109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 나주시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	총사업비	집 행 액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축사업	20,360		7,300	8,887	4,173	2022	2018	20
광주전남공동혁신도시 오픈랩조성사업	20,005		4,001	4,001	12,003	2022	2018	30
SW융합클러스터 구축사업	39,210	15,240	7,870	8,050	8,050	2020	2016	70
송월동 주민센터 신축	2,375		762	1,613	-	2019	2017	100
나주 국궁장 건립	2,800	600	91	2,109		2019	2018	85
영산강변저류지테마공원조성	9,500	-	259	3,675	5,566	2021	2017	-
경현동 인공폭포공원조성	3,900	-	73	2,595	1,232	2020	2017	-
마한문화축제	500	-	500	-	-	2018	2018	100
빛가람에너지 클러스터 투자선도지구	15,000	168	222	332	14,278	2023	2018	20
다시 농어촌도로 202호선 확포장공사	2,200	-	352	900	948	2022	2018	36
반남 농어촌도로 309호선 확포장공사	2,200	-	705	800	695	2022	2018	48
동강 농어촌도로 209호선 확포장공사	2,200	-	333	850	1,017	2022	2018	40
봉황 농어촌도로 204호선 확포장공사	3,200	-	130	900	2,170	2022	2018	5

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축사업

담당자

에너지신산업과 이승훈(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지밸리와 연계한 미래 에너지신산업 육성을 위하여 에너지산업 연구기반 및 기업지원 인프라 지속발굴

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.

○ 위  치 : 나주혁신산업단지 395-3장

○ 규  모 : 부지 7,960, 연면적 3,421㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  20,360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,360	-	7,300	8,887	4,173
국 비	10,000	-	4,000	3,539	2,461
시 도 비	3,430	-	1,300	1,558	572
시군구비	3,430	-	500	2,358	572
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,500	-	1,500	1,432	568
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 사업선정 및 협약체결                    : ‘18. 7.~8.

○ 나주혁신산업단지 부지 구매(주관기관)     : ‘18. 8.

○ 에너지밸리 전기설비시험연구원 건축착공  : ‘19. 6.

□ 향후계획

○ 에너지밸리 전기설비시험연구원 건축 준공 : ‘20. 3.

○ 시험설비 5종 구축 및 3종계약            : ‘20. 3.

사업명

광주전남공동혁신도시 오픈랩 조성사업

담당자

에너지신산업과 홍정완(☎339-8362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광주‧전남 공동혁신도시 중심 에너지‧ICT 융합분야 산업생태계 조성

○ 광주‧전남 상생협력 모델 개발로 지역혁신성장 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 에너지밸리 기업개발원 내

○ 규 모 : 오픈랩공간(메이커스페이스) 구축, 기업지원, 중장기R&D 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,005백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,005	-	4,001	4,001	12,003
국 비	11,000	-	2,200	2,200	6,600
시 도 비	1,395	-	279	279	837
시군구비	1,395	-	279	279	837
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	6,215	-	1,243	1,243	3,729

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 광주‧전남 공동혁신도시 오픈랩 조성사업 공모선정       : ‘18. 3.

○ 사업계획서 확정 및 참여기관 협약체걸                  : ‘18. 4.

○ 메이커스페이스 공용 장비 구축 완료                    : ‘18. 12.

□ 향후계획

○ 2019년 2차년도 사업 추진                             : ‘19. 4. ~

- 오픈랩 회원사 50개 모집, R&D 지원장비 2식 구축, 에너지신산업 등 과제

발굴 8건, 창업교육(2회), 스타트업 멘토링(20회) 실시

사업명

소프트웨어(SW)융합클러스터 구축사업

담당자

에너지신산업과 홍정완(☎339-8362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산‧학‧연‧관 네트워킹을 통한 지역 SW융합산업 발전 이슈화

○ 광주‧전남 소프트웨어 융합클러스터 활성화

○ 지역형 SW중심사회 구현 및 다수 컨소시엄의 단일화된 의사결정체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 빛가람 혁신도시 일원

○ 규 모 : SW기업에 대한 R&BD지원, 기업성장 지원, 인력양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	39,210	15,240	7,870	8,050	8,050
국 비	9,500	3,500	2,000	2,000	2,000
시 도 비	10,190	4,020	2,010	2,080	2,080
시군구비	1,500	600	300	300	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	18,020	7,120	3,560	3,670	3,670

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 공모사업 선정(미래창조과학부)                   : ‘16. 5.

○ 1차년도 사업 ~ 3차년도 사업 추진               : ‘16. 8. ~ ’18. 12

□ 향후계획

○ 4차년도 사업추진 및 성과보고                   : ’19. 1. ~

○ 5차년도 사업추진 및 성과보고                   : ‘20. 1. ~

사업명

송월동 주민센터 신축 사업

담당자

회계과 김을희(☎339-8692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 이전건의와 협소하고 시설이 노후화된 현 주민센터 청사를 기 확보된  송월택지 부지로 신축·이전하여 주민불편을 해소하고 쾌적한 청사환경 조성

으로 양질의 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 나주시 송월동 1356번지

○ 규 모 : 부지면적 1,825㎡, 건축연면적 996.44㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,375	-	762	1,613	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,375	-	762	1,613	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 2. ~ 5. : 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 완료

○ 2018. 7. ~ 9. : 설계 및 행정절차 이행완료

○ 2018. 9. : 공사발주 및 착공

○ 2019. 4. : 준공

사업명

나주 국궁장 건립

담당자

체육진흥과 최민규(☎339-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안전한 장소에서 국궁을 즐기고 전통체육 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2019

○ 위 치 : 전라남도 나주시 송월동 1539번지 일원

○ 규 모 : 건축면적 411.68㎡(철근콘크리트 한옥구조)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,800	600	91	2,109
국 비	660		62	598
시 도 비
시군구비	2,141	600	29	1,512
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 토목공사, 기계설비, 폐기물처리 완료

○ 건축 마감공사, 전기공사, 통신공사 진행 중

□ 향후계획

○ 철저한 자재검수 및 공사감독을 통하여 부실시공 방지

사업명

영산강변 저류지 테마공원 조성

담당자

역사관광과 옥성관(☎339-8712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나주시 대표 수자원인 영산강을 활용한 관광자원확충

○ 방치된 영산강변 저류지 부지를 주민휴게공간으로 탈바꿈

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 나주시 영산동 765-1번지 일원

○ 규 모 : 영산강 저류지 테마공원조성 약 310,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,500	-	259	3,675	5,566
국 비	5,700	-	223	2,137	3,340
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,800	-	36	1,538	2,226
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 중)

○ 2018.  3.            : 기본 및 실시설계 용역착수

○ 2018.  8. ~ 현재.     : 기본계획 등 하천점용 협의 진행 중

□ 향후계획

○ 2019.  9. : 사업발주 및 착공

○ 2021. 12. : 사업준공

사업명

경현동 인공폭포공원 조성사업

담당자

역사관광과 옥성관(☎339-8712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금성산 및 한수제와 연계한 관광자원확충

○ 방치된 폐석산을 활용한 주민휴게공간으로 탈바꿈

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018 ~ 2020

○ 위  치 : 나주시 경현동 산8-33번지 일원

○ 규  모 : 인공폭포공원조성 약 6,900㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,900	-	73	2,595	1,232
국 비	2,340	-	29	1,571	740
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,560	-	44	1,024	492
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 중)

○ 2017.  11.     : 기본 및 실시설계 용역착수

○ 2019.   6.     : 기술자문심의완료

□ 향후계획

○ 2019.   9. : 사업발주 및 착공

○ 2020.  12. : 사업준공

사업명

제4회 나주마한문화축제

담당자

역사관광과 나영선(☎339-8722)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 지역 관광자원(국립나주박물관, 고분군 등)을 연계한 마한문화축제를 통해 영산강 유역의 독창적인 마한의 문화를 재조명하고 마한의 중심 지역으로서의 위상 정립

◦ 지역주민이 주체가 되는 축제로 원도심, 혁신도시 간 지역통합을 유도하고 지역 농특산물 판매 촉진 등 지역경제를 활성화하는 생산적인 축제로 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 11. ~

○ 위 치 : 국립나주박물관 일원

○ 규 모 : 마한문화축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	500	-	500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	500	-	500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 분야별 세부 실행계획 수립 및 추진	: 2018. 5. ~ 6.

○ 축제 홍보 활동 전개	: 2018. 7. ~ 10.

○ 제4회 마한문화축제 시달 회의 개최	: 2018. 7.

○ 축제 준비 및 추진상황 보고회	: 2018. 7. ~ 9.

○ 제3차 마한문화축제추진위원회 회의 개최	: 2018. 8.

○ 안전관리 계획 수립 및 심의 의뢰	: 2018. 9.

○ 제4회 나주마한문화축제 개최	: 2018. 10. 19. ~ 21.

사업명

빛가람에너지클러스터투자선도지구

담당자

도시과 노대광(☎339-8982)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신도시와 원도심간 지역 상생발전을 위한 지역 성장 거점 공간 마련

○ 나주 KTX역 앞 부족한 주차장 확보 및 교통체계 개편을 통한 호남 서남부  교통허브 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 나주시 송월동 산15-1번지 일원 / 나주역 일원

○ 규 모 : 투자선도지구 A= 753,223㎡

- 공원 55,000㎡, 주차장 252면, 광장 및 교통체계 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,000	168	222	332	14,278
국 비	10,000	-	-	200	9,800
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	168	222	132	4,478

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018.  7. 31. : 지역개발사업 투자선도지구 공모 사업 선정 / 국토부

○ 2018. 11.  1. : 전라남도 투자심사 완료 / 적정

○ 2018. 12. 17. : 투자선도지구 지정 용역 착수

□ 향후계획

○ 2019. 6. ~ 11. : 투자선도지구 지구지정 절차 추진

○ 2019. 12. : 투자선도지구 지정

○ 2020.  1. : 공사 착수 / 2023. 12. 완료 예정

사업명

다시 농어촌도로 202호선 확포장공사

담당자

건설과 박성용(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 통행 불편 해소 및 낙후된 지역의 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 다시면 동당리

○ 규 모 : 도로 확․포장 L=0.736km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,200		352	900	948
국 비
시 도 비
시군구비	2,200		352	900	948
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

○ 2018. 12. : 공사 착공

○ 2019.  7. : 구조물공 및 토공 추진 중

□ 향후계획

○ 구조물공 및 교량 공사 추진

사업명

반남 농어촌도로 309호선 확포장공사

담당자

건설과 박성용(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 통행 불편 해소 및 낙후된 지역의 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 반남면 흥덕리, 대안리

○ 규 모 : 도로 확․포장 L=1.487km, B=6.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,200		705	800	695
국 비
시 도 비	500		500
시군구비	1,700		205	800	695
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

○ 2018. 12. : 공사 착공

○ 2019.  7. : 구조물공 및 토공 추진 중

□ 향후계획

○ 구조물공 및 토공 추진

사업명

동강 농어촌도로 209호선 확포장공사

담당자

건설과 조현철(☎339-8893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 통행 불편 해소 및 낙후된 지역의 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 동강면 옥정리, 곡천리 일원

○ 규 모 : 도로 확․포장 L=1.20km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,200		333	850	1,017
국 비
시 도 비
시군구비	2,200		333	850	1,017
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018. 12. : 공사 착공

○ 2019.  7. : 구조물공 및 토공 추진 중

□ 향후계획

○ 구조물공 및 토공 추진

사업명

봉황 농어촌도로 204호선 확포장공사

담당자

건설과 조현철(☎339-8893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 통행 불편 해소 및 낙후된 지역의 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 봉황면 욱곡리 일원

○ 규 모 : 도로 확․포장 L=1.60km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,200		130	600	2,170
국 비
시 도 비
시군구비	3,200		130	900	2,170
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019.  5. : 토지보상 협의

□ 향후계획

○ 2019.  9. : 공사 발주

○ 2019. 10. : 공사 착공

10-2. 지방채 발행사업

우리 나주시에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
해 당 없 음

10-3. 민간투자사업

우리 나주시에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
BTL	나주시 하수관거 정비사업	남양 나주 씨엔지(주)	67,245	26,179	5,126	5,204	69,027	20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

나주시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

상하수도과

김경률 (☎339-7673)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 민간의 자본과 기술을 도입 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인  정비 및 운영관리를 통해 방류수역의 수질오염 방지와 하수처리장 처리  효율제고

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2009. 12. 14. ~ 2013. 1. 13.

❍ 위    치 : 나주시 중부 및 남부(동지역)

❍ 민간사업자 : 남양 나주씨엔지(주) 대표 윤호

▶〈컨소시엄 구성 : SPC사〉- 남양건설(주) 외 7개사

❍ 총사업비 : 67,245백만원

❍ 사업규모 : 하수관거 L=75.99km, 배수설비 3,462가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 계약조건 : 임대기간 80분기(2013. 1. 14. ~ 2033. 1. 13.)

❍ 총사업비 : 105,536백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	105,536	26,179	5,126	5,204	69,027
국 비	83,350	20,610	4,044	4,333	54,363
시 도 비
시군구비	22,186	5,569	1,082	871	14,664
기 타

□ 추진상황

❍ 임대 운영중

□ 향후계획

❍ 잔여 임대료 지급(매 분기말)

❍ 운영성과평과 결과에 따라 운영비 지급(매 분기말)