109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 나주시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년집행사업비	2020년	2021년 이후
에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립	26,100	-	1,353	4,617	20,130	2022	2019	5
광주전남 공동혁신도시 오픈랩 조성사업	18,042	279	158	224	558	2022	2018	36
SW융합클러스터 구축사업	39,085	900	3000	300	-	2020	2016	78
국가혁신클러스터조성사업	14,827	-	770	977	-	2020	2018	70
고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축사업	20,360	500	2,358	286	286	2022	2018	50
산업용 드론 기업육성을 위한 기반구축 및 실증시범사업	12,700	-	976	524	1,000	2022	2019	20
에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증사업	9,800	-	695	750	1,005	2022	2018	20
EV·ESS 사용후 배터리 리사이클링 산업화 추진	22,600	-	-	4,062	2,418	2024	2019	15
나주시 가공배전선로 지중화 사업	6,389	-	2,5000	1,141		2021	2019	30
영산강변저류지테마공원조성	9,500	258	167	3,509	5,566	2021	2017	-
경현동인공폭포공원조성	3,900	73	1,432	1,162,	1,232	2021	2017	-
대한민국 마한문화제	590	-	590	-	-	2019	2018	100
광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립	62,600	-	-	-	62,600	2023	2019	10%
도시 바람길숲 조성사업	20,000	-	443	10,557	9,000	2021	2019	30
나주시보건소 별동증축 사업	9,255	557	3,842	4,856	-	2020	2018	47.2

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

에너지-ICT 융복합지식산업센터건립

담당자

일자리경제과 안성섭(☎339-8301)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신산단에 공공부문 지식산업센터를 건립하여 강소벤처기업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2022

○ 위 치 : 나주시 왕곡면 덕산리 817-8장.-9장

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 14,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,100,000,000원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	26,100,000,000		1,353,000,000	4,617,000,000	20,130,000,000
국 비	16,000,000,000		1,000,000,000	1,500,000,000	13,500,000,000
시 도 비	4,000,000,000			400,000,000	3,600,000,000
시군구비	6,100,000,000		353,000,000	2,717,000,000	3,030,000,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2020.  1. : 부지매입 완료

□ 향후계획

○ 2020. 10. : 공사 발주

○ 2022.  3. : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

광주·전남 공동혁신도시 오픈랩 조성사업

담당자

에너지신산업과 나광민(☎8362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광주·전남 공동혁신도시 중심 에너지·ICT 융합분야 산업생태계 조성

- 광주·전남 (공공기관)혁신자원 연계를 통한 혁신도시 중심 개방형 혁신 유도 및 협력네트워크 구축으로 에너지·ICT 융복합 산업생태계 조성

○ 광주·전남 상생협력 모델 개발로 지역혁신성장 견인

- 광주·전남 상시 협의조정 및 현장 협력 체계 구축을 통한 혁신성장 견인 주체 필요

□ 사업개요

○ 기   간 : 2018. 4. ~ 2022. 12.(57개월)

○ 위   치 : 에너지밸리 기업개발원 내

○ 주요내용

공공기관 연계 네트워킹, 회원사 확보, 오픈랩 운영, 창업, 기업지원 및 중장기 선도 R&D 2개 과제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,042백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,042,373,000	4,036,375,000	2,304,768,000	3,674,480,000	8,026,750,000
국 비	10,040,000,000	2,200,000,000	1,240,000,000	2,200,000,000	4,400,000,000
시 도 비	1,218,075,000	279,000,000	157,500,000	223,575,000	558,000,000
시군구비	1,218,075,000	279,000,000	157,500,000	223,575,000	558,000,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,081,373,000	720,375,000	434,768,000	531,480,000	1,394,750,000
기 타	2,460,500,000	558,000,000	315,000,000	471,500,000	1,116,000,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  36%)

○ 「공동혁신도시 오픈랩조성사업」2차년도 협약            : ‘19. 04.

○ 광주전남 오픈랩 운영활성화를 위한 운영기관 업무협약   : ‘19. 09.

□ 향후계획

○ 2차년도 사업 성과 현장실사 및 년차평가                 : ‘20. 01

○ 신규 광주전남 오픈랩 사업계획서 제출	: ’20. 8월 말

○ 3차년도 OpenLAB 사업 2차 진도점검	: ‘20. 9월

○ IR 컨설팅 프로그램 운영	: ‘20. 10월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

소프트웨어(SW)융합클러스터 구축사업

담당자

에너지신산업과 나광민(☎8362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산‧학‧연‧관 네트워킹을 통한 지역 SW융합산업 발전 이슈화

○ 광주‧전남 소프트웨어 융합클러스터 활성화

○ 지역형 SW중심사회 구현 및 다수 컨소시엄의 단일화된 의사결정체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5. ~ 2020. 12.(56개월)

○ 위 치 : 빛가람 혁신도시 일원

○ 규 모 : SW기업에 대한 R&BD지원, 기업성장 지원, 인력양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 390.85억원(현금 318.75 현물 72.1)

※ 국비 93.75 전남도비 107.9 광주시비 90 나주시비 15 ㈜한전64.6 한전KDN㈜ 19.6

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	39,085,000,000	25,110,000,000	7,050,000,000	6,925,000,000	-
국 비	9,375,000,000	5,500,000,000	2,000,000,000	1,875,000,000	-
시 도 비	19,790,000,000	11,490,000,000	4,150,000,000	4,150,000,000	-
시군구비	1,500,000,000	900,000,000	300,000,000	300,000,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	8,420,000,000	7,220,000,000	600,000,000	600,000,000	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 공모사업 선정(미래창조과학부)                   : ‘16. 5.

○ 1차년도 사업 ~ 3차년도 사업 추진               : ‘16. 8. ~ ’18. 12

○ 4차년도 사업 추진                              : ‘19. 2. ~ 12.

□ 향후계획

○ 5차년도 사업계획 보고 및 승인	: ’20. 1.

○ R&D, Post-R&D, 창업, 인력양성, 네트워크 사업 공고 및 추진	: ‘20. 2. ~ 8.

○ 5차년도 사업 중간 성과 보고	: ‘20. 9.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

국가혁신클러스터조성사업

담당자

에너지신산업과 나광민(☎8362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 물적·인적 인프라가 갖추어진 기존의 구역‧지구‧단지 특구를 활용하여        새로운 경제적 산업적 상승효과 발생 촉진

○ 국가균형발전 및 지역경제 활성화에 이바지하는 성장거점 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : (1단계) 2018. ~ 2020.

(1.5단계) 2021. ~ 2022.(기재부 예산 심의 중)

○ 위 치 : 혁신도시, 혁신산단, 일반산단, 신도산단(3.3㎢)

○ 주요내용

(기업유치 및 네트워크) 혁신클러스터 내 혁신기관 네트워킹, 중핵기업 등 투자유치      (글로벌 연계) 해외 협력네트워크 구축, 해외진출 지원방안 모색 등

(기업지원) 품질경쟁력, 마케팅경쟁력 강화, 해외 바이어 발굴 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,800백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,827,417,000	1,802,323,000	6,300,934,000	6,724,160,000	-
국 비	8,490,072,000	1,213,643,000	6,621,429,000	3,655,000,000	-
시 도 비	1,921,521,000	169,000,000	776,021,000	976,500,000	-
시군구비	1,752,521,000	0	776,021,000	976,500,000	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	2,663,303,000	419,680,000	1,127,463,000	1,116,160,000	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 21년도 사업비는 국가혁신클러스터(비R&D) 1단계 평가 후 1.5단계 사업비 확정

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 국가혁신클러스터 2차년도 사업 추진           : ‘19. 4. ~ 12.

□ 향후계획

○ 국가혁신클러스터 2차년도 평가 및 3차년도 협약            : ‘20. 1.

○ 2020년 3차년도 사업 추진(네트워크,글로벌연계, 기업지원 등) : ‘20. 1. ~    ○ 2020년 3차년도 사업 성과보고서 제출 및 평가               : ‘20. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축사업

담당자

에너지신산업과 이권익(☎339-8374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지밸리와 연계한 미래 에너지신산업 육성을 위하여 에너지산업 연구

기반 및 기업지원 인프라 지속발굴

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 나주혁신산업단지 395-3장

○ 규 모 : 부지 7,960, 연면적 3,421㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  20,360 백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,360,000,000	7,300,000,000	8,887,000,000	1,956,000,000	2,217,000,000
국 비	10,000,000,000	4,000,000,000	3,539,000,000	1,100,000,000	1,361,000,000
시 도 비	3,430,000,000	1,300,000,000	1,558,000,000	286,000,000	286,000,000
시군구비	3,430,000,000	500,000,000	2,358,000,000	286,000,000	286,000,000
지 방 채
민간자본	3,500,000,000	1,500,000,000	1,432,000,000	284,000,000	284,000,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 사업선정 및 협약체결                           : ‘18. 7.~8.

○ 나주혁신산업단지 부지 구매(주관기관)            : ‘18. 8.

○ 한국전기설비시험연구원 건축착공                : ‘19. 6.

□ 향후계획

○ 한국전기설비시험연구원 건축공사 완료            : ‘20. 6.

○ 1차년도 장비 시험가동 및 2차년도 장비 도입     : ‘20. 6.~

○ 시험 절차 및 평가기법 개발                     : ‘20. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산업용 드론 기업 육성을 위한 기반구축 및 실증 시범 사업

담당자

에너지신산업과 이권익(☎339-8374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 드론산업 선순환 구조 확립 및 강소기업 육성을 통한 “신개념 비즈

니스 창출 및 일장리 창출 선도”

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 전남실감미디어산업지원센터 내

○ 규 모 : 전남실감미디어산업지원센터 3,4층(전남드론산업지원센터 구축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,700 백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,700,000,000		2,926,000,000	4,297,100,000	5,476,900,000
국 비	6,200,000,000		600,000,000	2,873,100,000	2,726,900,000
시 도 비	2,500,000,000		975,500,000	524,500,000	1,000,000,000
시군구비	2,500,000,000		975,500,000	524,500,000	1,000,000,000
지 방 채
민간자본	1,500,000,000		375,000,000	375,000,000	750,000,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 사업신청서 제출 및 수행기관 선정평가            : ‘19. 4.~5.

○ 사업수행 기관별 협약체결                        : ‘19. 7.

○ 1차년도 자체장비도입심의 및 중앙장비도입심의    : ‘19. 9.~11.

□ 향후계획

○ 전남드론산업지원센터구축 완료                   : ‘20. 5.

○ 인력약성, 정보구축 및 제공 등 기업지원           : ‘20. 6.~

○ 드론 기업지원 사업(현장실증, 시제품제작지원) 추진 : ‘20. 6. ~ 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증사업

담당자

에너지신산업과 이권익(☎339-8374)

□ 사업목적 및 필요성

○ DC 배전 개방형 플랫폼 구축 및 기술개발/실증 지원을 통한 DC 배전

및 전기전자기기 실증 지역 거점 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2022. 2.

○ 위 치 : 나주혁신산업단지 에너지밸리산학융합원 내

○ 규 모 : DC(PV․분전반) 인프라 구축, DC케이블개발 실증 표준화

DC 통합운영시스템 구축, 개발형 실증실험실 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,800 백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,800,000,000		2,780,000,000	3,000,000,000	4,020,000,000
국 비	4,900,000,000		1,390,000,000	1,500,000,000	2,010,000,000
시 도 비	2,450,000,000		695,000,000	750,000,000	1,005,000,000
시군구비	2,450,000,000		695,000,000	750,000,000	1,005,000,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 산업부 사업계획 제안 및 선정, 기재부 사업 승인 : ‘18. 7.

○ 사업 전담기관, 주관기관 선정 및 협약체결       : ‘19. 2.~4.

○ 공용실험장비실 구축                             : ‘19. 12.

□ 향후계획

○ DC배전인프라 구축 조달청 공고                  : ‘20. 5.

○ DC배전인프라 구축 공사 착공                   : ‘20. 8.~

○ 신재생에너지 발전원 설계 및 구축                : ‘20. 12.

○ 1차년도 이월장비 구축 및 2차년도 장비 도입       : ‘20. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

EV․ESS 사용 후 배터리 리사이클링 산업화 추진

담당자

에너지신산업과 이창원(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ EV․ESS 사용 후 배터리의 재사용, 재제조를 위한 시험평가센터 구축을

통해 배터리 자원의 선순환 및 산업화 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 11.(5년)

○ 위 치 : 나주혁신산업단지 391-1장

○ 규 모 : 연간 EV 1,000대, 1MWh급 재사용 배터리 성능평가 및 안전시험

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  22,600 백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	22,600,000,000		2,800,000,000	8,620,000,000	11,180,000,000
국 비	9,300,000,000		2,000,000,000	1,900,000,000	5,400,000,000
시 도 비	4,320,000,000		800,000,000	1,908,000,000	1,612,000,000
시군구비	6,480,000,000			4,062,000,000	2,418,000,000
지 방 채
민간자본	2,500,000,000			750,000,000	1,750,000,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15%)

○ 산업부 공모사업 선정                  : ‘19. 10.

○ 사업추진 MOU(업무협약) 체결                 : ‘19. 11.

□ 향후계획

○ 공유재산심의 및 사업부지 매매(대지면적:8,602㎡) : ‘20.  1.

○ 건축설계 제안공모 및 용역사 선정 설계 추진     : ‘20.  4.

○ 1차년도 연차평가(한국에너지기술평가원)          : ‘20.  6.

○ 리사이클링 센터 착공                           : ‘20. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주시 가공배전선로 지중화사업

담당자

에너지신산업과 이창원(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라도 정명 천년을 맞이하여 읍성 4대문 복원과 도시재생사업 연계 난립한
가공선로 지중정비로 경관개선 및 안전한 보행 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.

○ 위 치 : 2개 구역 2.95km(성북동 1.81km, 이창동 1.14km)

○ 규 모 : 배전‧통신선로 지중매설, 지상기기 설치, 한전주 철거 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,389,676,640원(시 3,641,411,080, 한전‧통신사 2,748,265,560)

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,389,676,640		5,248,265,560	1,141,411,080	준공 후 정산
국 비
시 도 비
시군구비	3,641,411,080		2,500,000,000	1,141,411,080	준공 후 정산
지 방 채
민간자본	2,748,265,560		2,748,265,560	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   30%)

○ 2구역 2.95km(성북동, 이창동) 사업 승인   : ‘19.  1.

○ 업무협약 체결(나주시⇔한국전력공사)      : ‘19.  4.

○ 실무회의(추진상황 보고)                  : ‘19.  6.

○ 사업비 시부담분 분할납부                : ‘19. 11.

□ 향후계획

○ 성북동 실시설계용역 완료                 : ‘20.  2.

○ 이창동 실시설계용역 완료(한전)           : ‘20.  6.

○ 성북동, 이창동 주민설명회 및 착공        : ‘20.  8월 이후 순차적 시행

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영산강변 저류지 테마공원 조성

담당자

역사관광과 오종민(☎339-8712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나주시 대표 수자원인 영산강을 활용한 관광자원확충

○ 방치된 영산강변 저류지 부지를 주민휴게공간으로 탈바꿈

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 나주시 영산동 766-1번지 일원

○ 규 모 : 영산강 저류지 테마공원조성 약 310,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,666,715,000	258,245,000	166,715,000	3,675,755,000	5,566,000,000
국 비	5,700,000,000	222,695,000	166,715,000	1,970,590,000	3,340,000,000
시 도 비
시군구비	3,800,000,000	35,550,000	0	1,538,450,000	2,226,000,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2018.  3.   : 기본 및 실시설계 용역착수

○ 2019. 10.   : 환경청(소규모환경영향평가) 협의 완료

○ 2019. 12.   : 사업 발주(총괄 및 1차분)

○ 2020.  1.   : 사업 중지(관계기관 협의 지연)

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 사업 준공(1차분)

○ 2021. 12. : 사업 준공(총괄)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

경현동 인공폭포공원 조성사업

담당자

역사관광과 오종민(☎339-8712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금성산 및 한수제와 연계한 관광자원확충

○ 방치된 폐석산을 활용한 주민휴게공간으로 탈바꿈

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018 ~ 2021

○ 위  치 : 나주시 경현동 산8-33번지 일원

○ 규  모 : 인공폭포공원조성 약 6,900㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,900,000,000	73,354,540	1,432,497,700	1,162,147,760	1,232,000,000
국 비	2,340,000,000	29,183,540	859,107,160	711,709,300	740,000,000
시 도 비
시군구비	1,560,000,000	44,171,000	573,390,540	450,438,460	492,000,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2017.  10.     : ‘18년 관광자원개발사업(균특) 확정

○ 2017.  11.     : 기본 및 실시설계 용역착수

○ 2019.  12.     : 공사 착공(총괄 및 1차분)

○ 2019.  12.     : 공사 중지(도유지 매입 협의)

□ 향후계획

○ 2020.  12. : 공사 준공(1차분)

○ 2021.  12. : 공사 준공(총괄)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제5회 대한민국 마한문화제

담당자

역사관광과 장범준(☎339-8722)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 지역 관광자원(국립나주박물관, 고분군 등)을 연계한 축제를 통해 영산강 유역의 독창적인 마한의 문화를 재조명하고 마한의 중심 지역으로서의 위상 정립

◦ 지역주민이 주체가 되는 축제로 원도심, 혁신도시 간 지역통합을 유도하고 지역 농특산물 판매 촉진 등 지역경제를 활성화하는 생산적인 축제로 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. 11. ~ 10. 13 / 3일간

○ 위 치 : 국립나주박물관 일원

○ 규 모 : 대한민국 마한문화제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 590백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	590,000,000	-	590,000,000	590,000,000	800,000,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	10,000,000	-	10,000,000	-	-
시군구비	580,000,000	-	580,000,000	590,000,000	800,000,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 분야별 세부 실행계획 수립 및 추진	: 2019. 5. ~ 6.

○ 축제 홍보 활동 전개	: 2019. 7. ~ 10.

○ 제5회 대한민국 마한문화제 시달 회의 개최      : 2019. 7.

○ 축제 준비 및 추진상황 보고회	: 2019. 7. ~ 9.

○ 안전관리 계획 수립 및 심의 의뢰	: 2019. 9.

○ 제5회 대한민국 마한문화제 개최	: 2019. 10. 11. ~ 13.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립

담당자

체육진흥과오시나(☎339-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광주전남공동혁신도시의 정주여건 개선과 혁신도시 시즌2를 이끌어갈        혁신도시발전재단의 사무공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 199

○ 규 모 : 지하2층 지상6층 연면적 20,116.8㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 62,600,000,000원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	62,600,000,000	-	-	-	62,600,000,000
국 비	19,000,000,000	-	-	-	19,000,000,000
시 도 비	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000
시군구비	33,600,000,000	-	-	-	33,600,000,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2019.  7.   : 타당성 조사 완료

○ 2019. 11.   : 재정투자심사 완료

○ 2020.  8.   : 건축기획용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 9.  : 설계공모 공고

○ 2020. 12. : 당선작 선정

○ 2021. 9. : 착공

○ 2023. 8. : 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시바람길숲 조성사업

담당자

산림공원과 조정현(☎061-339-7233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지, 악취 등의 대기오염을 개선하여 생활권 주변 숲의로서의

생태적 기능을 회복하여 녹색도시 건설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 빛가람동 일원

○ 규 모 : 80ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  20,000,000,000원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,000,000,000		442,600,000	10,557,400,000	9,000,000,000
국 비	10,000,000,000		221,300,000	5,278,700,000	4,500,000,000
시 도 비
시군구비	10,000,000,000		221,300,000	5,278,700,000	4,500,000,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 바람길숲 조성사업 공모사업 선정     : 2018. 11. 05.

○ 용역입찰공고, 제안서평가, 계약서체결 : 2019. 08. ∼ 11.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진          : 2019. 12. 03. ∼ 현재

□ 향후계획

○ 2020. 8. ~ 2020. 9.  : 계약심사 등 행정절차 추진

○ 2020. 9. ~ 2021. 12. : 공사추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 – 183억원 / 변경 – 200억원

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(변동없음)

○ 사업면적 : 80ha(변동없음)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주시보건소 별동증축 사업

담당자

보건위생과 강원준(☎339-2112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 소통 공간 및 치유적 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 전라남도 나주시 이창동 738번지 외 1필지

○ 규 모 : 2,962㎡ (지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,254,759,000원                                   (단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,254,759,000	556,392,000	3,841,903,000	4,856,464,000	-
국 비	2,523,253,000	-	1,766,277,000	756,976,000	-
시 도 비	630,813,000	-	441,569,000	189,244,000	-
시군구비	6,100,693,000	556,392,000	1,634,057,000	3,910,244,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47.2%)

○ 2019.  9. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2019. 11. : 전라남도 계약심사 완료

○ 2019. 12. : 입찰 완료 및 낙찰자 선정

○ 2019. 12. : 공사발주 및 공사착공

○ 2020.  5. : 터파기 및 기초 콘크리트 타설 등

○ 2020.  6. : 지방재정투자 변경심사 완료

□ 향후계획

○ 사업계획에 따라 연내에 준공 목표

□ 사업변경 내역

사업명	나주시보건소 증축
위 치	나주시 이창동 738번지 외 1필지
구 분	변경 전	변경 후	증·감	비 고
대지규모	1,148㎡	3,435㎡	2,287㎡	주차장 부지
건축규모	2,666㎡	2,962.60㎡	296.6㎡
사 업 비	63억원	92억원	29억원	단가 조정