11

특수공시

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	총사업비	비 고
계	12건	139,467
장애인 연합회관 건립	지상 3층 1동, 연면적 1,943㎡	5,516
죽산보 오토캠핑장 조성 사업	오토캠핑장 12,329㎡(캠핑장 41면)	2,000
영산강변 저류지 테마공원 조성 사업	다목적광장, 야외물놀이장, 산책로 등	9,500
경현동 인공폭포공원 조성 사업	폭포공원 약 6,900㎡	3,900
오계 자연재해개선지구 정비 사업	배수펌프장 설치 Q=930㎥/min, 유수지 V=10,000㎥ 등	19,100
삼도 자연재해개선지구 정비 사업	배수펌프장 증설 Q=550㎥/min, 소하천정비 L=860m 등	17,300
남평1 자연재해개선지구 정비 사업	배수펌프장 증설 Q=1,200㎥/min, 유수지 V=35,000㎥증설, 우수관로 개량 등	9,914
나주천 풍수해 생활권 종합정비 사업	배수펌프장 증설 Q=1,200㎥/min, 유수지 V=35,000㎥	31,000
덕례 자연재해개선지구 정비 사업	유수지 증설 V=21,600㎥, 우회관로 신설 L=189m(2.0×1.8)	3,474
학산 자연재해개선지구 정비 사업	배수펌프장 증설 Q=240㎥/min, 유수지 V=18,000㎥	9,870
나주 화물자동차 공영차고지 조성 사업	A=49,083㎡, 341면	18,639
나주시 보건소 별동증축 사업	보건소 별동중축 1식	9,254

1		장애인연합회관 건립

* 담당자 : 사회복지과장(김남형), 장애인복지팀장(정기심, 339-8491)

	사업목적
❍ 장애인들의 자립기반 조성과 복지향상 및 사회활동 참여 증진 ❍ 장애인 관련 단체를 연합할 미래 지향적인 문화 공간 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 송월동 703-3 외 3필지

❍ 사업규모 : 지상 3층 1동, 연면적 1,943㎡

❍ 사업기간 : 2019. 4. 19. ~ 2020. 7. 3.(15개월)

❍ 사 업 비 : 5,516백만원(시비 5,434)

❍ 주요내용 : 장애인연합회관 건립

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
5,516		194	5,322

□ 추진상황

❍ 2016. 11. : 장애인연합회관 부지매입 계획 수립

❍ 2017.  1. : 장애인연합회관 부지매입

❍ 2019.  3. : 장애인연합회관 공사 발주

❍ 2019.  4. : 장애인연합회관 공사 착공

❍ 2020.  7. : 장애인연합회관 준공 완료

□ 기대효과

❍ 장애인들의 자립기반 조성과 복지향상 및 사회활동 참여 증진

❍ 산재되어 있는 장애인 관련단체를 연합 할 구심적 역할 기여

□ 관련사진(위치도 등)

위 치 도

장애인 연합회관 조감도

2		죽산보 오토캠핑장조성사업

* 담당자 : 역사관광과장(김인자), 관광개발팀장(최준석), 담당자(오종민, 339-8712)

	사업목적
❍ 영산강변 죽산보 공원을 활용한 관광자원 확충 ❍ 인근 관광자원 연계를 통한 관광 시너지효과 극대화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 다시면 죽산리 123-1번지 일원

❍ 사업규모 : 오토캠핑장 조성 12,329㎡(캠핑장 41면)

❍ 사업기간 : 2017. 6. ~ 2019. 6.

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,200,  시비 800)

❍ 주요내용 : 캠핑장 부지조성 1식, 기반시설 1식, 조경식재 등

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘19년	‘20년	‘21년 이후
2,000	1,867	133	-	-

□ 추진상황

❍ 2015.  1. : 죽산보 오토캠핑장조성사업 계획 수립

❍ 2015. 12. : 국비예산 확보

❍ 2017.  3. : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2017.  6. : 공사발주 및 착공(캠핑장)

❍ 2019.  6. : 공사준공(캠핑장)

❍ 2020.  3. : 추가공사(광역상수도 인입) 준공

❍ 2020.  8. : 위탁 운영사 선정

□ 기대효과

❍ 죽산보 공원을 활용한 체험 및 체류형 관광자원 확보

❍ 인근 영상테마파크, 황포돛배, 항공레저이착륙장 등 연계시너지 효과

□ 관련사진(위치도 등)

사업위치도

준공사진

3		영산강변 저류지 테마공원조성 사업

* 담당자 : 역사관광과장(김인자), 관광개발팀장(최준석), 담당자(오종민, 339-8712)

	사업목적
❍ 영산강변 저류지를 활용한 관광자원 확충 ❍ 방치된 강변 저류지를 주민휴게공간으로 탈바꿈

□ 사업개요

❍ 위    치 : 영산동 766-1번지 일원

❍ 사업규모 : 저류지테마공원조성 약 310,000㎡

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.

❍ 사 업 비 : 9,500백만원(국비 5,700,  시비 3,800)

❍ 주요내용 : 다목적광장, 야외물놀이장, 산책로, 꽃단지 등

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘19년	‘20년	‘21년 이후
9,500	960	2,334	-	6,206

□ 추진상황

❍ 2015.  10.  : 강변저류지활용 기본계획 수립

❍ 2017.   2.  : 지방재정투자심사 완료

❍ 2017.  10.  : 국비예산 확보

❍ 2018.   3.  : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2019.  10.  : 환경청(소규모환경영향평가) 완료

❍ 2019.  12.  : 사업 발주(총괄 및 1차분)

❍ 2020.   1.  : 사업 중지(관계기관 협의 지연)

□ 기대효과

❍ 영산강수변 및 저류지를 활용한 관광자원확충

❍ 방치된 저류지를 활용하여 주민휴게공간 제공 및 관광상품화

□ 관련사진(위치도 등)

사업위치도 및 항공사진

조감도

4		경현동 인공폭포공원조성사업

* 담당자 : 역사관광과장(김인자), 관광개발팀장(최준석), 담당자(오종민, 339-8712)

	사업목적
❍ 금성산 및 한수제 일원 관광자원 확충 ❍ 방치된 폐석산을 활용한 주민휴게공간 및 관광상품화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 경현동 산8-33번지 일원

❍ 사업규모 : 인공폭포공원조성 약 6,900㎡

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 비 : 3,900백만원(국비 2,340,  시비 1,560)

❍ 주요내용 : 인공폭포, 휴게광장, 생태주차장 등

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘19년	‘20년	‘21년 이후
3,900	334	2,334	-	1,232

□ 추진상황

❍ 2017.   7.  : 지방재정투자심사 완료

❍ 2017.  10.  : 국비예산 확보

❍ 2017.  11.  : 기본 및 실시설계 용역착수

❍ 2019.  11.  : 공사 발주(총괄 및 1차분)

❍ 2019.  12.  : 공사 중지(도유지 매입 협의)

□ 기대효과

❍ 방치된 폐석산을 활용하여 주민휴게공간 및 체류형 관광지 제공

❍ 기 조성된 한수제 산책길, 금성산 및 금성산 물놀이시설 등과 연계 등으로 지역경제 활성화 기여

□ 관련사진(위치도 등)

사업위치도 및 항공사진

조감도

5		오계 자연재해위험개선지구 정비사업

* 담당자 : 안전재난과장(우홍민), 자연재난팀장(박광열), 담당자(김준호, 339-7282)

	사업목적
❍ 지석천 수위상승 시 내수배제 불량에 따른 저지대 침수피해 예방을 위해 항구적인 방재시설 설치로 주민의 생명과 재산보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 남평읍 오계리, 우산리 일원  *오계리 114-26

❍ 사업규모 : 배수펌프장 및 유수지 신설 등

❍ 사업기간 : 2017. 12. 5. ~ 2020. 6. 30.

❍ 사 업 비 : 19,100백만원(국비 9,550, 시비 9,550)

❍ 주요내용 : 펌프장(Q=930㎥/분) 및 유수지(V=10,000㎥)신설, 교량 7EA

차산 소하천 L=1.15km(양안) 정비 등

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
19,100	9,770	3,400	5,230	700

□ 추진상황

❍ 2006.  3. 20. : 재해위험지구 지정 / "가" 등급(면적 592,483㎡)

❍ 2015.  5.  8. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘16.3.7. 완료)

❍ 2017. 12.  5. : 총괄 및 1차분 공사 착공 [‘18.12.5. (1차분 준공)]

❍ 2018. 12. 11. : 2차분 공사 착공 [‘19.8.7. (2차분 준공)]

❍ 2019.  5. 31. : 3차분 공사 착공 [‘19.12.4. 3차분 준공)]

❍ 2019. 12. 31. : 4차분 공사 착공 [‘20.5.15. 4차분 준공)]

❍ 2020.  2. 17. : 5차분 공사 착공 [‘20.6.30. 총괄 및 5차분 준공)]

□ 기대효과

❍ 우산(오계)리 일원 저지대 주택 및 농경지 33ha 침수피해 예방

□ 관련사진(위치도 등)

오계 자연재해위험개선지구 정비사업 계획평면도

오계 자연재해위험개선지구 정비사업 현장사진

6		삼도 자연재해위험개선지구 정비사업

* 담당자 : 안전재난과장(우홍민), 자연재난팀장(박광열), 담당자(김준호, 339-7282)

	사업목적
❍ 영산강 수위상승 시 내수배제 불량에 따른 저지대 침수피해 예방을 위해 항구적인 방재시설 설치로 주민의 생명과 재산보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 삼도동, 토계동 일원 * 토계동 671-22

❍ 사업규모 : 배수펌프장 증설 및 소하천 정비 등

❍ 사업기간 : 2019. 1. 14. ~ 2021. 1. 12.

❍ 사 업 비 : 17,300백만원(국비 8,650, 시비 8,650)

❍ 주요내용 : 펌프장 증설(Q=550㎥/분), 제신천 정비 L=0.86km, 교량 4EA 수로박스 L=61m, 삼도연못 정비 등

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
17,300	3,005	1,707	3,100	9,488

□ 추진상황

❍ 2010. 6.  1. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 680,000㎡)

❍ 2016. 5. 24. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18.12.11. 완료)

❍ 2019. 1. 14. : 1차분 공사 착공 (‘19.12.9. 준공)

❍ 2020. 2. 17. : 2차분 공사 착공 (‘20.10.13. 준공 예정)

□ 기대효과

❍ 삼도(토계)동 일원 저지대 침수로 인한 302세대 주민 보호 및 농경지 68ha 침수피해 예방

□ 관련사진(위치도 등)

삼도 자연재해위험개선지구 정비사업 위치도

삼도 자연재해위험개선지구 정비사업 현장사진

7		남평1 자연재해위험개선지구 정비사업

* 담당자 : 안전재난과장(우홍민), 자연재난팀장(박광열), 담당자(김준호, 339-7282)

	사업목적
❍ 지석천 수위상승 시 내수배제 불량에 따른 저지대 침수피해 예방을 위해 항구적인 방재시설 설치로 주민의 생명과 재산보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 남평읍 서산리 일원 *서산리 2-4

❍ 사업규모 : 배수펌프장 및 유수지 신설 등

❍ 사업기간 : 2019. 6. 26. ~ 2021. 6. 24.

❍ 사 업 비 : 9,914백만원(국비 4,957, 시비 4,957)

❍ 주요내용 : 배수펌프장(Q=50㎥/분) 및 유수지(V=360㎥)신설, 교량 4EA

소하천 정비 L=550m, 배수로정비 L=680m

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
9,914	720	1,202	2,000	5,992

□ 추진상황

❍ 2015. 6. 19. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 164,700㎡)

❍ 2017. 4. 25. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18.12.21. 완료)

❍ 2019. 6. 26. : 1차분 공사 착공(‘20.5.15. 준공)

❍ 2020. 2. 17. : 2차분 공사 착공 (‘20.10.13. 준공 예정)

□ 기대효과

❍ 남평읍 서산리 일원 저지대 침수로 인한 농경지 2.1ha 침수피해 예방

□ 관련사진(위치도 등)

남평1 자연재해위험개선지구 정비사업 위치도

남평1 자연재해위험개선지구 정비사업 계획평면도

8		나주천 풍수해생활권 종합정비사업

* 담당자 : 안전재난과장(우홍민), 자연재난팀장(박광열), 담당자(김준호, 339-7282)

	사업목적
❍ 영산강 수위상승 시 내수배제 불량에 따른 저지대 침수피해 예방을 위해 항구적인 방재시설 설치로 주민의 생명과 재산보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 삼도동 1407-11번지 일원(청동 배수펌프장 및 나주천)

❍ 사업규모 : 배수펌프장 및 유수지 증설, 나주천 교량 재가설 등

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 31,000백만원(국비 15,500, 시비 15,500)

❍ 주요내용 : 배수펌프장(Q=1,200㎥/분) 및 유수지(V=35,000㎥) 증설

나주천 교량 11개소, 우수관로 개량(L=1.28km)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
31,000	-	-	618	30,382

□ 추진상황

❍ 2018.  7. 20. : 재해위험지역 정비사업 공모사업 선정

❍ 2018. 12. 28. : 재해(침수)위험지구 지정 / “나”등급(면적 384,967㎡)

❍ 2019.  7. 26. : 사업수행능력평가(PQ) 실시

❍ 2019.  8. 28. : 1차분 용역 착수(‘20.4.27. 완료)

❍ 2020.  3. 16. : 2차분 용역 착수(‘21.2.17. 완료예정)

□ 추진계획

❍ 2020. 10. : 행정안전부 사전설계 검토 등 행정절차 이행

❍ 2020. 12. : 공사 발주

□ 관련사진(위치도 등)

나주천 풍수해생활권 종합정비사업 배수펌프장 계획평면도

나주천 풍수해생활권 종합정비사업 교량 계획평면도

9		덕례 자연재해위험개선지구 정비사업

* 담당자 : 안전재난과장(우홍민), 자연재난팀장(박광열), 담당자(문  경, 339-7283)

	사업목적
❍ 지석천 수위상승 시 내수배제 불량에 따른 저지대 침수피해 예방을 위해 항구적인 방재시설 설치로 주민의 생명과 재산보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산포면 덕례리 873-3번지 일원

❍ 사업규모 : 유수지 증설 및 방류관로 신설 등

❍ 사업기간 : 2019. 8. 12. ~ 2021. 8. 10.

❍ 사 업 비 : 3,474백만원(국비 1,737, 시비 1,737)

❍ 주요내용 : 유수지 증설(V=8,090㎥), 방류관로 신설 L=56m

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
3,474	-	1,482	798.5	1,193.5

□ 추진상황

❍ 2015. 6. 19. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 187,600㎡)

❍ 2017. 6. 13. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18. 3. 30. 중지)

❍ 2019. 8. 12. : 총괄 및 1차분 공사착공(1차분‘20. 8. 10. 준공예정)

❍ 2020. 5. 22. : 통합건설사업관리용역 착수

□ 기대효과

❍ 산포면 덕례리 일원 저지대 침수로 인한 농경지 11.3ha 침수피해 예방

□ 관련사진(위치도 등)

덕례 자연재해위험개선지구 정비사업 위치도

덕례 자연재해위험개선지구 정비사업 계획평면도

10		학산 자연재해위험개선지구 정비사업

* 담당자 : 안전재난과장(우홍민), 자연재난팀장(박광열), 담당자(문  경, 339-7283)

	사업목적
❍ 영산강 및 장성천 수위상승 시 내수배제 불량에 따른 저지대 침수피해 예방을 위해 항구적인 방재시설 설치로 주민의 생명과 재산보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 노안면 학산리 882-1, 856-8번지 일원

❍ 사업규모 : 배수펌프장 및 유수지 신설 등

❍ 사업기간 : 2020. 1. 10. ~ 2022. 1. 8.

❍ 사 업 비 : 9,870백만원(국비 4,935, 시비 4,935)

❍ 주요내용 : 배수펌프장 2개소 신설(Q=280㎥/분), 유수지 2개소 신설(V=11,100㎥)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
9,870	-	400	1,713	7,757

□ 추진상황

❍ 2015. 6. 19. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 199,700㎡)

❍ 2018. 3. 28. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18. 9. 6. 중지)

❍ 2020. 1. 10. : 총괄 및 1차분 공사착공(1차분‘21. 1. 8. 준공예정)

❍ 2020. 5. 22. : 통합건설사업관리용역 착수

❍ 2020. 7.  7. : 2차분 공사착공(‘21. 5. 2. 준공예정)

□ 기대효과

❍ 노안면 학산리 일원 저지대 침수로 인한 농경지 22.3ha 침수피해 예방

□ 관련사진(위치도 등)

학산 자연재해위험개선지구 정비사업 위치도

학산 자연재해위험개선지구 정비사업 계획평면도

11		나주 화물자동차 공영차고지 조성사업

* 담당자 : 교통행정과장(서현승), 교통시설팀장(김윤명), 담당자(주성민, 335-4004)

	사업목적
❍ 빛가람 혁신도시, 혁신산단 조성 등 물류량 급증 대비 및 대형 화물자동차의 주차난 해소 ❍ 화물운수업 주요 거점지화로 화물공영차고지 이용률 극대화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 청동 5번지 일원

❍ 사업규모 : 화물차고지 조성 (A=49,083㎡)

건축연면적 2,751.1㎡(지하1층/지상2층), 주차구획 341면

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 6.

❍ 사 업 비 : 18,639,000,000원(국비 13,500,000,000, 시비 5,139,000,000)

❍ 주요내용 :

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
18,639	13,808	4,276	555	-

□ 추진상황

❍ 2011. 10. : 지방재정 투융자 심사(전남도)

❍ 2017.  9. : 문화재 정밀발굴조사 용역 완료

❍ 2017. 10. : 계약심사 완료(전남도 회계과)

❍ 2017. 12. : 공사 착공

❍ 2019.  6. : 전체공사 완료

□ 기대효과

❍ 화물차 불법 주·정차 해소를 통한 시민 보행불편 해소 및 교통사고 예방

❍ 화물운수업 주요 거점지화로 지역경제 활성화

□ 관련사진(위치도 등)

사업계획평면도

화물차고지 조성 완료 전경

12		나주시 보건소 별동증축 사업

* 담당자 : 보건위생과장(김은화), 보건행정팀장(송내옥), 담당자(강원준, 339-2112)

	사업목적
❍ 지역주민들의 소통 공간 및 치유적 환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 전라남도 나주시 이창동 738번지 외 1필지

❍ 사업규모 : 2,962㎡ (지하1층, 지상4층)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 비 : 9,254백만원(국비 2,523, 도비 630, 시비 6,101)

❍ 주요내용 :

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
9,254	-	556	3,842	4,856

□ 추진상황

❍ 2019.  9. : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2019. 11. : 전라남도 계약심사 완료

❍ 2019. 12. : 입찰 완료 및 낙찰자 선정

❍ 2019. 12. : 공사발주 및 공사착공

❍ 2020.  5. : 터파기 및 기초 콘크리트 타설 등

❍ 2020.  6. : 지방재정투자 변경심사 완료

□ 기대효과

❍ 복합건강증진센터를 설치하여 건강생활실천 향상

❍ 의료장비 보강으로 정기적 검사 및 재활 치료 등으로 의료수급권 확보

□ 관련사진(위치도 등)

위치도

조감도