		2018년 나주시 지방재정공시(결산)

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 나주시에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
서성벽 특별 관리구역 조성	3,800	-	624	3,176	2019	2016	30%
농업기술센터 6차 산업교육관 신축	2,500	500	1,500	500	2018	2016	90%
나주시 장애인 연합회관 건립	6,770	-	1,580	5,190	2019	2016	40%
군도24호선(용산~학산)확포장공사	3,800	100	2,003	1,697	2019	2016	35%
역전공원 및 주차장 조성사업	12,200	168	350	11,682	2019	2016	5%
송월동주민센터 신축공사	3,314	869	-	2,445	2019	2017	20%
나주시 일자리종합 지원센터 신축	6,800	-	250	6,550	2019	2017	30%
천하장사 씨름대축제	290	-	290	-	2017	2017	100%
비규격 노후하우스 내재해형 규격시설 교체사업	4,478	-	1,146	3,332	2019	2017	26%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서성벽 특별관리구역 조성사업

담당자

역사도시사업단 김을희(☎339-8614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화유적 발굴정비로 도시의 격(格) 제고

○ 역사문화환경 조성으로 지역민에게 아름다운 생활환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 :

○ 규 모

- 서성벽 2구간 복원정비(체성/ L=256m) / 서수구문 복원(L=30m)

- 서성벽 쉼터 조성(A=840㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원(국비 1,600, 시비 2,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	-	624	2,000	1,176
국 비	1,600	-	136	1,000	464
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,200	-	488	1,000	712
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017.  1. : 설계용역 계약심사 및 발주

○ 2017.  2. : 설계용역 착수

○ 2017.  5. ~  7. : 설계자문회의 실시(3회)

○ 2017. 11. : 문화재청 설계심사 자문회의

○ 2017. 12. : 문화재 현상변경 허가 완료

○ 2018.  2. : 문화재청 설계승인 완료

○ 2018.  4. : 나주읍성 서성벽(2구간) 정비 공사 발주

○ 2018.  6. : 서성벽 쉼터조성 설계용역 발주

□ 향후계획

○ 2018.  9. : 서성벽 쉼터조성 설계용역 완료

○ 2018. 10. : 서성벽 쉼터조성 공사 발주

○ 2019.  2. : 나주읍성 서성벽(2구간) 정비 공사 완료

○ 2019.  6. : 서성벽 쉼터조성 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 3,800백만원(국비 1,900, 시비 1,900)

- 변경 : 3,800백만원(국비 1,600, 시비 2,200)

사업명

농업기술센터 6차 산업교육관 신축

담당자

농촌진흥과 홍정현(☎339-7421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물 생산, 가공, 유통 및 경영능력을 배양하여 6차산업화할 수 있는

농업인 교육관 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 나주시 왕곡면 덕산리 542-51 일원

○ 규 모 : 교육관 신축 1동 (856㎡, 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500	500	1,500	500	-
국 비	1,250	250	750	250	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,250	250	750	250	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 6차산업 교육관 신축공사 설계용역 완료 : 2017. 5.

○ 6차산업 교육관 발주 및 착공 : 2017. 6.

○ 6차산업 교육관 신축공사 건축물 신축준공  : 2017. 12.

□ 향후계획

○ 6차산업 교육관 가공교육장비 구축 : 2018. 10.

○ 6차산업 교육관 신축사업 완료 : 2018. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

장애인연합회관 건립

담당자

사회복지과 손미정(☎339-8491)

□ 사업목적 및 필요성

○ 분산되어 있는 장애인관련 단체를 연합할 구심적 센터 구축

○ 장애인 자립기반 조성과 사회활동 참여를 촉진하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 1월 ~ 2019년 12월(3년)

○ 위 치 : 나주시 송월동 703-3외 3필지

○ 규 모 : 부지 8,860㎡, 건축연면적 1,917㎡, 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,770	-	1,580	2,050	3,140
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,770	-	1,580	2,050	3,140
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시설계용역, 공유재산심의 완료, 기술심의 완료

○ 복지기금 조례 폐지 및 기금 일반전입금 처리

○ 계약심사 의뢰 중

□ 향후계획

○ 연합회구성 및 연합회관 조례 제정

○ 위탁관련 준비

○ 추가예산 확보 필요(2019년 본예산)

□ 사업변경 내역

○ 외부 경사로 설치요구에 따른 사업비 증가

※ 당초 건축 연면적 증가 : 1,653㎡ ⇒ 1,917㎡ (45억⇒67억)

사업명

군도24호선(용산~학산)확포장공사

담당자

건설과 박광열(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나주IC∼노안농공단지 유통 도로망 개선 및 인근 주민 사고 위험예방

○ 「나주IC∼동신대간 지방도 확포장공사」 추진에 따른 대형 물류 수송차량 증가 및 주민 영농 불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 1월 ～  2019년 12월(3년)

○ 위 치 : 전남 나주시 노안면 학산리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=0.4km, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	100	2,003	352	1,345
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,800	100	2,003	352	1,345
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 공사추진 중

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 토지보상 완료

○ 2019.  3. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

역전공원 및 주차장 조성사업

담당자

도시과 임창호(☎339-8973)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광주·전남 공동혁신도시 이전이 완료됨에 따라 나주역을 이용하는 이용객이 지속적으로 증가하고 있으나, 주차장 부족으로 나주역 인근 도로에 불법 주정차를 하고 있는 실정임.

○ 주차장 확보와 교통광장 및 교통체계 개선을 통해 나주역 주변 보행자 안전사고 예방 및 원활한 교통흐름을 유도하고, 인근에 친환경 공원을 조성하여 시민들과 우리시를 찾는 방문객에게 휴게공간을 제공하고

우리시 이미지를 향상시키고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 전남 나주시 송월동 산15번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 55천㎡, 주차장 252면, 교통광장 및 교통체계 개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,200백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,200	-	168	350	11,682
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,200	--	168	350	11,682
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017.  6. : 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 착수

○ 2017. 11. : 교통체계 개선을 위한 전문가 자문회의

○ 2018.  3. : 공원조성계획 수립 전문가 자문회의

○ 2018.  4. : 암반지반조사 완료

○ 2018.  7. : 현장 발생암 처리 공고 추진 중(온비드)

□ 향후계획

○ 2018. 11. : 나주시 도시계획위원회 심의

○ 2018. 12. : 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 완료 / 계약심사 완료

○ 2019.  1. : 공사 착공

○ 2019. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

송월동 주민센터 신축(이전)공사

담당자

회계과 최우창(☎339-8692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 현주민센터를 신축 이전하여 주민편의 도모

○ 친환경적이고 쾌적한 청사 신축으로 양질의 행정서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ∼ 2019. 6.

○ 위 치 : 나주시 송월동 1356번지

○ 규 모 : 지상2층 연면적 1,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,314백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,314	869	-	1,200	1,245
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,314	869	-	1,200	1,245
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   20%)

○ 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2017. 2. ∼ 5.

○ 기본, 실시설계 및 행정절차 이행(경관심의, 기술자문, BF예비인증, 인허가, 계약심사 등) : 2018. 7.

□ 향후계획

○ 공사계약 및 발주 : 2018. 8.

○ 공사준공 및 입주 : 2019. 6.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간변경

- 당초 : 2017. ∼ 2018.

- 현재 : 2017. ∼ 2019.

사업명

나주시 일자리종합 지원센터 신축

담당자

일자리정책실 김대영(☎339-8313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 일자리지원센터는 공간이 협소하고 기능적인 활용도가 낮아 취업 상담 및                 알선에서 직업훈련까지 고용복지센터 등 일자리 민원을 원스톱으로 지원하기 위함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2019. 12.

○ 위    치 : 이창동 506-10 외 3필지

○ 사 업 량 : 부지 2,500㎡(지상 5층)

○ 사 업 비 : 6,781백만원(특별교부세 700, 도비 200, 시비 5,881)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,800	-	250	6,550	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,800	-	250	6,550	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 일자리종합지원센터 건립계획 수립                  : 2017. 3.

○ 공유재산관리계획 심의 및 시의회 승인             : 2017. 8.

○ 부지매입 계약 및 토지보상                        : 2018. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 시행                       : 2018. 4.

□ 향후계획

○ 조감도(안) 여론수렴, 브리핑 및 설계안 결정        : 2018.  7.

○ 공사 착공                                        : 2018.  9.

○ 공사 준공                                        : 2019.  6.

○ 전 · 업무 개시(유관기관 동시 입주)                : 2019.  12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

천하장사 씨름대축제

담당자

교육체육과 김태훈(☎339-4563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 숙박, 음식, 농특산품 판매 등 대회를 통한 지역경제 활성화(1,062백만원)

○ 전국 지상파 방송 등 홍보를 통한 나주시 브랜드가치 상승

○ 실업팀 창단 운영중으로 대회 개최 후 전지훈련 유치 등 스포츠마케팅 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. 20. ~ 11. 26.(7일간)

○ 위 치 : 나주종합스포츠파크(다목적체육관)

○ 규 모 : 5개 부문 1,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	290	-	290	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	290	-	290	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017 천하장사 씨름대축제 개최 완료

□ 향후계획

○ 전통 씨름 계승 발전 및 육성 검토

○ 스포츠마케팅 활성화를 위한 전국대회 및 전지훈련 유치

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

비규격·노후하우스 내재해형 규격시설 교체사업

담당자

식품유통과 이은정(☎339-7384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비규격·노후하우스를 내재해형 규격시설로 교체하여 대설, 강풍 등 기상재해로         인한 원예시설의 경제적 손실 등을 예방하여 안심하고 영농에 종사할 있는 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2019년(3개년)

○ 대 상 : 농림부 고시 제2004-19호(2007.4.10.)이전에 설치된 비규격·노후하우스

○ 사 업 량 : 23.8ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :4,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,478	-	1,146	1,666	1,666
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,449	-	449	500	500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,029	-	697	1,166	1,166
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 2017년 : 6.3ha 면적의 비규격·노후하우스를 내재해형 규격시설로 교체 완료

□ 향후계획

○ 2018년 : 8.77ha면적 사업추진 예정

○ 2019년 : 8.77ha면적 사업추진 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 26.5ha(17년 6.5ha, 18년 10ha, 19년 10ha)

5,050백만원 (시비 1,640, 민간자본 3,410)

○ 변경 : 24ha(17년 6.3ha, 18년 8.77ha, 19년 8.77ha)

4,478백만원 (시비 1,449, 민간자본 3,029)

우리 나주시에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

우리 나주시에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	나주시 하수관거 정비사업	남양 나주 씨엔지(주)	67,245	20,829	5,204	79,503	20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

나주시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

상하수도과

김경률 (☎339-7673)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 민간의 자본과 기술을 도입 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인       정비 및 운영관리를 통해 방류수역의 수질오염 방지와 하수처리장 처리       효율제고

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2009. 12. 14. ~ 2013. 1. 13.

❍ 위    치 : 나주시 중부 및 남부(동지역)

❍ 민간사업자 : 남양 나주씨엔지(주) 대표 윤호

▶〈컨소시엄 구성 : SPC사〉- 남양건설(주) 외 7개사

❍ 총사업비 : 67,245백만원

❍ 사업규모 : 하수관거 L=75.99km, 배수설비 3,462가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 계약조건 : 임대기간 80분기(2013. 1. 14. ~ 2033. 1. 13.)

❍ 총사업비 : 105,536백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	105,536	15,552	5,277	5,277	79,430
국 비	72,852	10,735	4,028	4,028	54,061
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	32,684	4,817	1,249	1,249	25,369
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

❍ 임대 운영중

□ 향후계획

❍ 잔여 임대료 지급(매 분기말)

❍ 운영성과평과 결과에 따라 운영비 지급(매 분기말)

□ 사업변경 내역

❍ 해당없음