		2017년 나주시 지방재정공시(결산)

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 나주시에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
나주시 장애인 연합회관 건립	4,500	-	4	4,496	2019	2016	30
군도24호선(용산~학산) 확포장 공사	4,800	-	100	4,700	2019	2016	5
역전공원 및 주차장 조성사업	8,600	-	-	8,600	2019	2016	5
서성벽 특별관리구역 조성	3,800	-	-	3,800	2018	2016	10
농업기술센터 6차 산업 교육관 신축	2,800	-	500	2,300	2018	2016	20
한센간이양로주택 기능보강(신축)	5,000	-	-	5,000	2018	2016	32

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주시 장애인 연합회관 건립

담당자

사회복지과 이동원(☎339-8493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인 자립기반 조성과 복지향상 및 사회활동 참여 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

○ 위 치 : 나주시 송월동 1095-6번지

○ 규 모 : 대지면적 801.2㎡, 층수 3층, 건축 연면적 1,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,500	-	4	1,257	3,239
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,500	-	4	1,257	3,239

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 장애인 연합회관 매입부지 감정평가 실시

○ 장애인 연합회관 건립부지 매입 완료

□ 향후계획

○ 나주시 장애인 연합회관 설치 및 운영조례 제정

○ 건축 설계용역 및 계약심사, 건축허가, 건축시공 등

○ 건축물 사용승인 및 등기, 연합회관 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군도24호선(용산~학산) 확포장 공사

담당자

건설과 문경(☎339-8893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도13호선과 노안농공단지를 연결하여 편리하고 안전한 도로건설 및 교통
체계 구축

○ 지방도822호선과 연결되는 군도24호선 도로 확포장공사 추진하여 지역
경제 발전은 물론 물류 유통망 개선으로 농촌지역 활성화

□ 사업개요

○ 기 간

- 1공구 : 2016. 8. ~ 2019. 8.

- 2공구 : 2016. 8. ~ 2018. 8.

○ 위 치 : 노안면 용산리, 학산리 일원

○ 규 모

- 1공구 : 도로 확포장 L=2.637km, B= 8.0m

- 2공구 : 도로 확포장 L= 0.32km, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비		43	43	1,257	3,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016. 8. : 실시설계 착수

○ 2017. 5. : 실시설계 완료, 2공구 보상 추진(보상율 60%)

□ 향후계획

○ 2017. 10. : 공사 착공 및 보상 추진(2공구)

○ 2018.  3. : 공사 착공 및 보상 추진(1공구)

사업명

역전공원 및 주차장 조성사업

담당자

도시과 임창호(☎339-8973)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나주역전의 미조성된 공원에 공원 및 주차장을 조성함으로써 환경개선에 따른 방문객의 쉼터 제공 및 주차난 해소로 우리시 이미지 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.  1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 나주시 송월동 산5-20번지 일원

○ 규 모 : 공원 및 주차장 조성(40,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,600	-	-	1,100	7,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,600	-	-	1,100	7,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017.  3. : 사업수행능력평가 추진

○ 2017.  6. : 업체 선정 및 용역 착수

□ 향후계획

○ 2017. 10. : 공사 원가심사(전라남도)

○ 2017. 11. : 공사 착공

○ 2019. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

사업규모		사 업 비		사업기간
당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
⦁공원 및 주차장 조성	⦁공원 및 주차장 조성 ⦁교통광장 및 교통체계 개선	8,600백만원	12,200백만원	‘17.1.~’19.12	‘17.1.~’19.12

사업명

서성벽 특별관리구역 조성사업

담당자

역사도시사업단 김을희(☎339-8614)

역사도시사업단 아태영(☎339-8613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화유적 발굴정비로 도시의 격(格) 제고

○ 역사문화환경 조성으로 지역민에게 아름다운 생활환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 :

○ 규 모

- 서성벽 2구간 복원정비(체성/ L=256m) / 서수구문 복원(L=30m)

- 서성벽 쉼터 조성(A=840㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비				1,400	200
시 도 비
시군구비				2,000	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2017.  1. : 설계용역 계약심사 및 발주

○ 2017.  2. : 설계용역 착수

○ 2017.  4. : 서수구문 하천점용 사전협의(안전총괄과)

○ 2017.  5. : 설계자문위원 구성 및 제1차 설계자문회의 개최

○ 2017.  6. : 제2차 설계자문회의 개최 및 서성벽 구조안전진단 실시

○ 2017.  7. : 제3차 설계자문회의 개최(설계방향 설정 완료)

□ 향후계획

○ 2017.  8. ~ 10. : 행정절차 진행(하천점용, 문화재 현상변경)

○ 2017. 11. : 설계완료 및 공사발주

○ 2017. 12. : 착공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 3,800백만원(국비 1,900, 시비 1,900)

- 변경 : 3,800백만원(국비 1,600, 시비 2,200)

사업명

나주시 6차산업교육관 신축

담당자

농촌진흥과 홍정현(☎339-7421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물 생산, 가공, 유통 및 경영능력을 배양하여 6차산업화할 수 있는

농업인 교육관 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 나주시 왕곡면 덕산리 542-51 일원

○ 규 모 : 교육관 신축 1동 (856㎡, 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,800		500	1,500	800
국 비	1,400		250	750	400
시 도 비
시군구비	1,400		250	750	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 6차산업 교육관 신축공사 설계용역 완료 : 2017. 5.

○ 6차산업 교육관 발주 및 착공 : 2017. 6.

□ 향후계획

○ 6차산업 교육관 신축공사(건축) 완료  : 2017. 11.

○ 6차산업 교육관 가공교육장비 구축 : 2018. 4.

○ 6차산업 교육관 신축 준공 : 2018. 4.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

한센 간이양로주택(호혜원) 기능보강

담당자

건축허가과 임은숙(☎339-7791)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신도시의 악취문제 해결 및 정주여건 개선을 위한 한센 정착촌 주민 생업인 가축사육 폐업(포기)에 따른 지원책 강구 필요

○ 폐업축사 및 주거시설 혼재로 감염병 등 질병위험 노출 무의탁 한센 어른신들의 생활환경 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018년

○ 위 치 : 나주시 산포면 새벽길 42-9(구 신도초교 폐교부지)

○ 규 모 : 1인가구 46㎡(29세대), 2인가구 56㎡(21세대), 주민복지시설, 공동창고

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	-	-	1,600	3,400
국 비	2,500	-	-	1,600	900
시 도 비	1,250	-	-	-	1,250
시군구비	1,250	-	-	-	1,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ 2017. 7. : 설계용역 완료

○ 2017. 7. : 나주시 경관위원회 심의회 개최

□ 향후계획

○ 2017. 9. : 나주시 건설자문위원회 심의

○ 2017. 10. : 건축공사 발주

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 나주시에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

우리 나주시에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL	나주시 하수관거정비 임대형 민자사업	남양 나주 씨엔지(주)	67,245	15,552	5,277	84,707	20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

나주시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

상하수도과

김경률 (☎339-7673)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 민간의 자본과 기술을 도입 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인       정비 및 운영관리를 통해 방류수역의 수질오염 방지와 하수처리장 처리       효율제고

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2009. 12. 14. ~ 2013. 1. 13.

❍ 위    치 : 나주시 중부 및 남부(동지역)

❍ 민간사업자 : 남양 나주씨엔지(주) 대표 윤호

▶〈컨소시엄 구성 : SPC사〉- 남양건설(주) 외 7개사

❍ 총사업비 : 67,245백만원

❍ 사업규모 : 하수관거 L=75.99km, 배수설비 3,462가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 계약조건 : 임대기간 80분기(2013. 1. 14. ~ 2033. 1. 13.)

❍ 총사업비 : 105,536백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	105,536	15,552	5,277	5,277	79,430
국 비	72,852	10,735	4,028	4,028	54,061
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	32,684	4,817	1,249	1,249	25,369
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

❍ 임대 운영중

□ 향후계획

❍ 잔여 임대료 지급(매 분기말)

❍ 운영성과평과 결과에 따라 운영비 지급(매 분기말)

□ 사업변경 내역

❍ 해당없음