제2절		특수공시

		2017년 나주시 지방재정공시(결산)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	총사업비	비 고
계	13건	164,538
수청 재해 위험지구 개선사업	1식	28,718
오계 재해 위험지구 개선사업	1식	19,100
북망문 및 동성벽 복원	1식	5,400
면단위 하수처리시설 설치공사(공산덕음)	1식	8,995
왕곡 구천 면단위 하수처리 설치공사	1식	12,800
봉황 구석 농어촌 마을 하수도 설치공사	1식	4,338
장성천 지구 농어촌 마을 하수도 공사	1식	14,895
한센 간이 양로 주택(호혜원) 기능보강	50세대	5,000
화물자동차 공영 차고지 조성	1식	15,000
친환경 농산물 종합 물류센터 건립(2차)	1식	27,816
로컬푸드 상설매장 건립	1식	3,500
나주혁신산업단지 폐수처리 시설 설치공사	1식	13,145
나주혁신산업단지 완충저류시설 설치공사	1식	5,831

1		수청 재해위험지구 개선사업

* 담당자 : 안전총괄과장(이재식), 자연재난팀장(김천모), 주무관(한 완), 전화번호 : 061-339-7282

	사업목적
❍ 지석천 홍수위보다 저지대에 위치한 가옥 및 농경지침수에 대한 항구적 예방대책을 수립하여 소중한 주민생명 및 재산 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 남평읍 수청리 일원

❍ 사업규모 : 배수펌프장 및 유수지 설치 등 1식

❍ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2017. 12. 31.

❍ 사 업 비 : 28,718백만원(국비 14,463 지방비 14,255)

❍ 주요내용

- 배수펌프장 및 유수지 설치 등 1식

․ 배수펌프설치 5대(740㎥/분), 유수지 V=12,000㎥

․ 고지배수로 : 5.0×3.0×2련 L=750m

․ 유입수로 : 2.0×2.0×1련 L=460m, 2.5×2.0×2련, L=700m

․ 토출BOX : 2.0×2.0×2련 L=81m

․ 부지매입 : 14,560㎡ 등

□ 추진상황

❍ 2004.   4. : 재해위험지구 지정 / "가"등급(면적 560,000㎡)

❍ 2012.   5. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2013.   2. : 소방방재청 사전설계검토

❍ 2013.   4. : 전라남도 지방건설기술심의

❍ 2013.   5. : 조달청 공사원가(토목․조경․건축․기계) 사전검토

❍ 2013.  11. : 개발제한구역 관리계획 변경(국토교통부)

❍ 2014.   9. : 공사 총괄 및 1차분 계약(조달청)

❍ 2017.   7. : 3차분 공사 추진 중

⇒ 배수펌프장 및 유수지, 고지배수로 및 유입수로 설치 중(공정율 67%)

□ 기대효과

❍ 저지대 가옥 및 농경지 침수에 대한 항구적인 예방대책 수립으로 주민생명과 재산 보호

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	28,718	5,904	11,755	-	11,059

□ 관련사진

나주시 남평읍 수원리 715-15번지 일원

나주시 남평읍 수원리 715-15번지 일원

2		오계 재해위험지구 개선사업

* 담당자 : 안전총괄과장(이재식), 자연재난팀장(김천모), 주무관(한 완), 전화번호 : 061-339-7282

	사업목적
❍ 지석천 홍수위보다 저지대에 위치한 가옥 및 농경지침수에 대한 항구적 예방대책을 수립하여 소중한 주민생명 및 재산 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 남평읍 우산리, 오계리 일원

❍ 사업규모 : 배수펌프장 및 유수지 설치, 유입수로 정비 등

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.

❍ 사 업 비 : 19,100백만원(국비 9,550  시비 9,550)

❍ 주요내용

- 배수펌프장 및 유수지 설치

․ 배수펌프장(Q= 930㎥/min) 및 유수지(V= 10,000㎥)

․ 토출박스(B3.0×H1.8×3련) L= 40m

․ 소하천정비 L=1,050.0m

․ 부지매입 : 54,150.0㎡(107필지) 등

□ 추진상황

❍ 2006.   3. : 재해위험지구 지정 / "가"등급(면적 680,000㎡)

❍ 2015.   5. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2015.   8. : 주민설명회 개최

❍ 2016.   6. : 국민안전처 사전설계검토

❍ 2016.  12. : 지방건설기술심의 및 계약심사 이행(전라남도)

❍ 2017.   2. : 오계 자연재해위험개선지구 실시계획 공고

❍ 2017.   7. : 토지 및 지장물 감정평가 완료 및 보상 추진 중

□ 기대효과

❍ 저지대 가옥 및 농경지 침수에 대한 항구적인 예방대책 수립으로 주민생명과 재산 보호

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	19,100	-	1,600	4,770	12,730

□ 관련사진

나주시 남평읍 오계리 114-26번지 일원

나주시 남평읍 오계리 114-26번지 일원

3		북망문 및 동성벽 복원

* 담당자 : 역사도시사업단(윤상식), 문화재관리팀장(김종순), 주무관(김을희), 전화번호 : 339-8614

	사업목적
❍ 문화유적 복원사업 발굴정비로 도시의 격(格) 제고 ❍ 문화재 복원을 통한 역사문화도시 추동력 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 산정동 1-1번지 일원 / 남내동 117번지 일원

❍ 사업규모

- 북망문 복원(육축 36㎡, 체성 71m, 옹성 42.6m, 문루 44.78㎡, 협문 2개소)

- 동수구문(L=40m, B=5m) 복원

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

❍ 사 업 비 : 5,400백만원(국비 3,780, 지방비 1,620)

□ 추진상황

<북망문 복원 사업>

❍ 2015.  1. : 나주읍성 북망문 복원 및 주변정비 공사(건축) 1차분 착공

❍ 2015.  5. ~ 2015. 10. : 2차 북문지 학술발굴조사

❍ 2015.  7. : 전기·소방·방범설비 공사 및 상주감리용역 발주

❍ 2015.  9. : 공사중지 해지 및 공사 추진

❍ 2016.  1. : 공사 중지(성문형식 미결정)

❍ 2016.  8. : 공사 중지 해지 및 북문형태와 관련 없는 부분 공사 추진

❍ 2016. 12. : 공사 중지(성문형식 미결정)

❍ 2017.  1. : 옹성 설계변경을 위한 기술지도회의 개최

북망문 성문형식 문헌자료(속수나주지) 발견

❍ 2017.  2. ~ 6. : 북망문 성문형식 결정 문화재 사적분과위원 상정

❍ 2017.  7. : 제3차 소위원회 및 제7차 문화재 사적분과위원회 개최

<동성벽 복원 사업>

❍ 2017.  3. : 복원계획 수립 및 설계용역 발주

❍ 2017.  4. : 학술발굴조사 용역 발주 및 설계용역 착수

❍ 2017.  5. : 설계자문위원 구성 및 동성벽 학술발굴(시굴)조사 용역 착수

❍ 2017.  6. : 동성벽 학술발굴(시굴)조사 용역 착수

❍ 2017.  7. : 동성벽 학술발굴(시굴)조사 용역 완료

□ 기대효과

❍ 문화재 복원을 통한 관광객 유치 등 지역경제 활성화 도모

❍ 역사문화환경 조성으로 지역민에게 아름다운 생활환경 제공

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비		1,400	-	4,000	-

□ 관련사진

북망문 복원 조감도 : 나주시 산정동 1-1번지 일원

동성벽(수구문) 복원 조감도 : 나주시 남내동 117번지 일원

4		공산 덕음 면단위 하수처리시설 설치공사

	사업목적
❍ 영산강과 인접한 지역으로 수질오염 부하량 감소를 통해 수질개선에 기여 ❍ 환경기초시설 확충 및 하수관거 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 공산면 신곡리, 백사리, 중포리 일원

❍ 사업규모 : 처리용량  Q=200㎥/일, 오수관로 L=17.3km

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2017. 11.

❍ 사 업 비 : 8,995백만원(국고 : 6,297, 지방비 : 2,698 )

❍ 주요내용 : 하수처리장 및 하수관거 설치

□ 추진상황

❍ 2013.   5. : 설계자문(전라남도) 완료

❍ 2013.  11. : 실시설계용역 준공

❍ 2013.  12. : 재원협의(영산강유역환경청) 완료

❍ 2014.   5. : 공사착공(총괄 및 1차분)

❍ 2015.   4. : 공사준공(1차분)

❍ 2016.   1. : 공사준공(2차분)

❍ 2017.   2. : 총괄 및 3차분 설계변경 추진

□ 기대효과

❍ 환경기초시설 확충 및 하수관로 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	8,995	738	3,571	4,686	-

□ 관련사진

공산면 중포리 1025번지 일원

공산면 중포리 1025번지 일원

5		왕곡 구천 면단위 하수처리 설치공사

	사업목적
❍ 영산강과 인접한 지역으로 수질오염 부하량 감소를 통해 수질개선에 기여 ❍ 환경기초시설 확충 및 하수관거 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 왕곡면 덕산, 본양, 옥곡, 월천, 화정, 신포리 일원

❍ 사업규모 : 처리용량  Q=250㎥/일, 오수관로 L=14.7km

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 비 : 12,800백만원(국고 : 8,960, 지방비 : 3,840 )

❍ 주요내용 : 하수처리장 및 하수관거 설치

□ 추진상황

❍ 2015.   5. : 실시설계용역 착수

❍ 2016.   4. : 기술진단용역 착수

❍ 2016.   4. : 환경부 재원협의 신청

❍ 2016.  10. : 재원협의 과정중 하수처리장 통합설치 경제성 결여로 사업 추진 불가

❍ 2017.   3. : 환경부와의 사업계획(안) 변경 협의(변경 : 하수관거 개량·보수공사)

❍ 2017.   6. : 변경계획안으로 설계용역 재 추진중

□ 기대효과

❍ 환경기초시설 확충 및 하수관로 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	12,800	-	405	7,423	4,972

□ 관련사진

왕곡면 소재지 일원

6		봉황 구석 농어촌마을 하수도 설치공사

	사업목적
❍ 영산강과 인접한 지역으로 수질오염 부하량 감소를 통해 수질개선에 기여 ❍ 환경기초시설 확충 및 하수관거 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 봉황면 죽석리(구석, 대실, 장대, 신기마을) 일원

❍ 사업규모 : 처리용량  Q=90㎥/일, 오수관로 L=4.0km

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2018. 4.

❍ 사 업 비 : 4,338백만원(국고 : 2,100, 지방비 : 900)

❍ 주요내용 : 하수처리장 및 하수관거 설치

□ 추진상황

❍ 2013.  12. : 실시설계용역 착수(2015. 5. 7. 준공, TN산업)

❍ 2015.   4. : 재원협의(영산강유역환경청) 완료

❍ 2015.   5. : 계약심사(전남도) 완료

❍ 2015.  11. : 공사착공(총괄 및 1차분)

❍ 2016.  11. : 공사준공(1차분)

❍ 2017.   3. : 공사준공(2차분)

□ 기대효과

❍ 환경기초시설 확충 및 하수관로 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	4,338	714	1,132	1,488	1,004

□ 관련사진

봉황면 죽석리 473-30번지 일원(봉황 구석 마을하수처리장)

7		장성천지구 농어촌마을하수도 설치사업

	사업목적
❍ 영산강과 인접한 지역으로 수질오염 부하량 감소를 통해 수질개선에 기여 ❍ 환경기초시설 확충 및 하수관거 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 노안면 금동리(금암마을), 학산리(신동산․용산․문화마을, 친수공간) 일원

❍ 사업규모 : 처리용량  Q=520㎥/일, 오수관로 L=10.8km

❍ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 비 : 14,895백만원(국고 : 10,024, 지방비 : 4,354, 원인자 : 517)

❍ 주요내용 : 하수처리장 및 하수관거 설치

□ 추진상황

❍ 2012.  12. : 실시설계용역 착수(2015. 5. 29. 준공, 동아기술공사)

❍ 2015.   6. : 재원협의(영산강유역환경청) 완료

❍ 2015.   7. : 계약심사(전남도) 완료

❍ 2015.   8. : 공사착공(총괄 및 1차분)

❍ 2016.   3. : 공사착공(2차분)

❍ 2017.   3. : 공사준공(1차분)

□ 기대효과

❍ 환경기초시설 확충 및 하수관로 정비로 공공수역 수질오염 방지 및 시민 보건위생 향상

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	14,895	4,494	4,828	2,141	3,432

□ 관련사진

석현동 38번지 일원(장성천지구 마을하수처리장)

8		한센 간이양로주택(호혜원) 기능보강

* 담당자 : 건축허가과장(변동진), 팀장(임은숙),  전화번호 : 7791

	사업목적
❍ 혁신도시의 악취문제 해결 및 정주여건 개선을 위해 한센 정착촌 주민 생업인 가축사육 폐업(포기)에 따른 지원책 강구 필요 ❍ 폐업축사 및 주거시설 혼재로 감염병 등 질병위험 노출 무의탁 한센 어르실들의 생활환경 개선 필요

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 산포면 새벽길 42-9(구 신도초교 폐교부지)

❍ 사업규모 : 1인가구 46㎡(29세대), 2인가구 56㎡(21세대), 주민복지시설, 공동창고

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2018년

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 2,500, 도비 1,200, 시비 1,300)

❍ 주요내용

- 건축규모

․ 건축면적/연면적 : 3,082.64㎡/5,212.64㎡

․ 건축용도/건축구조 : 단독주택(단독주택 형태 노인복지시설)/철근콘크리트조

․ 간이양로주택 8개동,각 지상1층/주민복지시설1개동, 지하1층 지상1층

□ 추진상황

❍ 2017.  3. : 설계용역 발주

❍ 2017.  4. : 설계용역 계약(사업수행능력평가)

❍ 2017.  7. : 설계용역 완료

- 기본(안) 주민설명회 2회, 최종(안) 주민설명회 1회 개최

❍ 2017.  7. : 나주시 경관위원회 심의회 개최

❍ 2017.  9. : 나주시 건설자문위원회 심의 계획

❍ 2017.  9. : 전라남도 계약심사 의뢰 계획

❍ 2017.  10. : 건축공사 발주 계획

□ 기대효과

❍ 혁신도시 입주민들과 이전기관(14개 기관)임직원들이 악취에 대한 해결 대책으로 호혜원 축산 폐업을 지속적으로 요구에 따른 악취해결

❍ 한센 정착촌 주민의 생업인 가축사육 폐업(포기)으로 호혜원 한센 장애인들을 위한 현대식 시설과 편안한 주거 환경 조성

❍ 현 정부에 부응하는 소외계층에 대한 복지환경조성

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	5,000				5,000

□ 관련사진

△ 주소 기재 : 산포면 새벽길 42-9(구 산포신도 폐교)

예정 조감도

9		화물자동차 공영차고지 조성사업

* 담당자 : 경제교통과장(곽삼성), 팀장(김선권), 주무관(김준호), 전화번호 : 339-8865

	사업목적
❍ 빛가람혁신도시, 미래산단(‘15.12.)등 완공과 전남내륙중심 도시의 지리적 요충지로서 지역간 균형개발 및 물류량의 특정지역 편중해소로 인근 5일시장, 농산물공판장 등과 연계한 효율적인 물류체계 구축을 위한 화물자동차 공영차고지 조성이 필요함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 나주시 화물자동차 공영차고지 조성사업

○ 사업기간 : 2011. 2. ~ 2018. 12.

○ 위    치 : 전라남도 나주시 청동 4번지 일원

○ 사 업 량 : 공영차고지조성(주차대수 : 341대, 건축물 : 2,751㎡)

○ 사 업 비 : 15,000백만원(국비 90%, 시비 10%)

○ 주요 사업내용

- 부지면적 : 49,083㎡

- 주차대수 : 341대

- 건    물 : 2,492㎡(관리동 1,412, 편의시설 477, 세차정비동 603)

□ 추진상황

○ 2011.  5. : 전남 화물자동차 공영차고지 조성 사업 신청

○ 2011. 10. : 지방재정 투융자 심사

○ 2012.  3. : 화물자동차 공영차고지 조성 타당성 조사 완료

○ 2012.  9. : 도시관리계획 결정 및 기본실시설계용역 추진

○ 2014.  6. : 농지전용을 제외한 관련기관 및 실과 사전협의 완료

○ 2014. 10. : 편입 토지 및 지장물 등 보상협의

○ 2014.  3. : 도시관리계획시설결정 심의

○ 2015. 11. : 기본 및 실시설계(안) 결정

○ 2016.  6. : 토목분야 계약심사(전남도 회계과)

○ 2016.  8. : 나주시 도시관리계획 결정(변경-구역계 축소) 의결

○ 2016. 12. : 문화재 시발굴 용역 준공

○ 2017.  4. : 문화재 정밀발굴조사 용역 추진중

○ 2017. 10. : 공사착수 예정

○ 2018. 12. : 화물자동차 공영차고지 개장

□ 기대효과

❍ 영세 운송사업자의 주차난 완화 및 주택가 도로변 주정차난 해소

❍ 효율적인 물류네트워크 구축에 기여

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	15,000	6,352	1,944	4,400	2,304

《평면도》나주시 화물자동차 공영차고지 조성사업(청동4번지 일원)

《조감도》나주시 화물자동차 공영차고지 조성사업(청동4번지 일원)

10		친환경농산물 종합물류센터 건립

* 담당자 : 식품유통과장(조성은), 유통행정팀장(손민식), 주무관(장재영), 전화번호 : 7365

	사업목적
❍ 친환경농산물의 물류비용 절감과 유통망 확충을 통하여 생산자는 안정적인 수요처를 확보하고 수요자는 저렴하고 안전한 친환경농산물 구입 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 산포면 내기리 942-7번지 일원

❍ 사업규모 : 대지면적 29,965㎡, 연면적 13,644㎡, 지하1층/지상2층

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2017년

❍ 사 업 비 : 27,816백만원(국비 13,908, 도비 6,954, 시비 6,954)

❍ 주요내용 : 집배송장, 선별포장, 저온저장고, 업무시설 등

□ 추진상황

❍ 건립부지 토지매입                        : 2012.  7. ~ 2014.  1.

❍ 기본 및 실시설계 용역                    : 2014.  4. ~ 2015.  6.

❍ 건축허가                                 : 2015.  9.

❍ 건립공사 추진                            : 2016.  1. ~ 2017.  7.

❍ 운영효율화 연구용역(한국농촌경제연구원)   : 2016.  5. ~ 8.

❍ 위탁운영주체 선정(농협경제지주)           : 2016. 12.

❍ 위탁운영주체 위․수탁 협약 체결          : 2017.  5. 16.

□ 기대효과

❍ 일반 농산물과 차별화된 친환경농산물 전문 유통센터 조성으로 학교 등 대량 수요처에 대한 안정적이고 규격화된 원료 공급

❍ 통합물류기능 수행으로 효과적인 수집․분산 및 물류비용 절감

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	27,816	441	794	11,296	15,285

□ 관련사진

△ 나주시 산포면 영산로 6187-8(산포면 내기리 942-7번지 일원)

산포면사무소

국도1호선

(←나주방향)

국도1호선

(광주방향→)

물류센터

사업부지

조 감 도	현장사진

11		로컬푸드 상설매장(본점) 건립

* 담당자 : 식품유통과장(조성은), 팀장(박창기), 주무관(나예원), 전화번호 : 339-7412

	사업목적
❍ 지역 먹을거리 체계 구축으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 및 대도시 소비자를 중심으로 관계시장을 창출하고 인접지역의 농업자원을 연계함으로써 소비자에게는 안전한 지역먹거리를 합리적인 가격에 제공하고, 생산자에게는 안정된 소득을 창출함으로써 상생발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 산포면 내기리 942-6번지 외 3필지

❍ 사업규모 : 1,895㎡/2층

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2018년

❍ 사 업 비 : 3,500천원(국비 839, 도비 63, 시비 2,598)

❍ 주요내용 : 직매장(573㎡), 급식시설(269㎡), 식당(363㎡), 소매시설(265㎡), 기타시설(425㎡) 등

□ 추진상황

❍ 나주시 로컬푸드육성 및 지원조례 제정 : 2014. 8.

❍ 로컬푸드 상설매장(본점)신축 설계용역 발주 및 착수 : 2017. 4.

❍ 로컬푸드 상설매장(본점)신축 설계 변경에 따른 실시설계 용역 변경

계약 완료(당초 : 1.335㎡/1층 ⇒ 변경 : 1,895㎡/2층) : 2017. 7.

□ 기대효과

❍ 로컬푸드 본점 신축을 통한 관계시장 확대 및 소비자에게 안전하고 신뢰 받을 수 있는 먹거리 공급 기반 구축

❍ 직매장 및 급식지원 시설 확보를 통해 6차산업화에 기여하고 대규모  급식소에 식자재 공급 등 공급기반 마련

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	3,500	-	-	-	3,500

12		나주 혁신산업단지 폐수처리시설 설치공사

* 담당자 : 일자리정책실(이 재 승), 팀장(나 승 학), 주무관(박 철), 전화번호 : 061-339-8322

	사업목적
❍ 나주 혁신산업단지 조성에 따른 입주업체에서 발생되는 생활오수 및 공장폐수 등을 방류 수질기준에 맞게 원활히 처리하여 방류수역의 수질을 보전하는데 그 목적이 있음.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 동수동 404-1번지 / 혁신산업단지 내

❍ 사업규모 : 폐수종말처리 시설용량 Q= 1,000㎥/일(1-1단계)

❍ 사업기간 : 2012. 6. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 비 : 13,145백만원

❍ 주요내용

- 시설용량 Q= 1,000㎥/일

- 처리공법 : SymBio(BIONAD) 공법

- 대지면적 및 건축면적 : 13,610㎡ / 914.79㎡

- 연면적 : 1,9993.76㎡

□ 추진상황

❍ 2012.  6. 25. : 기본계획 용역 착수

❍ 2014.  9. 22. : 기본계획 승인(영산강유역환경청)

❍ 2015.  1. 13. : 폐수처리 공법선정 ⇒ SymBio(BIONAD)공법 / ㈜아쿠아테크

❍ 2015. 12. 24. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2016.  3. 28. : 사업 경제성 등(설계VE) 검토 용역 완료

❍ 2016.  3. 31. : 지방건설기술심의 완료

❍ 2016.  5. 27. : 전라남도 계약심사 완료

❍ 2016.  6. 23. : 토목․건축․기계․조경공사 착공 / 제일건설(주)

❍ 2016.  7. 25. : 감독권한대행등 건설사업관리 용역 착수 / ㈜건화외 1개사

❍ 2016. 11.     : 소방 및 정보통신공사 착공 / 덕성소방(주), 종합무선통신

❍ 2017.  3. 29.  : 전기공사 착공 / ㈜동산전력외 1개사

□ 기대효과

❍ 방류슈역의 수질개선

- 동령소하천 및 영산강 수질개선

❍ 생활환경 개선

- 공공수역의 내․외적 수질 향상

❍ 보건위생 향상

- 수인성 전염병 예방으로 주민 보건위생 향상

❍ 환경친화적 효과

- 수질 및 토지의 개선효과로 환경 친화적인 도시 분위기 조성

❍ 사회․경제적인 효과

- 광주․전남 혁신도시 관련 연관기업 유치로 인한 산단 조성으로 쾌적한   도시환경 조성

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	13,145			3,499	9,646

□ 관련사진

△ 동수동 404-1번지 일원 / 혁신산업단지 내

13		나주 혁신산업단지 완충저류시설 설치공사

* 담당자 : 일자리정책실(이 재 승), 팀장(나 승 학), 주무관(박 재 욱), 전화번호 : 061-339-8324

	사업목적
❍ 나주 혁신산업단지 내에서 폭발, 누출, 화재 등으로 인한 사고 발생시 유출되는 유해물질의 하천 직유입을 차단하여 방류하천 및 영산강 수질 오염을 사전에 예방하기 위한 완충저류시설 설치사업의 기본 및 실시 설계를 수행하는데 그 목적이 있음.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 동수동 410번지 일원 / 혁신산업단지 내

❍ 사업규모 : 완충저류시설 V= 1,100㎥

❍ 사업기간 : 2016. 8. 1. ~ 2017. 8. 31.

❍ 사 업 비 : 5,831백만원

❍ 주요내용

- 완충저류조 : 1개소(RC구조, 16m×12m×5.5m)

- 이송관거 L =63m(Ø100㎜)

-  유입관거 L= 112m(Ø300㎜ ~ Ø400㎜)

- 방류관거 L =20m(Ø100㎜)

-  계측기실 3개소[1개소(1.5m×1.5m), 3개소(1.5×2.0m)] 등

□ 추진상황

❍ 2015.  6. 22. : 설치․운영계획 승인 및 시설용량 확정(환경부)

❍ 2015.  9.  1. : 기본 및 실시설계 용역 착수 / ㈜대한콘설탄트

❍ 2016.  8.  1. : 토목․기계 공사 착공

❍ 2016.  9.  5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2016. 10.  6. : 실정보고 1건 접수 / 지장물 저촉에 따른 구조물 이동 등

❍ 2016. 10. 10. : 건기공사 착공

❍ 2016. 10. 12. : 구조물 이동 등 실정보고 관련 검토의견 제출 요청 / 설계사외 1

❍ 2016. 10. 20. : 실정보고 사항 검토의견 통보

❍ 2016. 12. 19. : 가시설 관련 실정보고 추가의견 검토 요청

❍ 2016. 12. 23. : 실정보고사항 추가 검토의견 통보 / 설계사 → 시

❍ 2017.  1. 18. : 실정보고사항 접수 / 사토운반거리 정상 등 4건

❍ 2017.  1. 19. : 실정보고사항 승인

❍ 2017.  2. 10. : 토목․가계 1차 설계변경

❍ 2017.  6. 19. : 실정보고사항 접수 / 포장복구 면적변경 등 3건

❍ 2017.  7. 19. : 공사중지 / 한전의 전기 인입 지연

□ 기대효과

❍ 혁신산업단지 수질오염사고 발생시 동령 소하천 직유입 차단

❍ 상수원 보호

- 주민 불안감 해소

- 상수도 신뢰성 향상

❍ 자연정화 개선

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
사 업 비	5,831		81	822	4,928

□ 관련사진

△ 동수동 410번지 일원 / 혁신산업단지 내

동수동 410번지 일원 / 혁신산업단지 내