특 수 공 시

○ 2009년 업무계획에 의거 추진 중 또는 완료된 사업, 특히 주민 관심사업

○ 타 자치단체에서 추진하지 않는 고유사업으로 공시 파급 효과가 큰 사업

연번	사 업 명	추진실과	비고
1	광주․전남 공동혁신도시 『빛가람』건설	혁신도시지원단
2	혁신도시 원주민 주거시설 건립	〃
3	도래 전통한옥마을 관광자원화 사업	문화관광과
4	백호 문학관 건립	〃
5	종합민원실 이전 증축	회계과
6	자원봉사활동 활성화 추진	주민생활지원과
7	사랑나눔 행복나주 만들기 사업	〃
8	2009년 희망근로사업 추진	〃
9	현애원 축산폐수 공공처리시설 설치	환경관리과
10	금성산 생태숲 조성	산림공원과
11	금성산 생태물놀이장 조성	〃
12	하수관거정비 BTL사업 추진	상하수도과
13	농업인 마을공동급식 지원사업	자치농정과
14	나주배 테마파크 조성사업	배원예과
15	농기계 임대사업 운영	친환경지도과
16	탑프루트 생산단지 육성 시범사업	〃

1.	광주․전남 공동혁신도시 『빛가람』 건설

○ 공공기관 지방이전과 산․학․연․관이 서로 협력하여

수준높은 생활환경을 갖춘 미래형 도시로 광주전남의

성장거점도시 건설

○ 지역전략 사업과 연계, 자립적 성장발전을 위한 거점구축

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2005. 12. ～2012. 12.

○ 위    치 : 나주시 금천, 산포면 일원

○ 면    적 : 7,315천㎡(221만 2천평)

○ 사 업 비 : 14,841억원(조성비10,345, 용지비4,496)

※ LH공사, 전남개발공사, 광주도시공사 공동건설 (민자 100%)

○ 이전기관 : 15개 기관(한국전력, 한국농어촌공사 등)

□ 추진 실적

○ 혁신도시특별법 국회통과                 : 2006.12.22.

○ 혁신도시 개발예정지구 지정                : 2007. 3.19.

○ 토지 및 지장물 보상 추진                  : 2007.10. 8.

○ 실시계획 승인                             : 2007.10.26.

○ 혁신도시 기공식                           : 2007.11. 8.

○ 혁신도시 재검토 논란 극복                 : 2008. 7.21.

○ 이전기관 부지매입 착수                    : 2009. 7.31.

○ 이전기관 청사설계 발주                    : 2009. 9.22.

○ 사업준공 및 이전기관 입주 완료            : 2012.12.

□ 사업 효과

○ 2012년 혁신도시 완성을 위한 본격적인 이전업무 추진

․(이전승인) 15개 이전기관 승인 완료

․(부지매입) 한전 등 7개기관 부지매입 계약 체결

․(설계발주) 전파연구소 등 6개기관 설계발주

․(공사실적) 토목공사 전체공정 33% 진행

□ 조감도

2.	혁신도시 원주민 주거시설 건립

광주․전남 공동혁신도시 건설로 말미암아 삶의 터전을 잃고 이주하게

되는 영세․고령 원주민의 이주대책 일환으로 폐교(閉校) 부지를 활용   주거시설을 건립하여 주민 공동체 복원 및 재정착을 유도.

□ 사업 개요

○ 위    치 : 금천면 신천리 21번지 외 (舊 금천남초등학교)

○ 주택규모 : 7동/26호〔45.09㎡ 8호, 56.25㎡ 18호〕

※ 다목적 회관 1동〔178.38㎡, 다목적실, 목욕장, 찜질방〕

○ 총사업비 : 4,546백만원(시비 4,296,  도비 25, 토지매입 포함)

○ 공사기간 : 2009. 6. ~ 2010. 4.

○ 공사 준공 및 입주 : 2010. 5

□ 추진 실적

○ 舊 금천남초등학교 부지 매입               : 2009. 1.

○ 주거시설 주택 건립 착공                   : 2009. 6. 30.

○ 주거시설 운영 조례안 제정                 : 2009. 10. 9.

○ 주거시설 관리위원회 구성 운영(11명/3회)   : 2009. 11. 10.

○ 임대료 결정고시 및 입주자 모집 접수       : 2010. 2. 9. ~

○ 주거시설 주택 건립 준공                   : 2010. 4. 26.

○ 입주자 임대계약 체결 및 입주              : 2010. 5. 10. ~

-  22호/22세대/31명〔부부세대 9, 독거세대 12〕

□ 사업 효과(성과)

○ 효율적인 주거시설 마련으로 주민 공동체 복원 및 재정착 유도

○ 공공사업으로 인한 이주하는 저소득층의 이주대책 방안 제시

○ 주거․ 영농․및 여가활동 공간 마련으로 삶의 질 향상

○ 건강증진 프로그램 운영 : 주 2회/ 생할체육 및 웃음치료

□ 조감도

3.	도래 전통한옥마을 관광자원화 사업

남도의 전통한옥과 자연경관을 살린 전국 제일의 전통한옥 민속마을 조성으로 외래 관광객 유치 및 전통문화 향수 충족

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007 ~ 2011

○ 위    치 : 나주시 다도면 풍산리 동녘마을 일원

○ 사 업 비 : 4,740백만원

○ 사업규모 : 전통한옥 신축 및 개․보수 15동, 다목적 체험관        1동, 육각정자 1동, 연못 복원, 빨래터 정비, 산책로, 물길          정비

□ 추진실적

○ 기본계획 및 학술용역 실시 : 2007. 11.

○ 한옥신축 및 개․보수사업 추진(15동) : 2008. 12.

○ 화장실, 주차장 등 완공 및 방문객 센터운영 : 2009. 2.

○ 육각정자 , 다목적 체험관, 빨래터, 연못 등 준공 : 2010. 10.

□ 사업효과

○ 광주․전남 중심의 역사 ․문화체험 관광인프라 구축, 체류형,       목적형 관광지 조성

○ 혁신도시, 나주호 관광지 배후 지역으로 문화자원을 활용한       실버형 농가소득 증대의 표준 모델 제시

조  감  도

4.	백호 문학관 건립

○ 한국문학사를 빛낸 우리지역 출신 백호 임제선생의 얼 선양

○ 후배 문인들의 창작의욕 계기 마련 및 쉼터 제공

○ 관광자원화를 위한 콘텐츠 구성 및 주변 공원화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007 ~ 2010

○ 위    치 : 나주시 다시면 회진리 일원

○ 사 업 비 : 3,350백만원(국 1,005, 지방비 2,345)

○ 사업규모 : 부지 3,000㎡, 건물 660㎡

- 전시실, 장서각, 자료실, 문화사랑방 등

□ 추진실적

○ 지방재정 투․융자심사완료 : 2009. 3.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2010. 2.

○ 백호문학관 건립공사 계약 체결 : 2010. 6.

□ 사업효과

○ 문인들의 창작의욕 고취 및 남도문화 정체성 확립

○ 문화체험 공간으로 활용 비단고을 이미지 제고

○ 천연염색문화관, 복암리 고분전시관 등과 연계 관광벨트화

□ 조감도

5.	종합민원실 이전 증축

민원인 편익 위주의 질 높은 행정서비스를 제공하고 본청

청사부족난 해소와 청사 환경개선을 위해 별도의 종합민원실

을 증축하여 주민편익 및 직원업무 능력향상에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 나주시청 부지(시의회 앞)

○ 기    간 : 2009. 6. 26. ~ 2010. 9. 14.

○ 사 업 량 : 지하 1층, 연면적 1,403㎡

○ 사 업 비 : 2,650백만원 (시비)

○ 주요내용 : 종합민원실 1동 증축

□ 추진실적

○ 재정투․융자심사 및 공유재산관리계획 의회승인 : 2008. 12. 26.

○ 종합민원실 증축공사 착공                   : 2009.  6. 26.

○ 지하 터파기 및 흙막이 벽 설치 완료         : 2010. 2.

○ 골조공사 완료 (공정율 60%)                 : 2010. 6. 30.

○ 공사 준공 예정                             : 2010. 9. 14.

□ 사업효과

○ 민원인 편익 위주의 질 높은 행정서비스를 제공

○ 본청 청사부족난 해소와 청사 환경개선 통한 직원 업무능력

향상에 기여

□ 조감도

6.	자원봉사활동 활성화 추진

○ 자원봉사에 대한 체계적 관리와 지원체계 구축

○ 자원봉사자의 사기진작 자긍심 고취로 자원봉사활동 저변확대

□ 사업개요

○ 자원봉사 모집 및 수요처조사(연중)

- 모집분야 : 전문기술(도배,장판,이․미용, 제과․제빵 등) 및 노력지원

- 수요처조사 : 재가봉사 대상자 및 사회복지시설 등

○ 자원봉사활동 전개

- 시설 및 재가봉사 프로그램 확대 추진(매월 600-800명 참여)

- 시 단위 이상 체육대회 등 각종 행사지원

□ 추진실적

○ 2009 자원봉사 모집 : 6,755(단체 6,165   개인 590)

○ 각종 자원봉사활동 전개 : 6,929회

-전문봉사 618회 : (이․미용 414,  도배봉사 80,  발마사지 14

의료 21,  제과․제빵 53,  수지침 36)

-노력봉사 6,225회 : (목욕봉사 752,  재가봉사 746,  환경정화 425

기타 4,302)

-행사봉사 : 86회(인라인대회 8, 자전거대회 3, 마라톤대회 3, 전국체전 23                      대통령배 싸이클 대회 20, 기타문화체육행사 29)

□ 자원봉사 장면

(이ㆍ미용 봉사)

(수지침 봉사)

7.	『사랑나눔』행복나주 만들기 사업

○ 생계곤란 등 사유로 도움을 필요로 하나 제도권내의 혜택을

받지 못하는 법정 비 급여 대상자에게

○ 민간 자원을 발굴 맞춤형 서비스를 제공함으로써 행복이 가득한

사회 분위기 조성

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2009. 1월 ~ 12월

○ 후원자 발굴 및 결연

- 대상 : 지역 내 공공기관 및 민간기업 임직원, 공무원, 병의원

의료기관, 시민 등

- 내용 : 현금, 밑반찬, 집수리, 안부살피기 등 (후원은행 보관 후 지원)

○ 후원활동 사례관리 : 새올시스템 입력 및 홍보

○ 후원자 사기진작 : 우수 후원자 표창

□ 추진실적

○ 후원자 발굴 : 712명 (시민 378명, 공무원 334명)

○ 결연 인원 : 627명 (현금지원 43, 밑반찬 44, 가사지원 540)

○ 돌발이웃 지원 : 39건 4,210천원 (현금지원)

□ 사업효과

○ 나눔 실천 생활화로 더불어 살아가는 공동체 사회 구현

○ 작은 관심으로 이웃사랑을 실천하는 새로운 기부문화 조성

□ 『사랑나눔』행복나주 만들기 사업 추진 장면

- 우수 후원자 표창 -

- 후원자와 결연자의 만남 -

8.	2009년 『희망근로사업』추진

○ 생산적ㆍ친서민적 일자리 창출 사업을 추진하여 저소득층의

한시적 생계 지원과 상품권 발행으로 지역경제 활성화에 기여

○ 행정안전부 평가에서 우수상 수상(상사업비 2억 확보)과 큰

사고 없이 사업을 완료하여 성공적인 희망근로사업을 추진하였음

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 6. 1 ~ 11. 30(6개월)

○ 사 업 비 : 3,827백만원(국비2,957 특교 235 도비 275 시비 359)

○ 참여인원 : 698명(계획인원 527명)

○ 참여자격 : 만 18세 이상인 근로능력자로서 가구소득이 최저생계

비의 120%이하로 재산이 1.35억원 이하 인자로서 우선선발

○ 선발기준 : 소득 외 8개 항목

○ 근로조건 : 주 5일 근로, 1일 33,000원 임금지급

○ 임금지급 : 현금70%, 상품권 30%

□ 추진실적

○ 추진사업 : 44개 세부사업

- 랜드마크사업 : 2개              - 시군구 특화사업 : 2개

- 전국공통사업 : 9개              - 일반사업 : 31개

○ 사업비 집행 :  3,583백만원(93.6%)

□ 사업효과

○ 저소득 취약계층에 일자리 제공하여 생계를 지원 하였으며

상품권 발행을 통하여 지역경제 활성화에 기여

○ 취약시설물 정비와 환경정비, 아름다운 마을가꾸기 사업 추       진으로 쾌적하고 아름다운 생활환경 및 복지환경 조성

□ 사업 사진

9.	현애원 축산폐수 공공처리시설 설치

○ 현애원에서 배출되는 가축분뇨의 적정처리를 위하여 축산폐수

공공처리시설을 설치 운영하여 환경개선과 수질오염 방지

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007 ~ 2009. 12.

○ 위    치 : 노안면 유곡리 산43번지 일원

○ 사 업 비 : 15,049백만원(국 12,039, 도 602, 시 2,408)

○ 용    량 : 150톤/일 → 하수처리장 연계처리

□ 추진실적

○ 축산폐수공공처리시설 설치승인(전라남도)    :  2006. 02.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료                :  2006. 09.

○ 공사착공                                :  2007. 01.

○ 토공 및 건축구조물 등 기반시설 설치완료  :  2008. 05.

○ 공종별 기계제작 및 설치완료             :  2009. 06.

○ 종합 시운전                             :  2009. 07.

○ 공사준공                                :  2009. 12.

□ 사업효과

○ 축산폐수의 안정적 처리로 악취 및 오염발생 최소화

○ 인근하천 및 영산강 유입 오염원 제거로 수질총량제 기여

□ 조감도

10.	금성산 생태숲 조성

○ 금성산 특성에 맞는 색다른 생태 숲 조성으로 관광자원화 및

자연학습장, 산림생태 탐방, 식물원, 휴식공간 등으로 활용

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2010 ~ 2013.

○ 위    치 : 나주시 노안면 영평리 산 113번지 외 (금성산 일원)

○ 사 업 량 : 50㏊(도유림)/온대남부 식물원, 자연식물원, 특수식물원 등

○ 사 업 비 : 52억원(국비 50%, 시비 50%)

□ 추진실적

○ 금성산 생태숲 조성계획 수립 : 2006. 8.

○ 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2008. 12.

○ 전라남도 공공디자인 위원회 심의 : 2009. 8.

○ 도유림 내 영구 건축물 축조 승인(조건부 허가) : 2010. 4.

○ 공사계약 : 2010. 5.

□ 사업효과

○ 시민에게 다양한 생태 숲 탐방․체험 등 쾌적한 휴식공간 활용

○ 산림을 이용한 휴양시설 등 확충으로 관광 자원화 및 지역경제

활성화 기여

□ 금성산 생태숲 대상지 현장 사진

11.	금성산 생태물놀이장 조성

□ 사업목적

기존 사방댐을 활용하여 생태물놀이장으로 조성하여 시민들에게 쾌     적한 산림휴양공간을 제공하고 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

위    치 : 경현동 806번지 일원(도유지 및 구거)

사 업 량 : 10,000㎡

사업기간 : 2008. 7. 26. ~ 2010.7. 23.

총사업비 : 8억원(시비)

수용인원 : 1일 700명(2009년 여름 이용객 10,000명)

주요시설 : 물놀이장 3개소, 주차장, 어린이물놀이시설,

화장실․샤워장․음수대, 관리소, 평상, 정자 등

□ 추진상황

금성산 생태물놀이장 운영 : 2010. 7. 24. ~ 8. 22.

- 개장시간 : 매일 10:00 ~ 16:00

- 물놀이장 관리인 : 8명

□ 사업효과

생태물놀이장 조성으로 쾌적한 산림휴양공간 제공

관광자원화 및 지역경제 활성화

□ 물놀이장 사진

12.	하수관거정비 BTL사업 추진

민간자본과 기술을 통해 경제적이고 효율적인 하수관거 정비로      지하수 방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리의 효율성 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009 ~ 2013.

○ 위    치 : 중․남부지역(남외, 토계, 송월, 영강, 이창, 용산동)

○ 사 업 비 : 68,709백만원(국비 48,096, 시비 20,613)

○ 사업규모 : 하수관거 정비 85.4㎞, 배수시설 3,633가구.

○ 사업시행 : 남양나주씨앤지(주)

□ 추진실적

○ 2006.  4. 19 : 2007년 하수관거정비 BTL사업 신청

○ 2006.  8. 22 : 2007년 하수관거정비 BTL사업 확정(환경부)

○ 2006. 12. 21 : 나주시의회 승인

○ 2008.  2. 26 ~ 2. 28 : 사업계획서 평가위원회 개최

○ 2008.  3.  4 : 우선협상대상자 선정 통보〔(가칭)남양나주씨앤지(주)〕

○ 2009.  2.  3 : 실시협약 체결

○ 2009. 12. 14 : 공사착공

□ 사업효과

○ 민간자본과 기술력을 활용 단기간에 하수관거를 정비

○ 공공하수처리장 유입수질 제고 및 관리효율화로 방류수질 개선

13.	농업인 마을공동급식 지원사업

○ 농업인구의 노령화․부녀화에 따른 여성농업인의 영농참여      와 역할이 확대됨에 따라 농촌일손부족 해소

○ 농업인의 건강증진과 농업생산성 향상에 기여하고 나주

농업의 발전 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009.4.20~6.20(상반기)/2009.9.15~11.30(하반기)

○ 사 업 량 : 48개소/종사자48명(상), 23개소/종사자23명(하)

○ 사 업 비 : 98백만원

○ 지원대상 : 공동급식시설을 갖추고 신청한 마을

○ 내    용 : 마을 중식 급식종사자 인건비 지급(1일/35천원)

□ 추진실적

○ 신청접수 : 71개소/69백만원

- 상반기 : 48개소/42백만원 , 하반기 : 23개소/27백만원

○ 나주시 농업․농촌 및 식품산업 정책심의회 개최 대상마을 선정 :          상․하반기 (2회)

○ 마을별 공동급식 중식 제공 : 상․하반기 20~25일/마을별

○ 사업추진상황 및 위생 상태 점검 : 급식 기간중 주 1회

○ 공동급식 완료마을 보조금 지급 : 69개소/67백만원

- 상반기 : 46개소/40백만원 , 하반기 : 23개소/27백만원

□ 사업효과

○ 농촌일손부족 해소 및 농업인 건강 증진과 삶의 질 향상

○ 영농정보 상호교환 및 주민간 화합의 장 계기 마련

□ 공동급식 현장사진

14.	나주배 테마파크 조성사업

○ 배를 기반으로 농가소득 증대 및 지역경제 활성화 방안을 마련하고

지역에 산재된 배 관련시설의 헤드쿼터로서의 역할

○ 농촌관광 센터로의 역할을 위한 나주배 테마파크 조성사업 추진

□ 사업 개요

○ 위    치 : 왕곡면 덕산리 591-1 일원

○ 면    적 : 49,146㎡(14,867평)

○ 주요시설 : 복합문화센터, 야외광장, 배숲공원, 나주배체험농장,

농산물체험농장, 농촌마을종합개발사업시설(패시브하우스,       곤충체험장 등) 등

○ 복합문화센터 규모

- 건축면적 : 1,742㎡(527평),  연면적 : 2,160㎡(653평)

- 용    도

․1층 : 다목적강당, 전시장(2), 전시장, 안내 및 특산품판매, 사무실

․2층 : 관리실, 전산실, 자료실, 강의교육실, 사무실, 기자재창고, 식당

○ 사업비 : 7,485백만원(광특 3,052, 시비 2,900, 농촌마을 1,533)

□ 주요사업 추진 경과

○ 2009. 06. 22 : 나주배 테마파크 조성사업 분야별 발주

○ 2009. 06. 30 : 나주배 테마파크 공정별 계약 및 착수계 제출

○ 2009. 07. 07 : 건축사법에 의한 감리계약 체결

○ 2009. 09. 08 : 나주배 테마파크 운영관리계획 연구 착수

○ 2009. 11. 23 : 시설공사 일시 중단[기본구상 변경에 따른 실시설계 변경]

○ 2010. 04. 08 : 나주배 테마파크 운영관리계획 연구 완료

○ 2010. 05. 24 : 공사재개 및 변경계약[2010. 09. 준공 예정]

□ 사업 효과

○ 나주 배 브랜드 확산 및 지역주민 문화활동, 경제활성화 기대

○ 전남권 중서부 농촌관광 활성화 기대

□ 조감도

15.	농기계 임대사업 운영

.

고가의 농기계를 시에서 직접 구입하여 필요한 농가에 임대해      줌으로써 농가의 농기계 구입부담 경감 및 농기계 이용율 향상

□ 사업개요

○ 사 업 장 : 나주시 동수동 144-13번지(나주시 농기계은행)

○ 사 업 비 : 1,224백만원(국비 300백만원, 지방비 924백만원)

○ 운영기간 : 연중(봄․가을 영농철 비상근무 지원)

○ 운영방법

- 단기임대(1기종/1농가 최대 3일까지)

- 농작업대행단운영 : 5명

○ 임대기종 : 57종 205대(임대료 5,000원~100,000원)

□ 추진실적

○ 나주시 농기계임대사업 조례 제정     : 2007. 01.

○ 농기계임대장비 구입                 : 2007. 05. ~ 2010. 8.

- 농용굴삭기, 트랙터등 57종 205대

○ 농기계임대사업 추진                 : 2008. 01. ~ 현재까지

- 임대실적 : 1,194농가/1,655일

○ 농작업대행단 운영                   : 2010. 04 ~ 현재까지

- 농각업대행 : 84일 81농가(비닐피복,로터리,조사료생산 등)

□ 사업효과

○ 고가 농기계 구입부담 경감에 따른 농업인 경영비 절감

- 2008~2010년 농가 직․간접 파급효과 : 2,000백만원

○ 밭작물의 기계화 촉진 및 농기계 이용율 향상
□ 사업사진

16.	탑프루트 생산단지 육성 시범사업

○ 지베렐린을 사용하지 않은 최고품질의 나주배 생산

○ 시범단지 현장 기술지원으로 최고품질 과실생산과 선별․유통 기술개선

○ FTA 대응 최고품질 과실생산으로 국내 소비촉진 및 나주배 대외 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 1. ～2011. 12.

○ 위    치 : 나주시 금천면 등 관내 과원

○ 대상단지 : 배사랑우리배 작목반(대표 김진호 외 12인)

○ 면    적 : 31.4ha

○ 2009년 사업비 : 44,414천원(국비 22,207, 시비 22,207)

□ 추진실적

○ 재배시설 현대화 시설 설치 : 저수조, 자동관비시스템         ○ 홍보탑 설치 : 국도 1호선 배 박물관 근처

○ 탑프루트 현장 컨설팅 실시 :  9회

- 시기별 재배 및 저장기술 교육 및 애로사항 해결

○ 무 지베렐린 나주배 홍보를 위한 ‘꼭지달린 나주배’ 브랜드 개발

○ 농촌진흥청 탑프루트 생산단지(6개과종, 55개단지)평가          - 대상(대통령상) 수상

□ 사업효과

○ 나주배의 우수성 홍보 및 소비촉진으로 농가 소득증대

○ 최고품질 안전과실 생산으로 소비자 신뢰 확보

□ 관련사진