	2009 주요 업무계획 (건설과)
□ 2009년 추진목표 --------------------------------------------			216
□ 일반시책
□ 주민숙원사업추진 ---------------------------------------------			217
□ 소재지권 도로정비사업---------------------------------------			218
□ 농촌생활환경 정비사업 --------------------------------------			219
□ 기계화경작로 확·포장사업-----------------------------------			220
□ 소규모 농업기반 정비사업-------------------------------------			221
□ 도로정비 및 유지관리 ---------------------------------------			222
□ 가로등정비 및 유지관리--------------------------------------			223
□ 신규시책
□ 가로등 위치 표시사업 추진 --------------------------------			224
□ 계속사업
□ 군도 확·포장 사업 ------------------------------------------			225
□ 농어촌도로 확·포장 사업 ---------------------------------			226
□ 농촌마을 종합개발사업 --------------------------------------			227

	2009년 추진목표
환경 친화적 견실시공, 사업 조기 마무리 추진 주민숙원 및 농업기반사업추진으로 생활환경 개선 체계적인 도로 유지보수 실시

	추 진 전 략
각종 건설공사의 견실시공과, 환경 친화적인 설계 반영 으로 삶의 질 향상 농업 생산 기반시설 확충으로 영농 불편 해소 체계적인 도로 유지보수로 시민 교통불편 해소

	주요 역점시책
주민숙원사업 및 농업기반 정비사업 추진 군도, 농어촌도로 확·포장 사업 추진 농촌마을종합개발, 농촌생활환경 정비사업 추진 도로정비 및 교량 유지 보수 관리 가로등 위치 표시사업 및 가로(보안)등 유지 보수 관리

『일반시책』

주민숙원사업 추진

□ 대상지역 : 관내 19개 읍 · 면 · 동 일원

□ 사업내용 : 마을진입로 및 안길포장, 마을하수도정비 등

□ 사 업 량 : 57개소

□ 사 업 비 : 1,504백만원(시비)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 현장조사를 철저히 하고, 주민기초생활 불편사항 우선 해결

하여 복지수준의 단계적 향상

□ 주변환경을 고려한 친환경공법 선택으로 환경훼손 최소화

□ 추진계획

□ 2008. 12.: 대상지 선정 및 조사측량

□ 2009.  1.: 설계서 작성 및 사업 발주

□ 2009.  6.: 사업 완료

□ 기대효과

□ 소규모 숙원사업으로 고충 민원 해결 및 마을환경 정비

농촌 이미지 개선

□ 정주기반시설 정비 및 확충으로 시민들의 삶의 질 향상

『일반시책』

소재지권 도로정비사업

□ 사 업 량 : 3개 지역( L=1.36km )

- 영강삼거리~영산교(L=0.49□, B=15.0m) : 412백만원/계속

- 금천사거리~금천면사무소(L=0.47□,B=15.0m) : 700백만원/계속

- 나주소방서~서당골(L=0.4□, B=6.0m)   : 200백만원/신규

□ 사업내용 : 시가지 도로시설 확충(보도, 가로등, 가로수 등)

□ 사 업 비 : 1,312백만원

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 무질서한 소재지권 주요도로를 중점 정비하여 도로기능 확충

□ 소재지 상권을 중심으로 주차 공간 확보 등 기반시설 구축

□ 추진계획

□ 2009. 1. : 영강동 도로정비사업 발주 및 금천면 토지보상협의

- 공사추진은 하수도B.T.L사업과 병행추진 예정(2009. 2월경)

□ 2009. 3. : 나주소방서~서당골 도로확장 설계완료 및 보상협의

□ 2009.12. : 공사 완료(영강동)

□ 문제점 및 대책

□ 소재지권 도로환경개선으로 지역이미지 개선을 위한 소요

사업비 미확보액(1,250백만원)을 조기확보 추진코자 함.

『일반시책』

농촌생활환경 정비사업

□ 위    치 : 정주면(다시, 노안, 반남) 오지면(문평, 다도)

□ 사 업 량 : 12건(정주면 8건, 오지면 4건)

□ 사업내용 : 농로 및 마을내 도로포장 11개소, 하수도정비 1개소 등

□ 사 업 비 : 3,986백만원(국비 2,790, 도비 60, 시비 1,136)

□ 사업기간 : 2009. 1월 ~ 12월

□ 추진방침

□ 중심마을 기초생활시설 정비 및 소득사업에 집중투자

□ 낙후지역 해소 및 농가소득증대와 관련된 사업 시행

□ 추진계획

□ 2009. 1 ~ 2월 : 실시설계 용역

□ 2009.  3월 : 공사 착공

□ 2009. 12월 : 공사 준공

□ 기대효과

□ 농촌마을 경관 개선 및 생활환경 정비로 삶의 질 향상

□ 낙후된 오지마을의 소득증대와 복지향상 도모

『일반시책』

기계화경작로 확·포장사업

□ 위   치 : 8개면

(남평, 산포, 왕곡, 반남, 다시, 문평, 노안, 금천)

□ 사 업 량 : L=8.0km

□ 사업내용 : 경지정리 구간내 농로포장

□ 사 업 비 : 833백만원(국비 667, 도비 50, 시비 116 )

□ 사업기간 : 2009. 1월 ~ 12월

□ 추진방침

□ 비포장 농로와 연계되는 농산물가공, 유통시설간의 포장

□ 유통개선 촉진 및 농업 생활환경 개선

□ 추진계획

□ 2009. 1 ~ 2월 : 실시설계 용역

□ 2009. 3월 : 공사 착공

□ 2009. 6월 : 공사 준공

□ 기대효과

□ 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상 및 소득증대

『일반시책』

소규모 농업기반 정비사업

□ 대상지역 : 관내 19개 읍 · 면 · 동 일원

□ 사업내용 : 농로 확·포장, 용·배수로 정비

□ 사 업 량 : 70개소

□ 사 업 비 : 1,925백만원(시비)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 용수공급이 원활치 않은 용·배수로 구조물화

□ 농기계 진입이 어려운 농로의 확·포장 추진

□ 구조물화가 필요한 구간 우선 실시

□ 추진계획

□ 2009. 1.: 설계 및 사업발주(착공)

□ 2009. 6.: 사업 완료

□ 기대효과

□ 용수공급 원활로 농업생산성 및 품질 향상

□ 농로 포장으로 기계화 영농 및 농산물 수송 원활

□ 영농 고충 해결로 안전 영농 기여

『일반시책』

도로정비 및 유지관리

□ 도로 및 교량현황

□ 도로 1,078□(국도85.3□,지방도170.6□,군도182.7□, 농어촌도로638.9□ )

□ 교량 111개소(국도 11, 시도 19, 군도 30, 농어촌도 51)

□ 사업내용

□ 소규모 도로시설보수 및 차선도색 등        570백만원

□ KT앞~남산로입구 아스콘 덧씌우기 외 2개소  360백만원

□ 위험교량보수 및 교량 정밀점검 용역 7개소  568백만원

□ 위험도로 구조개선 2개소                   966백만원

□ 추진방침

□ 교통량이 많고 도로 파손이 심한지역 도로 재포장 우선시행

□ 교통사고 위험이 높고 주민불편이 심한도로 보수

□ 위험교량 보수 및 정밀안전진단 용역시행

□ 추진계획

□ 2009. 1.: 동절기 제설작업 및 도로 표지판 일제 정비

□ 2009. 3.: 도로 재포장 및 차선도색 완료

□ 2009. 5.: 도로안전시설 설치 및 소규모 도로복구 완료

□ 2009. 6.: 노후교량 보수, 보강 완료

□ 기대효과

□ 도로 파손지역 긴급복구로 도로시설물 보호

□ 체계적 도로정비 및 교량안전관리로 양질의 교통서비스 제공

『일반시책』

가로등정비 및 유지관리

□ 가로(보안)등 현황 : 12,210등

□ 가로등 2,925등(읍면지역 1,043등, 동지역 1,882등)

□ 보안등 9,285등(읍면지역 7,384등, 동지역 1,901등)

□ 사업내용

□ 고장 가로(보안)등 개보수 3,000등           200백만원

□ 가로(보안)등 신설 및 노후가로등 교체 50등   55백만원

□ 부적합 가로등 개보수 150등                  52백만원

□ 추진방침

□ 주민 통행이 많고 어두운 골목길 우선 정비

□ 가로등 미설치로 교통사고 위험이 높은 지역 신설

□ 추진계획

□ 2009.  1.: 신설 및 노후가로등 현지조사 완료

□ 2009.  3.: 신설 가로(보안)등 설치 완료

□ 2009.  3.: 부적합 가로등 조사 및 보수 완료

□ 2009. 12.: 1월 ~ 12월 고장가로등 개보수 완료

□ 기대효과

□ 가로(보안)등 신속 개 · 보수로 주민생활 편익 제공

□ 시민 생활불편 해소 및 체계적인 유지관리로 안전사고 예방

『신규시책』

가로등 위치 표시사업 추진

□ 위    치 : 나주시 관내 일원

□ 사 업 량 : 표찰부착 2,851개소(가로등)

□ 사 업 비 : 27백만원(시비)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 3.

□ 추진방침

□ 특징적인 지형지물이 없는 도로변 가로등 민원 및 도로민원

발생시 신속처리

□ 현장 위치 식별이 용이하게 사업을 추진 각종 생활민원

발생에 대처

□ 추진계획

□ 2009. 1.~ 2. : 현지조사 완료

□ 2009. 3.: 표찰 제작 설치 완료

□ 기대효과

□ 가로등 유지관리 및 도로 유지관리 효율화.

□ 신속, 정확한 현장 접근으로 생활불편 해소 및 체계적인

유지관리

『계속사업』

군도 확·포장사업

□ 총사업량 : 5개 노선 L=14.92□ B=8.0m

<설계용역> 3개 노선 L=11.60□( 500백만원 )

- 군도 17호선 (세지 동곡~ 세지 동곡) : 2.7 □( 100백만원) /신규

- 군도 18호선 (다도 마산 ~ 다도 마산) : 7.0 □( 300백만원) /신규

- 군도 24호선 (노안 학산∼노안 금동) : 1.9 □( 100백만원) /신규

<공사추진> 2개 노선 L=3.32□( 700백만원 )

- 군도 10호선 (금천 고동∼남평 방축) : 0.22□( 250백만원) /신규

- 군도 11호선 (반남 하촌∼왕곡 신포) : 3.1 □( 450백만원) /계속

□ 사 업 비 : 1,200백만원(2009년)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진실적

□ 실시설계용역 발주 : 4개 노선(군도10, 17, 18, 24호선)

□ 2009년도분 사업 발주 : 1개 노선(군도11호선)

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 설계용역(4개 노선) 및 공사(1개 노선) 착수

□ 2009.  6. : 설계용역 완료(4개 노선)

□ 2009. 12. : 계속사업 공사완료(1개 노선)□ 2009년도분

□ 문제점 및 대책

□ 사업대상지에 대한 소요사업비중 우선 실시설계비를 확보

추진중으로, 설계 완료후 소요사업비(9,975백만원)를 연차별

확보하여 추진코자 함.

『계속사업』

농어촌도로 확·포장사업

□ 사 업 량 : 4개 노선 L=5.29 □, B=8.0m

<공사추진> 2개 노선 L=1.75 □( 700백만원 )

- 금천면 306호선 (이내~원촌) : 1.25□ ( 500백만원) /계속

- 산포면 102호선 (등정~덕례) : 0.50□ ( 200백만원) /신규

<토지보상> 2개 노선 L=3.54 □( 1,000백만원 )

- 왕곡면 205호선 (신원~화정) : 1.48□ ( 500백만원) /신규

- 봉황면 202호선 (옥산~송현) : 2.06□ ( 500백만원) /계속

□ 사 업 비 : 1,700백만원(2009년)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진상황

□ 실시설계용역 발주 : 산포면 102호선

□ 2009년도 공사발주 : 금천면 306호선

□ 토지보상 : 감정평가 및 토지분할 (봉황 202호선, 왕곡 205호선)

□ 추진계획

□ 2009. 1.    : 설계용역(102호선) 및 공사착수(306호선)

□ 2009. 2.~ 5.: 주민설명회 개최 토지보상협의 등

□ 2009. 10.   : 공사 완료 예정(2009년분)

□ 문제점 및 대책

□ 시 재정형편상 소요예산 전액을 일시에 확보할 수 없는 실정

으로, 우선 실시설계 및 토지보상비를 확보 추진하고 있으나

미확보예산(3,350백만원)을 조기확보 추진코자 함.

『계속사업』

농촌마을 종합개발사업

□ 대    상 : 봉황철야, 왕곡, 공산삼한지권역(3개 권역)

□ 사업내용 : 봉황철야권역(마을하수도정비 등 17개 사업)

왕곡권역(마을회관 재건축 등 16개 사업)

공산 삼한지권역(간이상수도 보수 등 15개 사업)

□ 사 업 비 :19,760백만원(철야 6,660, 왕곡 7,000, 삼한지 6,100)

- 2009년 사업비 : 4,655백만원(철야 1,737, 왕곡 1,601, 삼한지 1,317)

□ 사업기간 : 5년(1단계 3년, 2단계 2년)

□ 추진상황

□ 봉황 철야권역 : 사업기간 2007년 ~ 2012년

- 2008. 12. 23. : 1단계 2년차 사업 총괄 발주

- 2008. 12. 26. : 공사 착공

□ 왕곡, 공산 삼한지권역 : 사업기간 2008년 ~ 2013년

- 2008.  4. 14. : 1단계 사업 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

□ 봉황 철야권역

- 2009. 2. : 1단계 3년차 사업 발주

□ 왕곡, 공산 삼한지권역

- 2009. 1. : 1단계 사업 설계 완료

- 2009. 2. : 1단계 2년차 사업 발주

□ 기대효과

□ 농촌의 정주 인프라 구축으로 인구정착 및 유입효과 거양

□ 도시민이 찾고 싶은 공간 조성으로 주민의 소득기반 창출