	2009 주요 업무계획 (도시과)
□ 2009년 추진목표 --------------------------------------------			245
□ 일반시책
□ KPS연수원 등 도시기본계획일부변경용역 -------------			246
□ 도시관리계획 지형도면 작성용역 ------------------------			247
□ 시도23호선 확·포장공사 ---------------------------------			248
□ 나주시 도시경관 기본계획 용역 --------------------------			249
□ 신규시책
□ 개발제한구역 주민지원사업 ----------------------------			250
□ 도시계획도로 개설공사 -------------------------------			251
□ 자전거도로 개설공사 ----------------------------------			252
□ 홍어의거리/영산포등대 주변 경관사업 ----------------			253
□ 2009년 가로경관 개선사업 ------------------------------			254
□ 2009 대한민국 공공디자인 엑스포 전시 출품 --------			255
□ 가로경관 시설물 시범 정비사업 --------------------------			256
□ 계속사업
□ 남평소도읍 육성사업 ------------------------------------			257
□ 개발제한구역 해제관련 학술용역 -----------------------			258
□ 송월지구 도시개발사업 --------------------------------			259
□ 국민임대산업단지 조성공사 ---------------------------			260
□ 나주지방산업단지 폐수종말처리장설치공사 -----------			261
□ 나주지방산업단지 공업용수공급시설공사 --------------			262
□ 남산로연결도로 개설공사 ----------------------------			263
□ 자전거테마파크 조성공사 -----------------------------			264
□ 도시계획도로 개설공사 ---------------------------------			265
□ 나주 공설운동장 건립사업 --------------------------------			266
□ 국민체육센터 및 웨이트트레이닝센터 건립사업 -----			267

	2009년 추진목표
혁신도시와 원도심을 연계한 새로운 인프라 구축으로 성장 원동력과 지역균형 발전도모 각종 도시개발사업 및 도시 얼굴 가꾸기 등 밝고 깨끗한 도시경관 조성으로 우리시 이미지 제고

	추 진 전 략
도시 기반시설 조성 □ 지역균형 발전 도모 도시 가로환경 정비 □ 도시 경관 조성 스포츠테마파크 건립 □ 시민의 건강과 여가 공간 제공

	주요 역점시책
종합스포츠타운 건설 자전거테마파크 조성 국민임대산업단지 조성 아름다운 도시경관 조성 송월지구 도시개발 나주지방산업단지 폐수종말처리장 설치 도시계획도로 개설 남평소도읍 육성

『일반시책』

KPS연수원 등 도시기본계획 일부 변경용역

□ 용역개요

-  KPS연수원(다도면 판촌리)  : 200,000□(시가화예정지)

- 경현유원지 폐지(경현동)    : 386,210□(시설폐지)

- 문화공원 확장(공산면 신곡리): 500,000□(358,800□추가)

□ 용 역 비 : 141백만원

□ 용역기간 : 2009. 1. 6. ~ 2010. 1. 5.

□ 용역회사 : (주)하이콘 엔지어링

□ 추진방침

□ 시가화 예정면적 확보 및 연수원 부지 제공

□ 경현유원지 폐지로 민원발생 및 행위제한 해소

□ 나주영상테마파크 공원 추가 확보

□ 추진계획

□ 2009. 2. : 도시기본계획변경(안)공청회 개최

(공람 공고, 의회 의견청취 등)

□ 2009. 3. : 시 도시계획위원회 자문

□ 2009. 7. : 도시기본계획변경 승인 신청(전남도)

(지방도시계획위원회 결정)

□ 기대효과

□ KPS연수원 건립과 유원지 폐지 등으로 효율적인 토지이용

및 지역경제 활성화 기대

『일반시책』

도시관리계획 지형도면 작성용역

□ 위      치 : 나주시 전역

□ 면      적 : 608□

□ 소요용역비 : 1,045백만원

□ 용역 기간 : 2008. 12. 30. ~ 2010. 12. 29.

□ 추진방침

□ 도시관리계획 사항을 명시한 지적도면 작성

□ 지형도면의 데이터베이스 구축

□ 추진계획

□ 2009.  3. : 지형도면 중간보고

□ 2009.  7. : 지형도면고시 승인신청(도)

□ 2009. 12. : 지형도면고시 및 토지이용계획확인원 발급시행

□ 기대효과

□ 도시관리계획 결정 효력 상실 방지

□ 체계적인 도시계획 관리 및 토지관련 민원 원활

『일반시책』

시도23호선 확·포장공사

□ 위    치 : 나주시 다도면 풍산리 지내

□ 구    간 : 전남도임업시험장 ~ 나주휴튼CC 입구

□ 사업개요 : 연장 1,700 m,  폭 11 m

□ 사 업 비 : 1,394백만원(확보 593, 미확보 801)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 시도 선형개량 및 구조개선

□ 농기계 통행 도로폭 확보

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 관련부서 협의(농지, 산림, 환경, 재해영향평가 등)

□ 2009.  2. : 토지분할측량 및 감정평가자료 작성

(토지, 지장물 조서)

□ 2009.  3. : 공사 발주 및 착공

□ 2009. 12. : 공사 완료

□ 기대효과

□ 주민숙원사업 해결

□ 시도 확포장으로 시민통행 편의제공 및 교통사고 예방

『일반시책』

나주시 도시경관 기본계획용역

□ 나주시 경관자원의 보전 · 관리 및 형성을 위한 총체적인

계획수립으로 새로운 도시 이미지 전환을 통한 삶의 질 향상

□ 위    치 : 나주시 전역(604□)

□ 사 업 비 : 800백만원(시비)

□ 기    간 : 2009. 1. ~ 12.

□ 추진방침

□ 경관권역, 경관축, 경관거점별, 경관중점관리지구 설정

□ 건축물, 오픈스페이스, 공공시설물, 색채, 야간경관

기본계획 수립

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 기본조사 및 용역착수

□ 2009.  2. ~ 9.: 연구개발

□ 2009.  9. : 중간보고회(주민공청회)

□ 2009. 10. ~ 11. : 수정보완

□ 2009. 12. : 용역완료

□ 기대효과

□ 우리시 고유의 개성을 살리는 도시경관창출 및 미관개선으로       지역주민 소득증대 기여

『신규시책』

개발제한구역 주민지원 사업

□ 위    치 : 나주시 남평읍, 노안면, 금천면, 산포면 일원

□ 사업규모 : 농산물집하장 외 5개소

□ 사 업 비 : 1,230백만원(균특 861, 시비 369)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 개발제한구역 내 주민 복지증진 및 농업생산 활동 향상

□ 기계화 경작을 위한 도로개선으로 주민편익제공

□ 소득증대 사업 및 공동이용 시설 우선 시행

□ 추진계획

□ 2009. 1. : 사업대상 확정 및 설계도서 작성

□ 2009. 2. : 공사 착공

□ 2009. 6. : 공사 완료

□ 기대효과

□ 기반시설 정비로 주민 생활편익 증대

□ 개발제한구역으로 소외된 지역 사업지원으로 주민 불편해소

□ 자립형 소득증대 및 주민지원사업을 통한 소득향상 기여

『신규시책』

도시계획도로 개설공사

□ 위    치 : 나주시 영산동, 이창동 지내

□ 사업개요 : 3개소 / L=430m, B=8.0m

- 구 영산동사무소~강변도로 : L=60m B=8m/353백만원

- 영산포터미널옆 도시계획도로 : L=92m B=8m/201백만원

- 영산포제일병원~영산초교 : L=278m B=8m/1,215백만원

□ 사 업 비 : 1,769백만원

□ 사업기간 : 2009. 1. ~  2010. 12.

□ 추진방침

□ 시민의 삶의 질 향상에 적합한 도시개발사업 추진

□ 편리하고 아름다운 거리 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 추진계획

□ 확보된 예산의 범위내에서 연차적으로 사업추진

□ 계획공정대로 차질없이 추진하여 기한내 공사완료

□ 구 영산동사무소 ~ 강변도로, 영산강 선창 복원계획 확정 후 추진

□ 기대효과

□ 시가지 교통체증 해소 및 시민생활 편익제공

□ 도시기반시설 확충으로 지역균형 발전 도모

『신규시책』

자전거도로 개설공사

□ 위    치 : 나주시 교동, 송월동 지내

□ 사업개요 : 2개소/L=2,000m

- 소방서앞 ~ 한수제간 자전거도로 L=1,600m

- 나주역 ~ 흥룡육교간 자전거도로 L=400m

□ 사 업 비 : 1,012백만원

□ 사업기간 : 2009. 1. ~  2009. 12.

□ 추진방침

□ 기존 차도 및 보도와 구분된 자전거전용도로 개설

□ 자전거 이용자 안전성 확보를 위한 명확한 경계 구분

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 실시계획 용역 착수

□ 2009.  3. : 실시설계 완료 및 공사 착공

□ 2009. 10. : 공사 준공

□ 기대효과

□ 도심 교통문제 개선을 위한 수단으로서 자전거이용 활성화

□ 에너지절약, 환경오염방지 등 친환경적인 녹색교통체계 전환

『신규시책』

홍어의거리/영산포등대 주변 경관사업

□ 내    용 : 홍어의 거리 미관조성 및 야간경관조명 정비

□ 위    치 : 홍어의 거리 일원

□ 사 업 비 : 300백만원

□ 기    간 : 2009. 1. ~ 3.

□ 추진방침

□ 홍어의 거리 및 영산포 등대 주변의 경관 시설물정비

□ 외형디자인 및 야간경관 조명정비 등 주변 환경과 통합된

이미지 구축

□ 추진계획

□ 2009. 1. : 기본조사 실시

□ 영산강 선창 복원계획 확정 후 추진

□ 기대효과

□ 쾌적한 주변 환경 조성 및 우리시를 찾는 관광객 수요

증가 기여

『신규시책』

2009년 가로경관 개선사업

□ 내    용 : 각종지주 불법광고물 부착방지 시설물 설치

□ 위    치 : 주요도로변, 시가지

□ 사 업 비 : 200백만원(도비 100, 시비 100)

□ 기    간 : 2009. 6. ~ 10.

□ 추진방침

□ 주요도로변 및 시가지에 있는 지주형 불법광고물

부착 방지시설물을 설치하여 가로경관 정비

□ 부착 방지시설물을 디자인을 우리시의 특성에 맞게 개발

활용 적용

□ 추진계획

□ 2009. 1. : 기본조사 실시 및 디자인(안) 제작

□ 기대효과

□ 도시 미관 개선으로 쾌적한 주변 환경 조성

『신규시책』

2009 대한민국 공공디자인 엑스포 전시 출품

□ 장    소 : 공공디자인 엑스포 전시장

□ 내    용 : 공공디자인 작품 출품 및 전시

□ 시    기 : 2009. 10.

□ 사 업 비 : 42백만원

□ 추진방침

□ 우리시 공공디자인의 대외적인 홍보 및 타시군 사례 활용

□ 우리시 역사문화 및 도시경관조성 알리는 기회로 활용

□ 추진계획

□ 2009.  5. : 출품작품 디자인 시안 제작

□ 2009.  6. ~ 9. : 시설물 모형 및 판넬제작

□ 2009. 10. : 출품작품전시

□ 기대효과

□ 우리시의 경관 및 지역 이미지를 대외적으로 홍보

『신규시책』

가로경관 시설물 시범 정비사업

□ 목    적 : 우리시 관내에 있는 가로시설물을 정비하여

체계화된 도시미관 조성

□ 내    용 : 간판, 버스 승강장, 벤치, 안내판 등 정비

□ 위    치 : 주요 도로변 및 시가지

□ 기    간 : 2009. 1. ~ 6.

□ 사 업 비 : 450백만원

□ 추진방침

□ 주요도로변 및 공공장소에 있는 무질서한 간판(공공용,

상업용) 및 가로시설물을 정비하여 체계적인 도시미관조성

□ 지역적 특성에 맞는 디자인(안)을 제시 □ 시범구간에 설치

□ 추진계획

□ 2009. 1. : 디자인(안) 제작 및 시범 구간 선정

□ 2009. 2. ~ 6.: 제작 및 설치(시범구간)

□ 기대효과

□ 쾌적한 도시미관 및 경관 조성

『계속사업』

남평소도읍 육성사업

□ 위   치 : 나주시 남평읍 소재지 일원

□ 사업내용: 지석강 친수공간 조성 995,500□,

5일시장 활성화 7,600□, 부도심육성 331,027□

시가지정비 1.0Km, 근린공원조성 142,590□

하수관거 정비15.0km

□ 사 업 비: 26,707백만원(국비 9,500, 도비 1,050, 시비 16,157)

□ 사업기간: 2004 ~ 2009(6년간)

□ 추진상황

□ 2007.  1. : 남평 5일 시장 활성화 사업 준공

□ 2007. 10. : 지석천 친수공간 조성사업 1차분 준공

□ 2008.  6. : 지석천 친수공간 조성사업 3차분 준공

□ 2008. 10. : 실개천 정비사업 내 지장물 철거 39동 완료

□ 2008. 11. : 비관리청 하천공사 실시계획변경인가(익산청)

□ 추진계획

□ 2009.  3. : 근린공원조성계획 결정 신청(전라남도)

□ 2009.  6. : 지석천 친수공간

□ 2009. 12. : 실개천정비 완공

□ 문제점 및 대책

□ 예산 미확보액 (7,393백만원) - 추경확보 추진

『계속사업』

개발제한구역 해제관련 학술용역

□ 위    치 : 나주시 개발제한구역(남평, 노안, 금천, 산포)

□ 사 업 량 : 면적 39.56□

□ 용 역 비 : 78백만원

□ 용역기간 : 2007. 12. 27. ~ 2009. 7. 19.

□ 용역기관 : 동신대학교 산학 협력단

□ 추진상황

□ 2008. 5. : 용역계약 체결

□ 2008. 5. : 기초자료 및 현황 조사

□ 2008. 6. : 토지 이용현황 및 환경상태 조사 등

□ 추진계획

□ 2009. 2. : 해제가능지역 법률검토

□ 2009. 3. : 용역 완료

『계속사업』

송월지구 도시개발사업

□ 위    치 : 나주시 송월동 지내(나주역사 전면부)

□ 사업규모 : 택지개발(환지방식) 297,600□

□ 사 업 비 : 29,182백만원

□ 사업기간 : 2006. 1.~ 2009. 12.

□ 종합진도 : 40%

□ 추진상황

□ 2005.  1. : 도시개발구역지정 및 개발계획승인(전라남도)

□ 2006.  1. : 공사착공 및 문화재 시·발굴조사 착수

□ 2008. 11. : 문화재 발굴조사 완료 및 공사시행 승인

(문화재청)

□ 2009.  1. : 단지내 암 발파, 운반 등 토공작업 추진중

□ 추진계획

□ 2009.  8. : 단지조성공사 완료

□ 2009. 12. : 환지처분 등 제반사항 마무리

□ 문제점 및 대책

□ 평택임씨 묘지 2기 이장 불응(7기중 5기는 구정이후 이장협의)

□ 묘지소유자 설득 협의 이장 추진하고 불응할 경우 행정대집행

『계속사업』

국민임대산업단지 조성공사

□ 위    치 : 나주시 동수동, 운곡동 지내

□ 사업규모 : 단지조성 297,521□

□ 사 업 비 : 27,930백만원

(국비 9,520, 지방비 7,809, 융자금 7,808, 임대보증금 2,793)

□ 사업기간 : 2005. 1.~ 2009. 3.

□ 종합진도 : 83%

□ 추진상황

□ 2003.  4. : 국민임대산업단지 지정(국토해양부)

□ 2004.  9. : 실시계획 인가(전라남도)

□ 2005.  1. : 단지 조성공사 착공

□ 2009.  1. : 기반시설 및 단지조성공사 추진중

□ 추진계획

□ 2009.  3. : 순성토, 조경 등 단지조성공사 완료

□ 문제점 및 대책

□ 지방산단 암발파 및 소할 지연으로 순성토 운반 차질

□ 기한내 차질없이 추진될 수 있도록 특단의 조치 강구

『계속사업』

나주지방산업단지 폐수종말처리장설치공사

□ 위    치 : 나주시 동수동 지내(국민임대산단 내)

□ 사업규모 : 처리용량 2,400□/일(1단계 1,200□/일)

부지면적 9,400□  방류관로(250m/m)L=2.5□

□ 사 업 비 : 14,055백만원(1단계 7,867백만원) - 국비

□ 사업기간 : 2007. 1.~ 2011. 12.(1단계 2007.~ 2009.)

□ 종합진도 : 33%

□ 추진현황

□ 2006.  3. : 폐수종말처리장 기본계획 승인(환경부)

□ 2008.  7. : 1단계 공사 착공

□ 2008. 12. : 처리시설동(지하시설물) 설치 완료

□ 2009.  1. : 관리동 건축공사 추진중

□ 추진계획

□ 2009. 12. : 1단계 공사 완료

□ 2011. 12. : 2단계 공사 완료

『계속사업』

나주지방산업단지 공업용수공급시설공사

□ 위    치 : 다시면 ~ 운곡동(주암댐 광역상수도 관로연결)

□ 사업규모 : 송수관(D600m/m) 매설 L=11.0km

배수지(7,000□/일) 1개소 설치

□ 사 업 비 : 12,845백만원(국비)

□ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2010. 12.

□ 추진현황

□ 2008.  4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 2008. 10. : 미래산단 포함 공급시설 추진 승인(국토해양부)

□ 2009.  1. : 실시설계 용역 기술심의 요청(전라남도)

□ 추진계획

□ 2009.  2. : 건설기술심의, 계약심의 및 공사 착공

□ 2010.  2. : 공사 준공

『계속사업』

남산로 연결도로 개설공사

□ 위    치 : 나주시 성북동 지내(국도1호선~남외동 과선교)

□ 사 업 량 : L=1,200m  B=16~25m

□ 사 업 비 : 20,000백만원 (교부세 12,000, 시비 8,000)

□ 사업기간 : 2005. 1. ~ 2009. 12.

□ 종합진도 : 78%

□ 추진현황

□ 2006.  3. : 공사 착공

□ 2008.  2. : 국도1호선~삼성(아) 확·포장 완료(470m)

□ 2008.  7. : 삼성(아)~구 나주역사 확·포장 완료(530m)

□ 추진계획

□ 2009.  3. : 국도1호선~나주역사 구간 부대공사 마무리

□ 2009. 12. : 잔여구간 사업비 추경예산 확보 공사추진

(구 나주역~과선교 200m, 국도1호선변 240m)

『계속사업』

자전거 테마파크 조성공사

□ 위    치 : 나주시 송월· 영강동 지내(흥룡육교~구진포터널)

□ 사 업 량 : L=3,606m(철도 폐선부지)

- 자전거 · 인라인도로, 산책로, 분수대, 소공원 조성

- 구진포도로 확 · 포장(L=2,590m)

- 안영교 재가설(L=15m)

□ 사 업 비 : 10,598백만원(국비 330, 교부세 1,700, 시비 8,568)

□ 사업기간 : 2004. 9. ~ 2009. 6.

□ 종합진도 : 75%

□ 추진현황

□ 2004.  9. : 공사 착공

□ 2008.  2. : 구진포도로 확·포장 완료

□ 2008. 10. : 안영교 재가설 완료

□ 2008. 11. : 흥룡육교~택촌마을 구간(L=1,471m) 조성 완료

□ 2009.  1. : 택촌마을~구진포 구간 조성중

□ 추진계획

□ 2009.  6. : 택촌마을 ~ 구진포 구간(L=2,135m) 조성 완료

『계속사업』

도시계획도로 개설공사

□ 사업개요 : 7개소/ L=3,495m  B=8~25m

- 남평오거리~남평초교 : L=640m B=25m/3,931백만원

- 토계동 도시계획도로 : L=350m  B=8m/2,414백만원

- 현대(아)~성북주공(아) : L=60m  B=8m/524백만원

- 영산포국민은행~구터미널 : L=480m  B=12m/2,036백만원

- 전남과학고 진입로 : L=484m  B=8m/1,027백만원

- 현대(아)~원협공판장 : L=981m  B=8~12m/1,878백만원

- 동아약국~터미널간 지중화 : L=500m  B=12m/2,204백만원

□ 사업비 : 14,014백만원(시비)

□ 사업기간 : 2008. 1 ~  2010. 12

□ 추진현황

□ 공사시행중 : 2건(현대(아)~성북(아), 남평오거리~남평초교)

□ 공사발주중 : 3건(토계동, 전남과학고, 현대(아)~원협공판장)

□ 지중화관련사업 한전 등 관련기관과 협의 중 : 2건

(영산포 국민은행 ~ 구터미널, 동아약국 ~ 나주터미널)

□ 추진계획

□ 시행중이거나 발주중인사업 예정공정대로 차질없이 추진

□ 지중화 관련사업 조기 협의완료 후 착공

『계속사업』

나주 공설운동장 건립사업

□ 위    치 : 나주시 송월동 1078-2번지 일원(신역사 후면부)

□ 규    모 : 부지조성 179,425□

□ 사업기간 : 2008. 10 ~ 2010. 10.

《공설운동장》

- 사업개요 : 주경기장 35,398□(수용인원 10,000명), 건축면적

3,739□(연면적6,712□), 육상트랙 400m 8레인

- 사 업 비 : 36,024백만원

《생활체육공원조성》

- 사업개요 : 농구장외 5종경기장 설치

- 사 업 비 : 2,000백만원

□ 추진상황

□ 2008. 10 : 공설운동장 공사 착수

□ 2008. 11 : 공설운동장 전면책임감리 선정

□ 2009.  1 : 공설운동장 2차분 및 전기□통신□소방 발주

□ 추진계획

□ 2009.  3 : 공설운동장 부지조성(토목)완료 및 주경기장 착수

□ 2010. 10 : 공설운동장 완공

『계속사업』

국민체육센터 및 웨이트트레이닝센터 건립

□ 위    치 : 나주시 송월동 1078-2번지 일원(신역사 후면부)

□ 부지면적 : 9,830□(연면적 11,511□)

《국민체육센터》연면적 3,690□, 지하2층, 지상3층

- 사업개요 : 생활체육관 270석, 수영장(L=25m, 6레인),

- 사 업 비 : 6,000백만원

《선수합숙소 및 웨이트트레이닝센터》연면적 2,869□, 지상4층

- 사업개요 : 선수합숙소37실(2인1실), 웨이트트레이닝장 1식

- 사 업 비 : 9,500백만원

《다목적체육관》연면적 4,952□, 지하1층, 지상3층

- 사업개요 : 다목적체육관 1,658석

- 사 업 비 : 18,425백만원

□ 추진상황

□ 2008.  1 : 건축설계경기(현상설계) 공모

□ 2008.  4 : 건축설계경기 당선작 선정 및 실시설계용역 착수

□ 2008. 10 : 전라남도 지방건설기술심의 완료

□ 2008. 12 : 나주시 건축심의위원회심의 완료

□ 2008. 12 : 실시설계용역 완료 및 공사 계약 의뢰

□ 추진계획

□ 2009.  1 : 사업 착수

□ 2009.  6 : 국민체육센터 완공

□ 2009. 12 : 선수합숙소 및 웨이트트레이닝센터 완공

□ 2010. 12 : 다목적체육관 완공