	2009 주요 업무계획 (재난관리과)
□ 2009년 추진목표 -------------------------------------------			310
□ 일반시책
□ 민방위 교육 훈련 및 비상대비 자원관리 -------------			311
□ 재난대비 상황관리 유지 ------------------------------------			312
□ 재해위험지구 정비사업 추진 -----------------------------			313
□ 지방하천 하도준설사업 ------------------------------------			314
□ 소하천 정비사업 ----------------------------------------------			315
□ 지방하천 배수문 전동화 사업 -----------------------------			316
□ 하천 재해예방 및 기성제정비사업 ----------------------			317
□ 안전문화운동 정착 생활화 --------------------------------			318
□ 계속사업
□ 장림 재해위험지구정비사업 추진 ------------------------			319

	2009년 추진목표
재해사전대비 태세 확립으로 인명 및 재산피해 최소화 안보의식 함양과 재난발생시 신속한 동원태세 확립

	추 진 전 략
재해발생시 신속한 복구추진으로 2차 피해 발생 예방 비상대비 및 인력동원자원 관리 강화 특정관리대상시설 사전 점검으로 안전사고 미연 방지

	주요 역점시책
민방위 훈련 및 비상대비 자원관리 강화 재해위험지구 정비사업 지속 추진 지방하천 하도준설 및 소하천 정비 사업 추진 5개년 계획에 의한 지방하천 배수문 전동화사업 추진 배수펌프장 및 배수문 일제 점검정비로 재해 사전예방 안전문화운동 정착 생활화

『일반시책』

민방위 교육 훈련 및 비상대비 자원관리

□ 민방위대 신규 편성 및 교육 훈련의 내실화

□ 안보의식 함양과 재난발생의 신속한 동원태세 확립

□ 사업방침

□ 전시, 국가 비상사태대비 완벽한 자원관리 및 상시 준비태세 확립

□ 각종 재난의 예방 및 대처요령 습득으로 안전의식 함양

□ 추진계획

□ 민방위 대원 교육 : 연중

- 민방위대 편입 1 ~ 4년차 대원 연간 4시간

□ 민방위 훈련 : 2월 ~ 11월

- 민방공 대피훈련, 방재훈련, 생활민방위 시범훈련,

비상소집훈련, 테러종합 훈련 등

□ 2009년 을지연습 실시 : 2009. 8월중 20개 기관단체 1,000여명

□ 2009년 민방위대 창설 제34주년 기념행사 : 2009. 9월중

□ 인력동원 자원관리

- 중점관리자원 확인의 날 행사 개최 : 업체, 군부대 등

변동자원정리(5 ·10월 □ 연 2회)

□ 기대효과

□ 비상사태 대비의 완벽한 관리로 상시준비 태세 확립

□ 각종 재난재해대비 체감교육 및 생활 민방위 교육 강화

『일반시책』

재난대비 상황관리 유지

□ 재해로부터 신속한 대응태세 확립으로 시민의 생명과 재산 보호

□ 여름철 풍수해에 대비한 재난종합상황 관리 강화

□ 추진계획

□ 재난종합상황실 상시 운영

- 기    간 : 2009. 1. 1 ~ 12. 31(연중)

- 장    소 : 재난종합상황실

- 내    용 : 자연□인적재난 사고의 예방, 국가기반체계보호 상황관리

- 근무방법 : 2인 1조(주간 : 재난관리과, 야간 : 당직실)

□ 재해대책상황실 운영(재해기간)

- 기    간 : 2009. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)

- 장    소 : 재난종합상황실

- 내    용

· 재난 예□경보 시스템 운영

· 재난특보 사항 및 행동요령에 대한 신속한 전파

· 재해발생시 응급조치 및 재난복구 계획수립

□ 기대효과

□ 재난 사전대비 태세 확립으로 인명 및 재산 피해 최소화

□ 한 단계 빠른 체계적이고 과학적인 자연재난 대책 추진

『일반시책』

재해위험지구 정비사업 추진

□ 위    치 : 나주시 산포면 내기리일원

□ 사업내용 : 배수펌프장1개소, 배수관로2.5km

□ 총사업비 : 8,000백만원(국비 4,800, 시비 3,200)

□ 사업기간 : 2009. 1.  ~ 2012. 12.(4개년)

□ 추진방침

□ 지석천 수위 상승으로 산포천의 내수가 배제되지 않아

가옥 및 농경지 침수 피해 예상

□ 기존 배수장 펌프장이 산포천 정비로 인하여 집중 호우시        배수 처리 용량 부족으로 펌프장 설치가 필요

□ 추진계획

□ 2009. 1 현재 : 기본 및 실시설계 용역 발주(PQ심사중)

□ 2009. 2 : 기본 및 실시설계 착수

□ 2009. 7 : 기본 및 실시설계 완료

□ 2009. 8 : 편입용지 보상

□ 기대효과

□ 산포천 내수 배제로 인하여 가옥 및 농경지 침수 보호

『일반시책』

지방하천 하도준설사업

【 현   황 】

□ 지방2급하천 : 28개천(기본계획수립 27, 미수립 1), L= 172.95□

□ 정비사업 중기계획 : 12개천, L= 78.72□, 사업비 27,120백만원

□'08년까지 실적: 6개천(18개소), L= 13.4□(투자비 11,883백만원)

【 2009년 사업계획 】

□ 사 업 량 : 3개소, L= 2.2□

- 감정천(노안) L= 0.7□(483)  - 영산천(봉황) L= 0.5□(317)

- 만봉천(봉황) L= 1.0□(183)

□ 사업내용 : 퇴적토 준설, 제방 보축 및 호안, 시설물 정비

□ 사 업 비 : 983백만원(국비 590, 시비 393)

□ 사업기간 : 2009. 1.  ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 치수기능 강화 및 자연경관과 조화된 친환경적 사업시행

□ 하상 퇴적토 준설 등 통수단면 확대로 농경지 침수 예방

□ 추진계획

□ 2009. 1 현재 : 실시설계용역 착수 설계중(3개소)

□ 2009. 3 : 실시설계 용역 완료와 동시 공사 착공

□ 2009. 6 : 공사 준공

□ 기대효과

□ 생태계보전 등 자연형 친수공간 확보로 시민 정서함양 도모

『일반시책』

소하천 정비사업

【 현    황 】

□ 소하천 : 151개천, L= 210.29□(정비종합계획수립 완료)

□ 2008년까지 정비실적 : L= 84.70□(개수율 40.3%)

【 2009년 사업계획 】

□ 사 업 량 : 5개소, L= 3.2□

- 월천천(왕곡) L= 0.7□(600)  - 백사1천(공산) L= 0.61□(600)

- 노안2천(노안) L= 0.55□(423)  - 운곡천(봉황) L= 0.5□(472)

- 우산천(영산) L= 0.84km(517)

□ 사업내용 : 제방 및 호반, 시설물등 개보수, 퇴적토 준설 등

□ 사 업 비 : 2,612백만원(국비 1,380, 시비 1,232)

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 소하천정비종합계획에 의한 자연경관과 조화된 체계적이고

다목적 기능의 하천정비

□ 수해가 반복 또는 예상되는 소하천의 수해발생원인 사전제거

□ 추진계획

□ 2009.  1 현재 : 실시설계용역 중(주민설명회 완료)

□ 2009.  2 : 실시설계 완료와 동시 공사착공

□ 2009. 12 : 공사 준공

□ 기대효과

□ 수해재발 방지와 재해사전예방으로 인명 및 시민의 재산 보호

『일반시책』

지방하천 배수문 전동화사업

【 총    괄 】

□ 관리대상 배수문 : 153개소(전동 56, 자동 52, 수동 45)

□ 사 업 량 : 26개소, 전남도 5개년 계획(문비 규모 2□이상)

□ 총사업비 : 4,280백만원〔도기금 3,424, 시기금 856〕

□ 사업기간 : 2005. 3. ~ 2009. 12.

□ 2008년까지 정비실적 : 19개소, 투자비 3,000백만원

【 2009년 사업계획 】

□ 사 업 량 : 8개소(전남도 5개년 전동화사업 마무리해)

□ 사 업 비 : 1,280백만원(도기금 1,024,  시기금 256)

□ 사업기간 : 2009. 4. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 전남도 배수문전동화사업 5개년계획에 의거 사업시행

□ 수동식중 시설노후, 고장이 잦은 배수문 위주로 시설개선

□ 추진계획

□ 현재까지 전라남도 사업계획 확정 통보 없음(9월 확정 예정)

□ 전라남도 사업계획 확정 통보 즉시 자체 설계 공사 발주

□ 기대효과

□ 집중호우시 원활한 배수조절기능 강화로 재해피해 사전예방

□ 배수문 개폐시간 단축으로 재해상황 발생즉시 신속대처

『일반시책』

하천 재해예방 및 기성제정비사업

【 현    황 】

□ 하천 연장 : 182개천, L= 461.74□

· 국가(3) 78.5 / 지방2급(28) 172.95 / 소하천(151) 210.29

□ 사업내용 : 퇴적토 준설(수목제거) 및 기성제 · 노후 배수시설물 정비

【 2009년 사업계획 】

□ 사 업 량 : 3건/18개소

- 퇴적토 준설 : 3개소, L= 3.0□(15백만원)

- 기성제 정비 : 5건(40백만원)

- 노후 배수시설 보수 등 : 10개소(91백만원)

□ 사업기간 : 2009. 1.  ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 퇴적토 준설 및 유수소통 장애요인 제거로 홍수소통능력 증대

□ 재해위험요인 내제한 기성제 및 배수시설물 일제 정비

□ 추진계획

□ 2009.  1 : 사업추진계획 수립 및 자체설계 완료

□ 2009.  2 : 설계 완료와 동시 공사착공

□ 2009.  5월 재해기이전 : 사업 완료

□ 기대효과

□ 하천범람 및 농경지 침수피해 등 재해사전예방으로 인명과       시민의 재산 보호

『일반시책』

안전문화운동 정착 생활화

□ 재난사고가 상존하는 특정관리대상 시설 및 재난위험시설

물의 안전점검으로 재난사고 사전예방

□ 안전문화운동 정착을 위한 홍보 강화로 시민 안전문화 의식

고취

□ 추진방침

□ 각종 캠페인을 통한 안전문화운동 정착으로 재난사고 사전예방

□ 시설물의 상시 점검으로 긴급 상황발생시 대처능력 향상

□ 추진계획

□ 안전점검의 날 운영 : 12회(매월 4일)

□ 특정관리대상시설물 안전점검 실시 : 2회(118개소)

□ 명절 연휴대비 다중이용시설 안전점검 실시 : 2회(16개소)

□ 해빙기 및 장마철 대비 및 시기별 안전점검 실시 : 4회(25개소)

□ 재난취약가구 전기안전점검 및 노후시설 정비 : 410가구

□ 유선사업장 안전관리 및 지도 점검 : 12회(매월 1회)

□ 기대효과

□ 위험요인의 사전 정비로 재난없는 안전문화 정착

『계속사업』

장림 재해위험지구 정비사업 추진

□ 위    치 : 나주시 노안면 금동리 ~ 학산리

□ 사업내용 : 교량 4개소, 하상정비 4.0km, 도로 확포장 1.2km

- 2008년 추진(공사중) □ 위험지구 추가지정지역

· 사업내용 : 교량 1개소, 접속도로 0.4km

□ 사 업 비 : 12,912백만원

(국비 9,601, 도비 195, 시비 3,116)

□ 사업기간 : 2005. 1. 6 ~ 2009. 12. 30

□ 추진상황

□ 교량 3개소, 하상정비 4.0km, 도로 확·포장 1.2km(완료)

□ 2008. 12. 30 : 공사 착공

□ 추진계획

□ 2009.  1 : 가설도로 공사 추진

□ 2009. 12 : 공사 준공