	2009 주요 업무계획 (상하수도과)
□ 2009년 추진 목표 ----------------------------------------			322
□ 일반 시책
□ 상수도 급수 보급지역 확대 추진 -----------------------			323
□ 수도정비 기본계획 재정비 추진 -----------------			324
□ 농촌지역 맑은물 공급사업 추진 -----------------			325
□ 유입하수의 처리공정별 적정 관리 -----------------			326
□ 나주시하수도정비 기본계획 변경 ------------------			327
□ 신규 시책
□ 수질원격감시체계(TMS) 운영 위탁 관리 ----------			328
□ 나주공공하수처리장 여과기 설치 -------------------			329
□ 가축분뇨공공처리장 개량사업 추진 -------------------			330
□ 계속 사업
□ 봉황지구 광역상수도 확장사업 추진 ----------------			331
□ 하수처리구역 하수관거 정비사업 추진 ---------------			332
□ 하수관거정비 BTL사업 추진 ----------------------------			333
□ 마을하수도 정비사업 추진 ----------------------------			334
□ 하수찌꺼기 처리시설 설치 -----------------------------			335
□ 분뇨처리장 고도처리 시설공사 --------------------------			336

	2009년 추진목표
급수보급 확대 및 맑은물 안정적 공급으로 주민 삶의질 향상 유수율 제고를 통한 생산원가 절감 및 수자원의 효율적 이용 유입하수의 적정처리로 방류수수질기준 및 영산강수질보전에 기여

	추 진 전 략
효율적·체계적인 시설관리 □ 지방상수도 운영 효율화사업 지도감독 철저 유입하수, 연계처리수 처리 공정별 수질분석 강화 □ 설비 조작 운행 적정 도모 국고보조사업 조기착공 및 예산집행율 인센티브 적극 활용 □ 사업전년도에 제반 설계완료

	주요 역점시책
상수도 급수 보급지역 확대 추진 농촌지역 맑은 물 공급사업 추진 방류수 수질향상을 위한 공공하수처리장 여과기 설치 하수관거정비 BTL사업 추진 하수찌꺼기 처리시설 설치 분뇨처리장 고도처리 시설공사

『일반시책』

상수도 급수 보급지역 확대 추진

□ 급수 보급현황 : 관로 총연장 438.9km, 급수수용가 10,350전

□ 사업내용

· 신규 급·배수관 확장 : L = 22.2km(광역 15.0km,지방7.2km)

· 신규 급수전 : 1,300전(광역 1,000전, 지방 300전)

□ 사업비 : 2,464백만원(신규 급·배수관 확장1,554, 신규급수전910)

□ 추진방침

□ 물 부족 마을 및 지하수 오염지역 우선 시행

□ 수도정비 기본계획에 의하여 미 급수 지역인 농촌지역에 우선 공급

□ 추진계획

□ 광역·지방 상수도 구역 구분

- 광역 상수도 : 남평, 산포, 금천, 노안, 송월 배수지구(동지역)

- 지방 상수도 : 다시, 문평 배수지구

□ 신규 급·배수관 확장사업 추진

- 2009. 1. ~ 2009. 6. 30.

□ 신규 급수전 설치

- 연중 : 수용가 신청 즉시 사업시행(대행업체)

□ 기대효과

□ 맑은 물의 안정적인 공급으로 급수불편 해소 및 시민복지 향상

『일반시책』

수도정비 기본계획 재정비 추진

□ 상수도 시설현황

· 송·배수시설 용량 26,000톤(광역) 취·정수시설 1,600톤(지방)

· 송수관로 6.3□,  배수관로 432.6□

· 소규모 수도시설 230개소(마을 상수도 161, 소규모 급수시설 69)

□ 계획 인구 : 150,000명

(2016년 추정 □ 상위계획인 도시기본계획 반영)

□ 계획년도 : 2009 ~ 2029(20년)

□ 용역기간 : 2008. 3.~ 2009. 3.(1년) □ 현 공정 84%

□ 추진방침

□ 혁신도시 건설, 농촌지역의 지하수 오염 등에 따른 용수의       효율적 이용

□ 시설물의 원활한 유지관리 및 체계적인 상수도 운영관리

□ 추진계획

□ 2009. 1. ~ 3. : 수도정비 기본계획 재정비 용역완료

□ 기대효과

□ 급수체계의 운영방식 전환으로 지역간 용수공급 균형유지

□ 항구적인 용수수급 대책 수립과 체계적인 시설확충 기대

『일반시책』

농촌지역 맑은 물 공급사업 추진

□ 농촌 농업 생활용수 개발

· 대    상 : 문평 북동 상하지구

· 사업내용 : 관정개발, 관로매설, 급수전 설치, 이용시설 1식

· 사 업 비 : 165백만원

□ 소규모 수도시설 개량 및 사후관리, 긴급보수

· 사업내용 : 노후관 교체, 소독시설 개량, 물탱크 개량, 지하수 개발

· 사 업 비 : 1,158백만원(국비 250, 시비 908)

□ 추진방침

□ 식수부족과 수질오염 등으로 고통을 겪고 있는 지역 최우선 시행

□ 농촌 생활용수 개발 및 마을 상수도 시설 개량으로 농촌

지역 맑은 물 공급

□ 추진계획

□ 농촌 농업 생활용수 개발

- 2009. 2. : 농촌 농업 생활용수 실시설계 용역

- 2009. 6. : 사업 착공 및 준공

□ 소규모 수도시설 개량 및 사후관리, 긴급보수

- 2009. 2. : 소규모 수도시설 개량사업 실시설계 용역

- 2009. 6. : 사업 착공 및 완료

- 사후관리 및 긴급보수 : 수시

□ 기대효과

□ 소외된 농촌지역 주민의 상대적 박탈감 해소 및 삶의질 향상

『일반시책』

유입하수의 처리공정별 적정 관리

유입하수에 대한 처리 공정별 수질분석 강화 및 시설물 통합

관리를 통한 방류수 수질기준 준수로 영산강 환경 보전에 기여

□ 추진방침

□ 유입하수의 효율적인 처리 및 관리를 통한 방류수 수질기준 준수

□ 수질관리를 위한 수질검사 기초자료 확보 및 결과 분석

□ 추진계획

□ 유입 하수에 대한 처리 공정별 수질분석

- 실험항목 : BOD포함 6개 항목(COD, SS, T-N, T-P, 대장균군수)

- 실험주기

· 일일 실험 : 유입수 및 방류수(운곡, 산포, 공산)

· 주간 실험 : 연계 처리수(분뇨, 가축분뇨, 침출수)

· 월간 실험 : 마을 하수도 유입·방류수(29개 지구)

□ 연계수의 처리 공정별 세분화 분석으로 오염 부하량의 적정관리

- 분뇨, 가축분뇨, 침출수 원수 및 액상부식조 주기적 분석

□ 수질검사 결과분석을 통한 효율적인 하수처리 공정 관리

□ 수질 원격 감시 체계(TMS) 관리 : 측정항목 5개 항목

□ 기대효과

□ 수질검사 결과분석을 적용한 효율적인 수처리 공정관리로

처리 효율 상승 및 운영비 절감 도모

『일반시책』

나주시 하수도 정비 기본계획 변경

□ 사업 개요

- 하수도 정비 기본계획 변경 : 나주시 전역(A=604.07□)

- 공공하수도대장 작성 : 6.3□(마을하수도 29개소 포함)

- 산포 하수관거정비 기본 및 실시설계(L= 10.614□, 배수설비 782가구)

□ 총 용역비 : 1,350백만원(2008년 150백만원)

□ 용역 회사 : (주)동화종합건설, (유)신오건설NG)

□ 용역 기간 : 2008. 12. ~ 2009. 12.

□ 추진방침

□ 하수도법 제6조에 의거 하수도 정비 기본계획을 변경수립

□ 공공 하수처리장이 설치된 산포 처리구역의 기본 및 실시설계

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 용역계약 및 착공(2차분)

□ 2009.  4. : 주민 설명회 및 관련기관 협의

□ 2009.  6. : 환경부 및 전라남도 기본계획 협의

□ 2009. 10. : 용역 준공

□ 기대효과

□ 하수도 정비 기본계획 수립 하수도 기본 방향 정립

□ 산포지역 하수관거 정비 수질오염 예방 및 건강 증진

『신규시책』

수질 원격 감시체계(TMS) 운영 위탁 관리

□ 공공하수처리시설의 방류수질을 실시간 관리·점검하는 수질

원격감시체계(TMS)의 유지관리를 수질관리 전문업체에 위탁

□ 시스템 운영의 신뢰성 및 안정성 확보

□ 추진방침

□ 수질 원격 감시체계의 안정성과 측정값의 신뢰성 확보

□ 시스템 정비 및 운영관리에 대한 신속성과 전문성 확보

□ 추진계획

□ 대상 시설 : 나주 및 산포 공공 하수 처리시설 TMS(2개소)

□ 위탁 내용

- 시설장비 유지관리

- 계측장비 수선 및 교체

- 시스템 관리 및 운영에 필요한 사항

□ 위탁 업체 : 수질관리 전문업체

□ 위탁 운영비 : 48백만원(1개소/ 24백만원)

□ 기대효과

□ 시스템 운영과 수질자료에 대한 신뢰성 및 안정성 확보

□ 시설장비 및 계측장비의 효율적인 운영관리

『신규시책』

나주공공하수처리장 여과기 설치

□ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2009. 9.

□ 위    치 : 나주 공공 하수처리장내(자외선 소독조 전단계)

□ 사 업 량 : 1식(22,500□/일)

□ 사 업 비 : 1,000백만원

□ 설치시설 : 여과시설, 브로워, 콤프레셔, 배관, 전기공사등 12종

□ 추진방침

□ 수질원격 감시체계(TMS)가 본격 실시됨에 따라 공공하수처리장       방류수질 향상 및 준수를 위한 사전 시설보완

□ 난분해성 물질과 부유물질 처리효율 개선, 안정적인 방류

수질이 확보될 수 있도록 최우선 시행

□ 추진계획

□ 2009. 1. ~ 2009. 3. : 자료수집 및 분석·검토

□ 2009. 1. : 실시설계 용역 착수

□ 2009. 4. : 실시설계 용역 완료

□ 2009. 5. : 공사 착공

□ 2009. 9. : 공사 준공

□ 기대효과

□ 2010년 오염총량 관리계획의 수질 오염부하량에 대한 대비

□ 분뇨□가축분뇨 등 난분해성 물질과 부유물질의 처리효율개선

□ 공공하수처리장의 안정적 방류 수질 확보로 영산강 수질개선 기여

『신규시책』

가축분뇨 공공처리장 개량사업 추진

□ 사업내용 : 3차 처리시설(침전조, 여과장치 등)

□ 추정사업비 : 3,000백만원

- 2009년 : 기본 및 실시설계 용역비 150백만원

□ 사업기간 : 2009. ~ 2010.

□ 추진방침

□ 가축분뇨 공공처리장에 3차 처리시설을 설치하여 연계처리

수질 기준 준수

□ 공공 하수처리장 운영 효율화 도모

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 기본 및 실시설계용역 발주

□ 2009.  5. : 기본 계획 수립

□ 2009.  5. : 가축분뇨 공공처리장 변경승인 신청(환경부)

□ 2009.  8. : 변경승인 완료(예정)

□ 2009. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

□ 기대효과

□ 효율적인 가축분뇨처리로 연계수 수질기준 준수 및 영산강

수질오염 방지

□ 시설 개량으로 안정적인 가축분뇨 처리 여건 조성

『계속사업』

봉황지구 광역상수도 확장사업 추진

□ 사업 범위 : 나주시 봉황면 전지역, 다도·세지면 일부지역

□ 사업 내용 : 배수지 1개소, 송·배수관로 63km (D=80~300mm)

□ 총 사업비 : 10,000백만원(국비 80%, 시비 20%)

- 2009년 : 1,125백만원(국비 900, 시비 225)

□ 사업 기간 : 2008년 ~ 2012년(5개년)

□ 추진방침

□ 농촌주민에게 안전하고 깨끗한 먹는물 공급

□ 지하수 오염 및 고갈된 농촌지역 생활용수 해결

□ 추진계획

□ 2009.  2. : 실시 설계 완료

□ 2009.  3. : 공사 착공

□ 2012. 12. : 공사 준공 예정

□ 2013.  4. : 수돗물 급수개시(수용가 신청)

□ 기대효과

□ 맑은 물의 안정적인 공급으로 공중 위생향상과 생활환경

개선 등 시민복지 향상기여

『계속사업』

하수처리구역 하수관거 정비사업 추진

□ 대상지역 : 나주·산포·공산처리장 하수처리구역

□ 사업내용 : 하수관거 정비(L=41.3□), 배수설비(1,618가구)

□ 사 업 비 : 28,494백만원(국비 70%, 시비 30%)

- 2008년 까지 : 22,325백만원

- 2009년 계획 :  2,729백만원

- 2010년 이후 :  3,440백만원

□ 사업기간 : 2006. 2. ∼ 2010. 12.(종합진도 70%)

□ 시공회사 : 진흥기업(주), 새천년종합건설(주)

□ 감리회사 : (주)도화기술공사, (유)신오건설엔지니어링

□ 추진상황

□ 2008. 10. : 하수관거 정비공사 2, 3차분 준공(L=11.9□)

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 2009년 공사 착공(4차분) : 2,729백만원

□ 2010.  1. : 2010년 예산 공사 착공(5차분)

□ 2010. 10. : 하수관거 정비공사 준공

□ 기대효과

□ 관거정비로 인한 유입수질 확보로 하수처리장 처리효율 증대

□ 분류식 하수관거 정비로 정화조시설 설치의무 면제, 주민

경제적 부담 해소

『계속사업』

하수 관거정비 BTL사업 추진

□ 대상지역 : 나주 중부 및 남부 하수 처리구역

□ 사업내용 : 하수관거 정비(L=83□), 배수설비(3,660가구)

□ 사 업 비 : 62,080백만원(국비 43,456, 시비 18,624)

□ 민간사업자 사업비 선투자, 사업 준공후 20년간 균등상환

□ 사업기간 : 2009. 5. ~ 2012. 6.(37개월)

□ 우선협상대상자 : (가칭)남양나주씨앤지(주)

□ 추진방침

□ 민간 투자법에 의한 민간사업 추진 사회기반시설 확충

□ 건설 및 유지관리에 민간의 창의성과 경영기법 도입

□ 추진계획

□ 2009. 2. : 실시 협약 체결

□ 2009. 3. : 실시설계 심의(전라남도 건설심의) 및 승인

□ 2009. 5. : 공사 착공

□ 2012. 6. : 공사 준공 및 시공업체 운영관리(20년간)

□ 기대효과

□ 민간자본과 기술력을 활용 단기간에 하수관거를 정비

□ 공공하수처리장 유입수질 제고 및 관리 효율화로 방류수질 개선

『계속사업』

마을 하수도 정비사업 추진

□ 사 업 량 : 5개소(2009년 신규2, 2007년 · 2008년 계속사업 3)

- 2009년 신규설치(2개소) : 2,857백만원(동강 중앙 2,357,

동강 연화 500) □ 2009년 814백만원 확보

- 2007년 · 2008년 계속지구(3개소)

· 2007년지구(1) : 세지 동창

· 2008년지구(2) : 봉황 신석, 다시 청정

□ 사 업 비 : 5,280백만원(국비 70%, 시비 30%)

- 2008년 기확보 : 2,436백만원

- 2009년 확보   : 2,844백만원

□ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2010. 12.

□ 추진방침

□ 환경기초시설 확충으로 농촌지역 자연마을 생활환경 개선

□ 공공수역의 수질개선을 통한 환경오염 방지

□ 추진계획

□ 2009.  3. : 2009년 신규지구 공사 착공(동강 중앙, 동강 연화)

□ 2009. 10. : 2007년 계속지구 준공(세지, 동창)

□ 2009. 12. : 2008년 계속지구 준공(봉황 신석, 다시 청정)

□ 2009. 12. : 2009년 신규지구 1차분 준공(동강 중앙, 동강 연화)

□ 기대효과

□ 마을하수도 설치로 지하수·하천 및 토양오염 방지

□ 수질오염 저감 및 악취제거로 주민위생 및 주거환경 개선

『계속사업』

하수 찌꺼기 처리시설 사업

□ 슬러지 직매립 금지 이후 해양투기로 전환 처리하고 있으나

런던 협약에 의거 2011년 이후 해양투기 금지되어 우리시

자체 처리방안 강구

□ 하수찌꺼기 쓰레기 매립장 복토재 등으로 자원 재활용

□ 추진상황

□ 2008.  6. : 총 사업비 변경승인(3,801백만원 □ 3,539백만원)

□ 2008.  9. : 전라남도 계약심사 완료

□ 2008. 10. : 전라남도 폐기물 시설 설치신고 완료

□ 2008. 10. : 공사발주 의뢰(토목, 건축, 기계부분)

□ 2008. 10. : 관급자재 조달 의뢰

□ 2008. 11. : 공사 감리업체 선정완료 - (주)에스비기업

□ 2008. 11. : 도급공사 입찰 및 개찰

□ 2008. 11. : 공사 착공(토목, 건축, 기계)

□ 2008. 12. : 전기 및 계측, 소방공사 발주

□ 2008. 12. : 도시계획 변경 승인 신청

□ 추진계획

□ 2009. 03. : 공사 추진 중간 보고회 개최

□ 2009. 11. : 시운전 및 공사 준공

□ 사업비 : 3,539백만원 (국비 70%, 도비 10%, 시비 20%)

『계속사업』

분뇨 처리장 고도처리 시설공사

분뇨(위생)처리장에 고도처리 시설을 설치하여 연계처리 수질   기준 준수는 물론 공공하수처리장 운영에 원활을 기하고자 함

□ 사업개요

□ 위    치 : 분뇨처리장내

□ 사업내용 : 탈질조(672□) 신설 및 노후시설개량

□ 사 업 비 : 4,883백만원(국비3,906, 시비977)

구 분	사 업 비	국 비	시 비	비고
합 계	4,883	3,906.4	976.6
2006년	1,235	988	247
2008년	245	196	49
2009년	1,531	1,225	306
2010년	1,872	1,497.4	374.6

□ 사업기간 : 2006. 1. ~ 2010. 12.

□ 추진계획

□ 2009.  1. : 2차분 공사 착공(1,531백만원)

□ 2009.  2. : 탈질조 완료에 따른 전기·기계시설 설치

□ 2009.  8. : 시운전(1차 사업)

□ 2009. 12. : 2차분 공사 완료

□ 2010. 12. : 3차분 공사 준공(최종)

□ 기대효과

□ 효율적인 분뇨처리로 연계수 수질기준 준수 및 영산강 수질오염 방지

□ 노후시설 개량으로 안정적인 처리장 운영