건  설  과

	기 본 현 황

1	조직 및 주요업무

팀 명	현원	주 요 업 무
건설행정	4명	전문건설업등록, 국유재산관리, 도로점용, 광고물 관리
환경토목	4명	군도․농어촌도로 개설 정비, 소규모 주민숙원사업추진
농업기반	3명	농촌생활환경정비사업, 소규모 농업기반정비, 골재채취허가
도로관리	8명	도로유지관리, 가로(보안)등 유지관리

2	인 력

(2014. 1. 1. 현재)

구 분	계	일반직(임기제, 전담직위 포함)						별정직
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	20	-	1	5	7	3	4	-
현 원	20	-	1	6	8	4	1	-
과부족	-	-	-	-	-	-	-	-

3	예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액		전년 예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		20,122	100%	19,335	100%	787	4.07%
정책사업		19,649	97.65%	19,058	98.57%	591	3.10%
행정운영경비		473	2.35%	277	1.43%	196	70.95%
	인력운영비	422	2.10%	226	1.17%	196	86.83%
	기본경비	51	0.25%	51	0.26%	0	0%
재무활동		0	0%	0	0%	0	0%

4	주요 위원회 현황

위원회명	위원수	위원장	주요기능
나주시지명위원회	6명	부시장	지명 제정, 변경, 조정 심의결정
도로굴착심의위원회	11명	부시장	도로굴착관련사업 심의
지역건설산업활성화위원회	8명	부시장	지역건설산업활성화 심의
나주시설계자문위원회	38명	경제건설국장	사업계획 적정성등 자문
광고물심의위원회	7명	경제건설국장	광고물의 효율적 관리 심의

5	업무관련 통계

도로현황 : 337개 노선, 1,078㎞

(단위 : km)

구분 계	국도		국가지원지방도		지방도		군도		농어촌도로
	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
337개소 1,078km	3	85	4	56	7	115	24	183	299	639

교량현황 : 142개소

(단위 : 개소)

도로별 관리청	계	국도	지방도	시도	군도	농어촌도로				비고
						소계	면도	리도	농도
계	142	25	18	19	29	51	18	19	14
국토부	13	13	-	-	-	-	-	-	-
전남도	18	-	18	-	-	-	-	-	-
나주시	111	12	-	19	29	51	18	19	14

수리시설 현황 : 561개소

(단위 : 개소,ha)

구분	계		저수지		양수장		보		집수암거		관정		비고
	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적
계	561	15,313.3	228	12,146.5	98	1,821.7	80	708.6	8	71.7	145	435
시	266	2,460.8	60	741.4	24	608	30	604.7	7	71.7	145	435
농촌 공사	295	12,852.5	170	11,405.1	74	1,343.5	50	103.9	1	0

6	기타 기본현황 자료

접도구역 현황

(단위 : km)

계		국도		지방도(국지도포함)
노선수	연장	노선수	연장	노선수	연장
13	176.8	3	58.8	11	118

경지정리 현황

(단위 : ha, %)

답총면적	가능면적	기시행면적	잔여면적	경지정리율
16,721ha	12,825ha	12,684ha	141ha	75.8%

수리안전답 현황 : 15,237㏊

(단위 : ha, %)

답 총 면 적	수 리 답	불 안 전 답	수리안전율
16,721ha	15,237ha	1,484ha	91%

양수장비 보유 현황

(단위 : 대,km)

양 수 기				송 수 호 스 (km)
계	모 터	엔진용	탑재용	계	고 압	비 닐
269	64	84	121	39	39

옥외광고업체 등록 현황

(단위 : 개소)

등록업체	현수막 지정 게시대
	계	일반	행정
42	65	56	9

가로(보안)등 현황 : 13,899등 (가로등 3,345, 보안등 10,554)

전문건설업 등록현황 : 225개 업체, 374종

(철콘82, 토공42, 상하수도 39,기타 211)

	2014 주요업무계획

1	부서목표

건설공사의 견실시공과 지역특성에 맞는 친환경적 공사추진

사업비 조기집행으로 서민 생활 안정 및 지역경제 활성화

아름답고 쾌적한 도시기반 조성과 시민의 삶의 질 향상

2	추진전략

공정하고 투명한 실시설계 사전심사 확행, 견실시공 견인

낙후지역 주민들의 숙원사업 해결로 신뢰행정 구축

도로정비 및 체계적인 유지관리로 시민편익 증진

도로변 풀베기, 제설작업 등 주민자율참여 적극 유도

3	역점시책

내실있는 건설행정 추진

농업기반 정비 등 소규모 주민숙원사업 지속 추진

군도, 농어촌도로 확․포장사업으로 지역 균형발전 도모

농촌생활환경 정비사업, 기계화경작로 확․포장사업

도로 시설물․교량 보수 등 유지관리 강화

가로(보안)등 설치 및 체계적인 유지관리

건설공사 시행단계별 안내 및 공사 실명제 운영 (신규)

4	주요업무 목표

구분	업 무 명	지표/목표명	2013년 실적	2014년 목표	담당
성과	전문 건설업 등록 관리	건설업 적법 유지율	94%	98%	건설행정
현안	국유재산 대부료 부과	국유재산 대부료 징수율	80%	90%	건설행정
현안	D/B구축으로 옥외광고물의 효율적 관리	옥외광고물 D/B구축율	100%	100%	건설행정
성과	소규모 주민숙원사업	주민숙원사업 해결율 향상	86%	90%	환경토목
성과	군도 ․ 농어촌도로 정비사업	공정율 (연차적사업)	71%	50%	환경토목
성과	농촌생활환경정비사업	공정율 (연차적사업)	100%	50%	농업기반
현안	기계화경작로 확․포장공사	공정율	100%	100%	농업기반
성과	향상된 도로 유지관리 추진	도로이용 시설물 불편민원 해결율	90%	92%	도로관리
성과	가로(보안)등 설치 및 유지관리	가로(보안)등 고장 수리 민원해결율	94%	95%	도로관리

5	주요 사업비 현황

(단위 : 백만원)

연번	주요 사업명	사업비	사업내용	비고
1	주민숙원사업	9,500 (7,287)	주민숙원 및 농업기반사업 445건	2014
2	(계속) 농촌생활환경정비사업	5,639 (3,492)	L=0.88㎞, B=8.0m (공산) 마을 및 농경지 기반시설정비 1식 (동강)	2015
3	(계속)군도 29호선(풍림∼남석)	5,400 (500)	L=3.30㎞, B=8.0m	2015
4	(계속)군도 24호선(장동교 재가설)	2,366 (800)	L=370m, B=12.0m(교량 40, 접속도로 330)	2014
5	(계속)군도 12호선(옥산∼신도)	2,021 ( - )	L=1.16㎞, B=8.0m	2015
6	(계속)금천 208호선(원촌∼국도)	1,645 ( 336 )	L=0.70㎞, B=8.0m	2015
7	기계화경작로 확포장공사	1,261 (1,261)	농로포장 및 사리부설 L=9.8㎞	2014
8	노후도로 아스콘 덧씌우기 공사	1,134 (1,134)	아스콘 덧씌우기 9개소 900a	2014
9	(계속)왕곡 208호선(장산∼양산)	1,006 ( - )	L=0.88㎞, B=8.0m	2014
10	가로등 유지보수 및 신규 설치	786 (786)	가로(보안)등 보수 2,675등 가로(보안)등 신규 설치 300등	2014
11	도로 차선도색공사	397 (397)	차선도색 10개소 26.5km	2014
12	도로갓길 정비 및 선형개량 공사	380 (380)	갓길 정비 3개소 4km 급커브 선형개량 1개소	2014
13	도로 긴급보수 및 안전시설물 설치	327 (327)	- 도로 긴급보수 1식 - 도로 교통안전시설물 30개소	2014
14	교량보수 및 안전시설 설치	300 (300)	- 교량 보수 3개소(난간 1, 교대 및 교좌장치 1, 상판포장 1) - 차량유도시설 500개 설치	2014

주민 숙원사업 추진

내실있는 건설행정 추진

1

○ 연순방, 1일1마을방문, 영농교육 등 현장대화시 주민들이

건의한 숙원사업을 신속하게 해결함으로써 행정신뢰도 제고

- 2011년 해결 : 426건 접수/355건 추진(해결율 83%)

- 2012년 해결 : 410건 접수/350건 추진(해결율 85%)

-00건의의 접/추진(해결율 90%)

❍

추    :       ○

❍○  ❍❍ 등록 현황  : 207개 □ 추진계획  : 전문건설업  유지 □ 추진계  문건설업 적법 유지84, 토공 39, 상하수도 40, 기타 190)상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료주민 숙원사업 해결율 향상

목 표	주민숙원사업 해결율 90% 이상 달성

○ 상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료

- 2013. 02.   : 실시 설계

- 2013. 03.   : 공사 착공

- 2013. 06.   : 공사 준공

○ 하반기 연두순방 등 사업 동절기 이전 사업완료

- 2013. 08.   : 실시 설계

- 2013. 09.   : 공사 착공

- 2013. 12.   : 공사 준공

※ 업무담당자의 적극적인 해결 의지로 해결율 향상

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
10,000 (시비)	5,686 (시비)	4,314	4,548(80%)

담당부서	건설과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 우홍민	☏8892

1

❍ 전문 건설업의 체계적인 등록 관리로 견실한 건설공사 시공

❍ 국유재산의 효율적 운영으로 세외수입 증대

❍ 옥외광고물의 일괄처리시스템 구축으로 쾌적한 도시미관 조성

1. 전문 건설업 등록관리

지 표	전문 건설업의 적법 유지율 98%

❍ 등록현황 :  225개 업체, 374종(철콘82, 토공42, 상하수도 39,기타 211)

❍ 관    리 : 전문건설업 등록 기준인 실질자본금, 기술인력, 시설장비 등

등록사항 법정 기일내 신고 안내 ⇒ 행정처분등 불이익 사전예방

2. 국유재산 대부료 부과 징수율 제고 (국토해양부 소관)

목 표	국유재산 대부료 부과 징수율 90%

❍ 관리현황 : 18,625필지, 17,076천㎡

❍ 국유재산 대부료 고지서 발송                 : 2014.   3.

❍ 납부 독려 실시                             : 2014.   3.～12.

3. D/B구축으로 옥외광고물의 효율적 관리

목 표	옥외광고물 D/B 구축율 100%

❍ 개요 : 14,600개(고정 광고물), 30백만원(시비), 2014. 05.～12.

❍ 내용 : DB구축을 위한 전수조사 및 관리전용 시스템 입력

❍ 옥외광고물 전수조사 계획수립 및 용역    : 2014. 05.～06.

❍ PDA 활용한 전수조사(사진촬영, 지도검색, 정보입력 등)    :  2014. 07.

❍ 레이저 측정기를 이용한 규격 측정, 데이터 입력    : 2014. 07.～09.

❍ 통합관리 시스템 운영 및 새올행정시스템 구축  : 2014. 11.～12.

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
114(시비)	84(시비)	30	50(60%)

담당부서	건설과	건설행정팀장 김우봉	☏8881	주무관 염규석 주무관 김윤기	☏8883 ☏8885

주민 숙원사업 추진

2

❍ 연두순방, 1일1마을방문, 영농교육 등 현장대화시 주민들이

건의한 숙원사업을 신속하게 해결함으로써 행정신뢰도 제고

- 2012년 해결 : 410건 접수/350건 추진(해결율 85%)

- 2013년 해결 : 413건 접수/357건 추진(해결율 86%)

- 2014년 계획 : 445건 접수/400건 추진(해결율 90%)

1. 주민 숙원사업 해결율 향상

지 표	주민숙원사업 해결율 90% 이상 달성

❍ 상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료

- 2014. 01.   : 실시 설계

- 2014. 02.   : 공사 발주 및 착공

- 2014. 05.   : 공사 준공

❍ 하반기 연두순방 등 사업 동절기 이전 사업완료

- 2014. 08.   : 실시 설계

- 2014. 09.   : 공사 착공

- 2014. 12.   : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
9,500 (시비)	7,287 (시비)	2,213	5,830(77%)

담당부서	건 설 과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 이정원	☏8893

군도 ․ 농어촌도로 정비사업 추진

3

❍ 군 도 : 3개노선 L=4.83㎞/9,787백만원

- 군도 29호선(풍림~남석)  : L=3.3㎞ B= 8.0m/5,400백만원(계속)

- 군도 24호선(장동교 재가설) : L=370m(교량 40, 접속도로 330)

B=12.0m/2,366백만원(계속)

- 군도 12호선(옥산~신도) : L=1.16㎞ B=8.0m/2,021백만원(계속)

❍ 농어촌도로 : 2개노선 L=1.58㎞/2,651백만원

- 왕곡 208호선(장산~양산) : L=0.88㎞ B=8.0m/1,006백만원(계속)

- 금천 208호선(원촌~국도) : L=0.70㎞ B=8.0m/1,645백만원(계속)

❍ 사업기간 : 2012. 12. ~ 2016. 10.

1. 군도 ․ 농어촌도로 확포장 공사 추진

목 표	공사추진 공정율 50% 달성(연차적 사업추진)

❍ 군     도 (3개 노선)

- 2014. 02 : 군도24호선(장동교 재가설) 공사 착공

- 2014. 03 : 군도29호선 공사 착공

- 2014. 07 : 군도12호선 공사 착공

- 2015. 10 : 군도24호선(장동교 재가설) 공사 준공

❍ 농어촌도로 (2개 노선)

- 2014. 06 : 왕곡208호선 공사 준공

- 2014. 07 : 금천208호선 공사 착공

※ 미 준공 도로는 확보된 예산의 범위내에서 연차적으로 사업시행

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
12,438 (시비)	5,553 (시비)	6,885	3,887(70%)

담당부서	건 설 과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 최준석	☏8892

농촌 생활환경 정비사업 추진

4

❍ 위    치 : 2개 면(공산면, 동강면)

❍ 사업내용 : 기반시설정비, 생활환경개선, 문화복지시설 등

❍ 사 업 비 : 5,639백만원(국비 3,947, 시비 1,692)

(2013년 384, 2014년 3,492 2015년 1,763)

❍ 사업기간 : 2013. 01.～2015. 12.

1. 농촌 생활환경 정비사업 추진

지 표	공사 추진 공정율 50%(연차적 사업추진)

❍ 공산 금곡~상방 도로확포장 (2013. ~ 2015.)

- 2014.  1. : 실시설계 완료

- 2014.  2. : 공사 계약 및 착공

- 2015. 12. : 공사 준공

❍ 동강 생활환경정비 (2014. ~ 2015.)

- 2014.  1. : 실시설계 용역착수

- 2014.  4. : 실시설계 용역완료

- 2014.  5. : 공사 계약 및 착공

- 2015. 12. : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
5,639 (국비3,947 시비1,692)	3,876 (국비2,713,시비1,163)	1,763	2,325 (60%)

담당부서	건 설 과	농업기반팀장 마상익	☏8901	주무관 원성수	☏8903

기계화 경작로 확 ․ 포장공사

5

❍ 위    치  : 13개 읍․면중 6개 면 선정 예정

❍ 사 업 량  : 경지정리 지구 농로포장 및 사리부설 L=9.8km

❍ 사 업 비  : 1,261백만원(국비 883, 도비 113, 시비 265)

❍ 사업기간  : 2014. 01.～ 2014. 08.

1. 기계화 경작로 확·포장공사 추진

지 표	공사 추진 공정율 100%

❍ 2014. 01.  : 사업 대상지 결정 (6개 지구)

❍ 2014. 02.  : 실시설계 완료 및 사업시행 승인신청(전라남도)

❍ 2014. 03.  : 공사 착공

❍ 2014. 08.  : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
1,261 (국비 883, 도비 113, 시비 265)	1,261 (국비 883, 도비 113, 시비 265)	-	1,008 (80%)

담당부서	건 설 과	농업기반팀장 마상익	☏8901	주무관 원성수	☏8903

향상된 도로 유지관리 추진

6

❍ 시 관리도로 : 337개 노선 1,077km(국도, 군도, 도시계획도로, 농어촌도로)

❍ 중점정비대상 : 22노선 130km(국도3, 군도 및 도시계획도로, 농어촌도로19)

❍ 사업 개요

- 아스콘 재포장 및 파손부 복구 :  9개 노선 900a    1,134백만원

- 도로 차선도색 및 시설물 정비  : 10개 노선 26.5km   724백만원

- 도로갓길 정비 및 선형개량    :   3개 노선  4.0km   380백만원

- 교량 보수 및 안전시설 설치    :  7개소             300백만원

❍ 사업 기간 : 2014. 01.～2014. 08.

1. 신속한 도로시설물 보수로 쾌적한 도로환경 조성

지 표	도로이용 시설물 불편민원 해결률 92%

❍ 2014. 01.  : 시설물 보수 대상지 조사

❍ 2014. 02.  : 실시 설계

❍ 2014. 04.  : 사업 착공

❍ 2014. 08.   : 사업 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
2,538(시비)	2,538(시비)	-	1,770(70%)

담당부서	건 설 과	도로관리팀장 나승학	☏8911	주무관 정찬종	☏8912

가로(보안)등 설치 및 유지관리

7

❍ 사업 내용

- 가로(보안)등 유지보수 단가계약(3개 권역)  : 330백만원

- 가로(보안)등 신규 설치 (300등)         : 207백만원

- 가로등 유지보수 (긴급보수 2,675등)     :  99백만원

- 가로(보안)등 유지관리 표찰 부착(15,000등)  : 150백만원

❍ 사업 기간 : 2014. 1. ～2014. 12.

1. 가로(보안)등 설치 및 체계적인 유지관리

지 표	가로(보안)등 고장수리 민원 해결율 95%

❍ 2014. 01.  : 가로등 신규 설치 대상지 현지조사

❍ 2014. 01.  : 3개 권역 가로등(보안등)유지보수 단가계약

❍ 2014. 02.  : 가로등 신규설치 공사 착공

❍ 2014. 05.   : 가로등 신규 설치공사 준공

❍ 2014. 12.   : 가로(보안)등 유지보수 및 긴급보수 연중 추진

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
786 (시비)	786 (시비)	-	550 (70%)

담당부서	건 설 과	도로관리팀장 나승학	☏8911	주무관 김민식	☏8914

2014 주요업무계획

건설공사 시행 단계별 안내 및 공사 실명제 운영 (신규)

8

❍ 공사 추진상황을 시민과 함께 공유하여 부실공사 방지 및 신뢰행정 실현

❍ 공사 중 불편신고 및 민원발생에 대하여 신속 대처

□ 성과목표 : 사업안내 표지판 100% 설치 및 현장 지도 점검

□ 추진계획

❍ 대   상

- 나주시(실단과소, 읍면동)에서 발주한 모든 사업장

- 외부기관 발주 지도감독이 필요한 사업장(전기, 통신, 가스공사 등)

❍ 운영방법

- 공사현장 및 마을회관, 우산각등에 공사안내 표지판 설치 의무화

도로공사 2개소(시점, 종점), 건축물공사 1개소 등

❍ 단계별 추진계획

- 계획단계 : 공사 설계시 지역주민 입회하에 현장조사 확행

(주민과 설계자 의견을 현장에서 조율하는 등 방향결정)

- 추진단계 : 시공사와 현장책임자 및 담당공무원 연락처 등을 명확히                  기재한 안내표지판 설치

- 완료단계 : 준공검사자, 공사완료 사항을 읍면동장, 지역주민에게                  사전 예고 후 준공처리

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
	해 당	없 음

담당부서	건 설 과	환경토목팀장 김현위	☏8891	주무관 이정원	☏8893