상하수도과

	기 본 현 황

1	조직 및 주요업무

팀명	현원	주 요 업 무
상하수도행정팀	8명	공기업 특별회계 운영, 상․하수도 행정시책발굴 및 각종 공사 계약, 하수도 원인자부담금 부과 징수
수질복원팀	4명	하수처리장 유입 방류수․분뇨․축산폐수․침출수 수질분석
수자원관리팀	7명	상수도 시설 중장기 계획, 광역 및 지방상수도 미급수 지역 신설(확장), 소규모수도시설 유지관리, 지하수 보전․개발 이용관리
하수시설팀	5명	하수도 정비 기본계획 수립, 하수관거 유지관리, 마을하수도 설치 및 유지관리
하수설비팀	10명	나주․산포․공산하수처리장 시설물 운영 관리 및 유지 관리, 하수슬러지처리장 운영
가축분뇨팀	6명	분뇨 및 가축분뇨처리장 운영 관리, 현애원 가축분뇨 공공처리시설 관리

2	인 력

(2014. 1. 1. 현재)

구분	계	일반직(임기제, 전담직위 포함)						연구직	지도직		별정직
		4급	5급	6급	7급	8급	9급		지도관	지도사
정 원	41		1	11	10	8	10	1
현 원	40		1	13	21	2	2	1
과부족	△1	-	-	2	11	△6	△8	-			-

3	예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액		전년 예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		76,395	100%	61,326	100%	15,327	24.57%
정책사업		58,403	76.45%	42,913	63.98%	15,490	36.1%
행정운영경비		2,544	3.33%	2,287	3.73%	257	11.25%
	인력운영비	2,516	3.29%	2,273	3.71%	243	10.68%
	기본경비	28	0.04%	13	0.02%	15	107.43%
재무활동		15,448	20.22%	16,126	26.3%	△678	△4.21%

4	주요 위원회 현황

위원회명	위원수	위원장	주요기능
하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 성과평가위원회	11명	상하수도과장	하수관거정비사업 평가, 심의

5	주요 시설

상수도

급수전수 (전)	배 수 지		송·배 급수관 (㎞)	취·정수장(㎥/일)		소규모 수도시설
	개 소	시설용량 (㎥/일)		다 시 취수장	다 시 정수장	마을상수도 (개소)	소규모급수시설 (개소)
16,450	5	27,600	753.5	2,000	2,000	48	137

공공 하수처리장

시 설 명	소 재 지	시설용량 (㎥/일)	처리량 (㎥/일)	처리 방법	준 공
나주공공하수처리장	운곡동 107	22,500	16,160	고도처리 (CNR공법)	2007. 12. 22.
․하수슬러지처리장		8ton	6.5ton	건조․고화	2009. 12. 16.
산포공공하수처리장	내기리 915-1	3,000	1,887	회전원판법	1999. 6. 30.
공산공공하수처리장	금곡리 19	500	444	회전원판법	1999. 7. 20.

분뇨․가축분뇨․현애원축산폐수처리장

시설별	소재지	시설용량 (㎥/일)	처리량 (㎥/일)	처리공법	연 계 처리장명	준 공
분뇨처리장	진포동 1-1	100	86.4	액상부식법	나주공공 하수처리장	1990. 11. 20.
가축분뇨처리장	운곡동 107	150	103	액상부식법		2002. 10. 15.
현애원축산 폐수처리장	유곡리 산43	150	135	막분리공법		2009. 12. 30.

6	업무관련 통계

상수도 보급 현황

총인구 (명)	급수 인구 (명)	보급율 (%)	급수 가능량 (㎥/일)	1일 평균 급수량(㎥)	1일 1인당 급수량(ℓ)
89,426	67,145	75.1	79,100	17,734	265.5

상수도 유수율․현실화율

생산량		유수수량 (천㎥)	유수율 (%)	누수량 (천㎥)	누수율 (%)	수도 요금
연 간 (천㎥)	1일평균 (㎥)					평균단가 (원/㎥)	생산원가 (원/㎥)	현실화율 (%)
6,491	17,734	5,439	83.8	759	11.7	859	1,783.2	48

하수도 보급률․현실화율

총 인 구 (명)	하수처리인구 (명)	하수도보급율 (%)	총괄원가 (원/톤)	하수도사용료 (원/톤)	현실화율 (%)
89,426	52,643	58.87	2,438	257	10.55

7	기타 기본현황 자료

위탁사무 현황

위탁업무	수탁기관	위탁기간	위탁내용
지방상수도 운영	한국수자원공사	2008. 7. 21. ~ 2027. 12. 31. (20년간)	시설 운영관리, 시설개선, 고객 및 요금관리
마을하수처리시설 운영	태림인더스트리(주)	2012. 2. 1. ~ 2015. 1. 31. (3년)	마을하수처리시설 운전 및 유지관리, 수질관리
현애원 축산폐수 공공처리시설 운영	(주)파이닉스	2013. 1. 1. ~ 2015. 12. 31. (3년)	현애원 축산폐수 공공처리 시설물 전반, 이송관로(8km)

	2014 주요업무계획

1	부서목표

유입하수의 적정 처리로 영산강 수질 개선 기여

맑은 물의 안정적 공급으로 주민의 삶의 질 향상

2	추진전략

산포․공산공공하수처리장 처리 공정 개선을 통한 안정적인

방류수 수질 확보

광역상수도 공급지역 확대로 맑은 물 안정적 공급

하수관거정비사업으로 쾌적한 생활환경 개선

3	역점시책

먹는물 수질기준 준수율 향상 도모

상수도 보급률 향상

하수도 보급률 향상

방류수 수질기준 준수

공공하수처리시설 효율적 운영으로 유입하수의 안정적 처리

가축분뇨 공공처리시설 가동율 제고

마을하수도 정비사업 추진 (신규)

4	주요업무 목표

구분	업 무 명	지표/목표명	2013년 실적	2014년 목표	담당
성과	먹는물 수질검사 준수율 향상 도모	먹는물 수질기준 준수율	98.4%	98.5%	수자원 관 리
〃	상수도 보급률 향상	급수보급율	75.1%	75.3%	수자원 관 리
〃	하수도 보급 향상	하수도보급율	61.3%	62.1%	하수시설
〃	방류수 수질기준 준수	수질기준 준수율	100%	100%	수질복원
〃	가축분뇨공공처리시설 가동율 제고	가축분뇨처리 시설 가동율	72.6%	73%	가축분뇨
현안	수질검사 및 수질기준 부적합시설 보수 노후시설개량	적기수질검사 및 시설개량	∙수질검사 25회 ∙교체정비 19.4㎞	∙수질검사 25회 ∙교체정비 18㎞	수자원 관 리
〃	신규 급수전 설치 및 상수도 급배수관 확장	신속한 급수전 설치	∙급수전 805전 ∙급수관 9㎞	∙급수전 800전 ∙급수관 1㎞	수자원 관 리
〃	광역상수도 확장사업	진도율	∙봉황지구 13.2㎞ ∙공산지구 12㎞	∙봉황지구 10㎞ ∙공산지구 15.3㎞	수자원 관 리
“	마을하수도 설치 사업	관거정비 사업 적기 추진	2개소 관거정비 8.3km	3개소 관거정비 9km	하수시설
“	산포․공산 공공하수 처리시설 개량사업추진	진도율	65%	100%	하수설비

5	기관평가 대응계획 - 중앙부처, 도

구분	평가명	주 관	2014 목표	추진방법	담당
평가	지방공기업 경영실적평가	안전행정부 전라남도	상하수도 공기업 - 전남도내 3위	-2013 사업년도 경영 실적 5개 항목, 19개 지표에 대한 현지 확인 평가 -정책 준수, 고객 만족도 및 경영 목표 달성도 -리더쉽/전략, 조직 관리 등 업무의 능률성 -재무관리, 경영효율 성과 등 공익성	상하수도 행정팀

6	2015년도(2014. 실적) 정부합동평가 대응

❍ 해당 없음

7	2015년도(2014. 실적) 생산성대상 대응

❍ 해당 없음

8	주요 사업비 현황

(단위 : 백만원)

연번	주요 사업명	사업비	사업내용	비고
1	(계속)산포․공산공공하수처리시설 개량사업	13,836 (3,932)	처리공법 변경 및 시설 개선	2014
2	(계속) 봉황지구 광역상수도 확장사업 추진	10,000 (1,375)	송․배․급수관로 매설 L=10㎞	2014
3	(계속) 공산지구 광역상수도 확장사업 추진	19,800 (3,571)	송․배․급수관로 매설 L=15.3㎞	2015
4	수도정비 기본계획 재정비 용역	800	수도정비 기본계획 재정비 1식	2014
5	농촌생활용수 개발사업	1,307	반남 청송 이암지구 외 4개소 →관정개발, 관로매설, 이용시설 등	2014
6	소규모수도시설 개량사업	710	다도 암정 운흥지구 외 2개소 →노후관교체, 물탱크 시설 등	2014
7	산포(매성)하수관거정비공사	6,786	하수관거정비 L=14.9㎞ 배수설비 1,057가구	2014
8	금천/다시 하수관거 정비공사	10,010	하수관거 정비 L=40.7㎞ 배수설비 2,351가구	2017
9	나주중부하수도정비공사	1,540	실시설계용역중	2017
10	문평신안 면단위 하수처리장 설치공사	561	오수관로 정비 L=5.3㎞ 하수처리장 1개소	2016
11	공산덕음 면단위 하수처리장 설치공사	868	오수관로 정비 L=11.6㎞ 하수처리장 1개소	2016
12	금천방축 농어촌마을하수도 설치공사	1,666	오수관로 정비 L=3.0㎞	2015
13	봉황구석 농어촌마을하수도 설치공사	714	오수관로 정비 L=3.0㎞	2016
14	장성천지구 농어촌마을하수도 설치사업	3,623	오수관로 정비 L=14.26㎞ 하수처리장 1개소	2016

먹는물 수질기준 준수율 향상 도모

1

❍ 정기적인 수질검사 실시로 안전한 식수공급 도모

❍ 먹는 물 수질기준 준수율 98% 이행

1. 상수도 수질검사 실시

목 표	수질검사 실시 28회

❍ 광역 및 지방상수도 : 월 1회/연 24회(58개 항목)

❍ 소규모수도시설 : 연 1회(58개 항목), 분기 1회/연 3회(12개 항목 )

2. 노후 및 불량 수도시설 교체정비

목 표	농촌지역 생활용수 공급사업 8개소, L= 18㎞

❍ 농촌생활용수 개발사업 : 반남면 청송리 이암지구 외 4개소

- 사업내용 : 관정개발, 관로매설, 급수전 설치, 이용시설 등

❍ 소규모수도시설 개량사업 : 다도면 암정리 운흥지구 외 2개소

- 사업내용 : 취수시설, 노후관 교체, 약품투입기, 물탱크 시설 등

3. 배수시설 및 저수조 청소 실시

목 표	배수시설 및 저수조 청소 확인 2회

❍ 저수조 청소대상 : 나주초교 외 74개소(반기 1회)

4. 취수원 지하수 수질관리

목 표	지하수 수질검사 실시 확인 1회

❍ 지하수 개발․이용자에 대한 정기적인 수질검사 안내 및 확인

5. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
2,090 (국비1,412 시비678)	2,090 (국비1,412 시비678)	-	1,254 (60%)

담당부서	상하수도과	수자원관리팀장 최익준	☏7661	주무관 최영준 주무관 한 완	☏7667 ☏7662

상수도 보급률 향상

2

❍ 수도정비기본계획에 의거 미급수 지역 중 농촌지역 우선시행

❍ 급수 공급지역 확장으로 급수보급율 75.3%로 향상 시민 삶의 질 개선

1. 상수도 급․배수관 확장

목 표	급․배수관로 매설 L = 1.0㎞

❍ 대 상 : 대호동 칠전마을, 노안면 계림리 계동마을 등

2. 신규 급수전 설치

목 표	신규 급수전 설치 800전

❍ 대 상 : 급수공급지역중 신규 신청세대(연중 설치 → 신청시 즉시)

3. 봉황지구 광역상수도 확장사업 추진

목 표	송․배․급수관로 매설 L = 10㎞

❍ 사업내용 : 배수지 1개소, 상수관로 L = 73.0㎞(D50~350㎜)

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2014년(6개년) / 총괄발주 계속사업

❍ 추진계획

- 2014.  3. : 총괄 잔여분(세지면 오봉리, 대산리) 공사 착공(L= 10㎞)

- 2014. 12. : 총괄 전체공사 완료

4. 공산지구 광역상수도 확장사업 추진

목 표	송․배수관로 매설 L = 15.3㎞

❍ 사업내용 : 배수지 1개소, 상수관로 L = 79.2㎞(D50~300㎜)

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2015년(5개년) / 총괄발주 계속사업

❍ 추진계획

- 2014.  2. : 3차분 공사 착공(L = 15.3㎞)

- 2014. 12. : 3차분 공사 완료

5. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
5,746 (국/도비4,004 시비1,742)	5,746 (국/도비4,004 시비1,742)	-	3,448 (60%)

담당부서	상하수도과	수자원관리팀장 최익준	☏7661	주무관 노대광 주무관 주학노	☏7663 ☏7668

하수도 보급률 향상

3

❍ 합류식 하수관거를 분류식 하수관거 설치로 영산강 수계수질

보호 및 주거환경개선으로 주민 보건위생 향상 기여

(하수도 보급률 62.1% 달성)

1.산포(매성)하수관거정비사업

목 표	종합 공정 100% 준공 / 2014. 9월 공사 완료

❍ 대    상 : 산포면 내기리 일원

❍ 사업기간 : 2011. 9 ~2014. 9 /6,786백만원

❍ 추진계획. : 1월 착공 및 9월 전체분 준공

2. 금천 ․ 다시처리구역 하수관거 정비사업

목 표	종합 공정 70% 달성

❍ 대    상 : 다시면(월태, 영동, 강암) 금천면(오강,고동) 일원

❍ 사업기간

- 다시구역 : 2013. 7. ~ 2017. 7.

- 금천구역 : 2013. 5 ~ 2015. 9.

- 사 업 비 : 10,010백만원

❍ 추진계획

-다시구역 : 2014. 2월 1차분 준공, 2014. 3~12월 2차분 착공 및 준공

-금천구역 : 2014. 1월 1차분 준공, 2014. 2~12월 2차분 착공 및 준공

3. 중부처리구역 하수관거 정비사업 실시설계 추진

목 표	2014. 7월 공사착공 및 1차분 준공(100%)

❍ 대    상 : 성북동, 금남동, 대호동, 석현동, 노안면 일원

❍ 사업기간 : 2011. 6. ~ 2014. 7./1,540백만원

❍ 추진계획

-2014. 5 : 행정절차이행(재원협의, 자문․기술심의, 사업인가)

-2014. 7 : 공사착수

4. 장성천지구(노안 금암)마을하수도 설치사업

목 표	종합 공정 100% 준공

❍ 대    상 : 노안면 금암 마을

❍ 사업기간 : 2013. 11~ 2014. 12 / 1,840백만원

❍ 추진계획

- 2014.  1 : 1차분 준공

- 2014. 12 : 2차분 준공(공사 완료)

5. 장성천지구(노안, 용산, 신동산)마을하수도 설치사업

목 표	2014. 5월 공사착공 및 1차분 준공(100%)

❍ 대    상 : 노안면 용산, 신동산 마을

❍ 사업기간 : 2012. 12~ 2016. 12 / 1,783백만원

❍ 추진계획

- 2014.  3 : 행정절차이행(재원협의, 자문, 기술심의, 사업인가)

- 2014.  5 : 1차분 착공

- 2014. 12 : 1차분 준공

6. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
96,579 (국65,794, 시비30,785)	18,159 (국16,616, 시비5,157)	2,847(시비)	10,900(60%)

담당부서	상하수도과	하수시설팀장 우홍민	☏7671	주무관 박광열	☏7673

방류수 수질기준 준수

4

❍ 공공하수처리장 방류수 수질기준 준수로 영산강 수질 오염 제거

❍ 실시간 수질원격감시체계(TMS)로 방류수 수질기준 100% 준수

1. 유입하수의 처리공정별 적정 관리

목 표	방류수질 기준 준수(BOD 5 ppm, COD 20ppm, SS 10ppm, T-N 20ppm, T-P 0.3ppm

❍ 유입하수에 대한 처리공정별 수질분석 및 오염 부하량 적정관리

❍ 수질원격감시체계(TMS) 상시관리(측정항목 COD외 4종)

2. 영산강유역환경청 지도점검 및 TMS점검

목 표	년 8회(정기 2회, 오염총량 4회, 상대정확도 1회, 정도검사 1회)

❍ 영산강유역환경청 지도점검에 따른 생물반응조 적정관리

❍ 수질원격감시체계(TMS) 점검에 따른 교정작업 및 점검 실시

3. 유입하수에 대한 공정별 유입․방류수 수질실험

목 표	년 249회

❍ 수질실험

- 나주, 산포, 공산공공하수처리장/매일1회, 연계수 및 침출수/주1회

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
311 (시비 311)	311 (시비 311)	-	190

담당부서	상하수도과	수질복원팀장 임종순	☏7651	주무관 황상모	☏7651 ☏7652

공공하수처리시설 효율적 운영으로 유입하수 안정적 처리

5

❍ 노후화된 시설물과 처리공정 개선을 통한 하수 처리효율 개선

❍ 방류수질 기준 준수는 물론 영산강 수질오염 부하량 준수

1. 산포․공산공공하수처리시설 개량사업 추진

목 표	종합 공정 100% 준공

❍ 사업내용 : 처리공법 변경 및 시설 개선 등

❍ 총사업비 : 13,836백만원(국비 9,685, 지방비 4,151)

- 2014년 사업비 : 3,932백만원(국 2,760, 도 117, 시 1,055)

❍ 추진계획

- 2014.  1. : 2차분 공사 착공 및 추진

- 2014. 12. : 2차분 공사 준공(공사 완료)

2. 하수 슬러지 안정적 처리 및 나주공공하수처리장 시설 개선

목 표	종합 공정 100% 준공

❍ 하수슬러지 안정적 처리 / 260백만원(시비)

- 재활용 1,200톤, 위탁처리 2,000톤

❍ 나주공공하수처리장 시설개선 / 70백만원(시비)

- 최종침전지 설비 및 생물반응조 유입게이트 등 개선

3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
4,262 (국․도비 2,877, 시비 1,385)	4,083 (국․도비 2,877, 시비 1,206)	179(시비)	2,450(60%)

담당부서	상하수도과	하수설비팀장 차주복	☏7681	주무관 조영오	☏7684

가축분뇨 공공처리시설 가동율 제고

6

❍ 노후시설 개선을 통한 가동율 제고 / 가동률 73% 달성

❍ 운영방법 개선을 통한 처리효율 제고

1. 노후시설 개선을 통한 가동율 제고

목 표	악취방지시설 및 질산화조 개선 1식

❍ 사업내용 : 악취방지시설 살수․배기시설 개선 및 질산화조 개선

❍ 총사업비 : 43백만원(시비 43)

❍ 추진계획

- 2014.  2. : 악취방지시설 개선 1식

- 2014.  3. : 질산화조 순환펌프 교체 1식

2. 운영방법 개선을 통한 처리효율 제고

목 표	기술진단 후속 처리 완료

❍ 사업내용 : 침사 및 협잡물 저장호퍼 보수

❍ 총사업비 : 20백만원(시비 20)

❍ 추진계획

- 2014.  6. : 호퍼 하부 및 게이트 교체 1식

3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
63 (시비 63)	43 (시비 43)	20(시비)	43(68%)

담당부서	상하수도과	가축분뇨팀장 임주호	☏7691	주무관 김상환	☏7692

마을하수도 정비사업 추진 (신규)

7

(총괄사업비/당해사업비)

구분	사업명	사 업 비(백만원)			사업기간	비고
		계	국 비	시 비
계	3개소	20,329 (3,809)	12,419 (2,000)	7,910 (1,809)
신규	봉황 구석	3,000 (714)	2,100 (500)	900 (214)	2014. 1.~ 2016. 12.
	문평 신안 공산 덕음	12,800 (1,429)	8,960 (1,000)	3,840 (429)	2014. 2. ~ 2016. 12.
개량	금천 방축	4,529 (1,666)	1,359 (500)	3,170 (1,166)	2014. 3. ~ 2015. 12.

□ 성과목표 : 봉황구석, 문평신안․공산덕음, 금천방축 종합 공정 50% 달성

□ 추진계획

<봉황 구석 농어촌마을하수도>

❍ 2014. 1. : 실시설계용역 착수

❍ 2014. 8. : 공사 착공

<신안․덕음 면단위 하수처리장>

❍ 2014.  2 : 공사 착공

<금천 방축 농어촌마을하수도>

❍ 2014. 3 : 공사 착공

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
20,329 (국비 12,419, 시비7,910)	3,809 (국비2,000, 시비1,809)	-	2,290(60%)

□ 문제점 및 대책

❍ 2014년 국비는 확보되어 사업추진이 가능하나, 잔여사업비 확보가      불투명하여 환경부와 지속적으로 협의, 잔여사업비 확보

담당부서	상하수도과	하수시설팀장 우홍민	☏7671	주무관 박광열	☏7673