도시재생사업소

	기 본 현 황

1	조직 및 주요업무

팀명	현원	주 요 업 무
개발행정	3명	서무, 예산, 회계, 보상관련 업무
공영개발	2명	전원마을조성, 각종 개발 사업에 따른 주거단지 조성
행복마을	4명	권역단위종합정비사업, 행복마을 조성사업
시설관리	4명	공공체육시설 설치 및 관리, 실내체육관․종합스포츠 파크 관리, 농어민문화센터 관리 및 운영

2	인 력

(2014. 1. 1. 현재)

구분	계	일반직(임기제, 전담직위 포함)						연구직	지도직		별정직
		4급	5급	6급	7급	8급	9급		지도관	지도사
정 원	16		1	4	5	4	2
현 원	14			5	5	3	1
과부족	△2					△1	△1

3	예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액		전년 예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		13,278	100%	5,845	100%	7,433	127.17%
정책사업		12,046	90.72%	2,337	39.99%	9,709	415.45%
행정운영경비		119	0.9%	47	0.81%	72	153.2%
	인력운영비	78	0.59%	33	0.57%	45	136.36%
	기본경비	41	0.31%	14	0.24%	27	192.86%
재무활동		1,113	8.38%	3,461	59.2%	▵2,348	▵67.84%

4	주요시설

종합스포츠파크

시 설 명	관 리 현 황	비고
종합운동장	□ 건축규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 6,712㎡ □ 수용인원 : 10,000명, 관람석 7,110석
다목적 체육관	□ 건축규모 : 연면적 4,952㎡, 관람석 1,658석
국민체육센터	□ 건축규모 : 지하2층/지상3층, 연면적 3,690㎡, 관람석 270석 □ 시설규모 : 수영장(L=25m, 6레인)
인라인롤러 경기장	□ 건축규모 : 지상 2층, 연면적 1,719㎡, 관람석 964석 □ 시설규모 : 200m트랙(B=6.3m)

실내체육관 : 연면적 3,055㎡, 관람석 2,300석

공산농어민 문화체육센터

- 건축규모 : 지하1층 지상 2층, 연면적 2,194㎡

- 주용도 : 다목적체육관, 목욕장, 찜질방, 체력단련장, 작은도서관, 공부방

5	업무관련 통계

주요 시설물 이용실적(이용수입) : 총 139천명(283백만원)

시 설 명	사용인원 (천명)	이용수입 (백만원)	비고
수 영 장	38	247
다목적 체육관	48	3
보조축구장	8	4
실내체육관	13	3
기 타	32	26

	2014 주요업무계획

1	부서목표

정주기반 시설 확충을 통한 쾌적한 전원마을 조성

시민의 삶의 질 향상을 위한 생활체육 인프라 확충

2	추진전략

관광수요 대비 남평 광촌유역권 녹색벨트 사업계획 수립

지역별 특색과 환경을 연계한 자연친화적 전원마을 조성

생활체육인 저변확대를 위한 종합스포츠파크 운영

3	역점시책

쾌적한 주거환경 및 생활공간 조성

행복마을 조성사업 추진

마을공동소득창출사업 추진

시민의 건강 증진을 위한 체육시설물 활용도 제고

남평 광촌 유역권 녹색벨트사업 (신규)

4	주요업무 목표

구분	업 무 명	지표/목표명	2013년 실적	2014년 목표	담당
성과	전원마을 조성사업	쾌적한 주거환경 및 생활공간 조성	100%	20%	공영개발
“	영산강변 저류지 체육 공원 조성	체육공원조성 공정률		70%	“
〃	권역단위종합정비사업	단계별 사업 추진	기본계획 용역중(세지) 사업추진중 (노안)	사업준공 (왕곡), 1단계 준공(노안), 시행계획 승인(세지)	행복마을
〃	도시주거환경개선사업	기반시설공사 완료	금곡, 부덕지구 준공	용산지구 발주, 죽림지구 준공	〃
〃	한옥관광자원화사업	한옥 조기 착공	8동 착수	13동 착수	〃
〃	신규사업 발굴	2015년 마을가꾸기 사업 발굴 및 공모제안	1개 사업 발굴	3개 사업 발굴	〃
“	체육시설 이용 만족도 향상	체육시설이용 만족도	87.5%	88%	시설관리
현안	마을공동소득창출사업	노안금동마을 사업완료, 산포금와마을 시행계획 승인	기본계획 수립용역 완료(노안)	사업완료(노안), 시행계획 승인(산포)	행복 마을
“	실내체육관 리모델링 사업	리모델링 완료		100%	시설관리
성과	남평 광촌유역권 녹색 벨트사업 (신규)	쾌적한 주거환경 및 생활공간 조성		20%	공영개발

5	기관평가 대응계획 - 중앙부처, 도

구분	평가명	주 관	2014 목표	추진방법	담당
평가	행복마을 조성사업 평가	전남도	우수상	- 심사배정표의 세부항목에 의거 평가자료 작성 및 사전 현장 확인 - 신속한 한옥건립 및 마을 경관 조성 - 한옥민박, 특산물 등 소득실적 제고	행복마을

6	(2015년도(2014. 실적) 생산성대상 대응

평가항목	2013 실적	2014 목표	추진방법	담당
공공체육시설 대관, 사용일수	‧사용일수 : 4,042	‧사용일수 : 4,446	‧ 활용도 제고 홍보 ‧ 환경정비 및 시설개선	시설 관리

7	주요 사업비 현황

(단위 : 백만원)

연번	주요 사업명	사업비	사업내용	비고
1	동네 체육시설 설치사업 (마을운동기구, 게이트볼장)	681	□ 마을 운동기구 설치 - 38개소, 426백만원 □ 게이트볼장 시설개선 - 5개소, 255백만원	2014
2	영산강변 저류지 체육시설 설치사업	2,702 (1,798)	□ 야구장 4면, 궁도장 1식, 게이트볼장 16면, 축구장 2면	2015
3	실내 체육관 리모델링 공사	2,000	□ 지붕교체, 배선 등 노후시설 교체	2014
4	(계속) 세지송제권역단위 종합정비사업	3,850 (723)	기초생활기반확충, 지역경관개선, 소득기반사업, 지역역량강화	2016

쾌적한 주거환경 및 생활공간 조성

1

1. 전원(신규)마을 조성

지 표	행정절차 추진율 : 20%

□ 친환경 마을 조성을 통한 도시민 유치

❍ 은퇴자 및 귀농․귀촌자를 위한 정주기반 택지조성

❍ 주변 공간과 녹지자원 적극활용 자연 친화적 마을 조성

□ 사업개요

❍ 대상지구 : 2개지구 / 67호

- 입주자 주도형 : 다도 도래(36호), 봉황 용반(31호)

❍ 사업내용

- 단지조성, 주택건립 등  : 입주자 부담

- 기반시설(도로, 상․하수도 등) : 일정액 지원

❍ 지원 사업비 : 3,600백만원(국비70%, 시비30%)

❍ 사업기간 : 2014. 01∼2018.12

□ 추진계획

❍ 2014. 01. : 전원마을 조성사업 제안서 신청

❍ 2014. 10. : 전원마을 조성사업 대상지 확정

❍ 2015. 01. : 전원마을 조성계획 수립 및 신청

❍ 2015. 10. : 사업시행 계획 승인

❍ 2016. 01. : 기반조성공사 착공

❍ 2018. 12. : 기반조성공사 준공

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
3,600 (국비2,520,시비1,080)	-	3,600	-

※ 2014년 사업계획 대상지로 확정 후 2015년부터 예산확보 시행

2. 영산강변 저류지 체육공원 조성

지 표	공사추진율 70%

□ 문화체육 인프라 강화

❍ 체육시설 확충으로 시민의 여가선용 및 건강증진 도모

❍ 체육대회 유치를 통한 지역 이미지 제고 및 경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 영산동 761-3번지 일원(영산강변 저류지)

❍ 사업내용 (A=164,978㎡)

- 야구장 4면, 게이트볼장 16면, 궁도장 1식, 축구장 2면

❍ 사 업 비 : 2,702백만원

❍ 사업기간  : 2013. 1. ∼ 2015. 12.

□ 추진계획

❍ 2014. 01. : 체육시설 설치사업 착공

❍ 2014. 06. : 야구장 4면 조성 완료

❍ 2014. 08. : KBO배 전국야구대회(여자, 유소년) 개최

❍ 2015. 12. : 전체사업 완료

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
2,702 (기금350, 시비2,352)	1,798 (기금350, 시비1,448)	904	1,440 (80%)

담당부서	도시재생사업소	공영개발팀장 정홍균	☏4521	주무관 김윤명	☏4513

행복마을 조성사업 추진

2

❍ 낙후되어 있는 농촌마을의 생활환경정비, 경관개선, 소득원 개발 등을

통해 지역 자립기반을 구축하여 원주민의 삶의 질 향상 및 도시민 정착 유도

1. 권역단위종합정비사업 추진

지 표	4개 권역 단계별 사업 추진

❍ 왕곡권역 소득사업(유제품 가공시설, 마을공동방앗간) 준공 : 2014. 4.

❍ 공산삼한지권역 시행계획변경 승인 및 소득사업 발주    : 2014. 6.

❍ 노안금안권역 2단계 사업 추진

- 권역간선도로 조성 등 1단계 사업 준공                   : 2014. 6.

- 권역센터 및 소득사업 발주                              : 2014. 7.

❍ 세지송제권역 기본계획 및 시행계획 승인         : 2014. 2. ~ 8.

2. 도시주거환경개선사업 추진

지 표	용산지구 발주 및 죽림지구 준공

❍ 용산지구 주거환경개선사업 추진

- 정비구역 변경승인, 사업지구 감정평가 및 보상협의   : 2014. 2.

- 사업시행계획 인가 및 고시, 사업 발주               : 2014. 3. ~ 4.

❍ 죽림지구 주거환경개선사업 추진

- 죽림지구 주거환경개선사업 편입부지 보상완료       : 2014. 3.

- 죽림지구 주거환경개선사업 준공                    : 2014. 7.

3. 한옥관광자원화사업 추진

지 표	한옥 13동 착수

❍ 한옥건립 조기 착공 및 완료

- 다시 보광마을 한옥관광자원화 사업(13동) 착수 및 추진    : 2014. 1. ~ 12.

4. 신규사업 발굴

지 표	신규사업 3개 지구 발굴

❍ 2015년 마을가꾸기 사업 발굴 및 공모제안       : 2014. 1. ~ 11.

5. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
7,355 (국․도비4,185,시비3,170)	7,055 (국․도비4,185,시비2,870)	300(시비)	4,233(60%)

담당부서	도시재생사업소	행복마을팀장 최우섭	☏4561	주무관 조규동 주무관 양일석	☏4562 ☏4563

마을공동소득창출사업 추진

3

❍ 소득기반시설확충, 지역역량강화 등 지역주민의 공동 활동을 통해

주민소득 향상 및 지역의 특색 있는 발전 도모

1. 마을공동소득창출사업 추진

목 표	노안금동마을 사업 완료, 산포금와마을 시행계획 승인

❍ 노안 금동마을 공동소득창출사업 추진

- 농산물가공시설 실시설계 완료                    : 2014. 1.

- 기본 및 시행계획 승인                           : 2014. 2.

- 농산물가공시설 공사 발주 및 준공                : 2014. 3. ~  6.

- 지역역량강화사업 발주                           : 2014. 3. ~ 12.

❍ 산포 금와마을 공동소득창출사업 추진

- 기본 및 시행계획 수립 용역 발주                 : 2014. 2.

- 농산물가공시설 실시설계 용역 발주               : 2014. 5. ~  7.

- 기본 및 시행계획 승인                           : 2014. 8.

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
400 (국․도비280,시비120)	400 (국․도비280,시비120)	-	240(60%)

담당부서	도시재생사업소	행복마을팀장 최우섭	☏7261	주무관 이영자	☏4564

시민의 건강 증진을 위한 체육시설물 활용도 제고

4

❍ 시민의 건강증진과 여가선용을 위한 최적의 시설로 관리

❍ 체육시설물 효율적 운영 · 관리로 이용객 편의도모 및 이용률 제고

1. 공공체육시설 이용 만족도 향상

지 표	체육시설 이용에 대한 만족도 88%

❍ 체육시설물 이용 시민들에 대한 불편사항 접수, 개선

❍ 서비스 확대를 위한 시민 만족도 조사추진

- 평가횟수 : 연 2회 설문지 직접조사

- 평가대상 : 체육시설 이용시민 100명 무작위 추출

- 측정기준 : 체육시설 이용만족도 항목에 대한 응답률

2. 효율적 관리를 위한 주변 환경과 시설물 개선

목 표	프로그램운영 및 환경개선 100%

❍ 종합스포츠파크 시설물 운영

- 실내수영장 이용인구 확대

- 종합운동장 천연잔디 축구장 개방

❍ 체육시설물 관리

- 수영장 회원관리 시스템설치

- 게이트볼장 환경정비, 시설개선

- 동네체육시설(운동기구) 설치

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
701 (국비 60, 시비 641)	701 (국비 60, 시비 641)	-	701 (100%)

3. 이용객 편익증진을 위한 실내체육관 리모델링 사업

목 표	공사추진율 100%

□ 이용자 편익 위주로 노후시설 교체 및 보강

❍ 건축분야 : 지붕 전면교체, 단열창 설치, 냉·난방 설비 설치

❍ 전기·통신·소방분야 : 배관·배선 등 노후설비 교체

□ 사업개요

❍ 시설규모(준공년도 1990년)

- 건축면적 : 3,055㎡(지상 2층)  - 경기장 면적 : 1,240㎡

- 수용가능 인원 : 3,000명(관람석 2,300석)

❍ 주 용 도 : 배드민턴, 족구, 배구 등 생활체육 및 각종행사

❍ 입주단체 : 배구, 유도, 태권도, 게이트볼, 씨름, 장애인협회

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 30%, 시비 70%)

❍ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 2014. 12.

□ 추진계획

❍ 2014.  1. : 실시설계 용역

❍ 2014.  4. : 계약심사

❍ 2014.  5. : 공사계약 및 착공

❍ 2014. 12. : 공사 준공

□ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
2,000 (국비600, 시비1,400)	974 (국비600, 시비374)	1,026	600 (62%)

담당부서	도시재생사업소	시설관리팀장 강성희	☏4521	주무관 김강현, 김동수	☏4523

남평 광촌 유역권 녹색벨트사업 (신규)

5

❍ 나주인근 광주권과 인구증가가 예상되는 혁신도시 관광수요 대비

❍ 지역의 경쟁력 강화를 위한 비교 우위의 사업발굴 육성

□ 성과목표 : 기본계획 설계용역 완료율 100%

1. 사업개요

❍ 위    치 : 남평읍 광촌리∼ 남석리 (L=15km구간)

❍ 사업내용 : 남평역, 광촌분교, 노거수 군락지,  트레킹코스 등

❍ 사 업 비 : 24백만원(기본계획 설계용역비)

❍ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 2015. 12.

2. 추진계획

❍ 2014.  1. : 사업계획 수립 용역 착수

❍ 2014.  5. : 사업계획 수립 용역 완료

❍ 2014.  6. : 사업추진 방법 및 우선순위 확정

❍ 2015. 12. : 남평 광촌유역권 녹색벨트사업 완료

3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
24 (시비 24)	24 (시비 24)	-	24 (100%)

※ 용역결과에 따라 소요사업비 별도 확보 사업추진

담당부서	도시재생사업소	공영개발팀장 정홍균	☏4511	주무관 김윤명	☏4513