전략산업과

친환경염색산업센터 건립

1

❍ 위    치 : 다시면 회진리 143-9번지 일원

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2013년 (4년)

❍ 총사업비 : 12,000백만원 (광특 50%, 시비 50%)

❍ 규    모 : 건축면적 2,346㎡/연면적 3,413㎡, 지상2층

❍ 사업내용 : 염료 생산라인 ․지원시설 구축, R&D 네트워크 구축

1. 친환경염색산업센터 건립 (10대 과제)

지 표	센터 건립율 100%

❍ 친환경염색산업센터 건립

- 염료 추출동 착공 : 2013. 1.

- 센터 본부 및 연구시설 준공 : 2013. 2.

- 천연염색산업 클러스터 단지조성 지구단위 계획구역 지정 용역

❍ 쪽 효능을 활용한 융․복합 연구용역 추진 : 2013. 10.

- 나주쪽을 활용한 환경성질환 치료재 개발

- 가축세균성질환 면역력 강화를 위한 사료첨가제 개발

- 농산물 천연색소를 이용한 유아용품 개발

- 염료작물 유전자원 관리체계 및 재배법 확립

❍ 친환경염색산업센터 준공 : 2013.12.

- 센터 본부 및 연구지원 시설, 천연염료 생산라인 구축

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
3,300 (광특 1,650, 시비 1,650)	3,300 (광특 1,650, 시비 1,650)	0	1,650 (50%)

담당부서	전략산업과	천연염색팀장 박근구	☏8701	주무관 이윤태	☏8703

천연색소산업화지원센터 건립

2

❍ 위    치 : 동수동 385-4번지(식품산업연구센터 옆)

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2014 (4년)

❍ 총사업비 : 10,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)

❍ 사업내용 : 연구 및 GMP시설, 저장시설, 시험연구 장비구축

1. 천연색소산업화지원센터 건립 (10대 과제)

지 표	센터 건립율 70%

❍ 관련기업 유치를 위한 홍보물 제작 : 2013. 1. ~ 3.

- 투자유치 관련 자료 수집

❍ 산업단지 입주신청 및 공장설립 승인 : 2013. 3. ~ 6.

- 산업단지 및 공장설립 승인 사업계획서 작성

❍ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2013.  7.

- 관련기업 방문 및 의견 수렴, 기업중심의 설비라인 구성,

❍ 색소센터 공사 발주 : 2013. 10.

- 법적 이행절차 준수(계약심사, 디자인심사, 건설기술심의)

❍ 천연색소산업화지원센터설립및운영에관한조례제정 : 2013. 12.

- 자료수집, 조례초안 작성, 전문가 의견 수렴, 입법예고 절차

❍ 시험 가동 및 공사 준공 : 2014.  8.

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
3,000 (국․도비 1,950, 시비 1,050)	1,950 (국․도비 1,950)	1,050 (시비)	-

담당부서	전략산업과	천연염색팀장 박근구	☏8701	주무관 문 식	☏8704

천연염색문화재단을 통한 거점 구축

3

❍ 나주쪽 등 천연염료를 활용한 다양한 제품개발을 위한 기술 보급

❍ 문화재단의 다양한 수익사업 발굴과 홍보로 자립기반 구축

1. 천연염색문화재단 거점 구축 (10대 과제)

지 표	문화재단 자립화율 (50%)

❍ 쪽 추출물을 활용한 생활용품 상품 출시 : 4월 중

- 쪽 치약, 샴푸, 바디로션, 바디워시, 비누를 세트상품으로 제작

- 중산층을 겨냥한 중저가 판매전략 (e-마트, 하나로마트 공략)

❍ 천연염색 공방 활성화 추진 (30백만원) : 2013. 2. ~ 12.

- 천연염색 입주공방에 대한 디자인 및 염색기법 교육

- 개발제품에 대한 홍보물 제작 및 언론매체 홍보

❍ 천연염색 홍보 사업 추진

- 각종 기획 전시회 개최 및 박람회 참가 (서울, 부산 등)

- 대한민국 천연염색 문화상품대전 개최 : 11월 중

❍ 천연염색 체험 학습장 운영 : 연중

- 단순체험 위주에서 다양한 생활용품 체험으로 변화 시도

❍ 전문인력 양성 교육사업 추진 : 연중

- 천연염색지도사 , 공무원 및 교원 직무연수 , 창업인력 양성 등

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
530 (시비 530)	280 (시비)	250 (시비)	280 (100%)

담당부서	전략산업과	경영유통팀장 한승종	☏8711	주무관 이승아	☏8712

나주 쪽 식품원료 사용승인 신청

4

❍ 나주쪽을 식품원료로 사용할 수 있도록 함으로써 다양한 상품 개발

❍ 쪽의 인체 안전성을 확보하기 위해서는 식품 등록 필요

1. 나주 쪽 식품원료 사용승인 (10대 과제)

지 표	쪽 관련 자료 구축율 (40%)

❍ 식품 원재료 분류

- 채소류 엽채료(잎)

❍ 쪽 관련 자료 구축 :  2013. 1.～2014. 9.

- 기원 및 개발 경위, 국․내외 인정 및 사용 현황

- 원료의 특성 및 제조방법에 관한 자료

- 원료의 안전성에 관한 자료 구축 (식품위생 검사기관)

- 독성시험자료 구축 (식약청 등록 비임상 시험기관)

❍ 식품 원료의 한시적 기준 및 규격인정 신청 : 2014. 5.

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
200 (시비 200)	-	200 (시비)

담당부서	전략산업과	경영유통팀장 한승종	☏8711	주무관 이승아	☏8712

천연염료 작물 생산단지 조성

5

❍ 최적의 생산단지 조성으로 양질의 염료 생산

❍ 다양한 염료작물 재배로 농가 소득 창출

1. 천연염료 작물 생산 (10대 과제)

지 표	염료작물 재배면적 (7ha)

❍ 작물 재배계획 수립 및 재배농가 선정 : 2013. 1. ~ 3.

- 쪽 재배 → 10농가 / 7ha《일반농가 8/4.9 , 염색장 2/2.1》

- 시범포 조성 → 0.9ha , 쪽 공원 → 5.5.ha

❍ 작물파종 및 사후관리 : 2013. 3. ~ 11.

- 울금, 지초, 홍화 등 3종 시범포 조성 (0.9 ha)

- 경운․정지 작업, 퇴비 살포, 제초․관배수 등 재배 매뉴얼 보급

- 쪽 공원 등 기반 정비 사업 추진 (지역공동체 일자리사업 연계)

❍ 시기별 수확 및 염료 추출 : 2013. 6. ~ 12.

- 친환경염색산업센터 염료 추출시설 연계 활용

❍ 채종포 관리 및 종자수확 (경관 보존) : 2013. 9. ~ 12.

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
87 (시비 87)	87 (시비 87)	0	44 (50%)

담당부서	전략산업과	염료육성팀장 박지현	☏8721	주무관 윤종석	☏8722