건  설  과

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

건설공사의 견실시공과 지역간특성에 맞는 도로망 확충

아름답고 쾌적한 정주기반 조성과 시민의 삶의 질 향상

Ⅱ	추진전략

고품질의 건설공사를 위한 사전심사 확행, 견실시공 견인

낙후지역 주민들과 소통행정 강화로 주민숙원사업 해결

교량 및 도로의 사전적 점검과보수를 통한 유지관리 철저

도로변 풀베기, 제설작업 등 주민자율참여 적극 유도

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성 과 목 표	사업비 (백만원)
농촌지역 간선도로망 확충	․군도 2개노선 4.97㎞,농어촌도로 5개노선 4.95㎞ (토공 및 구조물공사) : 72%	13,190
농촌 생활환경 정비사업	․3개면⇒도로개설1.5㎞, 용배수로정비 6.3㎞ 농로,진입로포장 5.3㎞, 아스콘포장 9.9㎞ (마을 및 농경지 기반시설 정비) : 100%	4,277
기계화경작로 확․포장사업	․농로포장 18㎞ (콘크리트포장 6㎞ 사리부설 12㎞) (경지정리지구 농로포장 및 사리부설) : 100%	846
도로․교량시설물유지관리	․관리대상 : 도로337개 노선 1,077km, 교량 111개소 ․사업량:위험교량 2개소,도로포장 2.5㎞,차선도색18㎞, (도로포장 및시설물 정비) : 100%	1,896
가로(보안)등 유지관리	․업체조정 5개권역 →3개권역, 긴급보수 연중추진 (가로등 단가계약 체결 및 긴급보수 추진) : 100%	481

군도․ 농어촌도로 확포장 공사(계속사업)

1

□ 지금까지 추진실적

❍ 대    상 : 10개노선 13.45㎞(군도 3, 농어촌도로 7)/17,447백만원

❍ 공사준공 : 3개노선 3.53㎞  (군도1, 농어촌도로2)  / 4,257백만원

❍ 잔여사업 : 7개노선 9.92㎞  (군도 2, 농어촌도로 5)/13,190백만원

□ 추진계획

❍ 2012. 01. ～12. : 토공 및 구조물공사 시공

❍ 2012. 12.        : 5개 노선 준공 (군도17호선, 남평, 다시, 산포, 봉황)

❍ 2013. 12.       : 2개 노선 준공(군도24호선, 농어촌도로306호선)

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 과다로 예산 일시확보 어려움, 연차적 예산확보 차질없이 추진

농촌 생활환경 정비사업

2

□ 사업개요

❍ 위    치 : 세지면, 금천면, 산포면(3개면)

❍ 사 업 량 : 마을 및 농경지 기반시설 정비

- 도로개설 1.5㎞, 용배수로 정비 6.3㎞, 농로․진입로포장 5.3㎞,

아스콘 포장 9.9㎞

❍ 사 업 비 : 4,277백만원(국비 2,994, 시비 1,283)

□ 추진계획

❍ 2012. 01. : 실시설계용역 실시

❍ 2012. 04. : 공사 발주

❍ 2012. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 농촌지역 생활환경 개선으로 주민편익 증진 및 정주의욕 고취

기계화 경작로 확․포장 사업

3

□ 사업개요

❍ 위    치 : 13개 읍․면 중 6개 면 선정(격년제 선정)

❍ 사 업 량 : 경지정리 지구 농로포장 및 사리부설 L=15km

❍ 사 업 비 : 846백만원(국비 592, 도비 76, 시비178)

□ 추진계획

❍ 2012. 01. : 사업 대상 후보지 결정

❍ 2012. 02. : 사업 시행 승인 신청(전라남도)

❍ 2012. 03. : 공사 착수

❍ 2012. 06. : 공사 완료

□ 기대효과

❍ 기계화 영농 기반 구축으로 농업 생산성 향상 및 소득 증대

도로 ․ 교량 시설물 유지 관리

4

□ 사업개요

❍ 관리대상 : 도로 337개 노선1,077㎞, 교량 111개소

❍ 사 업 량 : 위험교량 보수 2개소, 도로포장 2.5㎞, 차선도색18㎞ 등

❍ 사 업 비 : 1,896백만원

□ 추진계획

❍ 2012. 01 : 교량보수공사 및 정밀점검 실시설계

❍ 2012. 03 : 위험교량 보수공사 착공 및 정밀점검 준공

❍ 2012. 04 : 도로포장 및 차선도색, 시설물보수

❍ 2012. 12 : 위험교량 보수공사 준공(청송교)

□ 기대효과

❍ 공공시설물의 안전성 확보를 통한 안전사고 사전예방

가로(보안)등 설치 및 유지 관리

5

□ 사업내용

❍ 가로(보안)등 유지보수 단가 계약    : 225백만원

❍ 가로등 긴급 보수                  :  60백만원

❍ 가로(보안)등 신규 설치공사         : 196백만원

□ 추진계획

❍ 2012. 01. : 가로(보안)등 유지보수 단가계약(3개 권역)

❍ 2012. 02. : 가로등 신규 설치 대상지 현지조사(신규 및 교통사고 지역)

❍ 2012. 05. : 가로등 신규 설치공사 완료

❍ 2012. 12. : 가로(보안)등 유지보수 및 긴급보수 연중 추진

□ 기대효과

❍ 가로(보안)등의 신속한 개․보수로 주민생활 편익 제공

❍ 체계적인 보수와 유지관리로 안전사고 예방 및 민원 해소

소규모 주민숙원사업

6

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내일원 (19개 읍․면․동)

❍ 사 업 량 : 221건(마을진입로 및 안길포장, 용․배수로 정비)

❍ 사 업 비 : 5,635백만원

❍ 사업기간 : 2012. 1.～12.

□ 추진계획

❍ 2012. 01 : 현장 조사 및 설계

❍ 2012. 02 : 공사 발주

❍ 2012. 04 : 영농관련 공사 완료

❍ 2012. 06 : 기타 공사 완료

□ 기대효과

❍ 낙후지역 주민들의 숙원사업 해결로 서민생활 불편 해소