도시재생과

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

각종 도시개발사업으로 시민의 삶의 질 향상 도모

원도심 정비로 관광객 유치 및 지역경제 활성화 기여

Ⅱ	추진전략

도시관리 및 지구단위 계획수립 ⇒ 효율적인 토지이용 및 사유재산권 보호

도시 기반시설 확충 ⇒ 생활환경 개선 및 교통편익 제공

원도심 활성화 ⇒ 문화자원을 이용한 도시재생 계획 수립

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성 과 목 표	사 업 비	비 고
지구단위 및 도시관리 계획(변경) 수립	변경 2건, 계획 1건	1,100백만원
개발제한구역 주민지원	2개 주민지원사업 생활비용보조 75명	893백만원 45백만원
도시계획도로 개설	18개소 10,686m	50,646백만원
도시경관 디자인 개발	1개분야	100백만원
경관 디자인 조성	10대 과제 천년목사고을 나주 위상 정립 : 70% 한옥단지 지구지정 : 100%	1,117백만원 323백만원

2012년 도시계획도로 개설 (신규)

1

□ 사업개요

❍ 사 업 량 : 6개소 1.6㎞(안창동 사격장 진입도로 외 5개소)

❍ 사업비 / 기간 : 4,743백만원(시비 100%) / 2012. 1. ~ 2014. 12.

□ 추진계획

❍ 2012. 1. ~  6. : 실시설계 용역 착수 및 완료

❍ 2012. 6. ~ 12. : 준공 3개소

❍ 2013. 12. ~ 2014. 12. : 준공 3개소

□ 기대효과

❍ 도시기반시설 확충으로 지역발전 및 주민편익 증진

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

남평초교 사거리~부도심간 연결 도시계획도로 개설

2

□ 사업개요

❍ 사업량 : L= 460m, B= 25m

❍ 사업비 / 기간 : 4,235백만원(시비 100%) / 2012. 1. ~ 2015. 12.

□ 추진계획

❍ 2012. 1. ~  6. : 실시설계 용역 착수

❍ 2012. 6. ~ 2014. 12. : 보상협의

□ 기대효과

❍ 남평 부도심 진․출입 원활로 도심활성화 및 시 이미지 제고

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

대호지구 및 개발제한구역 자연취락지구 지구단위계획 변경수립

3

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011.  8. : 지구단위계획 수립 용역 착수

❍ 2011. 12. : 기초자료 수집 현지 조사 및 영향성 검토 등

□ 추진계획

❍ 2012.  8. : 법적 행정절차 이행 및 전라남도 결정신청

- 주민 의견청취, 관련기관 협의, 시 도시계획위원회 자문 등

❍ 2012. 10. : 전라남도 도시․건축공동위원회 심의

❍ 2012. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면고시

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

도시관리계획 (관리지역 세분) 변경수립

4

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011. 10. : 도시관리계획 수립 용역 착수

❍ 2011. 12. : 기초자료 수집 현지 조사 및 영향성 검토 등

□ 추진계획

❍ 2012.  9. : 법적 행정절차 이행 및 전라남도 결정신청

- 주민 및 의회 의견청취, 관련기관 협의, 시 도시계획위원회 자문 등

❍ 2012. 11. : 전라남도 도시계획위원회 심의

❍ 2012. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면고시

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

개발제한구역 주민지원사업 (지원사업 및 생활비용 보조)

5

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011. 12. : 지원사업 9개 중 7개 사업 준공

❍ 2011. 12. : 지원사업 2개(누리길 조성 및 평산2구 저온저장고 설치)                 설계착수

□ 추진계획

❍ 2012.  1. : 주민생활비용보조금 지급( 75명, 45백만원 )

❍ 2012.  5. : 평산2구 저온저장고 설치 준공

❍ 2012. 10. : 누리길 조성사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

도시계획도로 개설 (계속공사)

6

□ 지금까지 추진실적

❍ 남산로 연결도로 외 7개소 4.15㎞, 공정율 30%

- 공사중      : 5개소(남산로 연결도로 외 4)

- 실시설계 중 : 2개소(전남 과학고 ~ 국도1호선 외 1)

- 보상협의 중 : 1개소(성북동 중앙병원 ~ 국도1호선)

□ 추진계획

❍ 2012. 1. ~ 12. : 공사 준공 7개소

❍ 2013. 2.      : 공사 준공 1개소

□ 문제점 및 대책

❍ 남산로 연결도로 : 대성제과 영업장이전 지연 ⇒ 행정대집행 준비 중

❍ 현대(아) ~ 원협공판장간 : 미 협의 토지 8필지 지방토지수용위원회 재결신청(11. 7.)

이창택지 ~ 용산동 (국도 23호선) 도로 개설

7

□ 지금까지 추진실적

❍ 2010.  3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2011. 12. : 실시설계 도서 납품

□ 추진계획

❍ 2012. 1. ~ 2. : 실시계획인가고시 및 보상협의 추진

❍ 2012. 3. : 실시설계 용역 완료

❍ 2012. 6. : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 7,800백만원 중 미 확보 사업비(7,300 백만원) 연차적 확보 시행

진포동 녹색 석관황포길 확 ․ 포장

8

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011. 10. : 공사 착공(공정율 40%)

❍ 2011. 12. : 공사 및 토지보상 협의 중(55필지)

□ 추진계획

❍ 2012.  1. : 구조물 및 포장공사

❍ 2012.  2. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 분묘보상 미 협의로 공사 지연

⇒ 지속적인 보상협의 독려로 기간 내 공사 완료

금천면사무소 ~ 배시험장간 도시계획도로 개설

9

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2012.  1. : 주민설명회 개최

❍ 2012.  3. : 용역 완료

❍ 2012.  4. : 공사 착공

❍ 2012. 12.  : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

나주시 농ㆍ특산물 공동브랜드 디자인 개발

10

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011.  4. : 용역 계약 심사

❍ 2011.  9. : 용역 계약 심의

❍ 2011. 10. : 용역 계약 및 착수

□ 추진계획

❍ 2012. 1. : 중간보고회 개최 및 각종설문조사, 디자인전문가 자문

❍ 2012. 3. : 의회 보고 및 최종보고회 개최

❍ 2012. 4. : 특허청 디자인 등록

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

천년목사고을 나주 위상 정립

11

□ 사업개요

❍ 사업내용 : 3개 분야

- 원도심간판정비사업 (2011년)

- 공공디자인 가이드라인 수립 (2011년)

- 대표 상징물(랜드마크) 제작 설치사업 (2012년~2014년)

❍ 사업비 / 기간 : 1,117백만원(시비) / 2011. 1. ~ 2014. 12.

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011. 10. : 원도심간판정비사업 완료

❍ 2011. 11. : 공공디자인 가이드라인 용역 중간보고회

□ 추진계획

❍ 2012. 1. : 공공디자인 가이드라인 최종보고회 개최 및 완료

❍ 2012. 2. : 특허청 디자인 등록

❍ 2012. 4. : 대표상징물 추진계획(안) 작성

역사문화도시와 어울리는 한옥단지 지구 지정

12

□ 지금까지 추진실적

❍ 2010. 1. : 원도심 활성화 제1종 지구단위계획 수립 용역 착수

❍ 2010. 6. : 기초자료 수집 및 지구단위계획(안) 작성

❍ 2010. 9. : 제1종 지구단위계획 수립 용역 중간보고회 개최

❍ 2011. 3. : 지구단위계획 수립 용역 일시 중지

□ 추진계획

❍ 2012.  2. : 역사문화유산 활용 도시활성화 용역과 연계 한옥단지 구역 확정

❍ 2012.  3. : 제1종 지구단위계획 수립 용역 최종보고회 개최

❍ 2012.  4. : 주민 의견청취 공람․공고(주민설명회) 및 관련부서 협의

❍ 2012.  5. : 나주시의회 의견 청취 및 나주시 도시계획위원회 자문 및                 전라남도 결정 신청

❍ 2012.  7. : 전라남도 도시․건축공동위원회 심의 및 결정고시

□ 문제점 및 대책

❍ 역사문화유산 활용 도시 활성화 용역(문화체육관광과)과 병행 추진