산림공원과

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

다양한 녹색 산림사업 추진으로 저탄소 녹색성장 도모

휴양 시설과 공원녹지 확충으로 시민 삶의 질 향상

Ⅱ	추진전략

녹색자원 정비사업 추진  ⇒ 지속적인 녹색 일자리 창출

나무은행 운영 내실화    ⇒ 조경수목 재활용, 예산 절감

산림 휴양, 휴식 공간 확충 ⇒ 건강하고 쾌적한 시민 여가 제공

도시림(가로수) 정비사업 추진 ⇒ 녹색 네트워크 강화 및 가로경관 질 제고

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성 과 목 표	사업비 (백만원)
산림자원 육성을 통한 일자리 창출	- 조림사업 : 130ha - 숲 가꾸기 사업 : 3,364ha - 산림바이오매스 산물 수집 : 250ha - 칡덩굴 제거사업 : 1,000ha	5,761
대호수변공원 조성사업	- 산책로 조성 1km, 연꽃식재 21,000㎡, 관정시설 등	600
금성산 생태 물놀이장 활성화	- 사방댐 준설을 위한 사유지 매입 - 물놀이장 보완사업 : 바닥타일 공사 등	79
등산로 조성 및 시설물 관리	- 산림욕장 등 4개소 : 6km	128
임도 설치 및 유지관리	- 임도신설 및 작업임도 : 4km - 구조개량 및 보수 : 11km	899

추 진 과 제	성 과 목 표	사업비 (백만원)
산불방지 종합대책	- 상황실 운영:2.1.~5.15./11.1.~12.15. - 진화대 운영 : 49명	656
병해충방제 및 유전자원 보호	- 산림병해충방제 : 100ha - 보호수ㆍ노거수 정비 : 684주 등	523
가로수 조성사업	- 가로 숲 조성 : 3개소 - 명품 가로수길 4개년 정비(3차) - 승촌보ㆍ죽산보 왕벚나무 식재 - 가로수 보식 등	1,382
녹색조성 지원사업	- 녹색쌈지공원 조성 : 0.5ha - 녹색나눔숲 조성 : 1.5ha - 녹색복지공간 조성 : 1.0ha	880
소공원 및 가로화단 관리	- 54개소 / 15ha : 해충방제, 풀베기, 전정 등	142

녹색성장 시대에 부응하는 산림자원 육성

1

□ 추진방향

❍ 목재펠릿 등 바이오매스 원료공급을 위한 바이오순환림 조성 확대

❍ 도로변 경관조림 및 덩굴류 집중제거로 아름다운 숲 조성

❍ 마을주변, 주요도로, 관광지 등 가시권 및 인공림을 우선 추진하여

경제적 가치제고와 가시적 성과 창출

□ 추진계획

❍ 조림사업 : 130ha / 사업비 839백만원(국비504, 도비89, 시비246)

- 바이오순환림 60, 목재 생산림 10, 특용수 조림 7, 큰나무공익조림 3,

산림재해복구 45, 유휴토지 조림 5

- 대상지(10개 읍면동) : 남평읍 광촌리 산48 외 62필지

ㆍ 남평, 세지, 왕곡, 동강, 다시, 문평, 노안, 다도, 봉황, 영강

※바이오순환림 : 짧은기간(15~25년)에 목재를 수확하여 산림바이오매스와

산업용재를 공급하는 산림을 조성

※목재생산림  : 양질의 목재를 지속적으로 생산 공급하는 산림을 조성하는 조림

※특용수조림  : 주거지ㆍ경작지 주변 등 산림관리가 쉬운 지역에 단기소득

창출이 가능한 유실수ㆍ특용수 조림

※큰나무공익조림 : 경관조성 등 산림의 공익적 가치 증진을 위하여 꽃이나

열매가 아름다운 경관수종 식재

※산림재해복구 : 산불ㆍ병해충 및 태풍 피해지 등 산림재해지의 신속한

복구로 산림경관 회복 및 생활환경 개선

※유휴토지조림 : 한계농지, 마을 공한지 등 유휴지에 유실수ㆍ특용수

조경수 등을 식재하여 식생복원 및 소득증대에 기여

❍ 숲 가꾸기 사업 : 3,364ha / 사업비 4,014백만원(국비2,007, 도비481, 시비1,526)

- 큰 나무 가꾸기 2,100, 조림지 가꾸기 1,264

- 사업대상(12개 읍면동) : 남평, 세지, 왕곡, 반남, 공산, 동강, 다시,

문평, 산포, 다도, 봉황, 영산(숲 가꾸기 5개년 계획에 의해 추진)

※숲 가꾸기 사업 : 인공조림이나 천연림이 건강하게 자랄 수 있도록 숲을

가꾸고 키우는 사업으로 숲의 연령과 상태에 따라 가지치기,

조림지 가꾸기, 천연림 가꾸기 등과 같은 작업이 있습니다.

□ 기대효과

❍ 경관적, 경제적 가치가 높은 산림자원 조성 및 저탄소 녹색성장의 기반구축

❍ 숲 가꾸기 사업을 통한 기후변화 대비 및 탄소흡수원 확충

대호수변공원 조성사업

2

□ 필 요 성

❍ 대호수변공원의 확대 보완 개발로 관광자원화 및 생태 휴식 공간의

질적 보완으로 시민 삶의 질 향상

□ 추진방향

❍ 시민이 필요하고 요구한 시설에 대해 최우선 확충

❍ 자연에 가까운 공원으로 조성하여 생태계의 건강성, 쾌적성 극대화

❍ 도심 생활권 공원으로서 우리 시의 대표적 공원으로 조성

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2012. 5. ~ 7.

❍ 사업내용 : 산책로 조성 1㎞, 연꽃식재 및 대호제 준설 21,000㎡, 관정시설 등

❍ 사 업 비 : 600백만원(시비)

□ 기대효과

❍ 대호수변공원 휴식공간의 질적 보완으로 시민 삶의 질 향상

❍ 시민의 나주 도심 대표적인 공원 조성에 대한 욕구 충족

□ 문제점 및 대책

❍ 대호제 목적외 사용과 관련 농업기반공사와 사전 협의 필요

❍ 부족사업비 4억 추경확보 필요

등산로 조성 및 시설물 관리

3

□ 추진방향

❍ 체계적인 정비 및 관리로 안전하고 쾌적한 등산 환경 조성

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2012. 4. ~ 8.

❍ 사업내용

- 등 산 로 : 금성산 산림욕장 등 4개소

(맛재~월정봉, 팔마APT~식산, 다시 호장마을~본촌)

- 시 설 물 : 정자 5동, 벤치 등 60점, 운동시설(허리돌리기 외 46점)

- 사 업 량 / 사업비 : 6㎞ / 128백만원(국비64 도비19.2 시비44.8)

□ 기대효과

❍ 등산로 조성 및 시설물 사후관리 강화로 지역주민 건강증진 도모

□ 문제점 및 대책

❍ 산주의 반대가 많아 추진에 어려움이 있으나 적극 설득 추진

산림보호강화 및 경영기반 구축

4

□ 사업개요 및 추진방향

❍ 임도사업 / 899백만원(광특70%, 시비30%)

- 임도신설 및 작업임도(소연제, 대도지구) 4km

- 구조개량 및 보수사업 (다도, 문평지구) 11km

❍ 산불방지 종합대책 추진 / 656백만원(국30%, 도15%, 시55%)

- 봄․가을철 산불상황실 운영 20개소(2.1.~5.15., 11.1.~12.15.)

- 산불전문진화대(감시원) 61명 운영(연7,000명, 봄철 위험기간 집중 고용)

ㆍ모집 : 1.17.한(시 진화대 20, 읍면동 감시원 41)

- 실버산불감시원 30명 운영 (연900명)

- 산불예방 홍보 및 관리 강화로 산불발생 감소 목표

(5년 평균 40건 대비 50% 감소 추진)

❍ 산림병해충방제 및 유전자원 보호 관리 / 523백만원

- 산림병해충 방제 100ha(솔잎혹파리 20, 깍지벌레 10, 기타해충 70)

- 보호수 및 노거수 정비 684주(우량 숲 포함)

- 산림유전자원보호림(다도 불회사) 정비 및 수목관리 41ha

□ 추진계획

❍ 2012. 1.            : 사업계획 수립

❍ 2012. 2.~5., 11.~12. : 산불종합상황실 운영

❍ 2012. 2. ~ 12.      : 공사 추진 및 준공

□ 기대효과

❍ 자연 친화적인 산림보호체계 확립

❍ 산림생태계의 건강성 유지로 산림의 공익적, 경제적 기능 확대

❍ 보존가치가 있는 보호수 등 유전자원 발굴로 녹색 인프라 구축

□ 문제점 및 대책

❍ 마을 주민들의 산불예방 및 진화 등 시민 참여의식 부족

⇒ 지속적인 홍보실시 및 산불 없는 마을 캠페인 추진 등

도시림 및 시설녹지 조성사업

5

□ 사업개요 (7개 사업분야 / 2,312백만원)

❍ 녹색쌈지공원 조성사업 : 1개소 / 200백만원 (광특50%, 도15%, 시35%)

- 스포츠파크 내 : 0.5ha (송월동)

❍ 가로 숲 조성사업 : 3개소 / 640백만원 (광특50%, 도15%, 시35%)

- 강변우회도로         : 8.0km / 320백만원

- 다시 영동리 ~ 죽산리 : 6.0km / 240백만원

- 노안 도산리 ~ 학산리 : 2.0km /  80백만원

❍ 녹색자금 지원사업 2개소 / 680백만원 (국비 100%)

- 녹색 나눔 숲 조성사업 : 스포츠파크 내 1.5ha(영강동) / 600백만원

- 녹색 복지공간 조성사업(봉황 백양실버타운) : 1.0ha / 80백만원

❍ 명품 가로수 4개년 정비 사업(3차) / 350백만원

- 다도 산림욕장 진입로        : 3.0km / 112백만원

- 남평 풍림 ~ 화순경계        : 2.1km /  85백만원

- 봉황 송현저수지 ~ 다도 경계 : 0.5km /  40백만원

- 다시 소재지 ~ 죽산 동산마을 : 2.6km / 113백만원

❍ 승촌보 죽산보 왕벚나무 식재 / 230백만원 (승촌보 150, 죽산보 80)

❍ 가로수 보식 사업 : 2개구간 / 162백만원

- 나주호 왕벚나무 보식                 :  5km /  50백만원

- 영산포 외고 ~봉황 구간 왕벚나무 보식 : 10km / 112백만원

❍ 소공원 조성(섬멀마을 외 3개소) / 50백만원

- 섬멀마을 1개소 / 20백만원, 삼영 대덕아파트 주변 2개소 / 15백만원, 계로리 1개소 / 15백만원

□ 추진계획

❍ 2012. 1.        : 사업계획 수립

❍ 2012. 4.        : 유관기관 협의 및 실시설계 용역 완료

❍ 2012. 2. ~ 12.  : 공사 추진 및 준공

□ 기대효과 및 관련부서 협조

❍ 도시림 조성 등으로 인한 녹색 네트워트 구축

❍ 녹화를 통한 공간의 시각적, 생태적, 공공적 질 제고

❍ 녹색 나눔 숲 및 복지 공간 조성사업 추진을 위한 녹색사업단 협의

❍ 가로수 사업 추진을 위한 유관기관(익산청 등) 협의

□ 문제점 및 대책

❍ 익산청, 녹색사업단 등 사업 관련부서와의 빠른 협의를 통해

조기발주 달성

❍ 시민 참여 유도를 위한 주민 설명회 개최 및 주민 홍보 강화

등산로(산맥) 연결사업

6

□ 필 요 성

❍ 단절된 산맥을 연결하여 지역 주민들의 정기를 살리고 등산로   이용객 및 야생동물의 이동 통행 확보로 자연환경 보전

□ 지금까지 추진실적

❍ 남평 등산로 연결사업

- 위    치 : 나주시 남평읍 교원리 산10-3번지 일원

- 사 업 량 : 32m(L=32m, S=10.6m)

- 사 업 비 : 638백만원(도급액 239백만원, 관급자재 등 399백만원)

- 사업기간 : 2011. 9. 1. ~ 2012. 2. 17.

- 사업내용 : 파형강판 32m, 조경수 식재 등

- 사 업 자 : 담양군 산림조합

- 지금까지 공정율 30%

❍ 맛재 등산로 연결사업

- 위    치 : 나주시 보산동 산8번지 일원

- 사 업 량 : 50m(L=50m, S=23m)

- 사 업 비 : 2,664백만원(도급액 1,101백만원, 관급자재 등 1,563백만원)

- 지금까지 추진사항

․ 2011.  4. 14. : 실시설계 용역

․ 2011.  9. 19. : 계약예비심사 완료(나주시 감사실)

․ 2011. 10. 27. : 대상지 지하 매설물 사전 협의

․ 2011. 12. 22. : 계약심사 완료(전라남도 세무회계과)

․ 2011. 12. 28. : 공사계약 의뢰(나주시 회계과)

□ 앞으로 추진계획

- 2012. 1. : 맛재 파형강판(관급자재) 계약 심의(나주시)

- 2012. 1. : 맛재 공사입찰 공고 및 계약(나주시)

- 2012. 2. : 맛재 공사 착공(공사기간 : 착공일로부터 6개월)

□ 기대효과

❍ 산을 이용하는 시민들의 쾌적한 등산 환경 조성으로 삶의 질 향상

□ 문제점 및 대책

❍ 지상(통신주) 및 지하(수도관 등)지장물이 산재되어 있어 추진에

어려움이 있으나 협의 후 추진

금성산 생태 숲 조성사업

7

□ 현    황

❍ 위    치 : 나주시 노안면 영평리 산113번지 일원

❍ 기    간 : 2009년 ~ 2013년

❍ 사 업 량 : 51㏊

❍ 총사업비 : 5,208백만원(국비 2,604 시비 2,604)

❍ 사업내용 : 편백 숲, 난대 숲, 비비추원, 탐방로, 휴게시설 등

□ 지금까지 추진실적

❍ 사전 타당성 심사(산림청)                   : 2007.  5. 21.

❍ 실시설계 및 기본설계 용역 완료             : 2009.  8.

❍ 일상감사 및 실시설계자문 완료(시)          : 2009.  9.

❍ 도유림 대부허가 및 조성계획 승인           : 2010.  4. 15.

❍ 금성산 생태 숲 조성사업 착공(산책로 1.7㎞) : 2011.  5. 17. ~

❍ 금성산 생태 숲 변경지정 신청서 제출       : 2011. 12. 14.

- 기본계획 변경 및 대상지 확대(51㏊ → 56.8㏊)

□ 향후계획

❍ 2012. 1. ~ 2013. 12. 31. : 숲 가꾸기, 식재공사, 건물 신축 등

도유림 대부 조건부 허가 사항에 따라 산림청의 기본계획 변경 승인 후

현재 발주중인 토목ㆍ조경 분야는 변경 축소 준공하고,

숲 조성, 탐방로, 생태 숲 지원, 비비추원 등 비시설 사업은 확대

지역인 시유지(금안 산29)에 추진하여,

금성산 등산로, 산림욕장, 설재서원, 삼남대로, 심향사 등과 연계한

관광자원으로 활용

□ 문제점 및 대책

❍ 기본계획승인 및 도유림 대부 조건시 도유림내 영구시설물 축조

불가로 대체부지 확보(노안면 금안리 산29번지) 후 생태 숲 변경

지정 신청 하였으며, 산림청 기본계획 변경 승인시 설계 반영 후

추진코자 함.