재난관리과

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

한 발 앞선 대응과 방재기반시설 확충으로 완벽한 재해사전 대비

쾌적하고 자연 친화적인 하천 유지관리

민방위 교육 강화로 상시 준비태세 확립

Ⅱ	추진전략

재난종합상황실 상시운영으로 재난상황 신속 대처

재난취약가구 안전 점검 및 시설물 일제 정비 등 재난관리 종합대책 수립

하천시설물 유지보수 관리 및 친수공간 조상사업 추진

민방위 대원의 실전체험 교육 및 안보교육 강화

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성과목표	사업비 (백만원)
재해예방을 위한 방재기반시설 확충	․ 통합원격제어 자동화 구축 : 6개소 ․ CCTV 설치 : 6개소	850
풍수해저감 종합계획 용역	․ 풍수해 특성 및 기초조사 ․ 우수유출저감시설 기본계획	493
풍수해 보험 가입홍보	․ 주택, 온실(하우스포함) : 3,391세대	850
수청 재해위험지구 정비사업	․ 실시설계용역추진 완료	14,600
소하천 정비사업 추진	․ 입석전천 및 월산소하천 정비	3,076

민방위 운영 및 비상대비업무 효율화

1

□ 추진방향

❍ 민방위대 교육ㆍ훈련의 내실화 및 비상대비태세 확립

□ 추진계획

❍ 민방위대원 교육 및 훈련 : 기본교육 5,464명, 민방위의 날 훈련 5회

❍ 민방위시설 및 장비관리 : 70개소, 6종 2,000여점(방독면 외 5종)

❍ 비상대비 태세 확립 : 을지연습 실시, 중점자원관리, 충무계획 수립

❍ 역점시책 추진 : 공직자ㆍ민방위대원 안보교육, 교육훈련 자율참여

□ 기대효과

❍ 민방위시설 및 자원 완벽 관리로 비상사태 등 상시 준비태세 확립

한발 앞선 대응 완벽한 재난대비

2

□ 추진방향

❍ 기후변화에 따른 악 기상현상이 빈번히 발생함에 따라 사후관리체계에서 예방위주의 선제적 방재행정으로 한발 앞선 상황관리 및 대응시스템 구축

□ 추진계획

〈 재난상황실 운영〉

❍ 재해대책기간

- 여름철 : 5. 15. ~ 10. 15. (호우, 태풍, 홍수 등)

- 겨울철 : 12. 1. ~ 익년 3. 15. (대설, 한파 등)

❍ 근무형태(3단계) : 주의보단계, 경보단계, 심각단계

(자연재난표준행동 매뉴얼 근무)

□ 기대효과 및 관계부서 협조

❍ 재난사전대비 태세 확립으로 인명 및 재산피해최소화

❍ 민․관․군, 유관기관, 일반기업 등 상호 유기적인 협조체계 구축

❍ 자율방재단, 안전모니터봉사단, 등의 지속적 교육 통한 민간방재 역량강화

나주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역

3

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011.  5월 : 사업추진 확정 및 2011년 1회 추경 예산 확보

❍ 2011. 12월 : 계약 및 착수(1차분, 500백만원)

□ 추진계획

❍ 전체 : 2011. 12. ~ 2013. 12.(24개월) 풍수해저감 종합계획 수립

- 1차 : 2011. 12. ~ 2013. 8.(20개월) 기초조사, 우수유출저류시설

설치사업 타당성조사 및 기본설계, 풍수해저감종합계획 추진

- 2차 : 2013. 08. ~ 2013. 12.(4개월) 풍수해저감종합계획 완료

수청 재해위험지구 정비사업

4

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 남평읍 수원리(지석강변)

- 사업내용 : 빗물펌프장 1개소(700HP 6대), 인입수로정비 650M 등

- 사 업 비 : 14,600백만원(국비 8,760, 시비 5,840)

- 2012년 설계용역 : 300백만원 확보

□ 추진계획

❍ 2012. 1. ~ 12. : 실시설계 착수, 설계검토 및 관련법 이행

❍ 2013. 1 ~ 2014. 12. : 공사착공 및 준공 예정

□ 기대효과 및 관련부서 협조

❍ 매년우수기시 반복되는 주택 및 농경지 침수예방

❍ 재해위험지구 체계적인 정비로 방재기반시설 확충

❍ 도시재생과 : 도시관리계획시설(유수지) 변경 결정 등

❍ 농업정책과 : 농지전용 협의

❍ 영산강유역환경청 : 사전환경성 검토

재해예방을 위한 방재기반시설 확충

5

□ 사업개요

❍ 대    상 : 청동 빗물펌프장 외 15개소

❍ 사 업 량

- 통합원격제어 자동화 구축6개소(7개소 기 설치완료)

- 멀티미디어(CCTV)설치 6개소 등

❍ 사 업 비 : 850백만원

□ 추진계획

❍ 2012. 1. : 실시설계

❍ 2012. 3. ~ 6. : 공사발주 및 착수

□ 기대효과

❍ 통합원격제어시스템 구축으로 국지성 호우침수피해 최소화

❍ 자연재해대책기간 이전 공사 준공으로 인명 및 재해피해 예방

풍수해보험 주민홍보 및 가입 홍보

6

□ 추진방향

❍ 풍수해에 대해 능동적으로 대처 할 수 있도록 주민홍보 활동을

강화하여 풍수해보험 가입자 유치에 만전

- 근거 : 풍수해 보험법

- 대상 : 주택, 온실(하우스 포함) / 태풍, 호우, 홍수, 강풍, 해일, 대설

□ 추진계획

❍ 나주시 대상시설 홍보 가입 및 가입 신청 : 2012. 1. ~ 5.

❍ 읍․면․동 풍수해 담당자 교육(연2회)

❍ 주민 풍수해 보험 효율성 설명회 개최(10회)

□ 기대효과

❍ 풍수해로 인한 재산피해를 실질적으로 보상

문평천 생태하천 복원사업

7

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2010. ~ 2012.

❍ 사업구간 : 다시구교 ~ 백동교(2.1km)

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 3,500, 시비 1,500)

❍ 사업내용 : 생물서식 공간, 수질정화습지, 하천정비 및 낙차보 설치

□ 추진계획

❍ 2012. 2. : 환경부 및 환경공단에 확정 실시설계서 제출

❍ 2012. 5. ~ 2013. 12. : 공사착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 하천 유지용수 확보하여 건천화 방지 및 자연형하천 조성

□ 문제점 및 대책

❍ 환경부에서 순수 자연생태환경 보존 방향 사업 승인시 사업효과 미흡

⇒ 다시교 상류 ~ 백동교 구간 하천기본계획에 따른 하폭확장 및

제방보강 사업 반영토록 협의 및 건의

소하천 정비사업

8

□ 사업개요

❍ 사업내용(2개 지구)

사 업 명	위 치	사업기간	사업개요	사업비(백만원)	비고
입석전천 정비사업	문평면 지내	2012. 1 ~ 2012. 12	L=0.8㎞, B=3.0~8.0m	560 (국280, 시280)
월산천 정비사업	금천면 지내	2012. 1 ~ 2012. 12	L=0.8㎞, B=22.0m	2,516 (국1,258, 시1,258)

□ 추진계획

❍ 2012. 1. ~  2. : 공사발주 및 관계법 협의

❍ 2012. 3. ~ 11. : 편입토지 보상 및 준공

□ 기대효과 및 관련부서 협조

❍ 수해 재발방지와 재해 사전예방으로 인명 및 시민의 재산보호

❍ 농지전용협의(농업정책과), 사전환경성 검토(환경관리과)