기업지원실

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

기업선호 투자환경 조성을 통한 기업유치로 일자리 창출

기업 수요충족 맞춤형 전문인력 양성으로 구인․구직난 해소

Ⅱ	추진전략

기업분석 맞춤형 지원 및 기업선호 투자환경 조성

중기업 이상 중점 투자유치로 일자리 창출 극대화 추진

전문인력 수급으로 일자리 창출과 기업의 구인난 해소

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성과목표	사업비 (백만원)
지역투자 활성화 추진 (투자유치)	25개 기업, 투자금액 1,500억원, 고용인원 1,500명	1,476
고용 및 투자확대를 위한 중소기업 지원	중소기업 정책자금 이차보전 : 50개 기업 스타&Pre스타기업 육성 : 8개 기업	815
맞춤형 산업․농공단지 조성	조성률 30%	335,036
지역맞춤형 일자리창출 지원사업 (직업훈련원 운영, 취업알선)	취업률 70%	819 (예정)
2012년 취업박람회 개최	참가업체 : 40개, 구직자 : 2,000명	20

고용 및 투자확대를 위한 중소기업 지원

1

□ 관내 기업 현황                          (2011. 12. 31. 기준)

계	대기업 (300인 이상)	중기업 (50~299명)	소기업		비고
			5~49명	5인 미만
321 (100%)	2 (0.6%)	9 (2.8%)	201 (62.6%)	109 (34%)

※ 종업원 : 4,085명(대기업 623명, 중기업 884명, 소기업 2,578명)

□ 추진계획

❍ 전라남도 중소기업 육성자금 출연    : 174백만원

❍ 산․학․연․관 협력 강화사업 추진  : 2개소, 245백만원

❍ 관내기업 신규 고용보조금 지원      : 20개 기업, 72백만원

□ 기대효과

❍ 기업 수요를 충족하는 맞춤형 지원으로 건실한 기업육성

❍ 산․학․연․관 협력으로 창업 및 신규고용 기업 지원

나주시 스타기업 육성사업 추진

2

□ 추진방침

❍ 기업 성장 단계별 분석을 통한 종합 카운슬러 제공

❍ 스타기업 육성을 통한 연관기업 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 추진계획

❍ 나주시 스타기업 육성사업 출연금 지급(전남테크노파크) : 200백만원

❍ 스타기업 및 Pre스타기업 선정 및 지원 : 8개 기업(예정)

□ 기대효과

❍ 기업 수요충족 종합컨설팅 제공으로 기업의 점진적 도약 기여

❍ 나주시 대표기업 육성을 통한 일자리 창출로 지역경제 활성화

나주시 기업 포털사이트 설치 운영

3

□ 추진방침

❍ 정보 수요자 중심의 메뉴 구성으로 접근의 용이성 확보

❍ 기업과 행정의 공조시스템을 구축, 친 기업행정 실현으로 동반성장의 기틀 마련

□ 추진계획

❍ 기업 포털사이트 레이아웃 작성 및 구축    : 2012. 3. ~ 6.

❍ 기업 포털사이트 시범 운영                : 2012. 7.

❍ 사이트 운영 및 업데이트                  : 2012. 8. ~

□ 기대효과

❍ 한눈에 볼 수 있는 기업관련 풍부한 콘텐츠 제공으로 각종 정보 접근 용이

중소기업 육성자금 융자금리 이차보전

4

□ 추진방침

❍ 중소기업의 경영활동에 필요한 운전자금의 적기 공급으로 기업의 자금경색 완화 및 기업의 유동성 지원

□ 추진계획

❍ 융자금 지원대상 중소기업 신청 및 접수 : 2012. 1.

❍ 융자금 지원대상 중소기업 추천         : 2012. 1.

❍ 중소기업 융자금 금리 이차보전(2.5%이내) : 2012. 2. ~

□ 사 업 비 : 100백만원(시비)

□ 기대효과

❍ 안정적 기업경영과 건실한 중소기업 육성으로 지역경제 활성화 기여

지역 투자 활성화 추진

5

□ 추진방침

❍ 산업별, 지역별 찾아가는 맞춤형 투자유치 활동 전개

❍ 투자 불패 이미지 구축을 위한 신규투자 지원

□ 추진계획

❍ 기업유치 목표 설정 : 25개 기업, 투자 1,500억원, 고용인원 1,500명

❍ 투자유치 환경 조성

- 금융지원, 산업입지 확보 등 기업 선호 투자환경 조성

- 국내․외 투자유치 전문 민간인 또는 기업 적극 활용

❍ 중점유치 분야 : 대규모 물류산업, 혁신도시 연관기업, 해외기업 등

□ 기대효과

❍ 국내․외 기업의 적극적인 투자유치로 일자리 1만개 창출로 인한 인구 유입 등 낙후된 지역경제 활성화 도모

공공근로사업 추진

6

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.

❍ 참여인원 : 90명

❍ 사 업 비 : 378백만원(분권 126, 도비 17, 시비 235)

❍ 사업내용 : 정보화추진사업, 공공생산성사업, 공공서비스사업 등

□ 추진계획

❍ 상반기 참여자 신청․접수 및 배치 : 2012. 1. ~ 2.

❍ 하반기 참여자 신청․접수 및 배치 : 2012. 7. ~ 8.

□ 기대효과

❍ 실업자 및 저소득층에 대한 근로기회 제공으로 최소한의 생존권 보장

중소기업 희망 청년인턴사업 추진

7

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.

❍ 지원인원 : 15명

❍ 사 업 비 : 90백만원(도비 45, 시비 45)

❍ 지원내용 : 1인당 월 100만원, 3개월 지원(정규직 전환 시 3개월 추가 지원)

□ 추진계획

❍ 인턴 신청자 접수 및 선발       : 2012. 2. ~ 3.

❍ 인턴약정 및 인턴 지원협약 체결 : 2012. 3.

❍ 인턴 선발자 현장 배치          : 2012. 4.

□ 기대효과

❍ 청년실업자에게 일자리를 제공 구직난 및 청년실업 해소

❍ 중소기업의 구인난 해소 및 기업경쟁력 향상 기여

지역공동체 일자리사업 추진

8

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012. 3. ~ 6(4개월)

❍ 계획인원 : 87명

❍ 사 업 비 : 373백만원(국비 187, 도비 56, 시비 130)

❍ 추진사업 : 도시공원 관리사업 외 7개 사업

□ 추진계획

❍ 사업 참여자 신청ㆍ접수                   : 2012. 1.

❍ 사업 참여자 선발 및 안전교육 후 현장투입 : 2012. 3.

□ 기대효과

❍ 취약계층 및 청년 미취업자에게 일자리 제공으로 삶의 질 향상

일자리 창출을 위한「마을기업」육성

9

□ 추진방침

❍ 묻혀있는 지역의 특화자원을 발굴하여 소득사업으로 연계

❍ 노인 및 여성 유휴인력을 활용한 일자리 창출로 지역의 활로 모색

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.

❍ 사업규모 : 5개 마을기업 육성

❍ 사 업 비 : 100백만원(시비)

❍ 지원사업 : 지역특산품․자연자원을 활용한 사업, 역사, 문화, 관광자원을 활용한 사업 등

□ 기대효과

❍ 지역에 산재한 각종 특화자원을 활용한 주민주도의 비즈니스 실시로 지역의 공동체 활성화 도모

2012 희망나주 취업박람회 개최

10

□ 사업개요

❍ 일정/장소 : 2012. 10월중 / 나주실내체육관

❍ 규    모 : 참가업체 40개, 구직자 2,000명

❍ 사 업 비 : 20백만원(시비)

❍ 주    최 : 나주시, 나주직업훈련원

❍ 주요내용 : 취업채용관, 기업홍보관, 정보관, 컨설팅관 운영

□ 추진계획

❍ 박람회 개최 계획 확정 : 2012. 6.

❍ 구인업체 모집         : 2012. 7. ~ 8.

❍ 박람회 홍보           : 2012. 6. ~ 10.

□ 기대효과

❍ 일자리 1만개 창출로 인한 지역경제 활성화 기대

❍ 기업체의 우수인력 확보 용이 및 시민의 안정적인 생활기반 마련

지역맞춤형 일자리창출 지원사업

11

□ 지금까지 추진실적

❍ 나주직업훈련원 개원 : 2011. 5. 16.

❍ 직업훈련생 모집 및 취업

구 분	교육인원(A)	수료인원(B)	취업인원(C)	취업대기자
계	305	229(75.1%)	164(71.6%)	65
전문인력	80	63(78.7%)	54(85.7%)	9
생산현장인력	225	166(73.7%)	110(66.3%)	56

※ 2011년 지역맞춤형 일자리사업 “특화부분” A등급 획득

❍ 2012년 지역맞춤형 일자리창출 공모사업 신청(819백만원) : 2011. 12.

□ 사 업 비 : 819백만원(국비 498, 시비 290, 컨소시엄 31)

□ 추진계획

❍ 직업 훈련생 모집(300명 예정) 및 홍보 : 2012. 1. 16. ~ 3. 30.

- 모집분야 : 전산세무/회계, 용접, 전산응용, 생산인력 등

❍ 직업 훈련생 교육 및 취업연계       : 2012. 4. 1. ~ 12. 31.

농공단지 공공시설물의 체계적인 유지관리

12

○ 농공단지 : 6개소(동수, 오량, 봉황, 금천, 문평, 노안)

○ 조성면적 : 851천㎡(동수 209, 오량 245, 봉황 100, 금천 103, 문평 69, 노안 125)

○ 입주업체 : 124개 업체(동수 46, 오량 45, 봉황 9, 금천 1, 문평 6, 노안 17)

○ 사 업 비 : 448백만원(국비 224, 시비 224)

○ 사업기간 : 2011. ~ 2015.

□ 지금까지 추진실적

❍ 동수․오량농공단지 : 포장 930㎡, 오수관 563m 맨홀 13개소

❍ 봉황농공단지 : 포장 2,700㎡, 보도정비 2,098㎡, L형 측구 0.2km

□ 추진계획

❍ 현장조사 및 실시설계             : 2012. 1. ~ 2.

- 동수․오량․봉황농공단지 : 노후관로 교체 3.7km, 도로보수 2.2km

❍ 공사추진                         : 2012. 4. ~ 11.

신도 일반산업단지 조성사업(민간투자사업)

13

○ 위    치 : 산포면 신도리 800번지 일원

○ 면    적 : 298,750㎡(90,372평)

○ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2012. 12.

○ 사 업 비 : 61,000백만원(시비 3,000  민자 58,000)

○ 시행사/시공사 : (주)초안산업개발/남학기업(주)

○ 진    도 : 30%

□ 지금까지 추진실적

❍ 산업단지지정 및 승인고시           : 2011. 4.

❍ 감정평가 및 보상                   : 2011. 5. ~

❍ 지구계 분할측량                    : 2011. 9.

□ 추진계획

❍ 토공 및 구조물 설치                : 2012. 1. ~

❍ 공사 준공                          : 2012. 12.

남평농공단지 조성사업(민간투자사업)

14

○ 위    치 : 나주시 남평읍 서산리 산13-1번지 일원

○ 면    적 : 112,221㎡(33,947평)

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2013. 12.

○ 사 업 비 : 15,000백만원(시비 3,500  민자 11,500)

○ 시행사/시공사 : (주)씨유토자개발/(주)씨유건설

□ 지금까지 추진실적

❍ 지정 및 승인고시                         : 2011. 12.

□ 추진계획

❍ 감정평가 및 보상                         : 2012. 1. ~ 4.

❍ 공사 착공                                : 2012. 4.

❍ 공사 준공                                : 2013. 12.

미래 일반산업단지 조성사업(민간투자사업)

15

○ 위    치 : 나주시 왕곡면(덕산, 양산, 장산리), 동수동 일원

○ 면    적 : 1,812,000㎡(548,130평)

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2015. 12.

○ 사 업 비 : 240,000백만원(국도비 20,000 시비 20,000  민자 200,000)

○ 시행사/시공사 : (주)고건산업개발/ 미정

□ 지금까지 추진실적

❍ 협약체결(시+투자업체)                     : 2011. 6.

❍ 감정평가 및 보상협의(한국감정원 위탁)      : 2011. 10. ~

- 보상실적 : 78%(2012. 1. 6.현재)

□ 추진계획

❍ 공사 착공                               : 2012. 2.

❍ 개발계획 및 실시계획 변경               : 2012. 10.

❍ 공사 준공                               : 2015. 12.

남평지구 도시개발사업(민간투자사업)

16

○ 위    치 : 나주시 남평읍 동사리 73번지 일원

○ 사 업 량 : 313,312㎡(94,776평)

○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2013. 12.

○ 사 업 비 : 66,000백만원(시비 5,000  민자 61,000)

○ 시행사/시공사 : (주)초안산업개발/ (주)씨유건설

○ 진    도 : 32%

□ 지금까지 추진실적

❍ 협약체결(시+투자업체)                     : 2011. 3.

❍ 감정평가 및 토지보상                    : 2011. 3. ~

❍ 공사 착공                               : 2011. 7.

□ 추진계획

❍ 개발계획 및 실시계획 변경               : 2012. 5.

❍ 공사 준공                               : 2012. 12.

나주일반산업단지 공업용수공급시설공사

17

○ 위    치 : 다시면 ~ 운곡동(주암댐 광역상수도 연결)지내

○ 규    모 : 송수관(D600mm) L=11.0㎞, 배수지(7,000㎥/일)

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2012. 12.

○ 사 업 비 : 12,845백만원(국비) - 확보 7,300  미확보 5,545

○ 진    도 : 57%

□ 지금까지 추진실적

❍ 미래산단 포함 공급시설 추진 승인(국토해양부) : 2008. 10.

❍ 실시설계 기술 및 계약심의(전라남도)          : 2009. 2.

❍ 공사 착공                                  : 2009. 7.

※ 관로매설 L=6.5km 완료

□ 추진계획

❍ 4차분 착공(1,300백만원)                      : 2012. 3.

- 영산강 횡단구간 송수관로 매설  L=130m

- 배수지 진입로 및 부지 정비(V=7,000톤/일)

노안농공단지 폐수처리장 설치

18

○ 위    치 : 노안면 장동리 노안농공단지 내

○ 사 업 량 : 처리용량 Q=550㎥/일

○ 사업기간 : 2011. 1. ~ 2012. 12.

○ 사 업 비 : 6,036백만원(국비 4,225, 시비 1,811)

○ 진    도 : 5%

□ 지금까지 추진실적

❍ 폐수종말처리장 기본계획 승인(환경부)        : 2010.  3.

❍ 실시설계용역 착수                          : 2011.  5.

□ 추진계획

❍ 실시설계 준공 및 환경부 협의               : 2012.  2.

❍ 공사 착공                                  : 2012.  3.