상하수도과

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

유입하수의 적정 처리로 영산강 수질 개선 기여

맑은 물의 안정적 공급으로 주민 삶의 질 향상

Ⅱ	추진전략

나주․공산․산포공공하수처리장 처리 공정 개선을 통한 안정적인 방류수 수질 확보

광역상수도 급수공급지역 확대로 맑은 물 안정적 공급

하수관거정비사업으로 쾌적한 생활환경 개선

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성과목표	사업비 (백만원)
공산․봉황지구 광역상수도 확장사업 추진	관로매설 L= 26㎞	4,433
농촌지역 생활용수 공급사업 추진	생활용수개발 4개소 급수공급 5개 마을	1,973
하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	총공정율 100%	68,709
산포매성 하수관거 정비사업	하수관거 정비 L= 5㎞	4,000
산포․공산공공하수처리장 개량사업 실시설계 용역	실시설계 용역 1식	635
나주공공하수처리장 태양광발전시설 설치	태양광 발전설비 20㎾p	142

상수도 급수 보급지역 확대 추진

1

□ 사업개요

❍ 급․배수관 확장  : L= 9.0㎞(3건 - 6개 마을) / 1,274백만원

❍ 신규 급수전 설치 : 800전 / 560백만원

□ 추진계획

《급․배수관 확장공사》

❍ 대 상 지 : 금천 죽촌 상촌마을, 노안 구정 고정마을. 금안 광곡마을

❍ 2012. 1월중 : 자체 실시설계 완료(3건)

❍ 2012. 2월중 : 공사 발주 및 착공(3건)

❍ 2012. 5월중 : 공사 완료(3건)

《신규 급수전 설치공사》

❍ 관내 광역․지방상수도 공급지역중 신규급수 신청시 즉시 공사 시행□ 기대효과

❍ 깨끗하고 맑은 물의 안정적 공급으로 급수불편 해소

□ 사업개요

농촌지역 생활용수 공급사업 추진

2

《농촌 생활용수 개발사업》

❍ 대 상 지 : 동강 운산 회룡․운흥지구 외 1개소

❍ 사업내용 : 관정개발, 관로매설, 급수전설치, 이용시설 등

❍ 사 업 비 : 1,402백만원(국비 981, 시비 421)

《소규모수도시설 개량사업》

❍ 대 상 지 : 세지 오봉 계동지구 외 1개소

❍ 사업내용 : 취수시설, 노후관 교체, 약품투입기, 물탱크 등

❍ 사 업 비 : 571백만원(국비 400, 시비 171)

□ 추진계획

❍ 2012.  3월중 : 지하수개발 및 오염방지시설 공사 완료(4건)

❍ 2012.  5월중 : 실시설계 완료(4건)

❍ 2012.  6월중 : 관로매설 등 급수시설공사 착공(4건)

❍ 2012. 12월중 : 공사 완료(4건)

□ 기대효과

❍ 소외된 농촌지역 주민의 보건위생 향상과 삶의 질 개선

공산지구 광역상수도 확장사업 추진

3

□ 사업개요(2011년~2015년)

❍ 위    치 : 나주시 공산면․동강면 전지역

❍ 사업내용 : 배수지 1지, 관로매설 L= 99.1㎞(D50~300㎜)

❍ 총사업비 : 19,800백만원(국비 13,860, 지방비 5,940)

※ 2012년 사업비 : 3,082백만원(국비 2,158, 도비46, 시비 878)

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011.  5. : 경제성 검토용역 완료[(주)아이엠기술단]

❍ 2011.  6. : 국도공사병행구간 우선시공분 착공(6개소, 1.4㎞)

❍ 2011. 11. : 도로굴착 및 점용허가 보완 재협의(익산청)

❍ 2011. 12. : 통합전면책임감리용역 도급계약 체결

□ 추진계획

❍ 2012.  1. : 실시설계 보완 및 계약심사 완료(전라남도)

❍ 2012.  3. : 총괄공사 발주 및 1차분 착공(L= 14㎞)(배수지부지 보상협의 개시)

❍ 2012. 12. : 1차 발주분 공사 완료

봉황지구 광역상수도 확장사업 추진

4

□ 사업개요(2009년~2013년)

❍ 위    치 : 나주시 봉황면 전지역, 세지면 일부지역

❍ 사업내용 : 배수지 1지(혁신도시), 관로매설 L= 63㎞(D50~350㎜)

❍ 총사업비 : 10,000백만원(국비 8,000, 지방비 2,000)

※ 2012년 사업비 : 1,351백만원(국비 1,081, 도비 14, 시비 256)

□ 지금까지 추진실적

❍ 2009. 5.  : 봉황지구 광역상수도공사 총괄 도급계약체결

❍ 2010. 6.  : 1차 발주분 공사 완료(L= 3.8㎞)

❍ 2011. 2.  : 2차 발주분 공사 완료(L= 25.8㎞)

❍ 2011. 2.  : 3차 발주분 공사 착공(L= 9.4㎞) ⇒ 현진도 90%

□ 추진계획

❍ 2012. 1. : 3차 발주분 공사 완료

❍ 2012. 2. : 4차분 공사 착공(L= 12㎞) / 12월 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 혁신도시 배수지 공사비 중 우리시 분담비용 1,082백만원 예산 별도      미확보로 4차분 공사 계획물량 추진 애로 ⇒ 12년 1회 추경 예산 확보

나주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

5

□ 사업개요 및 추진방향

❍ 사업내용   : 하수관거 정비 L=85.4㎞, 배수설비 3,633가구

❍ 사업기간   : 2009. 12. ~ 2013.  1. (37개월)

❍ 총사업비   : 68,709백만원(민자 68709)

❍ 사업시행자 : 남양나주씨엔지㈜ 윤 호

□ 지금까지 추진실적

❍ 2009.  2. : 실시협약 체결     ❍ 2009. 11. : 실시계획 승인

❍ 2009. 12. : 공사착공

❍ 2011. 12. : 7회 기성검사 완료(종합공정률 55%)

□ 추진계획

❍ 2012.  3. : 중부 7･9분구, 남부 3분구 완료

❍ 2012.  6. : 중부 8분구, 남부 2분구 완료

❍ 2012.  9. : 중부 6분구, 남부 1분구 완료, 전체분 공사 완료

❍ 2013.  1. : 전체분 준공 및 시운전 완료

산포매성 하수관거 정비사업

6

□ 사업개요 및 추진방향

❍ 사업내용 : 하수관거 정비 L=16.3㎞, 배수설비 1,062가구

❍ 사업기간 : 2011.  1. ~ 2013. 12. (36개월)

❍ 총사업비 : 16,357백만원(국비 11,450, 시비 4,907)

※ 2012년 사업비 : 4,000백만원(국비 2,800, 시비 1,200)

❍ 시 공 사 : 일광건설㈜ 정창원

□ 지금까지 추진실적

❍ 2010. 10. : 전라남도 공공하수도 통합자문위원회 자문 완료

❍ 2010. 11. : 전라남도 건설기술심의 완료

❍ 2011.  3. : 전라남도 실시설계 계약심사 완료

❍ 2011.  4. : 전라남도 공공하수도 설치인가 완료

❍ 2011.  9. : 1차분 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2012.  1. : 1차분 공사 준공

❍ 2012.  1. : 2차분 공사 착공

❍ 2012. 12. : 2차분 공사 준공

마을하수도 정비사업

7

□ 사업개요

구분	사업명	지원 년도	사 업 비(백만원)			사업기간	비고
			계	국비	시비
계	6개소		7,323	2,848	4,475
신규	반남흥덕	2010	2,600	1,820	780	2010. 1. ~ 2013. 8.	계속
	문평신안	2011	503	-	503	2011. 1. ~ 2013. 12.	〃
	공산덕음	2011	790	-	790	2011. 1. ~ 2013. 12.	〃
개량	노안장림	2011	1,274	382	892	2011. 1. ~ 2012. 12.	〃
	노안문화	2011	1,176	352	824	2011. 1. ~ 2012. 12.	〃
	금천석동	2011	980	294	686	2011. 1. ~ 2012. 12.	〃

□ 지금까지 추진실적

❍ 2010. 12. : 2011년 개량사업(노안장림 외 2개소) 실시설계용역 착공

❍ 2011.  2. : 2011년 신규사업(문평신안 외 1개소) 실시설계용역 착공

❍ 2011.  7. : 계속사업 착공(반남흥덕, 세지덕산)

□ 추진계획

❍ 2012.  3. : 실시설계용역 완료

❍ 2012.  4. : 2011년 개량사업(노안장림 외 2개소) 착수

❍ 2013.  2. : 2011년 개량사업(노안장림 외 2개소) 준공

나주 중부(3,4분구) 하수도정비 기본 및 실시설계용역

8

□ 사업개요 및 추진방향

❍ 나주시 중심부인 성북･과원동 등의 생활하수가 나주천 및 영산강 직유입에 따른 수질환경개선 및 악취, 유해해충 발생 억제로 지역주민 삶의 질 개선

❍ 위    치 : 나주시 산정･성북･서내･과원동 일원

❍ 용역개요 : 하수도정비 기본 및 실시설계용역 L=20㎞

❍ 용 역 비 : 500백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2012.  1. : 사업수행능력평가 공고

❍ 2012.  3. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2012. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

□ 기대효과

❍ 나주공공하수처리시설의 유입수질 제고 및 방류수질 향상을 통한 효율적 운영

산포․공산공공하수처리장 개량사업 실시설계 용역

9

□ 시설 현황

구 분	위치	시설용량 (㎥/일)	사업비 (백만원)	처리공법	최초가동	비고
산포	내기리 915-1	3,000	16,095	회전원판접촉법	1999. 6. 30.
공산	금곡리 19	500	5,379	회전원판접촉법	1999. 7. 20.

□ 사업 개요

❍ 용역기간 : 2012.  1. ~ 2012. 12.

❍ 용역내용 : 처리공법(고도처리) 및 공정 개선, 탈수시설 신설 등

❍ 용 역 비 : 635백만원(국 444.5, 시 190.5)

※ 추정 사업비 : 17,095백만원(국 12,000, 시 5,095)

□ 추진 계획

❍ 2012.  2.  : 기본 및 실시설계 착수

❍ 2012.  3.  : 행정절차 이행(설계자문, 재원협의, 계약심사 등)

❍ 2012. 12.  : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2013. 1. ~ 2014. 12. : 공사 추진

나주공공하수처리장 태양광 발전시설 설치

10

□ 사업 개요

❍ 사업기간 : 2012. 2. ~ 2012. 10.(8개월)

❍ 사업내용 : 태양광 발전설비(20㎾p, 고정식)

❍ 사 업 비 : 142백만원(국 71, 시 71)

❍ 설치위치 : 하수처리장 내 유휴부지 활용(정남향 방향)

□ 추진 계획

❍ 2012.  2. ~ 3. : 실시설계

❍ 2012.  4.      : 공사 착공

❍ 2012. 10.      : 시운전 및 준공

□ 기대 효과

❍ 연간 29㎿ 전력 생산으로 전기 사용요금 절감 및 처리장 운영효율 증대

공공환경시설 악취 기술진단

11

□ 사업 개요

❍ 대상시설 : 분뇨처리장, 가축분뇨처리장, 현애원축산폐수처리장

❍ 사업내용 : 악취배출시설 기술진단

❍ 사 업 비 : 94백만원(시비 94)

❍ 실시기관 : 한국환경공단

□ 추진 계획

❍ 2012.  1. : 악취기술진단 계획 수립

❍ 2012.  2. : 기술진단 신청서 제출(시 ⇒ 한국환경공단)

❍ 2012.  5. : 기술진단 실시

❍ 2012.  9. : 진단결과 개선계획 수립․보고

□ 기대 효과

❍ 공공환경시설에서 발생되는 악취로 인한 주민의 건강상 위해를 예방하고 생활환경을 보전