혁신도시지원단

	2012 주요업무계획

Ⅰ	추진목표

15개 이전공공기관 신사옥 착공으로 명품 혁신도시 건설 초석 마련

미래 신성장 동력 창출도시 육성을 위한 기반 구축

체계적인 U-City 구축으로 신ㆍ구도심간 균형적 정보서비스 구현

Ⅱ	추진전략

이전공공기관, 시행사, 지자체 등 추진 주체간의 원활한 소통과 협력체제 유지

내실 있는 홍보 및 유치 제안으로 민간투자 활성화

유비쿼터스 도시계획 수립과 나주 그린스마트시티 시범 구축을 통한 안정적인 U-City 환경조성

Ⅲ	역점시책

추 진 과 제	성과목표	사업비 (백만원)
혁신도시 교육ㆍ의료시설 등 정주여건 조성	10대과제 종합진도율 80%	-
혁신도시 각종 기반시설 공사 완공	공정률 100%	-
이전공공기관 임직원에게 나주 알리기	5개 이전기관	5
이전공공기관 청사 준공 등 이전업무 마무리	3개 기관	-
다양한 홍보매체 활용 민간투자 유치	연 2회	20

이전공공기관 임직원 대상 특강 추진

1

□ 추진방향

❍ 이전공공기관 임직원과의 소통을 통한 접촉식 나주 홍보

❍ 소통의 장 마련으로 임직원에게 이주의 따른 불안감 해소

□ 추진계획

❍ 대    상 : 15개 이전공공기관 임직원

❍ 실시방법 : 이전공공기관 임직원을 대상으로 나주시정, 역사문화, 혁신도시 추진상황 등을 주제로 강연

❍ 추진일정

- 이전공공기관 대상 특강 계획 홍보 및 일정수립 : 2012. 2.

- 특강 추진 : 2012. 3. ~ 12.

❍ 소요예산 : 5백만원

□ 기대효과

❍ 이전을 준비하는 임직원의 불안감 해소

❍ 나주에 대한 이해도 증진으로 전가족 이주 유도

대중매체를 활용한 혁신도시 홍보

2

□ 추진방향

❍ 활발한 혁신도시 조성 공사와 각 시행사별 토지분양 등의 신속한 정보 제공으로 조기 투자 유도

❍ 대중매체 활용 홍보로 혁신도시에 대한 전국민 공감대 조성

□ 추진계획

❍ 혁신도시 홈페이지 지속적인 관리 및 자료 즉시 업데이트

- 빛가람 홈페이지 : http://innocity.bitgaram.go.kr

- 주요내용 : 이전공공기관 현황, 혁신도시 소식지, 뉴스브리핑,  자유게시판 등

❍ 공항 및 KTX 역내 광고판 활용 홍보

- 시    기 : 연중 2회

- 장    소 : 공항 및 KTX역

- 홍보내용 : 혁신도시 추진상황, 향후 계획, 분양 정보 등

❍ 일간지 지면을 통한 홍보

- 중앙지 및 일간지 선정 2~3면 5단 광고 추진 : 연중

- 혁신도시 시행사 자체 부담으로 광고 유도

❍ 소요예산 : 20백만원

□ 기대효과

❍ 대중매체를 통한 홍보로 민간투자 유치 및 토지분양 활성화

혁신도시 이전공공기관과 인력수급 협력 추진

3

□ 추진방향

❍ 15개 이전공공기관의 이전시 대비 지역의 필요 인력 수급 지원

❍ 이전기관의 지속적으로 관심과 협력 유도 주민의 고용 창출로 연계

□ 추진계획

❍ 우정사업정보센터 용역업체 콜센터 및 S/W 인력 수요 지원 방안 마련

- 기업지원실과 협력 추진(직업훈련원), 지역대학과 연계

※ 2011. 12월 IT서비스업체 선정, 정확한 인력수요 파악 중(공문 송부)

❍ 관계기관(이전공공기관, 지자체, 지역대학, 전문고) 워크숍 개최

- 2012. 4월/60명/이전공공기관과의 인력관련 소통의 장

❍ 지역인재 우대 채용 혁신도시특별법(국회 계류 중) 개정 및 이전기관 채용 건의

❍ 이전기관별 ‘주민 우선 채용’ 가능 분야 상세 파악 및 협약 체결 추진

□ 기대효과

❍ 이전공공기관의 지방 이전에 따른 인력수급 문제 해결

❍ 지역인재 역외 유출 방지 및 지역 일자리 창출에 기여

□ 문제점 및 대책

❍ 이전공공기관 내 이전업무 및 인력관리 부서가 달라 일부 기관을 제외한 대부분 기관이 인력수급에 관심이 아직은 저조함

⇒ 인력부서 방문 구체적 현황 파악 및 지역인력 채용 건의

한전KPS R&D Complex 조성사업

4

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 다도면 판촌리 일원

❍ 면    적 : 155,340㎡(46,990평)

❍ 시설기능 : 연구, 교육, 신재생에너지 실증단지 등

❍ 사 업 비 : 약 800억원(1단계 400억원)

❍ 사업시행 : 한전KPS(나주시)

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2016(1단계 2011 ~ 2013)

※ 2011. 1. 한전KPS R&D Complex 건립 이행협약 체결(한전KPS↔나주시)

□ 추진계획

❍ 2012. 01. : 나주시 도시계획위원회 자문

❍ 2012. 03. : 전라남도 도시계획위원회 결정 및 고시

❍ 2012. 04. : 사업시행자 지정 및 실시계획 인가

❍ 2012. 06 ~ : 토지보상 및 사업시행

□ 기대효과

❍ 연구인력 등 100여명 상주 및 연간 2,000여명 교육생 방문으로       일자리 창출 등 지역경제 활성화

❍ 에너지 R&D기반 구축에 따른 관련산업 투자유치 촉진으로 혁신      도시 조기 활성화 및 지역발전 가속화

□ 문제점 및 대책

❍ 토지소유자 반대로 협의매수 난항 및 사업추진 지연 우려

⇒ 협의매수 불가시 사업시행자를 ‘나주시장’으로 지정하여 실시계획       인가 후 토지수용 추진

이전공공기관 이전업무 촉진 및 유대강화 행사 추진

5

□ 지금까지 추진실적

❍ 활발한 이전공공기관 이전업무 추진

- 12개 기관 부지매입 및 13개 기관 청사설계 발주

- 11개 기관 신사옥 건립을 위한 건축허가 완료

❍ 이전공공기관 신사옥 착공식 개최 : 3개 기관

- 우정사업정보센터(2011. 4. 25.) : 지상4층 골조공사 완료

- 한국전력공사(2011. 9. 26.) : 터파기 공사 추진

- 전력거래소 (2011. 12. 26.) : 공사 착수

❍ 이전공공기관 임직원과의 다각적 교류 행사 및 지원 추진

- 선남선녀 만남의 날 행사, 지역탐방 행사, 1사1촌 자매결연 체결

- 이전업무 협의 방문시 차량 및 숙소 등 편의시설 제공

□ 추진계획

❍ 이전공공기관 신사옥 착공식 행사 지원

- 12개 기관 상반기내 착공식 행사 개최 ⇒ 인원동원 및 홍보 등 지원   ❍ 이전공공기관과의 다각적 교류 행사 추진

- 이전공공기관과 1사1촌 자매결연 체결 및 지속적인 교류 촉진

- 이전공공기관 조기정착 프로그램 선남선녀 만남의 날 행사 및 지역탐방 행사 지속 추진

❍ 이전공공기관 이전업무 협의 방문시 지원

- 차량 및 숙소 등 편의시설 제공

- 원스톱 민원처리제 운영

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

혁신도시 교육․의료시설 등 정주여건 조성

6

□ 지금까지 추진실적

❍ 혁신도시 공립학교 부지매입비 예산 반영 및 설계 발주 (도교육청)

- 유 1, 초 1, 중 1 : 2013년 개교, 고 : 2014년(예정)

❍ 혁신도시 내 공립 특목고 설립 건의(나주시장, 도교육감 면담)

❍ 혁신도시 특별법 개정(혁신도시 특목고 우선 설립 요청 가능)

❍ 수도권․광주권 대형 의료기관에 종합병원 설립 투자 제안

❍ 프리미엄 아울렛 쇼핑센터 유치 제안 및 실무적 방문 협의

□ 추진 계획

❍ 혁신도시 내 공립학교 설립(도교육청)

- 2013년 개교 학교 설계 완료 및 착공(유 1, 초 1, 중 1)

❍ 우수 고등학교 설립 유치 추진(공립국제고, 자율형사립고)

- 국제고 설립 국고지원 건의(도교육청과 공조→ 교과부)

- 혁신도시 특별법 개정(지자체, 이전기관 학교 지원 근거 마련)

- 자율형사립고 설립 건의(공사법 및 정관에 근거 명시 등)

❍ 이전가능, 투자유망 종합병원 및 특화병원 설립 유치 추진

※ 대학병원 적극 유치 추진

❍ (주)신세계첼시 프리미엄 아울렛 유치 추진

- 관계자 나주 초청, 업무협약, 도시계획시설결정, 유통단지개발

□ 문제점 및 대책

❍ 2014년에 개교할 고등학교 유형 방향 결정 필요

- 혁신도시 내 고등학교 총 2개소 계획(2014년, 2018년 개교)

- 2014년 개교 학교 교과부 투융자심사 조건부 승인(자사고 유치)

- 교육청 실무의견은 조건부에 의거 자사고 우선 추진 후 일반고 이전(또는 신설) 추진 예정

- 자사고 설립은 유치되더라도 시기상 2014년 개교는 어렵다고 봄

혁신도시 주택 정주여건 조성

7

	혁신도시 주택 건설계획(20,000호 / 2011~2020)
• 공동주택 : 17,133호(임대 4,791, 분양 12,342) / 21개 블록 • 단독주택 : 1,840호(필지형 1,042, 블록형 798) / 15개 블록 • 주상복합 : 1,027호 / 2개 블록

□ 지금까지 추진실적

❍ 광주․전남 주택건설업체 대상 투자설명회 개최(혁신도시 홍보관) : 2011. 3.   ❍ 이전공공기관 종사자 주택특별공급을 위한 제도개선 건의 : 2011. 3.

→ 2011. 8. 25.「주택공급에 관한 규칙」개정 시행(50%이상 특별공급)

❍ 혁신도시내 주택사업 투자참여 제안․홍보(50개 유명․중견업체) : 2011. 6.

❍ LH공사 본사․지사 방문 및 공동주택 조기착공 건의(6회) : 2011. 3. ~ 9.

→ 2011. 9~10월 공공분양 1,226호 아파트 건설공사 발주

❍ 부영주택 본사 방문 및 공동주택 조기착공 요청(3회) : 2011. 4. ~ 9.

→ 2011. 10월 일반분양 3,982호 건축심의 신청

□ 추진계획

❍ LH공사 공공분양(1,226호/2개 블록) 착공         : 2011. 12. 16.

❍ 부영주택 일반분양(3,982호/3개 블록) 착공        : 2012. 1.~2.

❍ LH공사 임대아파트(3,837호/4개 블록) 조기착공 건의 : 2012. 1.

❍ 부영주택 분양아파트(3,017호/4개 블록) 조기착공 요청 : 2012. 2.

❍ 혁신도시내 주택사업 투자참여 제안․홍보(유명․중견업체) : 2012. 2. ~

□ 문제점 및 대책

❍ 우정사업정보센터 등 선도기관 이주시기에 주택공급 차질 우려

⇒ 2013년 상반기내 입주 가능하도록 조기착공 및 공기단축 요청

❍ 이전공공기관 종사자(55%) 임대아파트 선호하나, 임대주택 착공일정 미정

⇒ LH공사에서 계획중인 임대아파트(3,837호) 조기 착공토록 건의

빛가람 명품도시 건설

8

□ 지금까지 추진실적

❍ 혁신도시 광역교통망 개설(지구외도로 3개 노선)

- 나주역~혁신도시 연결도로 공사 추진중(공정률 41%)

- 혁신도시 동측~국지도 55호선 연결도로 보상협의 착수

- 혁신도시 서측(신천IC)~고동리 연결도로 실시설계 완료

❍ 광역상수도[12,000㎥/일〕설치사업 공사 추진중(공정률 73%)

❍ 도시가스[47km〕설치사업 공사 추진중(공정률 32%)

❍ 수질복원센터[19,000㎥/일〕 설치사업 공사 추진중(공정률 5%)

❍ 호수공원 등 조경시설공사 실시설계 용역 완료(2011. 12.)

※ 2012. 1월 현재 부지조성공사 공정률 : 74%

□ 향후 추진계획

❍ 혁신도시 개발및실시계획 4차 변경안 협의(LH공사) : 2012. 1. ~ 2.

- 한전 기숙사부지 반영, 상업용지내 오피스텔 건축 허용 등

❍ 혁신도시 지구외도로(3개 노선) 공사 추진

- 나주역~혁신도시간 연결도로 공사 완료 : 2012.12.

- 2개 노선(동측~국지도 55호선, 서측~고동리) 공사 착공 : 2012. 3.

❍ 호수공원 등 조경시설(공원 32개소) 공사 착공       : 2012. 2.

❍ 특수구조물(교량 6개소, 경사로 5개소) 공사 착공     : 2012. 1.

❍ 전기, 도시가스, 수질복원센터 등 기타 기반시설 본격 추진

※ 전 구간(9개 공구) 부지조성 공사 완료 : 2012. 9.

□ 문제점 및 대책

❍ 사업시행자(LH공사 등) 자금난 등으로 일부 기반시설 착공 지연

⇒ 사업시행자와 수시 협의 및 국토부, 전남도 등에 조기착공 건의

❍ 전남도 시행 지구외도로(혁신도시 북측~국도1호선) 사업비 미확보

⇒ 국비 확보 및 조기 사업추진을 위한 대응방안 강구(전남도 등 협의)

U-City 시범도시 지원사업

9

□ 사업 개요

❍ 사  업  명 : 나주 Green Smart City 구축 시범사업

❍ 사업 기간 : 2011.  8. ~ 2012. 12.

❍ 사 업 비 : 20억원(국비10, 도비4, 시비6) - 명시이월

❍ 사업 내용

- Green Smart City 운영센터 구축

- BEMS기반 공공건물 에너지관리서비스 구축

- 민간주택 에너지관리서비스 연계

- 전기자동차 구입 운영 및 충전소 인프라 구축

□ 지금까지 추진실적

❍ 2011년 U-시범도시 지정(국토해양부) : 2011. 6. 28.

※ 전국 7개 지자체 - 나주시,은평구,인천경제자유구역청,안산시,남양주시,부산광역시,여수시

❍ 사업 착수보고회 : 2011. 7. 26.(국토해양부 대회의실)

❍ 사업예산 확보 : 2011. 9. ~ 12.

- 국비 예산 교부결정(국토해양부→ 전남도) : 2011. 9.

- 국․시비 예산 확보 : 2011. 10. (제2회 추경)

- 도비 예산 확보 : 2011. 12. (도 제3회 추경)

※ 국․도비 14억원 교부결정 및 송금 완료 : 2011. 12.

❍ 사업발주 준비 : 2011. 12. (과업지시서, 제안요청서 초안 작성)

□ 추진계획

❍ 사업 발주 : 2012. 1. ~ 3. 15.

- U-시범도시 지정 타 지자체 사례 파악, 발주 방법 검토 확정

- 입찰공고, 제안서 평가, 업체 선정 및 계약

❍ 사업 추진 : 2012. 3. ~ 2012. 11.

❍ 사업 완료 및 사업비 정산 : 2012. 12.

2011 지능형 홈 네트워크 산업기반 조성사업

10

□ 사업 개요

❍ 사업 기간 : 2011. 8. ~ 2012. 2.

❍ 사 업 비 : 880백만원(국비300, 도비100, 시비100, 민자380)

❍ 사업 내용

- 에너지 모니터링 서비스(460세대 - 현대APT 380, 호반리젠시빌 80)

- 스마트 홈 네트워크 서비스(15세대- 현대APT)

- 독거노인 관리 서비스(50세대 - 영산동 25, 이창동 25)

- OPSW 백본망 구축 ( 10km - 관내 동지역과 시청 연계)

- 스마트 TV 연계서비스(1개소 - 현대아파트 관리사무소)

- LED Light 테라피 서비스(1개소 - 나주시보건소)

❍ 사업 추진기관 : 동신대학교산학협력단컨소시엄

※컨소시엄 구성: 동신대학교산학협력단+한전KDN+대한전선+신한시스템즈

❍ 소관 부처 : 지식경제부(사업주관 - 한국전자통신연구원)

□ 지금까지 추진실적

❍ 사업계획 확정 및 국비 예산 교부(ETRI→동신대) : 2011. 8.

❍ 사업 대상지 및 대상 세대 선정 : 2011. 9. ~ 2011. 11.

❍ 사업예산 확보 : 2011. 9. ~ 12.

- 도비 예산 확보 : 2011. 12. (도 제3회 추경)

※ 도비 1억원 교부결정 및 송금 완료 : 2011. 12.

- 시비 예산 확보 : 2011. 12. (제3회 추경)

❍ 사업 추진 : 2011. 9. ~ 2012. 2. (사업추진 공정률 : 65%)

□ 추진계획

❍ 진행중인 사업 마무리 및 미착공 사업 조속 추진 : 2012. 1. ~ 2.

❍ 사업 완료 및 사업비 집행 : 2012. 2.

※사업 완료 후 지방비 예산 2억원(공기관 대행사업비) 집행

『나주시 유비쿼터스도시계획 수립 용역』추진

11

□ 용역 개요

❍ 용역 기간 : 2012. 1. 4. ~ 2012. 6. 1.

❍ 계약 금액 : 79,700백만원(시비 - 명시이월)

❍ 용역 업체 : 대영유비텍(주)

❍ 계획 목표년도 : 2016년

❍ 과업 범위 : 나주시 행정구역 전역

❍ 주요 과업 내용

- 유비쿼터스도시계획의 기본 구상, 부문별 계획 , 계획의 집행관리

- 혁신도시와 원도심과의 U-서비스 연계방안

- U- City 통합운영센터 운영방안 등

□ 지금까지 추진실적

❍ 용역 입찰공고: 2011. 12. 15. ~ 12. 26.

❍ 용역업체 선정을 위한 제안서 평가 : 2011. 12. 27.

- 우선협상 대상업체 선정 : 대영유비텍(주)

※ 입찰 참여업체(2개사) : 대영유비텍(주), 나눔정보통신(주)

❍ 용역 계약 체결 : 2011. 12. 29.

❍ 용역 착수 : 2012. 1. 4.

❍ 용역 감독공무원 선정 : 2012. 1. 6.

□ 추진계획

❍ 용역 자문위원회 구성 : 2012. 1. 16.한

❍ 용역 최초 보고회 : 2012. 1. 19.(예정)

❍ 용역 중간 보고회 : 2012. 3월말

❍ 관계부서 업무담당자 워크샵 : 2012. 4월 중순

❍ 용역 완료 보고회 : 2012. 5월말

❍ 국토부 승인 신청 : 2012. 6월말