문화관광과

	2010 주요 업무계획(문화관광과)
□ 2010년 추진목표 -------------------------------------------			85
□ 일반시책
○ 지역문화 예술 활동의 활성화 ----------------------------			86
○ 금남 최부선생 생가 복원 ----------------------------------			87
○ 다야들 생태공원 조성 ---------------------------------------			88
○ 문화예술회관 주차시설 확충 -----------------------------			89
□ 신규시책 ○ 나주호 관광지(상판지구) 조성사업 ----------------------			90
○ 삼남대로 탐방로 조성사업 ---------------------------------			91
○ 나주영상테마파크 문화센터 조성 ------------------------			92
○ 나주쪽 전통기술 산업화사업 ------------------------------			93
□ 계속사업
○ 백호문학관 건립 -----------------------------------------------			94
○ 나주호 파노라마 공원 조성사업 --------------------------			95
○ 도래 전통한옥 관광자원화 사업 --------------------------			96
○ 우습제 생태관광자원화 사업 ------------------------------			97
○ 죽설헌 생태관광자원화 사업 ------------------------------			98
○ 영산강 나주선 복원 ------------------------------------------			99
○ 나주읍성 서성문 복원사업 ---------------------------------			100
○ 나주 복암리 고분전시관 건립 -----------------------------			101
○ 영산강 역사문화단지 조성 ---------------------------------			102

	2010년 추진목표
관광성장 패러다임을 바꾸는 국민관광 관광 1등 역사문화도시 조성 신성장 동력과 일자리를 창출하는 미래형 녹색문화관광 인프라 구축 정체성과 다양성을 바탕으로 오감을 즐기는 새로운 자연문화 창조

	추 진 전 략
역사문화와 생태, 레저가 결합된 새로운 관광거점 벨트인 영산강 뱃길 관광허브 구축 녹색성장 천연염색 메카 중심도시 육성 나주관광 스토리텔링화를 통한 새로운 가치 창출로 선도적 관광자원 육성 사계절 체 류가 가능하고 주민소득과 연계되는 창조적이고 실용적인 관광지 조성

	주요 역점시책
창의적 관광기반시설 구축 및 효율적 관리운영으로 행정경영 정착 영산강고대문화권과 나주목문화권 사업의 조기완료 국립나주박물관 국립나주문화재연구소 등 문화시설건립 확충 영산강 살리기 사업과 연계한 녹색 문화관광 사업 신속추진 일자리 창출과 연계한 사업추진으로 주민의 삶의 질과 소득향상 시민 문화향수권 확대, 창작활동 동기부여 및 지원을 위한 다양한 문화예술활동 전개 시대를 앞서가는 문화관광 트랜드 개발과 추진으로 신발전동력 확보

『일반시책』

지역문화 예술 활동의 활성화

○ 다양한 문화 예술 활동 지원 및 전시작품 유치로 문화의식 고취

○ 시민들을 문화 예술 활동 공간으로 유도, 지역문화 발전 도모

□ 추진방침

○ 정기적인 공연 및 전시회 개최

○ 문화 및 취미교실 상시 운영

○ 다양한 예술문화 활동 유치

□ 추진계획

○ 무대공연작품 제작지원        : 연극협회, 국악협회 등

○ 충 ․ 효 및 문화행사 지원     : 삼색문화유산놀이 등

○ 기획 및 초청공연, 전시회 추진 : 월 2회(연극, 음악회, 전시회 등)

○ 문화 및 취미교실 운영         : 10개 과목(주2회)

- 밸리댄스, 발레, 풍물, 에어로빅, 국악 등

○ 문화강좌 운영                 : 8개 과목(주2회)

-대금, 피리, 해금, 가야금, 거문고, 아쟁, 타악기, 소리

○ 주말 문화 예술 공연 운영       : 주말 공연, 체험

○ 송년음악회 개최                : 2010. 12.

□ 기대효과

○ 다양한 문화서비스 제공으로 문화시민 자긍심 고취

○ 시민과 함께하는 문화 예술 활동으로 지역문화 발전

『일반시책』

금남 최부선생 생가 복원

○ 나주가 낳은 역사적 인물인 금남 최부선생의 삶을 통한
지역 문화 창출

○ 특히 걸리버 여행기에 버금가는 표해록의 역사 문화적
재평가를 통한 나주인의 자긍심고취와 문화관광 자원화

□ 추진방침

○ 생가 위치에 대한 현지조사와 문헌조사를 병행하여 규명

○ 시대에 맞는 생가복원, 편익시설 조성 및 경관조성

○ 우습제 생태공원 조성사업과 연계한 관광벨트화 추진

□ 추진계획

○ 사업기간 : 2010. 2. ~ 2010. 12.

○ 위    치 : 동강면 인동리 382번지 1,800㎡

○ 사업내용 : 생가복원 100㎡, 주변정비 (편익, 조경, 휴식시설)

○ 사 업 비 : 500백만원

- 사업비 내역 : 토지매입, 생가복원사업 추진, 용역비 등

□ 기대효과

○ 나주를 빛낸 역사적 인물의 생가터를 후세들의 산교육장으로
활용 및 나주인의 자긍심 고취

『일반시책』

다야뜰 생태공원 조성

○ 사업기간 : 2010 ~ 2011(2년)

○ 위    치 : 공산면 백사리 영산강 둔치

○ 사업규모 : 약 300,000㎡ / 하천부지

○ 내    용 : 갈대숲, 습지, 연못, 꽃밭, 황포돛배 나루터 등

※ 영산강 살리기 사업 내 포함 (현재 실시설계 중)

□ 추진방침

○ 생태공원 조성 실시설계에 우리 시 의견 및 계획 반영

○ 관리청 및 시공사(삼성중공업)에 우선 시행 및 조기착공 협의

○ 기상재해에 안전하고 항구적인 생태공원으로 조성

□ 추진계획

○ 실시설계 완료         : 2010. 3.

○ 공사 착공             : 2010. 4.

○ 공사 준공             : 2011. 4.

□ 기대효과

○ 사계절 상시 볼거리와 체험 등 레저관광 인프라 구축

○ 나주영상테마파크와 연계한 관광 시너지효과 극대화

○ 저탄소, 친환경의 다양한 이벤트 및 축제개최로

관광 수요창출

『일반시책』

문화예술회관 주차시설 확충

○ 열악한 주차시설 확충으로 다양한 공연추진 및 관람기회 제공

○ 문화예술회관 수용인원에 적합한 주차공간 확보로 시민안전 보호

□ 추진방침

○ 시민이 자유롭게 문화를 즐길 수 있도록 주차공간 확보

○ 2010년 추정예산 확보하여 문예회관 주차장 공사 추진

□ 추진계획

○ 위    치 : 나주시 송월동 774번지 일대

○ 사 업 량 : 부지매입 2,500㎡, 주차장 77면

○ 추진일정

- 토지 매입 추진                 : 2010. 10.

- 사업 실시설계 및 토지형질변경  : 2011.  3.

□ 기대효과

○ 폭넓고 다양한 공연 관람기회 제공으로 시민 문화욕구 충족

○ 문화예술인의 창작활동 여건 조성으로 지역문화발전 활성화

『신규시책』

나주호관광지(상판지구) 조성사업

○ 용 역 명 : 나주호관광지 권역계획 및 조성계획 변경

○ 용역기간 : 2009. 1. ~ 2011. 2.

○ 과업범위 : 나주호관광지(2,000,000㎡)

○ 용 역 비 : 2,000백만원 (※ 확보액 : 1,000백만원)

□ 추진방침

○ 지역여건을 최대한 활용한 자연친화적인 산악 호반형
관광지 개발

○ 나주호 천혜의 자원을 적극 활용한 관광 레저 시설로 개발하여
인근 우산지구 관광지와 연계 가족단위 휴양․관광객 레저 공간으로 적극 유치

□ 추진계획

○ 투자유치 및 MOA 체결                 : 2010.  3.

○ 권역계획 및 조성계획 용역 발주         : 2010.  3.

○ 제5차 권역별 관광개발계획에 반영       : 2010. 12.

□ 기대효과

○ 관광지 조성을 통한 고용창출로 주민소득 향상 및
지역경제 활성화

○ 지속적이고 안정적인 세수확보

『신규시책』

삼남대로 탐방로 조성사업

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2012. 12.

○ 사업구간 : 45km(노안면 금안동 ~ 반남면 고분군 일원)

○ 사업내용 : 탐방로 조성, 생태숲 및 율정공원 조성,

지도 제작, 스토리텔링화 등

□ 추진실적

○ 사업계획 수립 및 광특사업 신청          : 2009.  9.

○ 국비지원 요청을 위한 중앙부서 출장방문  : 2009.  9.

○ 관광자원개발사업 국비보조사업 가내시    : 2009. 11.

□ 추진계획

○ 학술 및 실시설계 용역 실시              : 2010.  4.

○ 탐방로 시범 운영                        : 2010.  6.

○ 탐방로 조성 및 스토리텔링화             : 2010. 12.

○ 율정공원 조성을 위한 부지매입           : 2010. 12.

□ 기대효과

○ 탐방로 답사 프로그램 운영을 통한 지역 홍보 및 경쟁력 향상

○ 생태자원 관광화로 새로운 관광수요 창출 및 지역 경제 활성화

『신규시책』

나주영상테마파크 문화센터 조성

○ 위    치 : 공산면 신곡리 산 2번지

○ 사업기간 : 2010 ~ 2012년

○ 사업규모 : 8,264㎡ / 동부여성 지하

○ 주요시설 : 청소년 수련원 및 교육관, 고구려역사문화 전시
체험관, 미니방송국(드라마 영상체험전시관,
실내 스튜디오), 숙박시설, 전통문화 체험관,
관광상품점 등 편의시설

□ 추진방침

○ 관광추세와 테마파크가 어울리는 컨텐츠 구성

○ 역사․문화․체험 등 체류형, 목적형 관광 인프라 구축

○ 시설물 활용도 제고 및 이용자의 편의․안전 확충

□ 추진계획

○ 마스터플랜 수립을 위한 컨설팅 실시        : 2010.  2.

○ 우선순위 선정 및 기본설계 용역            : 2010.  3.

○ 사업 총괄 발주                            : 2010.  6.

○ 공사 착공                                 : 2010.  9.

○ 공사 준공 및 개관                         : 2011. 12.

□ 기대효과

○ 체류형 관광지 개발로 시너지 효과 극대화

○ 관광산업 성장기반 구축으로 지역 홍보 및 농ㆍ특산물
판로 증대

『신규시책』

나주쪽 전통기술 산업화사업

나주 전통 쪽염색 기법과 첨단 생물공학 기술을 접목하여
천연염료의 대량생산, 문화 산업화에 따른 지역농가의 소득
증대 및 고용창출로 인한 지역경제 활성화

□ 추진방침

○ 나주 쪽 생산단지 조성 및 재배농가 육성 등 산업화 기반조성

○ 천연염료 대량생산 및 공방 신축 등 산업화 시설 구축

□ 추진계획

○ 사업기간 : 2009 ~ 2011(3년)

○ 사업시행 : 나주쪽 전통기술산업화사업단(천연염색문화재단)

○ 사업위치 : 다시면 회진리, 신광리 일원

○ 사업내용

- S/W사업  : 마케팅사업, 산업화 기반조성, 문화산업 육성

- H/W사업 : 염료생산시설(660㎡), 공방 시설(330㎡)

□ 기대효과

○ 안정적 염료생산 기반 구축으로 고부가가치 상품개발

○ 천연염색 산업의 현대화를 통한 농가 소득 증대 및
지역경제 활성화

『계속사업』

백호문학관 건립

○ 추진기간 : 2006 ~ 2010

○ 위    치 : 나주시 다시면 회진리 103번지 일원

○ 규    모 : 부지 3,800㎡, 건물 660㎡

○ 내    용 : 전시실, 장서각, 자료실, 문화사랑방 등

○ 사 업 비 : 3,350백만원 (국비 30%,지방비 70%)

□ 그동안 추진상황

○ 토지매입 완료              : 2008. 12.

○ 투융자 심사 완료           : 2009.  3.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주

- 용역기간 및 계약자 : 2009. 9. 21. ~  / 발해건축사

□ 향후 추진계획

○ 공사 발주             : 2010. 6. ~ 2010. 12.

○ 전시시설물 공사 발주  : 예산확보 후 추진

□ 문제점 및 대책

○ 국비확보 어려움이 있지만 국비확보에 최선의 노력 경주

『계속사업』

나주호 파노라마 공원 조성사업

○ 사업기간 : 2006. 5 ~ 2010. 12

○ 사업위치 : 다도면 판촌리 산 197-1번지

○ 사업면적 : 5,256㎡

○ 사업내용 : 기반 토목 및 부지 석축 공사, 망향정 건립
쉼터정자, 망향탑, 망향비, 화장실

○ 사 업 비 : 755백만원(도비 300, 시비 455)

□ 그동안 추진상황

○ 기반시설 조성                              : 2008.  2.

○ 진입로 개설                                : 2009.  3.

○ 기본 및 실시설계 용역                      : 2009.  8.

□ 향후 추진계획

○ 성립전 예산 편성                           : 2010.  1.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료                 : 2010.  3.

○ 제1회 추경 시비 부담금 예산 반영           : 2010.  3.

○ 사업발주 및 완공                           : 2010. 10.

□ 문제점 및 대책

○ 도비 300백만원 확보에 따른 시비부담금 300백만원 미확보

⇒ 제1회 추경시 확보

『계속사업』

도래 전통한옥 관광자원화 사업

○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2012. 12.

○ 사업위치 : 다도면 풍산리 동녘마을 일원

○ 사업내용 : 전통한옥 신축․개보수, 공동주차장 및 방문객

센터 조성, 전기․통신 지중화사업, 황토포장,

경관조성사업, 폐교부지매입, 전통문화체험

전시관 건립 운영

○ 사 업 비 : 7,210백만원

- 2008년     : 1,490백만원(민박조성 15동, 방문객센터 조성)

- 2009년     : 2,530백만원(제1차 발주액 2,120)

- 향후소요액 : 3,190백만원

□ 그동안 추진상황

○ 화장실, 주차장 완공 및 방문객 센터 운영   : 2009.  1.

○ 다목적 체험관 건립공사 발주               : 2009. 11.

○ 한전․통신 지중화사업 수탁 완료           : 2009. 11.

○ 토목, 전기 사업 발주                      : 2009. 11.

□ 향후 추진계획

○ 토지 무상사용 승낙서 징구                : 2010.  1.

○ 2009년 사업 미 발주분 발주               : 2010.  4.

○ 사업 완료                                : 2010.  6.

○ 운영조직체계 수립 및 운영 프로그램 개발  : 2010.  6.

○ 폐교 활용을 위한 부지 매입               : 2010. 12.

『계속사업』

우습제 생태관광자원화 사업

○ 위    치 : 공산면 동촌리, 동강면 인동리 일원

○ 사업기간 : 2009. 3. ~ 2011. 12.

○ 사업면적 : 29,700㎡(9,000평).

○ 사업내용 : 탐방로, 수변데크, 목교, 방문객센터, 황토풀,
주차장, 탐조대 등

○ 사 업 비 : 4,100백만원(국비 2,220, 시비 1,880)

□ 그동안 추진상황

○ 공유재산관리계획 수립 및 승인               : 2009.  1.

○ 실시설계완료                                : 2009.  6.

○ 공사발주 및 착공                            : 2009.  7.

○ 인허가 절차이행 및 토지매입                 : 2009. 11.

□ 향후 추진계획

○ 2차분 공사 발주                             : 2010.  2.

□ 문제점 및 대책

○ 국비 확보에 따른 시비부담금 및 토지매입비 일부만 반영

⇒ 부족예산 4.4억(시비 3.2,  토지매입비 1.2)
제 1회 추경에 확보

『계속사업』

죽설헌 생태관광자원화 사업

○ 사업기간 : 2009. 10. ~ 2011. 12.

○ 위    치 : 금천면 촌곡리 124-1번지 일원

○ 사업면적 : 21,000㎡

○ 사업내용 : 갤러리, 산책로, 조경시설, 쉼터, 화장실,
음수대, 기반시설 등

○ 사 업 비 : 4,416백만원(국비 1,750, 시비 2,666)

□ 그동안 추진실적

○ 공유재산 관리계획 수립 및 승인              : 2009.  2.

○ 2010년 광특예산 확정                        : 2009. 11.

○ 사업추진을 위한 가협약 체결                 : 2009. 12.

□ 향후 추진계획

○ 실시설계 및 인허가 협의                     : 2010.  8.

○ 공사발주                                    : 2010. 10.

□ 문제점 및 대책

○ 2010년 토지 매입비(5억원) 미확보로 사업 장기화 우려

⇒ 제 1회 추경 확보

『계속사업』

영산강 나주선 복원

○ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2010. 12.

○ 복원규모

- 톤    수 : 92톤

- 전    장 : 29.9m, 너비 9.9m, 깊이 3.16m

- 승선인원 : 96명 내외 (선원 3명 포함)

- 속    력 : 최대 10노트, 평속 8노트

○ 복원 활용 방향 : 영산강 문화관광 유람선

○ 사 업 비 : 800백만원 (국비 400, 시비 400)

□ 그동안 추진상황

○ 나주선 복원 기본 및 실시설계 완료    : 2009.  9. 21.

○ 전라남도 원가 계산심사 완료          : 2009. 11. 16.

○ 제조구매 및 감리용역 발주 및 계약    : 2009. 12. 28.

○ 제조구매 착수                        : 2010.  1.  4.

○ 착수보고 회의 개최                   : 2010.  1. 11.

□ 향후 추진계획

○ 목재 건조                            : 2010. 1. ~ 5.

○ 전통 한선 제작 및 활용사례 현장 조사 : 2010. 2. ~ 5.

○ 제조 착수                            : 2010. 6. ~ 9.

『계속사업』

나주읍성 서성문 복원사업

○ 문화재명 : 나주읍성(사적 제337호)

○ 사업위치 : 나주시 교동 42번지 일원

○ 사업내용 : 서성문 복원 및 우회도로 개설

○ 사 업 비 : 3,142백만원

□ 그동안 추진상황

○ 서성문 공사 착수                            : 2009.  7.

○ 서성문 지장물 철거 완료                     : 2009.  9.

○ 서성문 지하매설물 이설 완료                 : 2010.  1.

□ 향후 추진계획

○ 서성문 기초공사 실시                        : 2010.  2.

○ 서성문 육축 및 성문복원공사 실시            : 2010.  5.

○ 서성문 복원공사 완료                        : 2010. 10.

『계속사업』

나주 복암리 고분전시관 건립

○ 문화재명 : 나주복암리고분군(사적 제404호)

○ 사업위치 : 나주시 다시면 복암리 522번지 일원

○ 사업내용 : 연면적 3,903㎡, 지하1층 / 지상1층

○ 사 업 비 : 7,400백만원

□ 그동안 추진상황

○ 부지매입 및 발굴조사 기본설계 완료          : 2008.  6.

○ 고분전시관 건축 실시설계 착수               : 2009.  1.

○ 고분전시관 전시물 제작 착수                 : 2009.  8.

□ 향후 추진계획

○ 실시설계 문화재청 승인신청                  : 2010.  2.

○ 고분전시관 공사 발주                        : 2010.  3.

○ 고분전시관 공사 준공                        : 2011. 12.

□ 문제점 및 대책

○ 실시설계 작성에서 법정시설 설치 및 기능개선으로 인하여
4,100백만원이 증액되어 당초사업 예산으로는 추진이 어려워
문화재청 설계 승인 애로

『계속사업』

영산강 역사문화단지 조성

○ 사업기간 : 2009 ~ 2015(7년간)

○ 사업위치 : 다시면 복암리, 회진리 일원(510,000㎡)

○ 사업내용 : 영산강역사문화관, 남도 농업문화관, 공예음식
문화관, 민속놀이관, 조경 및 탐방로 등

○ 사 업 비 : 49,500백만원

□ 그동안 추진실적

○ 영산강역사문화단지 조성 추진 검토 보고       : 2009. 1.23.

○ 역사문화단지 조성사업 기본계획변경 용역 발주 : 2009. 6.30.

□ 향후 추진계획

○ 용역결과 보고회 및 기본계획 변경승인 요청 : 2010. 1.

○ 지구지정 및 부지매입                      : 2010. 2. ~ 12.

□ 문제점 및 대책

○ 반남고분군 등과 연계한 종합검토 필요

○ 투자비의 현실성을 감안 당초 사업비 조정 필요

⇒ 용역 결과를 토대로 사업위치, 사업내용 변경 등
실현 가능한 방향으로 추진