건설과

	2010 주요 업무계획 (건설과)
□ 2010년 추진목표 -------------------------------------------			196
□ 일반시책
○ 주민숙원사업 추진 --------------------------------------------			197
○ 농촌생활환경 정비사업 --------------------------------------			198
○ 기계화경작로 확․포장사업 ----------------------------------			199
○ 도로정비 및 유지관리 ----------------------------------------			200
○ 위험교량 보수 및 정밀 안전진단 용역 -----------------			201
○ 안전한 보행환경 조성사업 ---------------------------------			202
○ 교통사고 잦은곳 개선사업 ---------------------------------			203
○ 위험도로 구조개선사업 --------------------------------------			204
○ 가로(보안)등 설치 및 유지관리 ---------------------------			205
□ 계속사업
○ 군도 확․포장사업 --------------------------------------------			206
○ 농어촌도로 확․포장사업 -----------------------------------			207

	2010년 추진목표
환경 친화적인 도로 시공 및 폐기물 재활용으로 저탄소 녹색국토 실현 농촌생활환경 정비사업 추진으로 주민 생활환경 개선

	추 진 전 략
각종 건설공사의 견실시공과, 환경 친화적인 설계 반영으로 삶의 질 향상 농업 생산 기반시설 확충으로 영농 불편 해소 체계적인 도로 유지보수로 시민 교통 불편 해소

	주요 역점시책
주민숙원사업 추진 농촌생활환경 정비사업, 기계화경작로 확․포장사업 추진 도로 정비, 위험교량 보수 및 정밀안전진단 용역 실시 안전한 보행환경 조성사업 추진 교통사고 잦은곳 개선사업, 위험도로 구조개선사업 추진 가로(보안)등 설치 및 유지관리 군도, 농어촌도로 확․포장사업 추진

『일반시책』

주민숙원사업 추진

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 6.

○ 대상지역 : 관내 19개 읍․면․동 일원

○ 사업내용 : 마을진입로 및 안길포장, 마을하수도 정비 등

○ 사 업 량 : 69개소(1,198백만원)

□ 추진방침

○ 지역주민과 함께 현장조사를 철저히 하여 생활환경 불편
사항 우선 해결

○ 인공구조물을 배제하고 자연환경을 고려한 친환경공법 시공
으로 환경훼손 최소화

□ 추진계획

○ 2010.  1. : 자체설계단 편성 운영

- 편성운영 : 6개 반 15명(1. 11. ~ 2. 10. / 31일간)

- 설계대상 : 167건(주민숙원 69건, 농업기반정비 98건)

- 효    과 : 조기발주 대비 및 예산절감

○ 2010.  1. : 대상지 선정 및 조사측량

○ 2010.  2. : 설계서 작성 및 사업발주

○ 2010.  6. : 사업 완료

□ 기대효과

○ 주민숙원사업 시행으로 농촌마을정비 및 통행불편 해소

○ 농촌 정주여건 정비 및 확충으로 시민들의 삶의 질 향상

『일반시책』

농촌생활환경 정비사업

○ 사업기간 : 2010. 1. ~  10.

○ 위    치 : 세지면, 반남면

○ 사 업 량 : 7건

○ 사업내용 : 마을기반 정비 6개소, 마을회관 1개소

○ 사 업 비 : 2,100백만원(국비 1,470, 시비 630)

□ 추진방침

○ 중심마을 기초생활시설 정비 및 소득사업에 집중투자

○ 낙후지역 해소 및 농가소득증대와 관련된 사업 시행

□ 추진계획

○ 2010. 1. ~  2. : 실시설계 용역

○ 2010. 3. ~ 10. : 공사 추진

□ 기대효과

○ 농촌마을 경관 개선 및 생활환경 정비로 삶의 질 향상

○ 농촌지역의 생산기반시설 정비로 지역 균형발전 도모

『일반시책』

기계화경작로 확‧포장사업

○ 사업기간 : 2010.  1. ~ 5.

○ 위    치 : 4개면(동강면 등 5개 지구)

○ 사 업 량 : L=5.0km

○ 사업내용 : 경지정리 완료 지역내 농로포장

○ 사 업 비 : 595백만원(국비 417, 도비 53, 시군비 125)

□ 추진방침

○ 비포장 농로와 연계되는 농산물가공, 유통시설간의 포장

○ 유통개선 촉진 및 농업 생활환경 개선

□ 추진계획

○ 2010. 1. ~ 2. : 실시설계 용역

○ 2010. 3. ~ 5. : 공사 추진

□ 기대효과

○ 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상 및 소득증대

『일반시책』

도로정비 및 유지관리

○ 현 황 : 연장1,078㎞(국도3, 지방도11, 시군도, 농어촌도로)

○ 도로노면보수 및 안전시설, 기타 긴급보수, 풀베기 등 8건

○ 2009년 수해복구공사 국도1호선 옹벽복구 등 3건

○ 국도1호선(교동육교~화산주유소) 가드레일 설치공사

□ 추진방침

○ 교통량이 많고 도로파손이 심한 지역 도로 재포장 우선 시행

○ 교통사고 위험지역 및 주민 불편이 초래되는 도로보수

□ 추진계획

○ 2010. 3.       : 동절기 제설작업 및 도로표지 일제정비

○ 2010. 6.       : 도로 노면 보수 및 수해복구공사 완료

○ 2010. 1. ~ 12. : 도로 유지관리 사업 연중 추진

□ 기대효과

○ 도로 시설물의 주기적으로 정비 관리하여 교통사고예방

○ 체계적 도로정비 및 유지관리로 양질의 교통서비스 제공

『일반시책』

위험교량 보수 및 정밀안전진단 용역

○ 현황 : 교량 111개소(시의 국도 11, 시도 19, 군도 30, 농어촌도로 51)

○ 노후교량 재가설        : 도동교 재가설공사

○ 위험교량 보수 ․ 보강  : 석현교 외 6개소

○ 교량 정밀안전진단 용역 : 학산교 외 6개소

□ 추진방침

○ 노후교량 재가설 및 위험교량 보수

○ 시설물안전관리특별법제10조 규정에 의한 교량 정밀안전진단
용역추진

□ 추진계획

○ 2010.  4. : 도동교 재가설공사 완료

○ 2010.  5. : 교량 정밀안전진단 용역 완료

○ 2010.  6. : 위험교량 유지보수 완료

□ 기대효과

○ 시설물의 안전점검과 적정한 유지관리로 재해 사전예방

○ 시설물의 효용성 증진 및 공공의 안전 확보로 시민복리증진

『일반시책』

안전한 보행환경 조성사업

○ 사업기간 : 2009. 6. 25. ~ 2010. 6. 19.

○ 위    치 : 나주시 송월동 1074-4번지 외

○ 사 업 량 : 보도 및 자전거도로개설 L=2.191km, B=4.0~8.0m

- 1구간 : 국도13호선(한수교~한전사택 삼거리) L=1.943km

- 2구간 : 시내도로(신동아약국~아디다스 대리점) L=0.248km

○ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 2,000)

□ 추진방침

○ 차 없는 보행자전용도로 개설로 차량에 의한 보행안전 확보

○ 특색있는 길거리 문화공간 조성

□ 추진실적

○ 2009. 6. 25. : 공사 착공( 2009. 12. 31. 현재 공정 50% )

□ 추진계획

○ 2010. 6. 19. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 보행자 전용도로 개설로 안전하고 편리한 거리환경조성

○ 특색있는 길거리 문화공간 확보로 시민의 문화생활에 대한
다양한 욕구 충족

『일반시책』

교통사고 잦은곳 개선사업

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12. 31.

○ 위    치 : 나주시 성북동 성북사거리

○ 사업내용 : 교차로 개선 및 보행자섬 정비 1식

○ 사 업 량 : L=0.2km,  B=25m

○ 사 업 비 : 100백만원(광특 50, 시비 50)

□ 추진방침

○ 교통사고 잦은곳 개선사업 추진으로 교통사고예방

○ 안전하고 편리한 도로개선으로 교통불편 해소

□ 추진계획

○ 2010.  1. ~  3. : 실시설계 용역

○ 2010.  3.      : 사업 착공

○ 2010.  6.      : 사업 준공

□ 기대효과

○ 안전하고 편리한 도로환경조성으로 교통사고 예방 기여

『일반시책』

위험도로 구조개선사업

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12. 31.

○ 위    치 : 나주시 반남면 흥덕리, 석천리

○ 사업내용 : 굴곡도로 선형개선 및 확․포장

○ 사 업 량 : L= 0.5㎞,  B= 8.0m

○ 사 업 비 : 610백만원(광특 305, 시비 305)

□ 추진방침

○ 위험도로 구조개선사업 추진으로 교통 사고예방

○ 안전하고 편리한 도로개선으로 교통 불편 해소

□ 추진계획

○ 2010.  1.~  3. : 실시설계 용역

○ 2010.  4. ~ 5. : 토지분할 및 행정절차 이행

○ 2010.  5.     : 사업 착공

○ 2010. 11. 31.  : 사업 준공

□ 기대효과

○ 안전하고 편리한 도로 환경조성으로 교통 불편 해소 및
교통사고 예방

『일반시책』

가로(보안)등 설치 및 유지관리

○ 현황 : 19 읍면동 12,286등(가로등 2,943 ,보안등 9,343)

○ 보안등 유지보수 단가계약 및 가로등 유지보수

○ 보안등 신규 설치공사                    : 100등

○ 원협공판장 입구~흥국주유소간 노후 가로등 선로 보수

○ 부적합 시설 개보수공사(한국전기안전공사) : 150등

□ 추진방침

○ 주민 통행이 많고 어두운 골목길 우선 정비

○ 가로(보안)등 미설치로 교통사고 및 야간보행이
어려운 구간 신설

□ 추진계획

○ 2010.  3 : 노후 가로등 선로보수 현지조사 완료

○ 2010.  5 : 보안등 신설 및 원협공판장입구~흥국주유소간
노후 가로등 선로보수 완료

○ 2010.  6 : 부적합시설 개보수 완료

○ 2010. 12 : 연중 고장 가로등 및 보안등 개보수 실시

□ 기대효과

○ 가로(보안)등의 신속한 개보수로 주민생활 편익 제공

○ 체계적인 유지보수 및 관리로 안전사고 예방

『계속사업』

군도 확․포장사업

	2010년 사업현황
○ 사 업 량 : 2개 노선 L=1.66㎞, B=8.0m -군도 10호선 (금천 고동 ~ 남평 방축) : 0.28㎞( 40백만원) -군도 18호선 (다도 신동 ~ 다도 방산) : 1.38㎞(1,000백만원) ○ 사 업 비 : 1,040백만원 ○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

□ 그동안 추진상황

○ 공사 발주 의뢰 : 군도18호선

□ 향후 추진계획

○ 2010.  1. : 공사 착수(군도18호선)

○ 2010.  2. : 공사 착수(군도10호선)

○ 2010. 12. : 공사 완료

□ 문제점 및 대책

○ 계속사업으로 장기공사에 따른 주민들의 불편사항이
많으므로 미확보 예산 690백만원을 추경에 확보하여
추진코자 함.

『계속사업』

농어촌도로 확․포장사업

	2010년 사업현황
○ 사 업 량 : 5개 노선 L=5.83㎞, B=8.0m <공사추진> - 왕곡면 205호선 (신원~화정) : 1.48㎞ (300백만원)-계속 - 나주소방서~서당골 진입도로 : 0.54㎞ (300백만원)-계속 <토지보상> - 금천면 306호선 (이내~원촌) : 1.25㎞ (400백만원)-계속 - 봉황면 202호선 (옥산~송현) : 2.06㎞ (300백만원)-계속 <실시설계> - 왕곡면 208호선 (축협~국도) : 0.60㎞ ( 50백만원)-신규 ○ 사 업 비 : 1,350백만원 ○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

□ 그동안 추진상황

○ 실시설계용역 발주 : 왕곡208호선

○ 공사발주 의뢰     : 2개 노선(왕곡205, 금남동)

○ 토지보상 협의     : 2개 노선(금천306, 봉황202)

□ 향후 추진계획

○ 2010.  1. : 공사 착수(왕곡 205호선)

○ 2010.  2. : 공사 착수(금남동)

○ 2010. 12. : 공사완료

□ 문제점 및 대책

○ 연차 사업비 미확보로 토지보상 및 공사 지연에 따른 주민
불편이 많으므로 미확보 예산 1,531백만원 추경 확보 추진