도시과

	2010 주요 업무계획(도시과)
□ 2010년 추진목표 -------------------------------------------			222
□ 일반시책
○ 구도심 활성화를 위한 제1종 지구단위계획 수립용역 ----			223
○ 산포매성지구 제2종 지구단위계획 변경수립용역 --			224
□ 신규시책
○ 개발제한구역 주민 및 생활지원 사업 -----------------			225
○ 도시계획도로 개설공사 -------------------------------------			226
○ 자전거도로 개설공사 ----------------------------------------			227
○ APC~영산강변 도로개설공사 -----------------------------			228
□ 계속사업
○ 시도 23호선 도로 확․포장공사 -------------------------			229
○ 남평소도읍 육성사업 ----------------------------------------			230
○ 나주지방산업단지 폐수종말처리장설치공사 ----------			231
○ 나주지방산업단지 공업용수공급시설공사 -------------			232
○ 자전거테마파크 조성공사 ----------------------------------			233
○ 도시계획도로 개설공사 -------------------------------------			234
○ 송월지구 도시개발사업 -------------------------------------			235
○ 도시경관 기본계획 용역 -----------------------------------			236
○ 나주 공설운동장 건립사업 --------------------------------			237
○ 국민체육센터 및 웨이트트레이닝센터 건립 ----------			238

	2010년 추진목표
빛가람도시와 원도심을 연계한 새로운 인프라 구축으로 성장 원동력과 지역균형 발전도모 각종 도시개발사업 및 아름다운 도시경관 조성으로 우리시 이미지 제고

	추 진 전 략
도시 기반시설 조성 ⇒ 지역균형 발전 도모 도시 가로환경 정비 ⇒ 도시 경관 조성 스포츠테마파크 건립 ⇒ 시민의 건강을 위한 공간 제공

	주요 역점시책
종합스포츠타운 건설 자전거테마파크 조성 가로경관 정비사업 아름다운 도시경관 조성 나주지방산업단지 폐수종말처리장 설치 도시계획도로 개설 남평 소도읍 육성

『일반시책』

구도심 활성화를 위한 제1종 지구단위계획 수립용역

○ 용역기간 : 2010. 1. ~ 2011. 1.

○ 위    치 : 나주읍성 권역지내

○ 면    적 : 99,000㎡

○ 과업내용 : 제1종 지구단위계획, 교통성, 경관성, 환경성검토

○ 용 역 비 : 263백만원

□ 추진방침

○ 나주읍성권내 구도심 활성화를 위한 지구단위계획을 수립
빛가람 혁신도시와 공존할 수 있는 기반 마련

○ 토지이용계획을 합리화하고 구도심 기능을 증진시켜 경관,
개선 및 도시 환경을 확보 체계적 발전계획 수립

□ 추진계획

○ 2010.  1. : 구도심 활성화 제1종 지구단위계획 용역착수

○ 2010.  4. : 제1종 지구단위계획(안) 작성
(교통성, 경관성, 재해성, 사전환경성 검토)

○ 2010.  6. : 관련기관 협의 및 주민, 의회 의견청취

○ 2010.  8. : 시 도시계획위원회 자문

○ 2010.  9. : 전남도 결정신청 및 도시 건축 공동위원회 심의

○ 2010. 11. : 지구단위계획 결정 및 지형도면 고시

□ 기대효과

○ 특화된 발전계획 수립으로 지속적 인구유입 및 경제 활성화

○ 구도심과 빛가람 혁신도시와 연계 상생할 수 있는 여건조성

『일반시책』

산포 매성지구 제2종 지구단위계획 변경수립용역

○ 용역기간 : 2010. 2. ~ 2011. 2.

○ 위    치 : 산포면 매성리 소재지 권역지내

○ 면    적 : 201,950㎡

○ 과업내용 : 제2종 지구단위계획, 교통성, 경관성, 환경성검토

○ 용 역 비 : 250백만원

□ 추진방침

○ 산포면 소재지 권역이 빛가람 혁신도시 개발 등 주변 여건
변화로 교통, 환경 등 기반시설 확충

○ 제2종 지구단위계획 변경용역 수립으로 기존도로 확장과 토지이용계획 변경 및 주거환경 정비 등 체계적인 발전계획 수립

□ 추진계획

○ 2010.  2. : 산포 매성지구 제2종 지구단위계획 변경용역 착수

○ 2010.  4. : 제2종 지구단위계획(안) 작성
(교통성, 경관성, 재해성, 사전환경성 검토)

○ 2010.  6. : 관련기관 협의 및 주민, 의회 의견청취

○ 2010.  8. : 시 도시계획위원회 자문

○ 2010.  9. : 전남도 결정신청 및 도시 건축 공동위원회 심의

○ 2010. 11. : 지구단위계획 결정 및 지형도면 고시

□ 기대효과

○ 지역실정에 맞는 실질적 토지이용계획으로 주거환경 개선

○ 빛가람 혁신도시와 연계 개발계획 수립으로 상생발전 기여

『신규시책』

개발제한구역 주민 및 생활지원 사업

○ 위    치 : 나주시 남평읍, 노안면, 금천면, 산포면 일원

○ 사업규모 : 주민지원사업 4개소, 생활지원사업 266세대

○ 사 업 비 : 645백만원(광특581, 시비 64)

※ 주민지원사업 514, 생활지원사업 131백만원

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

□ 추진방침

○ 개발제한구역내 주민 복지증진 및 농업생산사업 지원

○ 주민등록상 개발제한구역내 거주대상으로 전기료, 건강

보험료 등 생활비용을 거주 기간에 따라 차등지원(원주민

575천원, 5년 이상 거주자 288천원 지원예정)

□ 추진계획

○ 2010.  1. : 직접지원사업 조사 및 생활비용 보조금지급에 대한 공고

○ 2010.  2. : 주민사업 공사발주 및 생활비용 보조금 신청 접수

○ 2010.  3. : 생활비용 보조금 지급

○ 2010. 12. : 주민지원사업 추진 완료

□ 기대효과

○ 기반시설 정비로 주민 생활편익 증대

○ 자립형 소득증대 및 주민지원사업을 통한 소득향상 기여

○ 개발제한구역 거주민의 생활비 직접지원으로 소득 보전

『신규시책』

도시계획도로 개설공사

○ 사업기간 : 2010. 1. ~  2015. 12.

○ 위    치 : 나주시 산포․금남․이창 지내

○ 사업개요 : 3개소/L=1,200m, B=6~12.0m

- 이창동세원@~기동마을간     : L=550m B=8m/2,007백만원

- 서성문주변 도시계획도로    : L=300m B=20m/3,010백만원

- 산포면소재지 간선도로확포장공사 : L=350m B=8m/602백만원

○ 사 업 비 : 5,619백만원(확보액 1,000, 미확보액 4,619)

□ 추진방침

○ 편리하고 아름다운 거리 및 쾌적한 도시환경 조성

○ 시민의 삶의 질 향상에 적합한 도시개발사업 추진

□ 추진계획

○ 확보된 예산의 범위 내에서 연차적 사업으로 추진

○ 계획 공정대로 차질없이 추진하여 기한내 공사완료

○ 서성문 주변도시계획 도로개설은 문화재 보호구역 주변
토지를 매입 5m 정도의 간이 포장으로 주변 불편 해소

□ 기대효과

○ 소요 예산 미확보로 사업추진 지연 예상

○ 예산 확보 후 협의보상 완료지구부터 우선 사업추진

『신규시책』

자전거도로 개설공사

○ 사업기간 : 2010. 1. ~  2011. 12.

○ 위    치 : 금천면, 송월동, 성북동 지내

○ 사업개요 : 2개소/L=10.6㎞

- 금천면 신가교 ~ 산정삼거리 L=7.0㎞

- 송월지구 ~ 대호동(수변공원) L=3.6㎞

○ 사 업 비 : 3,730백만원

□ 추진방침

○ 기존 차도 및 보도와 구분된 자전거전용도로 개설

○ 자전거 이용자 안전성 확보를 위한 경계 구분 시행

□ 추진계획

○ 2010.  2. : 실시설계 완료 및 공사 착공

○ 2011. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 에너지절약, 환경오염방지 등 친환경적인 녹색교통체계 전환

○ 도심 교통문제 개선을 위한 수단으로서 자전거이용 활성화

『신규시책』

APC~영산강변 도로개설공사

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2015. 12.

○ 위    치 : 왕곡면 장산리 ~ 금천면 원곡리 지내

○ 사업개요 : 1개소/L=8.65㎞, B=20~30.0m

○ 사 업 비 : 65,000백만원

□ 추진방침

○ 쾌적한 도시환경 조성 및 도심교통량 분산

○ 시민의 삶의 질 향상에 적합한 도시개발사업 추진

□ 추진계획

○ 2010.  1. : 일상감사 및 원가계산의뢰

○ 2010.  2. : 사업수행능력 평가

○ 2010.  3. : 실시설계 용역 착수

○ 2011.  1. : 실시설계 용역 준공

□ 기대효과

○ 도시기반 시설 확충으로 지역균형발전

○ 시가지 교통량 해소와 쾌적한 도시환경 조성

『계속사업』

시도 23호선 도로 확․포장공사

○ 사업기간 : 2009. 6. ~ 2010. 12.

○ 위    치 : 나주시 다도면 풍산리 지내

○ 구    간 : 전남도임업시험장 ~ 나주휴튼CC 입구

○ 사업개요 : 연장 1,700 m,  폭 11 m

○ 사 업 비 : 1,418백만원(공사비 1,144, 보상비 274)

⇒ 총괄입찰에 의한 계속사업

○ 시 공 사 : 지원건설(주)

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  6 : 1차분 공사 착공(공정 95%)

□ 향후 추진계획

○ 2010.  1. : 1차분 준공(459백만원)

○ 2010.  2. : 2차분 착공(400백만원)

○ 2010.  6. : 3차분 착공(559백만원)

○ 2010. 12. : 공사 완료

□ 문제점 및 대책

○ 예산 미확보로 2010년말 준공 어려움

⇒ 미확보액(559백만원)에 대해 추경예산 확보 후
사업 마무리

『계속사업』

남평소도읍 육성사업

○ 사업기간 : 2004. ~ 2010. 12.

○ 위    치 : 나주시 남평읍 소재지 일원

○ 사업내용

〈추진완료〉

․ 지석천 친수공간 조성 995,500㎡,  ․ 5일시장 활성화 7,600㎡

․ 하수관거정비 15.0km

〈추진 중 및 이후추진〉

․ 시가지정비 1.0km - 추진중(90%)

․ 부도심육성사업 331,027㎡ - 지역경제과에서 추진 중

․ 근린공원조성 142,590㎡ - 이후추진

○ 사 업 비 : 26,707백만원

□ 그동안 추진상황

○ 2004~ 2009. 6. : 3개 사업 추진완료

○ 2008.  3.      : 시가지정비(실개천)사업 착공

○ 2009. 12.      : 근린공원조성계획 시 도시계획위원회 자문

□ 향후 추진계획

○ 2010.  2. : 근린공원조성계획 결정 및 신청(나주시→전라남도)

○ 2010.  4. : 시가지정비(실개천)사업 준공

○ 2010.  6. : 근린공원 조성사업 착공(예산 미확보)

□ 문제점 및 대책

○ 예산 미확보로 2010년 말 준공 어려움

⇒ 근린공원조성 사업 등 잔여 사업비(1,000백만원)
추경예산 확보 후 사업완료

『계속사업』

나주지방산업단지 폐수종말처리장설치공사

○ 사업기간 : 2007.  1.~ 2011. 12.(1단계 2007 ~ 2009.

○ 위    치 : 나주시 동수동 지내(국민임대산단 내)

○ 사업규모 : 처리용량 2,400㎥/일(1단계 1,200㎥/일)
부지면적 9,400㎡, 방류관로(250m/m)L=2.5㎞

○ 사 업 비 : 14,655백만원(1단계 8,467백만원) - 국비

○ 종합진도 : 90%

□ 그동안 추진상황

○ 2006.  3. : 폐수종말처리장 기본계획 승인(환경부)

○ 2008.  7. : 1단계 공사 착공

○ 2008. 12. : 처리시설동(지하시설물) 설치 완료

○ 2009. 10. : 방류관로(L=2.5km) 완료

○ 2009. 12. : 기계설비 및 전기공사 등 1단계 공사 추진 중

□ 향후 추진계획

○ 2010.  3. : 총인(T-P) 처리시설 착공

○ 2010. 12. : 총인(T-P) 처리시설 준공(1단계 준공)

○ 2011. 12. : 2단계 공사 완료

□ 문제점 및 대책

○ 1단계 사업비 중 1,200백만원 부족

⇒ 환경부에 건의하여 부족사업비 확보 후 사업완료

『계속사업』

나주지방산업단지 공업용수공급시설공사

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2011. 12.

○ 위    치 : 다시면 ~ 운곡동(주암댐 광역상수도 관로연결)

○ 사업규모 : 송수관(D600m/m) 매설 L=11.0km
배수지(7,000㎥/일) 1개소 설치

○ 사 업 비 : 12,845백만원(국비)

□ 그동안 추진상황

○ 2008. 10. : 미래산단 포함 공급시설 추진 승인(국토해양부)

○ 2009.  1. : 실시설계 용역 기술심의(전라남도)

○ 2009.  2. : 계약심의(전라남도)

○ 2009.  7. : 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ 2010.  2. : 1차 공사 관로매설(L=5,490m) 완료

○ 2011. 12. : 배수지 설치

○ 2011.  2. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ 미래산단 실시계획인가 지연으로 공업용수 개통시기 지연

『계속사업』

자전거 테마파크 조성공사

○ 사업기간 : 2004.  9. ~ 2010.  6.

○ 위    치 : 나주시 송월․ 영강동 지내(흥룡육교~구진포터널)

○ 사 업 량 : L=3,606m(철도폐선부지)

- 자전거․인라인도로, 산책로, 분수대, 소공원 조성

- 구진포도로 확․포장(L=2,590m)

- 안영교 재가설(L=15m)

○ 사 업 비 : 10,598백만원

○ 종합진도 : 90%

□ 그동안 추진상황

○ 2004.  9. : 공사 착공

○ 2008.  2. : 구진포도로 확․포장 완료

○ 2008. 10. : 안영교 재가설 완료

○ 2009. 12. : 흥룡육교 ~ 제창마을구간(L=2,771m) 조성 완료

□ 향후 추진계획

○ 2010.  2. : 제창마을 ~ 구진포 구간(L=835m) 착공
(조경, 수로관 400m, 경계석 900m)

○ 2010.  6. : 제창마을 ~ 구진포 구간(L=835m) 준공

□ 문제점 및 대책

○ 잔여 사업비 미확보로 사업추진 지연예상

○ 잔여 사업비 예산확보 후 사업 마무리

『계속사업』

도시계획도로 개설공사

○ 사업기간 : 2008.  1. ~  2010. 12.

○ 사업개요 : 8개소/ L=3,860m  B=8~25m

- 남평오거리~남평초교 : L=640m B=25m/3,931백만원

- 토계동 도시계획도로 : L=350m  B=8m/1,477백만원

- 영산포국민은행~구터미널 : L=480m  B=12m/2,486백만원

- 전남과학고 진입로 : L=484m  B=8m/1,144백만원

- 현대(아)~원협공판장 : L=981m  B=8~12m/3,014백만원

- 영산포제일병원~영산포초교 : L=170m  B=8m/902백만원

- 송월6통 도시계획도로 : L=475m B=8m/2,645백만원

- 송월주공@~송월부영@ : L=280m B=8m/1,807백만원

○ 사 업 비 : 17,406백만원(확보 11,282,  미확보 6,124)

□ 그동안 추진상황

○ 공사시행중 : 7건(남평오거리~남평초교, 토계동, 영산포국민은행~
구터미널, 전남과학고진입로, 현대(아)~원협공판장,
영산포제일병원~영산초교간, 송월6통도시계획도로)

○ 보상완료   : 1건(송월주공@~송월부영@)

□ 향후 추진계획

○ 공사 시행중이거나 보상완료지구 예정 공정대로 차질없이 추진

□ 문제점 및 대책

○ 예산 미확보로 사업추진 지연 예상

○ 잔여 사업비 예산확보 후 사업 마무리

『계속사업』

송월지구 도시개발사업

○ 사업기간 : 2006. 1. ~ 2010. 3.

○ 위    치 : 나주시 송월동 나주역사 전면부

○ 사업규모 : 환지방식에 의한 택지개발 297,600㎡

○ 사 업 비 : 29,182백만원

○ 종합진도 : 90%

□ 그동안 추진상황

○ 2005.  1. : 도시개발구역지정 및 개발계획승인(전라남도)

○ 2006.  1. : 공사착공 및 문화재 시․발굴조사 착수

○ 2008. 11. : 문화재 발굴 완료 및 공사시행 승인(문화재청)

○ 2009.  6. : 단지내 토공 및 구조물공사 추진

○ 2009.  9. : 개발계획 및 실시계획인가 변경

○ 2009. 10. : 환지예정지 공고, 환지계획 인가

○ 2009. 12. : 체비지 매각공고

□ 향후 추진계획

○ 2010.  2.  : 단지내 포장 및 확정 측량 완료

○ 2010.  3.  : 공사완료 및 등기 촉탁

○ 2010.  4.~ : 환지 청산금 징수 및 교부

『계속사업』

도시경관 기본계획 용역

○ 기    간 : 2009.  6. 25. ~ 2010.  6. 24.

○ 위    치 : 나주시 전역(604㎢)

○ 사업내용 : 경관계획 수립 및 관리형성

○ 사 업 비 : 310백만원

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  6. : 용역 착수

○ 2009. 12. : 경관지구 세분화 계획 완료

□ 향후 추진계획

○ 2010.  1. : 중간보고회

○ 2010.  4. : 경관가이드라인 및 실행계획 수립

○ 2010.  5. : 최종보고회

○ 2010.  6. : 용역 완료

『계속사업』

나주 공설운동장 건립사업

○ 사업기간 : 2008. 10. 15. ~ 2010. 10. 14.(진도 : 44%)

○ 위    치 : 나주시 송월동 1078-2번지 일원(신역사 후면부)

○ 규    모 : 부지조성 179,425㎡

○ 사업개요

- 주경기장 35,398㎡(수용인원 10,000명), 건축면적 3,739㎡
(연면적6,712㎡), 육상트랙 400m 8레인, 보조경기장 2면,
농구장, 테니스장, 게이트볼장 외

○ 사 업 비 : 39,925백만원

- 건축･토목･기계 17,860, 전기 4,241, 통신 807, 소방 183,
조경 1,999, 근린공원 3,252, 보상비 10,500, 기타 1,083

□ 그동안 추진상황

○ 2008. 10. : 건축･토목･기계공사 착수

○ 2008. 11. : 전면책임감리 착수

○ 2009.  1. : 전기, 통신, 소방공사 착수

○ 2009.  9. : 본부석 내부공사 완료

○ 2010.  1. : 근린공원 토취장 완료

□ 향후 추진계획

○ 2010.  6. : 주경기장 토성 관람석 완료

○ 2010. 10. : 공설운동장 완공

□ 문제점 및 대책

○ 근린공원 조성사업 차질로 운동장 주변 미관저해

○ 미확보 예산 3,452백만원 추경예산 확보 후 사업 마무리

『계속사업』

국민체육센터, 다목적체육관, 웨이트트레이닝센터 건립

○ 사업기간 : 2009. 3. 20. ~ 2011. 3. 19.(진도 : 28%)

○ 위    치 : 나주시 송월동 1078-2번지 일원(신역사 후면부)

○ 사업개요 : 9,830㎡(건축연면적 11,511㎡)

≪국민체육센터≫ 지하 2층･지상 3층, 연면적 3,690㎡

- 수영장(L=25m, 6레인), 생활체육관 270석, 체력단련 및 측정실 1식

≪다목적체육관≫ 지하 1층･지상 3층, 연면적 4,952㎡

- 관람석 1,658석, 기타 편의시설 1식

≪웨이트트레이닝센터≫ 지상 4층, 연면적 2,869㎡,

- 선수합숙소 37실(2인1실), 웨이트트레이닝장 1식

○ 사 업 비 : 30,000백만원(건축․토목․기계21,475, 전기2,059,
통신1,904, 소방737, 지열465 기타3,360)

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  3. : 건축･토목･기계 공사착수

○ 2009.  6. : 전기･통신･소방 공사착수

○ 2009. 12. : 건축 철골조 완료

○ 2010.  1. : 전기･통신･소방공사 1차분 완료 및 2차분 착수

□ 향후 추진계획

○ 2010.  3. : 국민체육센터 완공

○ 2010. 12. : 다목적체육관, 웨이트트레이닝센터 완공

□ 문제점 및 대책

○ 예산 미확보로 2010년 9월 이후 사업 중단 우려

○ 건축물 외장공사 우선 시행 및 미확보 예산 7,950백만원
추경예산 확보