재난관리과

	2010 주요 업무계획(재난관리과)
□ 2010년 추진목표 -------------------------------------------			279
□ 일반시책
○ 민방위 교육 훈련 및 비상대비 자원관리 --------------			280
○ 재난대비 상황관리 유지 --------------------------			281
○ 재해 사전대비 사업 추진 -------------------------			282
○ 소하천 정비 사업 --------------------------------			283
○ 하천 재해예방 및 기성제 정비 사업 ---------------			284
○ 안전문화운동 정착 생활화 ------------------------			285
□ 계속사업
○ 내기 재해위험지구 정비 사업 ---------------------			286
○ 영산강 살리기 사업 추진 -----------------------			287
○ 나주천 생태하천 조성 사업 추진 ------------------			288

	2010년 추진목표
재해사전대비 태세 확립으로 인명 및 재산피해 최소화 안보의식 함양과 재난발생시 신속한 동원태세 확립 맑은 물 영산강 살리기 사업 본격 추진

	추 진 전 략
재해발생시 신속한 복구추진으로 2차 피해 발생예방 비상대비 및 인력동원자원 관리 강화 재해예방과 친수공간 확보를 위한 4대강 살리기 사업 추진

	주요 역점시책
민방위 훈련 및 비상대비 자원관리 강화 재난대비 상황관리 유지 및 안전문화운동 정착 생활화 재해 사전 대비 사업 및 소하천 정비 사업 추진 내기 재해위험지구 정비 사업 추진 영산강 살리기 및 나주천 생태하천 조성 사업 추진

『일반시책』

민방위 교육 및 비상대비 자원관리

○ 민방위대 신규 편성 및 교육 훈련의 내실화

○ 안보의식 함양과 재난발생의 신속한 동원태세 확립

□ 추진방침

○ 전시, 국가 비상사태대비 완벽한 자원관리 및
상시 준비태세 확립

○ 각종 재난의 예방 및 대처요령 습득으로 안전의식 함양

□ 추진계획

○ 민방위 대원 교육 : 연중

- 민방위대 편입 1~4년차 대원     →  연간 4시간

- 민방위대 편입 5년차 이상 대원  →  비상소집훈련 실시

○ 민방위 훈련 : 2월 ~ 11월

- 민방공 대피훈련, 방재훈련, 생활민방위 시범훈련 등

○ 2010년 을지연습 실시 : 8월중 20개 기관단체 1,200여명

○ 2010년 민방위대 창설 제35주년 기념행사 : 2010. 9월중

- 민방위 대장 및 대원, 공무원 등 200여명 참석 예정

○ 인력동원 자원관리

- 20세~60세 남․여 중 특정자격․면허 소지자

- 중점관리자원 확인의 날 행사 : 업체, 군부대 등 변동자원

정리(5․10월  ⇒ 연 2회)

□ 기대효과

○ 비상사태 대비의 완벽한 관리로 상시준비 태세 확립

『일반시책』

재난대비 상황관리 유지

○ 재해로부터 신속한 대응태세 확립으로 시민의 생명과 재산 보호

○ 여름철 풍수해에 대비한 재난종합상황 관리 강화

□ 추진계획

○ 재난종합상황실 상시 운영

- 기    간 : 2010. 1. 1. ~ 12. 31.(연중)

- 장    소 : 재난종합상황실

- 내    용 : 자연ㆍ인적재난 사고의 예방, 국가기반체계보호 상황관리

- 근무방법 : 2인 1조(주간 : 재난관리과, 야간 : 당직실)

○ 재해대책상황실 운영(재해대책기간)

- 기    간 : 2010. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)

- 장    소 : 재난종합상황실

- 내    용

․재난 예ㆍ경보 시스템 운영

․재난특보 사항 및 행동요령에 대한 신속한 전파

․재해발생시 응급조치 및 재난복구 계획수립

□ 기대효과

○ 재난 사전대비 태세 확립으로 인명 및 재산 피해 최소화

『일반시책』

재해 사전대비 사업 추진

○ 사업기간 : 2010. 2. ~ 6. 30.

○ 위    치 : 송월동, 영강동, 운곡동, 청동일원

○ 사 업 량 : 구형 모터교체 7대, 제진기 4대, 전기승압,
기반시설 1식

○ 사 업 비 : 2,853백만원(특교 2,000, 시비 853)

□ 추진방침

○ 배수장의 체계적인 점검ㆍ정비로 사전 대비 철저

○ 노후 된 배수장의 보수 및 보완으로 재해 대비 만전

□ 추진계획

○ 2010. 1. : 성립전 예산 사용계획 승인

○ 2010. 2. : 실시설계 용역

○ 2010. 3. : 공사 발주 및 착수

○ 2010. 6. : 공사 준공 예정

□ 기대효과

○ 재난 사전대비 사업 추진으로 인명 및 재산 피해 최소화

『일반시책』

소하천 정비 사업

【 현   황 】

○ 소 하 천 : 151개 천, L= 210.29㎞(정비종합계획수립 완료)

※ 2009년까지 정비실적 : L= 87.90㎞(개수율 41.8%)

【 2010년 사업계획】

○ 사 업 량 : 5개소, L= 2.22㎞, 2,116백만원

- 정광천(남평) L= 0.6㎞(700) - 노안2천(노안) L= 0.42㎞(400)

- 월천천(왕곡) L= 0.3㎞(316) - 송계천(노안) L= 0.4㎞(350)

- 안성천(이창) L= 0.5km(350)

□ 추진방침

○ 소하천정비 종합계획에 의한 체계적이고 다목적 기능의
하천정비

○ 수해가 반복 또는 예상되는 소하천의 수해발생원인 사전 제거

□ 추진계획

○ 2010. 1. : 실시설계용역 및 토지 분할

○ 2010. 2. : 편입토지 용지보상 및 공사착공

○ 2010.12. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 수해재발 방지와 재해사전예방으로 인명 및 시민의 재산보호

『일반시책』

하천 재해예방 및 기성제 정비 사업

【 현   황 】

○ 하천연장 : 182개천, L= 461.74㎞

․국가(3) 78.5㎞ ․지방2급(28) 172.95㎞ ․소하천(151) 210.29㎞

○ 사업내용 : 잡목제거 및 기성제․노후 배수시설물 정비

【 2010년 사업계획 】

○ 사 업 량 : 3건/10개소

- 기성제 정비 및 잡목제거 : 3건(60백만원)

- 노후 배수시설 보수 등   : 10개소(140백만원)

□ 추진방침

○ 하천 잡목 제거 및 유수 소통 장애요인 제거로
홍수 소통 능력 증대

○ 재해위험요인 내재한 기성제 및 배수시설물 일제정비

□ 추진계획

○ 2010. 1. : 사업추진계획 수립 및 자체설계 완료

○ 2010. 2. : 설계 완료와 동시 공사 착공

○ 2010. 5월 재해기 이전 : 사업 완료

□ 기대효과

○ 농경지 침수피해 등 재해 사전 예방으로 인명과
시민의 재산 보호

『일반시책』

안전문화운동 정착 생활화

○ 재난사고가 상존하는 특정관리대상시설 및 재난위험시설물

의 안전점검으로 재난사고 사전예방

○ 안전문화운동 정착을 위한 홍보 강화로 시민 안전문화

의식 고취

□ 추진방침

○ 각종 캠페인을 통한 안전문화운동 정착으로
재난사고 사전예방

○ 시설물의 상시 점검으로 긴급 상황발생시 대처능력 향상

□ 추진계획

○ 안전점검의 날 운영                        : 12회(매월4일)

○ 특정관리대상시설물 안전점검 실시          :  2회(121개소)

○ 명절 연휴대비 다중이용시설 안전점검 실시  :  2회(16개소)

○ 해빙기 및 장마철 대비 및 시기별 안전점검 실시 :  4회(25개소)

○ 재난취약가구 전기안전점검 및 노후시설 정비 : 242가구

○ 유선사업장 안전관리 및 지도 점검         : 12회(매월 1회)

□ 기대효과

○ 위험요인의 사전 정비로 재난 없는 안전문화 정착

『계속사업』

내기 재해위험지구 정비 사업

○ 사업기간 : 2009. 1.  ~ 2012. 12.(4개년)

○ 위    치 : 나주시 산포면 내기리 일원

○ 사업내용 : 배수펌프장1개소, 배수 관로2.5km

○ 총사업비 : 8,000백만원(국비 4,800,  시비 3,200)

□ 그동안 추진상황

○ 2009. 2. 19. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2009. 6. 30. : 편입토지 보상 협의 완료( 21필지, 14,901㎡)

○ 2009. 8. 11. : 주민설명회 개최(산포면 내기 마을회관)

○ 2009.11. 24. : 소방방재청 실시설계  검토 요청(250억원 요구)

○ 2010. 1. 15. : 소방방재청 실시설계 검토 보고회 개최

□ 향후 추진계획

○ 2010. 2. : 행정절차 이행(사전재해성, 환경성, 기술심의 등)

○ 2010. 2. : 공사 발주 및 착수(총괄발주)

○ 2010.12. : 2010년도분 공사 준공 예정

□ 문제점 및 대책

○ 전라남도 예산 가내시 지연으로 예산 미반영(가내시 2009. 11. 24.)

○ 국비예산은 성립전 예산 사용하고 시비는 1회 추경 시 확보

『계속사업』

영산강 살리기 사업 추진

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2011년(3년간)  ※ 직접연계사업 2012년

○ 총 연 장 : 128㎞(하구둑 ~ 담양댐)

○ 사 업 비 : 2조 7,791억원(국비)

○ 사업내용 : 하도정비, 생태하천조성, 제방보강(영산포구 재개발),

보, 강변저류지, 자전거도로, 저수지 숭상, 수질대책 등

※ 우리시 관련사업 : 14개 사업, 1조 8,817억원

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  6. : 4대강 살리기 사업 마스터플랜 확정 발표(국토부)

○ 2009. 10. : 경작지 및 편입용지 보상 협의 개시(한국토지공사)

○ 2009. 12. : 농경지 리모델링사업 5개소 및 골재적치장 2개소 확보

○ 2009. 12. : 신규 사업 14건 발굴 추가반영 건의(시)

○ 2010.  1. : 턴키발주 2개 공구 포함 4개 공구 공사 착공 추진중

□ 향후 추진계획

○ 2010.  3. : 영산포구 재개발 등 미발주 4개 공구 착공(익산청)

○ 2010.  3. : 농경지 리모델링, 골재 판매 등 준설토 처리 착수

○ 2010.  6. : 토지 보상협의 완료(토지주택공사)

○ 2011. 12. : 영산강 살리기 본사업(환경정비, 준설, 보 등) 완료

○ 2012. 12. : 영산강 지류 수질대책 및 저수지 숭상 등 완료

『계속사업』

나주천 생태하천 조성 사업 추진

○ 사업기간 : 2009 ~ 2013년(5년간)

○ 사 업 명 : 나주천 수해상습지 개선사업

○ 위    치 : 경현동 오두제방수로 ~ 삼도동 영산강합류부

○ 사 업 량 : L= 5.5㎞,  B= 20~24m

○ 사 업 비 : 200억원(국비 120, 도비 80)

○ 시행기관 : 전라남도

□ 그동안 추진상황

○ 2008.  8. 25. : 하천재해예방사업 기본계획수립 반영(국토부)

○ 2009.  2. 11. : 실시설계용역 착수(전남도)

○ 2009. 10. 28. : 주민 설명회 개최(100여명 참석)

○ 2010.  1. 21. : 주민 설명회 재차 개최(120여명 참석)

□ 향후 추진계획

○ 2010.  1월 말 : 실시설계용역 완료(설계심의 등)

○ 2010.  2월 중 : 공사 발주(전남도)

○ 2010.  4월 중 : 공사착공(도) 및 토지 보상협의 개시(나주시)

○ 2013. 12월 중 : 공사 완료