	2010 주요 업무계획(상하수도과)
□ 2010년 추진목표 -------------------------------------------			291
□ 일반시책
○ 유입하수의 처리공정별 적정 관리 -----------------------			292
○ 상수도 급수 보급지역 확대 추진 ------------------------			293
○ 농촌지역 맑은 물 공급사업 추진 -------------------------			294
□ 신규시책
○ 공산지구 광역상수도 확장사업 추진 --------------------			295
○ 나주․공산 공공하수처리장 총인 처리시설 설치사업 추진 --------			296
○ 나주 하수슬러지 처리장 민간 운영 추진 --------------			297
□ 계속사업
○ 봉황지구광역상수도 확장사업 추진 ---------------------			298
○ 하수처리구역 하수관거 정비사업 추진 -----------------			299
○ 나주시 하수도정비 기본계획 변경 -----------------------			300
○ 하수관거 정비 BTL사업 추진 -----------------------------			301
○ 마을하수도 정비사업 추진 ---------------------------------			302
○ 분뇨처리장 고도처리 시설공사 ---------------------------			303

상하수도과

	2010년 추진목표
유입하수의 적정처리를 통해 영산강 수질보전 기여 맑은 물의 안정적 공급으로 주민 삶의 질 향상

	추 진 전 략
유입하수 및 연계처리수의 처리공정별 수질분석 강화 각종 사업의 적극적인 추진으로 주민 불편 최소화 지방상수도 운영 효율화사업 지도감독 철저

	주요 역점시책
하수처리장 적정 운영 및 관리 강화로 방류수 수질 향상 상수도 급수 보급지역 확대로 농촌지역 맑은물 공급 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 추진 하수처리 구역 및 마을하수도 정비사업 지속 추진 나주․공산 공공하수처리장 총인 처리시설 설치사업 추진

『일반시책』

유입하수의 처리공정별 적정 관리

유입하수에 대한 처리 공정별 수질분석 강화 및 시설물 통합

관리를 통한 방류수 수질기준 준수로 영산강 수질 보전에 기여

□ 추진방침

○ 유입하수의 효율적인 처리 및 관리를 통한 방류수 수질기준 준수

○ 수질관리를 위한 수질검사 기초자료 확보 및 결과 분석

□ 추진계획

○ 유입 하수에 대한 처리 공정별 수질분석

- 실험항목 : BOD포함 6개 항목(COD, SS, T-N, T-P, 대장균군수)

- 실험주기

․일일 실험 : 유입수 및 방류수(운곡, 산포, 공산)

․주간 실험 : 연계 처리수(분뇨, 가축분뇨, 침출수)

․월간 실험 : 마을 하수도 유입․방류수(29개 지구)

○ 연계수의 처리 공정별 세분화 분석으로 오염 부하량의 적정관리

- 분뇨, 가축분뇨, 침출수 원수 및 액상부식조 주기적 분석

○ 수질검사 결과 분석을 통한 효율적인 하수처리 공정 관리

○ 수질 원격 감시 체계(TMS) 관리 : 측정항목 5개 항목

□ 기대효과

○ 수질검사 결과 분석을 적용한 효율적인 수처리 공정관리로
하수 처리효율 상승 및 운영비 절감 도모

『일반시책』

상수도 급수 보급지역 확대 추진

○ 급수보급 현황 : 관로 총연장 545.6km, 급수수용가 11,783전

○ 급수보급 확대 추진

- 급․배수관 확장 : L=5km(광역 1.9km, 지방 3.1km)

- 신규 급수전 설치 : 800전(읍․면지역 600, 동지역200)

○ 사업비 : 902백만원(급 ․ 배수관 확장 342, 신규 급수전 560)

□ 추진방침

○ 물이 부족한 마을, 지하수 오염지역 우선시행

○ 수도정비 기본계획에 의하여 미 급수 지역인 농촌지역에
우선 공급

□ 추진계획

○ 신규 급․배수관 확장지구

- 광역상수도 : 남평, 산포, 금천, 노안, 왕곡, 동지역

- 지방상수도 : 다시, 문평

○ 사업 내용

- 상수도 확장 설치사업 : 광역 L=1.9km, 지방 L=3.1km

- 신규 급수전 설치사업 : 800전(읍․면지역 600, 동지역 200)

⇒ 수용가 신청(지하수 사용자)

□ 기대효과

○ 맑은 물의 안정적인 공급으로 급수 불편 해소 및 시민복지 향상

『일반시책』

농촌지역 생활용수 공급사업 추진

○ 농촌 농업 생활용수 개발

․ 대    상 : 노안유곡 감정지구 외 4개소

․ 사업내용 : 관정개발, 관로매설, 급수전 설치, 이용시설

․ 사 업 비 : 1,330백만원(국비 931, 시비 399)

○ 소규모 수도시설 개량사업

․ 대    상 : 세지송제 화탑 마을상수도 외 3개소

․ 사업내용 : 노후관 교체, 약품투입기, 취수시설, 물탱크 등

․ 사 업 비 : 814백만원(국비 569.8, 시비 244.2)

□ 추진방침

○ 식수부족과 수질오염 등으로 고통을 겪고 있는 지역 최우선 시행

○ 농촌 생활용수 개발 및 마을상수도 시설 개량으로 농촌지역
생활용수 공급

□ 추진계획

○ 농촌 농업 생활용수 개발

- 2010. 1. ~  3. : 지하수 개발

- 2010. 4. ~  5. : 실시설계 용역

- 2010. 6. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

○ 소규모 수도시설 개량사업

- 2010. 2. ~  3. : 실시설계 용역

- 2010. 4. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

○ 소외된 농촌지역 주민의 상대적 박탈감 해소 및 삶의 질 향상

『신규시책』

공산지구 광역상수도 확장사업 추진

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년(5개년) ⇒ 연차사업

○ 사업범위 : 나주시 공산면, 동강면 전지역과 반남면 일부

○ 사업개요 : 배수지 1개소, 송․급배수관로 99.1km(D=50 ~ 300mm)

○ 사 업 비 : 19,700백만원(국비 70%, 지방비 30%)

○ 실시설계 용역중 : 2009. 11. ~  2010. 11.(1년)

□ 추진방침

○ 지하수 오염 및 고갈로 식수확보에 어려움을 겪고 있는
농촌지역에 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급

□ 추진계획

○ 2010. 10. : 실시설계 용역 마무리(용역비 1,200백만원 - 시비)

○ 2010. 12. : 각종 심의 마무리(도로굴착 심의 등 5건)

○ 2011.  1. : 공사 착공

□ 기대효과

○ 맑은 물의 안정적인 공급으로 공중 보건위생 향상과
생활환경개선 등 시민복지 향상기여

『신규시책』

나주 ․공산 공공 하수처리장 총인 처리시설 설치사업 추진

○ 기      간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

○ 위      치 : 나주․공산 하수처리장 내 2개소

○ 용      량 : 22,500㎥/일(나주), 500㎥/일(공산)

○ 소요사업비 : 1,499백만원(국비70%, 시비30%)

○ 내      용 : 인 제거 설비, 여과 설비 신설

□ 추진방침

○ 영산강 살리기 사업으로 조류발생, 부영화방지 등 수질개선

○ 2012년부터 총인의 수질기준이 10배 강화됨에 따른 시설보완

□ 지금까지 추진실적

○ 2009. 12.  : 2010년 예산 반영

○ 2010.  1.  : 국비보조사업 교부신청

□ 추진계획

○ 2010.  1.  : 기본 및 실시설계

○ 2010.  6.  : 공사 착공

○ 2010. 12.  : 공사 준공

□ 기대효과

○ 총인 등을 화학적으로 처리하여 오염부하량과 처리효율
대폭 개선

○ 공공하수처리장의 안정적 방류 수질 확보로
영산강 수질개선 기여

『신규시책』

나주 하수슬러지 처리장 민간운영 추진

○ 기      간 : 2010.  1. ~ 2010. 12.

○ 위      치 : 나주시 공공 하수처리장내

○ 용      량 : 8㎥/일

○ 소요사업비 : 245백만원

○ 내      용 : 하수슬러지 처리장의 효율적인 운영․관리를
위해 민간 운영관리 추진

□ 추진방침

○ 필요성과 타당성을 검토․분석하여 위탁 여부를 판단

○ 민간 위탁으로 경제적, 전문적, 효율적 운영․관리 도모

□ 지금까지 추진실적

○ 2009. 12.  : 하수슬러지 처리장 준공과 2010년 예산 반영

○ 2009. 12.  : 위탁관리 타당성 용역 결과 타당 결론

□ 추진계획

○ 2010. 3. ~ 4. : 민간운영 용역 결과와 경제성 및 타당성을 검토

하여 우리시에 적합한 운영방안 확정

□ 기대효과

○ 하수슬러지의 2차 오염방지 및 자원 재활용으로 예산 절감

『계속사업』

봉황지구 광역상수도 확장사업 추진

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2013년(5개년) ⇒ 연차사업

○ 사업범위 : 나주시 봉황면 전지역, 다도․세지면 일부지역

○ 사업개요 : 배수지 1개소, 급․배수관로 63km(D=50~350mm)

○ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 80%, 도비 1%, 시비 19%))

․ 실시설계 용역비 490, 배수지 설치 시 부담금 1,200, 공사비 8,310

○ 시공회사 : (주)동광건설

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  2. : 실시설계 완료

○ 2009.  6. : 급․배수관 확장 공사 1차분 착공

□ 향후 추진계획

○ 2010.  2. : 2차분 공사 착공

○ 2010.  4. : 1차분 공사 준공

○ 2013. 12. : 공사 준공

○ 2014.  4. : 수돗물 급수개시(수용가 신청)

『계속사업』

하수처리구역 하수관거 정비사업 추진

○ 대상지역 : 나주․산포․공산처리장 하수처리구역

○ 사업내용 : 하수관거 정비(L=41.3㎞), 배수설비(1,618가구)

○ 사 업 비 : 29,260백만원(국비 70%, 시비 30%)

- 2009년 까지 : 27,202백만원

- 2010년 계획 :  2,058백만원

○ 사업기간 : 2006. 2. ～ 2010. 5.(종합진도 93%)

○ 시공회사 : 진흥기업(주), 새천년종합건설(주)

○ 감리회사 : (주)도화기술공사, (유)신오건설엔지니어링

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  1. : 하수관거 정비공사 4차분 착공

○ 2009.  6. : 하수관거 정비 공사 2, 3차분 준공(L=11.9㎞)

○ 2009. 11. : 하수관거 정비공사 5차분 착공

○ 2009. 12. : 하수관거 정비공사 4차분 준공

□ 향후 추진계획

○ 2010.  2. : 하수관거 정비공사 5차분 준공

○ 2010.  2. : 하수관거 정비공사 6차분 착공

○ 2010.  6. : 하수관거 정비공사 준공(100%)

『계속사업』

나주시 하수도정비 기본계획 변경

○ 용역기간 : 2008. 12. ～ 2010. 6.

○ 사업개요

- 하수도정비 기본계획 변경 : 나주시 전역(A=604.07㎢)

- 공공하수도대장 작성 : 6.3㎢(마을하수도 29개소 포함)

- 산포 하수관거정비 기본 및 실시설계
(L= 10.614㎞, 배수설비 782가구)

○ 총 용역비 : 1,150백만원

○ 용역 회사 : (주)도화기술공사, (유)신오건설엔지니어링

□ 그동안 추진상황

○ 2008. 12. : 1차분 용역 착공(150백만원)

○ 2009.  1. : 2차분 용역 착공(200백만원)

○ 2009.  4. : 산포 하수관거 정비 주민 설명회 개최

○ 2009.  7. : 하수도정비 기본계획 관련기관 및 실과 협의

○ 2009. 10. : 하수도정비 기본계획 환경부 및 전라남도 협의

○ 2009. 12. : 3차분 용역 착공(800백만원)

□ 향후 추진계획

○ 2010.  6. : 용역 준공

『계속사업』

하수 관거정비 BTL사업 추진

○ 사업 기간 : 2009. 12. ~ 2013. 1.(37개월)

○ 대상 지역 : 나주 중부 및 남부(동 지역)하수 처리구역

○ 사업 내용 : 하수관거 정비(L=83.9㎞), 배수설비(3,633가구)

○ 사 업 비  : 68,709백만원(공사비 52,102, 감리비 등 16,607)

○ 사업시행자 : 남양나주씨앤지(주)

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  2. : 실시협약 체결

○ 2009.  5. : 전라남도 건설기술 심의회 심의

○ 2009.  6. : 전라남도 공공하수도 통합 자문위원회 자문

○ 2009.  8. : 우선 시공분 실시계획 승인

○ 2009. 10. : 우선 시공분 공사 완료(영강동)

○ 2009. 10. : 환경부 재원 협의

○ 2009. 11. : 본 공사 실시계획 승인

○ 2009. 12. : 전체공사 착공

□ 향후 추진계획

○ 2013.  1.             : 공사 준공

○ 2013.  2. ～ 2033.  1. : 사업시행자 운영 관리(20년간)

『계속사업』

마을하수도 정비사업 추진

연도별	위 치	사업량	사 업 비(백만원)					사업기간	비고
			계	2008	2009	2010	2011
합 계			9,149	1,087	2,085	3,027	2,950
2008	봉황신석	Q= 80 톤/일	1,764	704	470	590		2008. 1. ～2010.12.
	다시청정	Q= 30 톤/일	1,256	383	501	372		2008. 1. ～2010.12.
2009	동강중앙	Q= 80 톤/일	2,357	-	714	1,643		2009. 1. ～2010.12.
	동강연화	Q= 30 톤/일	500	-	400	100		2009. 1. ～2010.12.
2010	반남흥덕	Q= 80 톤/일	2,600	-	-	150	2,450	2010. 1. ～2011.12.
	세지덕산	L=4.5㎞	672			172	500	2010. 1. ~2011. 12.

□ 그동안 추진상황

○ 2009.  9. : 동강 연화, 동강 중앙지구 실시설계 준공

○ 2009. 12. : 봉황 신석, 다시 청정지구 공사 추진(공정 70%)

○ 2009. 12. : 동강 연화, 동강 중앙지구 공사 추진(공정 30%)

□ 향후 추진계획

○ 2010.  1. : 반남 흥덕, 세지 덕산지구 사업 실시설계 추진

○ 2010.  6. : 반남 흥덕, 세지 덕산지구 사업 착공

○ 2010. 12. : 봉황 신석, 다시 청정지구 사업 준공

○ 2010. 12. : 동강 중앙, 동강 연화지구 사업 준공

『계속사업』

분뇨 처리장 고도처리 시설공사

○ 사업기간 : 2006. 1. ~ 2011. 12.

○ 위    치 : 나주시 진포동 산 5-2(분뇨처리장 내)

○ 사업내용 : 탈질조(672㎥) 신설 및 노후시설개량

○ 사 업 비 : 4,883백만원(국비 3,906, 시비 977)

□ 그동안 추진사항

○ 2006.  9. : 분뇨 처리장 변경 승인(전라남도)

○ 2008.  5. : 1차분 공사 착공

○ 2009.  1. : 2차분 공사 착공

○ 2009.  5. : 1차분 공사 준공

○ 2009.  7. : 2차분 공사 준공

○ 2009. 10. : 총 공정률 56%

□ 향후 추진계획

○ 2010. 2. : 2010년 사업분 발주(자동제어, 탈수시스템 등)

○ 2010. 7. : 2010년 사업분 준공

□ 문제점 및 대책

○ 2010년 사업분 7월 준공 후 공사중지로 연내 사업 마무리 불가

○ 2011년 국비 542.4백만원 조기 확보 노력