건 설 과

	2008 주요 업무 계획(건설과)
□ 2008년 추진목표 -------------------------------			254
□ 일반시책
○ 주민숙원사업 추진 ------------------------------			255
○ 오지개발사업 추진 ------------------------------			256
○ 농촌 정주기반사업 확충 -------------------------			257
○ 기계화경작로 확ㆍ포장 사업 ---------------------			258
○ 도로정비 및 유지관리 ---------------------------			259
○ 가로등정비 및 유지관리 -------------------------			260
□ 신규시책
○ 도로표지판 통합관리 시스템구축 -----------------			261
○ 도로순찰 담당구역제 실시 -----------------------			262
○ 사설안내표지판 통합지주대 설치 -----------------			263
□ 계속사업
○ 군도 확ㆍ포장사업 ------------------------------			264
○ 농어촌도로 확ㆍ포장사업 ------------------------			265
○ 전원마을 조성 사업 -----------------------------			266
○ 농촌마을종합개발 사업 --------------------------			268
○ 소재지권 도로정비 사업 -------------------------			269
□ 2008 주요 추진 사업 조서 ---------------------			270

	2008년 추진목표
도로의 체계적인 유지보수로 양질의 교통서비스제공 농로 및 마을외곽도로는 가급적 환경친화적인 사리부설 시행

	추 진 전 략
추진중인 사업장 조기 마무리 ⇒ 주민불편 해소 주민숙원사업추진 및 생활환경개선 ⇒ 주민만족도 제고 도로의 체계적인 유지보수 ⇒ 교통불편 해소

	주요 역점시책
주민숙원사업추진으로 주민 만족도 제고 군도,농어촌도로 확․포장으로 지역균형발전 도모 오지․정주권개발사업으로 주민소득기반 확충 도로정비 및 유지관리로 교통불편 해소 신속한 가로(보안)등 보수로 야간통행 불편해소 수리시설 개․보수사업으로 영농편익제공

『일반시책』

주민숙원사업 추진

○ 대상지역 : 나주시 19개 읍․면․동 일원

○ 사 업 량 : 59개소(2,102백만원)

- 진입로, 마을안길, 농로포장 : 37개소

- 마을회관, 우산각, 기타     : 22개소

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 12.

□ 사업의 필요성

○ 농촌 주거환경 개선 및 주민 숙원사업 해결

○ 주민기초생활 불편사항 우선해결로 복지수준의 단계적 향상

○ 소규모 편익시설 설치 및 소득 기반시설 확충

□ 추진 계획

○ 사업대상지 선정 및 추진계획 수립 : 2008.  1월

○ 조사측량 및 설계서 작성          : 2008.  2월

○ 사업 착공                        : 2008.  3월

○ 사업 완료                        : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 3,155백만원(도비 875, 시비 2,280)

○ 주민생활 불편해소 숙원사업 추진 : 2,398백만원(도비 158, 시비 2,240)

○ 주민 편익시설 확충 민간자본적 보조 : 757백만원(시비 717, 도비 40)

『일반시책』

오지개발사업 추진

○ 대    상 : 문평면, 다도면 (2개면)

○ 사 업 량 : 도로확포장 및 연결도로포장 4건(L=4.4km)

○ 사 업 비 : 1,114백만원(국비 780, 도비 34, 시비 300)

○ 사업기간 : 2008. 2. ~ 12.

□ 사업의 필요성

○ 낙후된 오지마을의 소득증대와 복지향상 도모

○ 낙후지역 개발로 지역의 균형 유지

□ 추진 계획

○ 사업 대상지 제출                  : 2008.  2월

○ 사업 대상지 확정 및 설계도서 작성 : 2008.  3월

○ 공사 발주 및 착공                 : 2008.  4월

○ 공사 준공                         : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 1,114백만원(국비 780, 도비 34, 시비 300)

○ 실시설계비 :    31백만원

○ 공사비     : 1,083백만원

『일반시책』

농촌 정주기반 확충 사업

○ 대    상 : 다시면, 노안면 (2개면)

○ 사 업 량 : 마을내 도로포장(2개소), 연결도로포장(4개소)

○ 사 업 비 : 2,661백만원(국비 1,863, 시비 798)

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 12.

□ 사업의 필요성

○ 농촌마을의 경관 개선 및 생활환경 정비로 삶의 질 향상

○ 농촌 정주기반 조성으로 희망과 활력이 넘치는 삶의 터전 마련

□ 추진 계획

○ 사업 대상지 신청  : 2008.  1월

○ 사업 대상지 확정  : 2008.  2월

○ 공사 발주 및 착공 : 2008.  3월

○ 공사 준공 예정    : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 2,661백만원(국비 1,863, 시비 798)

○ 실시설계비 :    64백만원

○ 공사비     : 2,597백만원

『일반시책』

기계화경작로 확ㆍ포장사업

○ 대         상 : L=695.6km

○ 지금까지 시행 : L=335.2km(48.1%)

○ 2008년 시행   : L=15.0km

○ 사 업 비 : 854백만원(국비 683, 도비 51, 시비 120)

○ 사업기간 : 2008. 2. ~ 12.

□ 사업의 필요성

○ 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상 및 소득증대

○ 영농 편익 제공

□ 추진 계획

○ 사업 대상지 신청                      : 2008.  2월

○ 사업 대상지 시행인가 및 설계도서 작성 : 2008.  3월

○ 공사 발주 및 착공                     : 2008.  4월

○ 공사 준공 예정                        : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 854백만원(국비 683, 도비 51, 시비 120)

○ 실시설계비 :  23백만원

○ 공사비     : 831백만원

『일반시책』

도로정비 및 유지관리

□ 도로현황

○ 도로 337개 노선 1,078㎞

[국도 85㎞, 지방도 171㎞, 군도 183㎞, 농어촌도 639㎞]

○ 교량 111개소[국도 11, 시도 19, 군도 30, 농어촌도 51]

□ 사업내용

○ 도로 재포장 및 차선도색(10개소)          : 255백만원

○ 도로안전시설 설치 및 소규모 보수(32개소) : 387백만원

○ 노후교량 보수ㆍ보강(9개소)               : 200백만원

□ 사업의 필요성

○ 도로 덧씌우기 및 차선 도색을 실시 산뜻한 도로상태 유지

○ 도로안전시설을 주기적으로 정비 관리하여 교통사고 예방

□ 추진 계획

○ 도로표지판 및 도로안전시설 정비            : 2008.  3월

○ 도로재포장 현지조사 및 재포장 실시         : 2008.  4월

○ 노후교량 보수ㆍ보강(9개소)                 : 2008.  7월

○ 안전시설물 설치 및 소규모 보수 지속적 실시 : 2008. 11월

□ 소요 예산 : 872백만원(시비)

○ 도로유지보수                : 642백만원

○ 교량유지보수                : 200백만원

○ 위험교량 보수 실시설계 용역 :  30백만원

『일반시책』

가로등정비 및 유지관리

□ 가로(보안)등 현황 : 12,026등

○ 가로등 2,827등(읍면지역   969등, 동지역 1,858등)

○ 보안등 9,199등(읍면지역 7,304등, 동지역 1,895등)

□ 사업내용

○ 고장 가로(보안)등 개보수 2,000등           180백만원

○ 가로(보안)등 신설 및 노후가로등 교체 300등 150백만원

○ 부적합 가로등 개보수 250등                  52백만원

□ 사업의 필요성

○ 보안등 설치로 시민 생활불편 해소

○ 가로(보안)등 체계적인 유지관리로 안전사고 예방

□ 추진 계획

○ 신설 및 노후가로등 현지조사      : 2008. 3월

○ 신설 가로(보안)등 설치           : 2008. 5월

○ 부적합 가로등 현지조사 및 개보수 : 2008. 9월

○ 고장가로등 개ㆍ보수 실시 2,000등 : 연중

□ 소요 예산 : 382백만원(시비)

○ 가로(보안)등 유지보수 : 180백만원

○ 불량가로등개보수      :  90백만원

○ 보안등 신규설치       :  60백만원

○ 부적합시설개보수      :  52백만원

『신규시책』

도로표지판 통합관리 시스템 구축

○ 서남부의 중추적 교통요충지인 우리시를 통과하는 국도 및 지방도

도로표지판의 통합관리 시스템 구축으로

○ 깨끗한 도로 환경 조성으로 시민의 복리 증진과 나주를 찾는

방문객의 이미지 제고

□ 사업의 필요성

○ 통합표지관리 시스템을 효과적으로 관리하여 교통 여건변화에
능동적으로 대처하며

○ 무질서한 표지판을 체계적으로 관리 최적의 도로교통 환경 조성

□ 추진 계획

○ 기존도로표지판 현황조사후 적정성 검토 및 개선안 도출 : 2008. 4월

○ 도로표지판 통합관리 시스템구축 완료 : 2008.  8월

○ 개선대상 표지판 정비 추진           : 2008. 10월

□ 기대 효과

○ 낡은 표지판 정비로 도로경관 조성

○ 체계적인 표지판 정비로 운전자의 안전운전 유도

『신규시책』

도로순찰 담당구역제 실시

구간별 도로순찰 담당 공무원제 지정 운영함으로써 도로정비 지연에 따른 교통 불편을 최소화하고 신속한 유지 보수로 교통사고를 사전에 예방하기 위함.

□ 사업의 필요성

○ 도로 파손지역 복구지연으로 교통사고 위험 및 주민불편

○ 현재 보유한 장비로 정기적인 도로순찰이 어려움

□ 추진 계획

○ 월 2회이상 도로순찰 실시 후 결과 보고(즉시 유지보수)

○ 도로 순찰 담당구간 지정 운영

- 국도 및 지방도        : 도로관리 담당부서

- 시군도 및 농어촌 도로 : 읍, 면, 동

○ 도로순찰 전용 차량 확보 : 35백만원

□ 소요 예산 : 35백만원(시비)

『신규시책』

사설안내표지판 통합지주대 설치

○「친절하고 질서있는 깨끗한 나주」만들기 운동 일환으로 주요

도로변에 규격이 일치되지 않고 분산된 사설안내표지판이 난립

되어있어 주위 경관을 훼손하고 있는 실정으로

○ 사설안내표지판에 대한 통합 지주대를 설치하여 규격화함으로써

깨끗한 도시 경관을 조성코자 함

□ 사업의 필요성

○ 규격이 일치되지 않은 사설안내표지판이 난립되어 있어

가로 경관을 저해하고 있음.

□ 추진 계획

○ 사설안내표지판 지주대 설치 대상지 조사  : 2008. 3월

○ 대상지 조사결과 개인별 철거 안내문 발송 : 2008. 4월

○ 난립된 사설안내표지판 철거              : 2008. 6월

○ 통합 사설안내표지판 지주대 설치(시)     : 2008. 7월

○ 규격화된 사설안내표지판 제작 부착       : 2008. 8월

□ 소요 예산 : 20백만원(시비)

○ 통합 사설안내표지판 지주대 설치 : 1개소

『계속사업』

군도 확ㆍ포장 사업

○ 사 업 량 : 2개 노선 L=5.1㎞

- 군도 11호선 (반남 하촌~왕곡 신포) : 3.1㎞(1,131백만원)

- 군도 18호선 (다도 신동~다도 방산) : 2.0㎞(  540백만원)

○ 총사업비 : 11,484백만원

(기투자 7,753, 2008확보 1,671, 미확보 2,060)

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2008.12.

□ 사업의 필요성

○ 국도 및 지방도와 연계, 계속사업 마무리 위주로 우선 추진

○ 나주호 주변 도로망 확충으로 지역 관광지 활성화

□ 그 동안 추진상황

○ 편입토지 협의보상 및 문화재 발굴조사 : 2005.~ 2007.

○ 군도 11호선 토공 및 구조물 시공중(공정율 31%)

□ 향후 추진계획

○ 군도18호선 실시설계용역 및 편입토지 분할 측량 : 2008. 1 ~ 4월

○ 군도18호선 편입토지 감정평가 및 보상협의      : 2008. 5 ~ 6월

○ 기존도로포장 파쇄후 문화재 발굴조사(군도11호선) : 2008. 7월

○ 공사 준공 : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 1,671백만원(시비)

『계속사업』

농어촌도로 확․포장공사

○ 사 업 량 : 8개노선 L=9.9㎞ B=8.0m

- 금천면 306호선 (이내 ~ 원천) : L=1.2km (350백만원

- 남평읍 204호선 (광촌 ~ 광촌) : L=0.2km (283백만원)

- 남평읍 102호선 (우산 ~ 우산) : L=3.5km (583백만원)

- 다시면 202호선 (대못 ~ 두만) : L=0.5km (463백만원)

- 봉황면 101호선 (철천 ~ 황용) : L=2.3km (410백만원)

- 봉황면 202호선 (옥산 ~ 송현) : L=2.0km ( 79백만원)

- 왕곡면 207호선 (양산 ~ 신가) : 문화재 지표조사(50백만원)

- 산포면 202호선 (등수 ~ 등정) : L=0.2km (120백만원)

○ 총사업비 : 8,575백만원(기투자 1,527, 2008년 2,288. 미확보 4,760)

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2008. 12.

□ 사업의 필요성

○ 계속사업 마무리 위주로 추진하여 사업효과 극대화

○ 낙후지역 도로망 우선확충으로 지역간 균형개발 유도

□ 그 동안 추진상황

○ 편입토지 협의 보상 실적 : 70%

○ 총 공사 추진 공정율     : 51%

- 봉황101호선(95%), 금천면 306호선(토지보상 5%)

□ 향후 추진계획

○ 잔여사업 발주 및 신규노선 실시설계용역 : 2008. 1 ~ 4월

○ 편입토지 감정평가 및 보상 협의         : 2008. 5 ~ 6월

○ 공사 착공 및 준공                      : 2008. 7 ~ 12월

□ 소요 예산 : 2,288백만원(시비)

『계속사업』

전원마을 조성 사업

○ 대    상 : 봉황 만봉, 다시 신광지구(2005년 확정)

노안 금안, 금천지구(2008년 확정)

○ 사업유형 : 입주자 주도형(만봉, 신광, 금안지구)

공공기관주도형(금천지구-한국농촌공사시행)

○ 사업규모 : 만봉(83,300㎡-49세대), 신광(20,130㎡-35세대)

금안(29,400㎡-33세대),금천(71,785㎡-76세대)

○ 사업개요 : 주택단지조성, 진입도로포장, 상ㆍ하수도설치

오ㆍ폐수처리시설 등

○ 사 업 비 : 7,500백만원(만봉 1,500, 신광 1,500, 금안 1,500, 금천 3,000)

○ 재    원 : 국비 80%, 시비 20%

○ 사업기간 : 2005. 1. ~ 2010. 12.

□ 사업의 필요성

○ 농촌지역에 쾌적하고 다양한 형태의 주거공간 조성으로 지역
활성화 도모

○ 도시민의 농촌 유입 촉진으로 농촌 인구 유지

□ 그 동안 추진상황

○ 만봉지구 : 기본계획 용역 착수 및 용도지역 도시계획 심의 요청

○ 신광지구 : 기본계획 및 마을정비구역 승인 완료

○ 금안, 금천지구 : 사업 대상지 확정 및 예산 내시

□ 향후 추진계획

(만봉지구)

○ 용도지역 도시계획 심의(전남도)           : 2008.  1월

○ 기본계획 및 마을정비구역수립 착수       : 2008.  2월

○ 기본계획 및 마을정비구역 지정 승인 신청 : 2008.  5월

○ 실시설계 완료 및 시행계획 승인 신청     : 2008.  8월

○ 기반시설 착수                           : 2008. 10월

(신광지구)

○ 실시설계 완료                  : 2008. 3월

○ 사업시행계획 승인 신청(전남도) : 2008. 4월

○ 기반시설 착수  및 완료         : 2008. 6 ~ 12월

(금안, 금천지구)

○ 금천지구 기본계획 수립 착수 및 완료 : 2008. 2 ~ 9월

○ 기본계획 및 마을정비구역 승인 신청  : 2008. 10월

○ 금천지구 실시설계 착수              : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 350백만원(국비 280, 시비 70)

○ 노안금안지구 : 150백만원

○ 금천지구     : 200백만원

『계속사업』

농촌마을종합개발 사업

○ 대    상 : 봉황 철야, 왕곡, 공산 삼한지권역(3개권역)

○ 확정연도 : 봉황철야(2005년), 왕곡, 공산삼한지권역(2007년)

○ 사업내용 : 봉황철야권역(마을하수도정비 등 17개 사업)

왕곡권역(복합문화센터 등 16개 사업)

공산삼한지권역(다야들경관조성 등 15개 사업)

○ 사 업 비 : 19,760백만원(철야6,660, 왕곡7,000, 공산삼한지6,100)

○ 사업기간 : 2007 .1. ~ 2012. 12.(5년차)

□ 사업의 필요성

○ 농촌다움의 유지,보존과 환경정비를 통한 쾌적한 농촌공간 조성

○ 농촌 다원적 기능을 확충하여 삶의 질 향상 및 균형 발전

□ 그 동안 추진상황

○ 봉황 철야권역    : 1단계 사업 마을하수도정비사업 착공

○ 왕곡, 삼한지권역 : 기본계획 수립 및 승인 요청(전라남도)

□ 향후 추진계획

(봉황 철야권역)

○ 1단계 2년차 사업 시행                       : 2008.  3월

○ 1단계 2년차 사업(간이상수도등 3개사업) 준공 : 2008. 12월

(왕곡, 삼한지권역)

○ 1단계 사업 실시설계 시행 : 2008.  3월

○ 1단계 사업 실시설계 완료 : 2008. 10월

○ 1단계 사업 시행인가 신청 : 2008. 11월

□ 소요 예산 : 2,400백만원(국비 1,920, 시비 480)

『계속사업』

소재지권 도로정비 사업

○ 대상지역 : 금천면, 영강동

○ 사 업 량

- 금천면 : L=0.5㎞, B=15.0m(국도1호선~금천면사무소)

- 영강동 : L=0.5㎞, B=12.0~15.0m(영강삼거리~영산교)

○ 총사업비 : 3,600백만원(금천면 2,100, 영강동 1,500)

○ 사업내용 : 보도, 자전거도로, 가로등, 가로수, 하수관확충

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2009. 6.

□ 사업의 필요성

○ 무질서한 소재지권 주요도로를 중점 정비하여 도로기능 확보

○ 소재지 상권을 중심으로 주차장 등 기반시설 확충

□ 그 동안 추진상황

○ 실시설계용역 발주(금천면, 영강동) : 2007. 11월

○ 현지조사 측량 및 지장물 조사      : 2007. 12월

○ 주민설명회 개최(영강동, 2회)      : 2008.  1월

□ 향후 추진계획

○ 주민설명회 개최(금천면)               : 2008. 2월

○ 실시설계 완료 및 설계자문위원회 개최  : 2008. 3월

○ 토지 및 지장물 보상 협의              : 2008. 4월

○ 공사 발주(하수관거정비사업 병행 추진) : 2008. 8월

○ 공사 완료                             : 2009. 6월

□ 소요 예산 : 1,270백만원(시비)

2008 주요 추진사업 조서

(건설과)

구분	사 업 명	사업기간	사업량	2008년 사업비(백만원)				비고 (관련부서)
				계	국비	도비	시비
계				17,037	5,526	960	10,551
일반시책	주민숙원사업 추진	연중	59개소	3,155		875	2,280	환경토목 담당
〃	오지개발사업 추진	연중	도로확포장 등 4개소	1,114	780	34	300	농업기반 담당
〃	농촌 정주기반 확충 사업	연중	마을내 도로포장 등 6개소	2,661	1,863		798	〃
〃	기계화경작로 확포장 사업	연중	경지정리농로포장 L = 15㎞	854	683	51	120	〃
〃	도로정비 및 유지 관리	연중	도로 재포장 및 차선도색 10개소	872			872	도로관리 담당
〃	가로등정비 및 유지 관리	연중	고장 가로등 개보수 등	382			382	〃
신규 시책	사설안내표지판 통합지주대 설치	연중	1개소	20			20	건설행정 담당
계속 사업	군도 확포장 사업	연중	2개노선 5.1㎞	1,671			1,671	환경토목 담당
〃	농어촌도로 확포장 공사	연중	7개노선 9.9㎞	2,288			2,288	〃
〃	전원마을 조성 사업	2005 ~ 2010	4개 지구	350	280		70	농업기반 담당
〃	농촌마을종합개발 사업	2007 ~ 2012	3개 권역	2,400	1,920		480	〃
〃	소재지권 도로정비 사업	2007 ~ 2009	2개소 1㎞	1,270			1,270	환경토목 담당