도 시 과

	2008 주요 업무 계획(도시과)
□ 2008년 추진목표 -------------------------------			294
□ 신규시책
○ 구도심권 활성화방안 심포지움 추진 --------------			295
○ 나주 지방산업단지 공업용수 공급시설 공사 -------			296
○ 개발제한구역 주민 지원 사업 --------------------			297
○ 도시계획 도로 개설공사 -------------------------			298
□ 계속사업
○ 구도심 공동화에 따른 활성화 계획 수립 ----------			299
○ 송월지구 도시개발 및 국도13호선 확․포장공사 ----			300
○ 종합스포츠타운 건립사업 ------------------------			301
○ 국민체육센터 및 웨이트트레이닝 건립사업 --------			303
○ 국민임대 산업단지 조성공사 ---------------------			304
○ 나주지방산업단지 폐수종말처리장 설치공사 -------			305
○ 도시기본계획 및 관리계획 수립 ------------------			306
○ 남평 소도읍 육성사업 ---------------------------			307
○ 국립 영산강 고고학 박물관 시설결정 -------------			308
○ 개발제한구역 해제관련 학술용역 -----------------			309
○ 남산로 연결도로 개설공사 -----------------------			310
○ 영산교~이창택지간 연결도로공사 -----------------			311
○ 자전거 테마파크 조성공사 -----------------------			312
○ 인간중심의 지역만들기 사업 ---------------------			313
○ Ⅱ단계 도시주거환경개선 사업 -------------------			314
○ 도시계획 도로 개설공사 -------------------------			315
□ 2008 주요 추진 사업 조서 --------------------			316

	2008년 추진목표
혁신도시와 구도심을 연계한 인프라를 구축하여 새로운 성장 동력과 지역균형 발전 도모 도시개발계획 및 개발사업 추진 관리로 시민의 삶의질 향상

	추 진 전 략
도시기반시설 확충 ⇒ 지역균형발전 도모 도시공간 체계정비 ⇒ 도시여건 변화에 적극 대처

	주 요 시 책
혁신도시 건설로 구도심 공동화에 따른 활성화 계획 및 심포지움 추진 종합스포츠타운 건립사업 나주지방산업단지 폐수종말처리장 설치공사 도시기본계획 및 관리계획 수립 자전거 테마파크 조성공사 남산로 연결도로 개설공사 도시계획 도로개설공사 남평 소도읍 육성 및 Ⅱ단계 주거환경 개선 사업

『신규시책』

구도심권 활성화방안 심포지움 추진

○ 위    치 : 나주시 지역 개발권역 일원

○ 사 업 량 : 고대역사문화와 첨단산업 공조 외 5개 개발방안

- 구도심권 활성화방안 심포지움(안) 1식

○ 용 역 비 : 30백만원(시비)

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2008. 6.

□ 사업의 필요성

○ 빛가람 도시 및 미래산업단지 조성 등 첨단 산업과 구도심권의
고대문화 공존방안 마련

○ 구도심권의 고대문화 잠재력 가치회복 및 지속가능한 발전 전략수립

□ 추진 계획

○ 잠재력 도출 및 개발전략(안) 작성 : 2008. 2 ~ 3월

○ 관련계획협의 및 심포지움(안)작성 : 2008. 4월

○ 심포지엄 개최                    : 2008. 5월

※ 국내 전문교수, 구도심권 관련계획 책임연구원 공동개최

□ 소요 예산 : 30백만원(시비)

『신규시책』

나주지방산업단지 공업용수 공급시설공사

○ 위    치 : 다시면 ~ 운곡동(주암댐 광역상수도 관로연결)

○ 사업규모 : 송수관(D=500m/m) 매설 L= 8.0㎞

배수지(5,000㎥/일) 1개소 설치

○ 사 업비  : 4,000백만원(국비)

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 2009. 12.

□ 사업의 필요성

○ 원활한 공업용수 공급으로 물이용 안정성 및 경제성 확보

○ 저렴하고 질 좋은 공업용수 공급으로 적극적인 기업유치

□ 추진 계획

○ 기본 및 실시설계 용역 발주           : 2008.  2월

○ 기본설계 용역 완료                   : 2008.  6월

○ 사전환경성 검토 및 도시계획시설 결정 ; 2008.  8월

○ 실시설계 용역 완료                   : 2008.  9월

○ 공업용수 공급시설공사 발주           : 2008. 10월

○ 공업용수 공급시설공사 완료           : 2009. 12월

□ 소요 예산 : 1,800백만원(국비)

『신규시책』

개발제한구역 주민 지원 사업

○ 근거법령 : 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제15조

○ 목    적 : 개발제한구역 주민의 생활편익과 복지증진 도모

○ 재원조달 : 개발제한구역훼손부담금

○ 재원기준 : 국비 70%, 지방비 30%

□ 사업의 필요성

○ 개발제한구역내 주민 복지증진 및 농업생산 활동 향상

○ 기계화 경작을 위한 도시기반시설 확충으로 주민편익제공

○ 자립형 소득증대 사업 및 공동이용 시설 우선 시행하고

사업비의 상․하한제 추진

□ 추진 계획

○ 2008년도 주민지원사업 대상지 확정 : 2008. 3월

○ 사업 추진                         : 2008. 5 ~ 12월

□ 소요 예산 : 1,178백만원(국비 1,130, 시비 48)

○ 개발제한구역 도시기반시설 정비

○ 개발제한구역 주민지원사업 민간자본보조

『신규시책』

도시계획 도로 개설공사

○ 공 사 명 : 토계동 도시계획도로개설공사 외 3개소

○ 위    치 : 나주시 송월․대호․이창․금천 오강리 지내

- 토계동 도시계획도로 : L=0.35km, B=8.0/1,705백만원

- 현대(아)~성북주공(아)간 : L=0.06km, B=8.0m/302백만원

- 영산포 국민은행~구터미널 : L=0.48km, B=10.0m/1,500백만원

- 전남과학고 진입로 L=0.75km, B=8.0m/2,000백만원

○ 사 업 비 : 5,507만원(확보액 2,822, 미확보액  2,685)

○ 사업기간 : 2008. 2. ~ 2010. 12.

□ 사업의 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형발전은 물론 주민편익 제공

○ 주민참여예산 편성건의 및 역점시책으로 추진하고 있는

깨끗한 도시 만들기의 가로환경 정비

○ 시민 삶의 질 향상에 적합한 도시개발사업 추진

□ 향후 추진계획

○ 도시계획도로개설공사(4개소)실시설계용역 : 2008. 2 ~ 5월

○ 도시계획도로 개설공사 감정평가 및 토지보상협의 : 2008. 2 ~ 8월

○ 보상 완료지구 착공 : 2008. 9월

□ 소요 예산 : 2,822백만원(시비)

○ 도시계획도로 개설사업 실시설계비, 보상비 등

『계속사업』

구도심 공동화에 따른 활성화 계획 수립

○ 위    치 : 나주도시계획(나주․영산포)지역 구도심 일원

○ 사 업 량 : 면적 68,000㎡

- 정비 기본계획 및 토지이용에 관한 계획 1식

○ 용 역 비 : 200백만원(도비 100, 시비 100)

○ 사업기간 : 2006. 1. ~ 2008. 12.

□ 사업의 필요성

○ 빛가람 도시 개발사업, 미래 산업 단지 조성 등 신도시의
건설로 구도심의 활성화 방안 마련

○ 구도심의 활성화를 위한 개발전략 수립 및 지속 가능한
도시개발사업 장기방안 마련

○ 구도심이 갖고 있는 잠재력 가치회복의 대안 수립

○ 구도심 공동화에 따른 활성화 방안의 심포지움 개최로 개발 방향 마련

□ 추진 계획

○ 빛가람 도시 건설로 구도심공동화에 따른 활성화 방안의
심포지움 개최 결과 반영

○ 정비계획(안) 완료 : 2008. 12월

『계속사업』

송월지구도시개발 및 국도13호선확․포장공사

○ 위    치 : 나주시 송월동 일원(나주역사 전면부)

○ 사업규모 : 택지개발(환지방식) 297,600㎡

도로 확․포장 L=1.06km, B=35m

○ 사 업 비 : 41,182백만원(택지개발 29,182, 도로확․포장 12,000)

○ 사업기간 : 2006. 1.~ 2008. 12.

○ 종합진도 : 33%

□ 사업의 필요성

○ 구도심 활성화를 위한 경제․업무중심지 조성 및 역세권 개발

○ 도시의 건전한 발전 및 공공복리 증진을 위한 기반시설 확충

□ 그 동안 추진상황

○ 실시계획 인가(전라남도) 및 공사착공         : 2006.  1월

○ 문화재 시굴조사 완료 및 발굴조사 착수       : 2007. 12월

○ 국도13호선 확ㆍ포장 완료 및 부대시설 설치중 : 2008.  1월

□ 향후 추진계획

○ 문화재 발굴조사 완료            : 2008.  6월

○ 공사시행 승인(문화재청) 및 착공 : 2008.  7월

○ 송월지구 도시개발사업 완료      : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 23,082백만원(시공사부담금)

○ 택지조성공사에 따른 시설비, 감리비, 부대비, 예비비

『계속사업(공약사항)』

종합스포츠타운 건립사업

○ 위   치 : 나주시 송월동 1078-2번지 일원(신역사 후면부)

○ 규   모 : 부지조성 179,425㎡

○ 사업기간 : 2007. 8. ~ 2009. 12.

《공설운동장》

- 사업개요 : 주경기장 43,713㎡(수용인원 10,000명), 건축면적

3,739㎡(연면적6,712㎡), 육상트랙 400m 8레인

- 사 업 비 : 36,480백만원

- 성과지표 : 실시설계완료 및 부지조성

《인라인․롤러스케이트구장》

- 사업개요 : 필드규격 200m트랙 폭 6.3m, 3,000관중석

- 사 업 비 : 11,130백만원

- 성과지표 : 인라인롤러구장 사업완료 및 경기 개최

《생활체육공원조성》

- 사업개요 : 농구장외 5종경기장 설치

- 사 업 비 : 2,000백만원

- 성과지표 : 부지조성

□ 사업의 필요성

○ 제89회 전국체전 인라인ㆍ롤러스케이트 개최지역으로 지역 균형
발전 및 시민의 복지향상에 기여

○ 통합 시 및 혁신도시 유치 지역임에도 타시․군에 비하여
문화 체육시설 등이 절대 부족

□ 그 동안 추진상황

○ 도시 기본계획수립 변경 확정                 : 2006. 11월

○ 문화재지표조사 완료                        : 2007.  3월

○ 전남도 건설기술심의 및 도시계획 시설결정(변경) : 2007. 7월

○ 인라인롤러스케이트장 건설공사 착수         : 2007.  8월

□ 향후 추진계획

○ 인라인롤러장 1차분(토목) 완료 및 2차분(건축) 사업 착수 : 2008. 2월

○ 공설운동장 사업 착수                : 2008.  6월

○ 인라인롤러구장 공인승인 후 사업완료 : 2008.  8월

○ 전국체전 인라인롤러경기 개최        : 2008. 10월

○ 공설운동장 완공                     : 2009. 12월

□ 소요 예산 : 8,084백만원(국비 1,185, 도비 237, 시비 6,662)

○ 인라인롤러스케이트구장 건설공사 사업비

○ 종합스포츠 타운 부지 토지보상비

『계속사업(공약사항)』

국민체육센타 및 웨이트트레이닝 건립 사업

○ 위    치 : 나주시 송월동 1078-2번지 일원(신역사 후면부)

○ 규    모 : 연면적 13,000㎥(지하1층, 지상4층)

○ 사업기간 : 2008. 6. ~ 2009. 12.

《국민체육센타》

- 사업개요 : 수영장(L=25m, 6레인), 체련단련 및 측정실 1식

- 사 업 비 : 6,000백만원

《웨이트트레이닝장》

- 사업개요 : 다목적체육관(관람석 2,000석), 선수합숙소 50실

(2인 1실), 웨이트트레이닝장 1식

- 사 업 비 : 9,500백만원

□ 사업의 필요성

○ 지역단위 기본 체육시설 확보로 체육진흥과 지역 균형발전 도모

○ 자전거 테마파크와 스포츠타운이 연계한 생활체육시설 건립으로 시민건강증진 도모

□ 그 동안 추진상황

○ 지방재정 투융자사업 심사 완료             : 2006.  5월

○ 건립위치 변경 승인 신청(국민체육진흥공단) : 2007. 11월

□ 향후 추진계획

○ 실시설계 및 사업발주     : 2008.  3 ~ 6월

○ 국민체육센터 완공        : 2008. 12월

○ 웨이트트레이닝센터 완공  : 2009. 12월

□ 소요 예산 : 500백만원(시비)

『계속사업(공약사항)』

국민임대산업단지 조성공사

○ 위    치 : 나주시 동수동, 운곡동 일원

○ 사업규모 : 단지조성 297,521㎡

○ 사 업 비 : 31,332백만원

(국비 9,520, 지방비 10,871, 융자금 7,808, 임대보증금 3,133)

○ 사업기간 : 2005. 1. ~ 2008. 12.

○ 종합진도 : 46%

□ 사업의 필요성

○ 광주 ~ 나주 ~ 목포로 이어지는 산업벨트 구축

○ 부족한 산업용지 수요 충족 및 지역경제 활성화

□ 그 동안 추진상황

○ 단지 조성공사 착공                             : 2005. 1월

○ 단지조성(43,300㎡ 완료) 및 기반시설공사 추진중 : 2008. 1월

□ 향후 추진계획

○ 배수암거 등 구조물공사 완료 : 2008.  6월

○ 단지조성공사 완료           : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 716백만원(시비)

○ 단지조성공사에 따른 시설비 및 감리비

『계속사업』

나주지방산업단지 폐수종말처리장 설치공사

○ 위    치 : 나주시 동수동,운곡동 일원(국민임대산단 내)

○ 사업규모 : 처리용량 2,400㎥/일(1단계 1,200㎥/일)

부지면적 9,400㎡

○ 사 업 비 : 14,055백만원(1단계 8,172)

○ 사업기간 : 2007. 1.~ 2011. 12.(1단계 2007.~ 2009.)

□ 사업의 필요성

○ 나주지방산업단지 내에서 발생되는 공장폐수의 적정처리

○ 쾌적한 생활환경과 자연환경 보전을 통한 삶의 질 제고

□ 그 동안 추진상황

○ 폐수종말처리장 기본계획 승인(환경부) : 2006. 3월

○ 실시설계 용역 착수                   : 2007. 7월

□ 향후 추진계획

○ 1단계 공사 추진  :2008. 4월 ~ 2009. 12월

○ 2단계 공사 추진 : 2010. 3월 ~ 2011. 12월

□ 소요 예산 : 4,660백만원(국비)

○ 처리장 설치공사에 따른 시설비, 감리비, 부대비

『계속사업』

도시기본계획 및 관리계획 수립

○ 위    치 : 나주시 행정구역 전역(1읍, 12면, 6동)

○ 면    적 : 603.87㎢

○ 용역범위 : 도시기본계획, 도시관리계획, 지형도면고시

○ 목표연도 : 2020년      ○ 계획인구 : 150,000인

○ 용 역 비 : 2,640백만원

(기본계획 669, 관리계획 721, 지형도면 1,250)

○ 용역기간 : 2003. 9. 16. ~ 2009. 12. 30.

□ 사업의 필요성

○ 2003. 1. 1.이후 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행으로 관리지역

(준농림지역+준도시지역)을 세분화(계획관리, 생산관리, 보존관리)

○ 도시기본계획구역이 행정구역 전체 면적으로 확대됨에 따라

도시관리계획 정비 의무사항

□ 추진 계획

○ 도시관리계획(안) 입안공고                   : 2008.  1월

○ 시 도시계획위원회 자문 및 전라남도 결정신청 : 2008.  3월

○ 전라남도 도시계획위원회 심의 및 결정고시    : 2008.  5월

○ 지형도면고시                                : 2009. 12월

※ 관리지역 세분화에 따른 토지이용규제로 입안 시기 조정

(건설교통부 1년간 유예 방안 마련중)

□ 소요 예산 :  - 백만원

○ 도시관리계획(용도지역 세분화, 시설변경 결정) 지형도면 고시

『계속사업』

남평 소도읍 육성 사업

○ 위    치 : 나주시 남평읍 소재지 일원

○ 사업내용 : 지석강친수공간조성 995,500㎡, 부도심육성 331,027㎡

시가지정비 2.0Km, 근린공원조성 142,590㎡

○ 사 업 비 : 23,600백만원(국비 10,000, 도비 1,050, 시비 12,550)

※ 예산확보 : 15,735백만원(2007까지 13,732, 2008년 2,003)

○ 사업기간 : 2004 ~ 2008(5년간)

□ 사업의 필요성

○ 농촌의 낙후지역의 개발을 선도하는 거점으로 육성하여 산업경쟁력을
갖춘 생산기지로 발전시키고

○ 수준 높은 문화와 서비스를 공급하는 기능을 갖춘 도시공간을
창출함과 동시에 지역주민의 소득증대와 생활복지 향상에 기여

□ 그 동안 추진상황

○ 남평 5일 시장 활성화 사업 준공            : 2007.  1월

○ 지석천 친수공간 조성 사업 1차분 준공      : 2007. 10월

○ 도시개발사업 구역지정 심의 결정(전라남도) : 2007. 12월

□ 향후 추진계획

○ 도시개발사업 지구단위계획 수립 및 실시설계 인가 : 2008. 4월

○ 지석천 친수공간 조성사업 2차분 준공       : 2008. 5월

○ 근린공원조성사업 실시계획 인가(전라남도)  : 2008. 6월

○ 부도심 확장지구 및 근린공원조성 사업 시행 : 2008. 7 ~ 8월

□ 소요 예산 : 2,003백만원(균특 1,000, 시비 1,003)

『계속사업』

국립 영산강 고고학 박물관 시설결정

○ 위    치 : 나주시 반남면 신촌리 일원

○ 사 업 량 : 면적 81,810㎡

○ 용 역 비 : 240백만원

○ 사업기간 : 2007. 10. ~ 2008. 9.

□ 사업의 필요성

○ 영산강 고고학 박물관건립으로 지역 이미지제고

○ 박물관 주변의 계획적인 도시개발로 합리적인 토지이용계획수립

□ 추진 계획

○ 기초조사, 토지적성평가, 환경, 교통, 재해성 검토 : 2008. 1월

○ 환경협의회구성 및 협의회 개최   : 2008. 2월

○ 주민공람공고 및 시의회 의견청취 : 2008. 3월

○ 나주시도시계획위원회 자문 및 결정신청(전라남도) : 2008. 5월

○ 지방도시계획위원회 심의 결정   : 2008. 7월

○ 실시계획인가 공람공고(20일간)  : 2008. 8월

○ 실시계획인가고시(건축착공)     : 2008. 9월

□ 소요 예산 : 240백만원(시비)

○ 기초조사, 토지적성평가 도시관리계획(안) 작성

○ 환경, 교통 재해성 검토서 작성

『계속사업』

개발제한구역 해제관련 학술용역

○ 위    치 : 나주시 개발제한구역(남편, 노안, 금천, 산포)

○ 사 업 량 : 면적 39.56㎢

○ 용 역 비 : 91백만원

○ 용역기간 : 2007. 12. ~ 2009. 7.

□ 사업의 필요성

○ 개발제한구역 해제가능 지역에 대한 타당성 사전 검토

○ 산업용지 수요충족 및 지역경제 활성화 대비

□ 추진 계획

○ 토지이용현황 및 환경상태 조사     : 2008.  5 ~  7월

○ 개발제한구역 중 해제가능지역 설정 : 2008. 11 ~ 12월

○ 법률검토, 도시관리계획수립 기준 및 절차선정 : 2009. 3월

○ 용역 완료                         : 2009. 7월

□ 소요 예산 : 50백만원(시비)

○ G.B해제 가능지역 타당성 검토 및 도시관리계획(안) 작성

『계속사업』

남산로 연결도로 개설공사

○ 공 사 명 : 남산로 연결도로 개설공사

○ 위    치 : 나주시 성북동(국도1호선~남외동 과선교)

○ 사 업 량 : L=1.2km, B= 16~25m

○ 사 업 비 : 20,000백만원(도로분 교부세)

- 예산확보액 : 14,283백만원(기확보액 12,283, 2008년 2,000)

- 미확보액   :  5,717백만원

○ 사업기간 : 2005. 1. ~ 2008. 12.

□ 그 동안 추진상황

○ 죽림교 재가설 및 국도 1호선~남고문 구간 아스콘 기층 포설

□ 향후 추진계획

○ 가로등 설치(국도1호선~삼성APT정문)       : 2008. 1월

○ 소나무(80주)식재, 자전거도로 및 인도설치 : 2008. 2월

○ 나주구역사~과선교구간 보상협의           : 2008. 2월

○ 삼성(아)~나주구역사 구간 임시개통        : 2008. 3월

※ 한전주 지중화 사업구간으로 다소 지연 될 수 있음

□ 소요 예산 : 2,000백만원(시비)

『계속사업』

영산대교~이창택지간 연결도로공사

○ 공 사 명 : 영산대교 ~ 이창택지간 연결도로공사

○ 위    치 : 나주시 영산․이창동 지내

○ 사 업 량 : L=1.56km, B=12~15m

○ 사 업 비 : 17,510백만원(도로분 교부세)

- 예산확보액 : 12,265백만원(기확보 11,265, 2008년 1,000)

- 미 확보액  :  5,245백만원

○ 사업기간 : 2004. 6. ~ 2008. 12.

□ 사업의 필요성

○ 시가지 주요간선도로 미개설로 교통체증 및 사고위험 상촌

○ 영산강 강변주변 상가 밀집지역으로 지역주민 생활불편 해소

□ 그 동안 추진상황

○ 영산대교 ~ 이창택지 우․오수관 및 옹벽 설치

□ 향후 추진계획

○ 보조기층 및 인도 설치            : 2008.  2월

○ 영산대교~홍어축제구간 아스콘포설 : 2008.  3월

○ 잔여 구간 구조물 및 토공         : 2008.  4 ~ 8월

○ 가로등 설치                      : 2008.  9월

○ 전구간 준공예정                  : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 1,000백만원(시비)

『계속사업(공약사항)』

자전거 테마파크 조성공사

○ 공 사 명 : 자전거 테마파크 조성공사

○ 위    치 : 나주시 송월․영강동 지내

○ 사 업 량 : L=3.606km(자전거․인라인도로․산책로․소공원 등)

○ 사 업 비 : 9,668백만원

- 예산확보액 : 8,277백만원(기확보 6,777, 2008년 1,500)

- 미 확보액  : 1,391백만원

○ 사업기간 : 2004. 9. ~ 2008. 12.

□ 사업의 필요성

○ 호남선 복선화로 발생된 구 나주역사와 폐선 부지를 활용
시민편익시설 및 공원 조성

○ 주변지역과 연계한 녹지 공간 조성 및 새로운 명소 마련

□ 그 동안 추진상황

○ 영강삼거리 분수대 설치 및 구국도 1호선 콘크리트 포장 완료

□ 향후 추진계획

○ 구) 국도확․포장구간 완료   : 2008. 2월

○ 택촌앞~구진포 터널구간 자전거도로 토공 및 배수로 설치 : 2008. 3월

○ 토지매입 및 안영교 재가설 : 2008. 3 ~ 5월

□ 소요 예산 : 1,500백만원(시비)

○ 안영교 재가설 및 자전거도로 확․포장, 공사비

『계속사업(공약사항)』

인간중심의 지역만들기 사업

○ 대 상 지 : 나주시 일원(도시계획구역내 도로시설)

- 성북동 보차도정비, 영산육교~풍물시장간 보차도정비

○ 연    장 : L=197.4km, B=2~4m

○ 사 업 비 : 93,700백만원

- 예산확보액 :  1,353백만원(기확보 990 , 2008년 363)

- 미 확보액  : 92,347백만원

○ 사업기간 : 2007. 7. ~ 2011. 12.

□ 사업의 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형발전은 물론 주민편익 제공

○ 자동차 전용도로에서 인간중심의 보행로 개설

□ 추진 계획

○ 성북동 보차도 정비 준공                  : 2008. 6월

○ 영산육교~풍물시장간 보차도 정비공사 준공 : 2008. 8월

□ 소요 예산 : 363백만원(시비)

○ 인간중심의 지역만들기 사업에 따른 실시설계비, 시설비, 부대비

『계속사업』

Ⅱ단계 도시주거환경개선사업

○ 위    치 : 도시계획구역 내 6개 지구

(남평교촌, 영산용산, 공산금곡, 다시월태, 금남삼도, 봉황죽석)

○ 사업내용 : 도로개설 6개지구 L=4.1km, 상․하수도 및 주차장

○ 사 업 비 : 12,630백만원(균특 6,315, 도비 631, 시비 5,684)

- 2008년 사업비 : 2,100백만원(균특 1,050, 도비 105)

※ 시비 미확보 : 945백만원

○ 사업기간 : 2005 ~ 2010(6년간)

□ 사업의 필요성

○ 도시저소득 주민의 복지증진 및 주거환경개선

○ 노후불량 주택이 밀집되고 공공시설정비가 불량하여 주거 환경이
열악한 집단주거지역을 집중 개발 육성

□ 그 동안 추진상황

○ 영산 용산지구(제1공구) 착공 : 2007. 10월

□ 향후 추진계획

○ 전라남도 도시계획자문위원회 지구지정승인신청   : 2008. 2월

○ 전라남도 도시계획위원회 지구지정승인 및 결정고시 : 2008. 3월

○ 편입토지 분할측량 및 지장물 감정평가           : 2008. 6월

○ 교촌지구 사업 착공 및 용산지구 사업 준공       : 2008. 8월

○ 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2008. 7 ~ 12월

※보상 완료지구부터 사업우선 시행

□ 소요 예산 : 1,155백만원(균특 1,050, 도비 105)

『계속사업』

도시계획 도로 개설 공사

○ 공사명 : 송월 6통 도시계획도로 개설공사 외 4개소

○ 위  치 : 나주시 송월, 남평, 공산 금곡지내

- 송월6통 도시계획도로 : L=0.475km, B=8.0/2,181백만원

- 송월주공(아)~송월부영(아)간 : L=0.28km, B=10.0m/1,570백만원

- LG앞~송월부영(아) : L=0.111km, B=10.0m/450백만원

- 남평오거리~남평초교간 : L=0.72km, B=25.0m/2,000백만원

- 공산금곡 도시계획도로 : L=0.129km, B=10.0m/450백만원

○ 사 업 비 : 6,651만원(확보액 3,375, 미확보액  3,276)

○ 사업기간 : 2008. 2. ~ 2010. 12.

□ 사업의 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형발전은 물론 주민편익 제공

○ 시민 삶의 질 향상에 적합한 도시개발사업 추진

□ 그 동안 추진상황

○  실시설계용역 완료        : 2006. 5 ~ 12월

- 송월주공(아)~송월부영간, 공산 금곡, 송월6통

○ 공산금곡도시계획도로 착공 : 2007. 11월

□ 향후 추진사항

○ 공산금곡 도시계획도로 무연분묘 이장 : 2008. 4월

○ 공산금곡 도시계획도로 추진          : 2008. 5 ~ 8월

○ 미보상 공사구간 보상협의            : 연중

□ 소요 예산 : 1,126백만원(시비)

2008 주요 추진사업 조서

(도시과)

구분	사 업 명	사업기간	사업량	2008년 사업비(백만원)				비고 (관련부서)
				계	국비	도비	시비
계				52,309	10,825	342	41,142
신규시책	구도심권 활성화 방안 심포지움 추진	2008	첨단산업 공조 외 5개	30			30	도시계획 담당
〃	나주지방산업단지 공업용수 건설	2008 ~ 2009	송수관 매설 배수지 설치	1,800	1,800			공영개발담당
〃	개발제한구역 주민 지원사업	2008	주민지원사업	1,178	1,130		48	도시계획 담당
〃	도시계획 도로 개설공사	2008 ~ 2010	4개 사업	2,822			2,822	도시개발 담당
계속 사업	송월지구 도시개발 및 국도13호선 확포장공사	2006 ~ 2008	L=1.06㎞ B=35m	23,082			23,082 (부담금)	공영개발 담당
〃	종합스포츠타운 건립 사업	2007 ~ 2009	공설운동장 외	8,084	1,185	237	6,662	종합스포츠 담당
〃	국민체육센터 및 웨이트 트레이닝 건립사업	2008 ~ 2009	국민체육센터 외	500			500	〃
〃	국민임대 산업단지 조성 공사	2005 ~ 2008	단지조성 297,521㎡	716			716	공영개발담당
〃	나주지방산업단지 폐수종말처리장 설치공사	2007 ~ 2011	2,400㎥/일	4,660	4,660			〃
〃	남평 소도읍 육성 사업	2004 ~ 2008	시가지정비 외 3개 사업	2,003	1,000 (균특)		1,003	도시계획 담당
〃	국립영산강 고고학 박물관 시설결정	2007 ~ 2008	면적 81,810㎡	240			240	〃
〃	개발제한구역 해제 관련 학술용역	2007 ~ 2009	면적 39.56㎢	50			50	〃
〃	남산로 연결도로 개설공사	2005 ~ 2008	L=1.2㎞ B=16~25m	2,000			2,000	도시개발담당
〃	영산교~이창택지간 연결도로공사	2004 ~ 2008	L=1.56㎞ B=12~15m	1,000			1,000	〃
〃	자전거 테마파크 조성공사	2004 ~ 2008	L=3.606㎞	1,500			1,500	〃
〃	인간중심의 지역 만들기 사업	2007 ~ 2011	L=194.4㎞ B=2~4m	363			363	〃
〃	∐단계 도시주거 환경개선 사업	2005 ~ 2010	도로개설 6개 지구	1,155	1,050 (균특)	105		〃
〃	도시계획 도로 개설공사	2008 ~ 2010	도로개설 5개 사업	1,126			1,126	〃