재난관리과

	2008 주요 업무 계획(재난관리과)
□ 2008년 추진목표 -------------------------------			368
□ 일반시책
○ 민방위 교육 훈련 및 비상대비 자원관리 ----------			369
○ 지방하천 하도준설사업 -------------------------			370
○ 소하천 정비사업 ------------------------------			371
○ 지방하천 배수문 전동화사업 ---------------------			372
○ 하천 재해사전예방사업 --------------------------			373
○ 안전문화운동 정착 생활화 -----------------------			374
□ 신규시책
○ 배수장 및 배수문 CCTV 시스템 구축 --------------			375
○ 남평취수장 모터펌프 원격제어 관리전환 ----------			376
□ 계속사업
○ 재해위험지구 정비사업 --------------------------			377
□ 2008 주요 사업 추진 조서 --------------------			378

	2008년 추진목표
재난사전대비 태세 확립으로 인명 및 재산피해 최소화 안보의식 함양과 재난발생의 신속한 동원태세 확립

	추 진 전 략
재해발생시 신속한 복구추진으로 2차 피해 발생 예방 비상대비 및 인력동원자원 관리 강화 특정관리대상시설 사전 점검으로 사고발생 사전예방

	주요 역점시책
민방위 교육훈련 및 비상대비 자원관리 지방하천 하도준설 및 소하천 정비사업 5개년 계획에 의한 지방하천 배수문 전동화사업 추진 안전문화운동 정착 생활화 배수장 및 배수문CCTV시스템 구축 남평취수장 모터펌프 원격제어 관리전환 재해위험지구 정비사업

『일반시책』

민방위 교육 훈련 및 비상대비 자원관리

○ 민방위대 신규 편성 및 교육 훈련의 내실화

○ 안보의식 함양과 재난발생의 신속한 동원태세 확립

□ 사업의 필요성

○ 전시, 국가 비상사태대비 완벽한 자원관리 및 상시 준비태세 확립

○ 각종 재난의 예방 및 대처요령 습득으로 안전의식 함양

□ 추진 계획

○ 민방위 대원 교육 : 연중(대원 2,119명)

- 민방위대 편입 1~4년차 대원 연간 4시간

○ 민방위 훈련 : 2008. 2 ~ 11월

- 민방공 대피훈련, 방재훈련, 생활민방위 시범훈련,

비상소집훈련, 테러종합 훈련 등

○ 2008년 을지연습 실시 : 2008. 8월(19개 기관단체 1,000여명)

○ 2008년 민방위대 창설 제33주년 기념행사 : 2008. 9월

○ 인력동원 자원관리 : 2008. 5, 10월(연 2회)

- 중점관리자원 확인의 날 행사 개최 : 업체, 군부대 등 변동자원 정리

□ 소요 예산 : 12백만원(시비)

『일반시책』

지방하천 하도준설사업

【현   황】

○ 지방2급하천 : 28개천, L= 172.95㎞(기본계획수립 27, 미수립 1)

○ 정비사업 중기계획 : 12개천, L= 78.72㎞(사업비 27,120백만원)

※ 2007년까지실적: 5개천(15개소), L= 10.6㎞(투자비 10,050백만원)

【 2008년 사업계획】

○ 사 업 량 : 3개소, L= 2.8㎞

- 영산천(봉황) L= 0.9㎞(833)  - 장성천(노안) L= 1.0㎞(667)

- 감정천(노안) L= 0.9㎞(333) → 2007년 공사발주 계속사업지구

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 12.

□ 사업의 필요성

○ 하상 퇴적토 준설 등 통수단면 확대로 농경지 침수 사전예방

○ 치수기능 강화 및 재해사전대비로 인명과 시민의 재산 보호

□ 추진 계획

○ 실시설계용역 완료(영산천, 장성천)  : 2008.  2월

○ 공사 발주의뢰(2건)                 : 2008.  3월

○ 공사 착공(2건)                     : 2008.  4월

○ 공사 준공(3건)                     : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 1,833백만원(국비 1,100, 지방비 733)

○ 영산천 외 2개지구 하도준설사업

『일반시책』

소하천 정비 사업

【현   황】

○ 소하천 : 153개천, L= 214.126㎞(정비종합계획수립 완료)

※ '07년까지 정비실적 : L= 82.71㎞(개수율 38.6%)

【 2008년 사업계획】

○ 사 업 량 : 3개소, L= 1.7㎞

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 12.

□ 사업의 필요성

○ 수해재발 방지 및 재난사전예방으로 인명 및 시민의 재산보호

○ 자연친화적인 친수공간 마련 제공으로 시민의 정서함양 도모

□ 추진 계획

○ 설계용역 완료 및 소하천정비시행계획 공고  : 2008.  1월

○ 소하천정비사업계획서 제출(나주시→전남도) : 2008.  2월

○ 공사 발주의뢰                             : 2008.  3월

○ 공사 착공                                 : 2008.  4월

○ 공사 준공                                 : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 1,431백만원(국비 462, 지방비 969)

○ 시비 의무부담액중 825,174천원 본예산 미확보

『일반시책』

지방하천 배수문 전동화 사업

【총  괄】

○ 사 업 량 : 26개소(전동화사업 5개년계획)

○ 사 업 비 : 4,280백만원(도비 3,424  시비 856)

○ 사업기간 : 2005. 3.  ~ 2009. 5.

○ 2007년까지 정비실적 : 10개소(투자비 1,880)

※ 관리대상 배수문 153개소(전동45, 자동 52, 수동 56)

【2008년 사업계획】

○ 사 업 량 : 8개소

○ 사업기간 : 2008. 1.  ~ 2008. 12.

□ 사업의 필요성

○ 전남도 배수문전동화사업 5개년계획에 의거 사업시행

○ 집중호우시 원활한 배수조절기능 강화로 재해피해 사전예방

□ 추진 계획

○ 실시설계(자체) 완료  : 2008.  2월

○ 공사 발주의뢰        : 2008.  3월

○ 공사 착공            : 2008.  4월

○ 공사 준공            : 2008. 12월

□ 소요 예산 : 1,180백만원(도비 944, 시비 236)

『일반시책』

하천재해 사전 예방 사업

【현   황】

○ 하천 연장 : 184개천, L= 465.576㎞

- 국가(3) 78.5, 지방2급(28) 172.95, 소하천(153) 214.126

○ 사업내용 : 퇴적토 준설 및 유수지장 수목, 잡목, 갈대 등 제거

※ 2007년 정비실적 : 16개소 14.8㎞(투자비 40백만원)

【2008년 사업계획】

○ 사 업 량 : 15개지구, L= 21.3㎞

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 5.

□ 사업의 필요성

○ 퇴적토 준설 및 유수소통 장애요인 제거로 홍수소통능력 증대

○ 하천범람 및 농경지 침수피해 등 재해요인 사전제거

□ 추진 계획

○ 대상지 조사 및 사업추진계획 수립       : 2007. 12월

○ 군부대 및 민간장비 지원의뢰            : 2008.  2월

○ 시설공사와 장비임대 사업병행 본격 착수 : 2008.  3월

○ 사업 완료                              : 2008.  5월

□ 소요 예산 : 115백만원(도비 20, 시비 95)

○ 공사비 100, 유류대지원 10, 장비임차료 5

『일반시책』

안전문화운동 정착 생활화

○ 재난사고가 상존하는 특정관리대상시설 및 재난위험시설물의 안전점검으로 재난사고 사전 예방

○ 안전문화운동 정착을 위한 홍보 강화로 시민 안전문화 의식 고취

□ 사업의 필요성

○ 각종 캠페인을 통한 안전문화운동 정착으로 재난사고 사전예방

○ 시설물의 상시 점검으로 긴급 상황발생시 대처능력 향상

□ 추진 계획

○ 안전점검의 날 운영                         : 12회(매월4일)

○ 특정관리대상시설물 안전점검 실시           : 2회(109개소)

○ 명절 연휴대비 다중이용시설 안전점검 실시   : 2회(27개소)

○ 해빙기 및 장마철 대비 및 시기별 안전점검 실시 : 4회(29개소)

○ 재난취약가구 전기 안전점검 및 노후시설교체 : 234세대

□ 소요 예산 : 14백만원(국비 7, 시비 7)

○ 재난취약가구 전기안전점검 및 노후시설교체

『신규시책』

배수장 및 배수문 CCTV시스템 구축

재난상황 발생시 재난상황실에서 배수장 및 배수문의 현장 상황을  신속히 파악하여 적은 인력으로 효율적인 대응체계를 구축함으로서 시민의 생명과 재산을 보호하기 위함.

□ 사업의 필요성

○ 배수펌프장의 부족한 인력으로 신속한 대처 능력 부족

○ 현장상황의 신속한 파악으로 효율적인 대응체계 구축

○ 야간시 현장상황 파악 곤란으로 대응 조치 미비

□ 추진 계획

○ 2008년 본예산 확정

○ 사업 규모

- CCTV 설치

․ 배수펌프장 : 15개소

․ 배  수  문 : 5개소(5련이상 시범)

․ 전등설치 : 40개소

- 컴퓨터 제어 : 1식

○ 기설치된 시 ․ 군 현지 견학

□ 소요 예산 : 250백만원(시비)

『신규시책』

남평취수장 모터펌프 원격제어 관리전환

【현   황】

○ 취 수 원 : 남평읍 동사리 지석천내(구.상수도취수장)

○ 시설규모 : 모터펌프(250HP× 250㎜) 2대, 수중펌프(250HP× 150㎜) 1대

○ 취 수 량 : 5,500톤/일

○ 가동시간 : 매일 05:00~18:00(근무인원 1인)

○ 용    도 : 나주천 건천화방지를 위한 하천 유지수 공급

【사업계획】

○ 사 업 량 : 원격제어시스템 구축 및 역지변 설치 1식

○ 사업기간 : 2008. 1. ~ 3.

□ 사업의 필요성

○ 근무자 1인으로 조기출근 펌프 수작동하여 일 8hr이상 근무

현실로 교대근무 불가하며 공휴일 근무로 근무여건 열악

○ 실시간 시설물 고장상황 발생시 신속한 대처능력체계 미흡

□ 추진 계획

○ 통신용 모뎀 원격제어시스템 구축 완료     : 2008. 1월

○ 송수관로 역류충격방지용 역지변 설치 완료 : 2008. 3월

□ 소요 예산 : 10백만원(시비)

『계속사업』

재해위험지구 정비 사업

○ 덕례지구 (덕례배수펌프장 설치)

- 위    치 : 나주시 산포면 덕례리

- 사 업 비 : 8,000백만원, 금년 : 1,000백만원

- 사업개요 : 배수펌프장 1식, 배수로 2.3km

- 공사기간 : 2005. 8. 8 ~ 2008. 12. 30

○ 장림지구(장성천제방숭상 및 하상정비공사)

- 위    치 : 나주시 노안면 금동리 ~ 학산리

- 사 업 비 : 7,300백만원, 금년 : 2,800백만원

- 사업개요 : 교량4개소, 하상정비 5km, 도로확포장 1.2km

- 공사기간 : 2005. 1. 6 ~ 2008. 12. 30

□ 사업의 필요성

○ 덕례지구는 2008년 사업비 10억추가 투자하여 완벽한 재해

예방사업 및 주민안전 고려

○ 장림지구는 하천제방보다 낮은 교량 1개소 및 제방정비를

추가하여 재해위험요인 완전 해소

□ 그 동안 추진상황

○ 년도별 투자계획

지구명	년도별 사업비(백만원)			비고
	계	기투자	2008년
계	15,300	11,500	3,800
덕 례	8,000	7,000	1,000
장 림	7,300	4,500	2,800

□ 향후 추진계획

○ 배수펌프장 설치후 저지대 농경지 상습침수 방지 및 정기적인        영농투자로 안정적 고소득 창출

○ 정비사업 추진으로 주민의 생명과 재산을 재해로부터 사전에         보호하는 예방위주의 방재행정 구현

□ 소요 예산 : 3,800백만원(국비 2,280, 시비 1,520)

2008 주요 추진사업 조서

(재난관리과)

구분	사 업 명	사업기간	사업량	2008년 사업비(백만원)				비고 (관련부서)
				계	국비	도비	시비
계				8,633	3,849	964	3,820
일반시책	지방하천 하도준설사업	2008	3개소,L=2.8km	1,833	1,100		733	하천관리담당
〃	소하천 정비사업	2008	8개소, L=1.7km	1,431	462		969	〃
〃	지방하천 배수문 전동화 사업	2008	8개소	1,180		944	236	〃
〃	하천재해 사전 예방 사업	2008	15개지구, L=21.3km	115		20	95	〃
〃	안전문화 운동 정착 생활화	2008	노후시설교체 234세대	14	7		7	안전관리담당
계속사업	재해 위험지구 정비 사업	2005 ~ 2008	배수펌프장 1식, 교량 4개소 하상정비 5km 도로확포장 1.2km	3,800	2,280		1,520	재해대책담당
신규 시책	배수장 및 배수문 CCTV 시스템 구축	2008	배수펌프장 15개소 배수문 5개소	250			250	〃
〃	남평취수장모터펌프 원격제어관리전환	2008	원격제어시스템 송수관로역류방지시설	10			10	하천관리담당