109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 나주시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
광주전남 공동혁신도시 복합혁신센터 건립	62,600	13,600	13	8,000	40,987	2023	2019	10
육상보조경기장 전천후 실내경기장 구축	2,653	44	1,063	1,546	-	2021	2020	98
에너지-ICT융복합 지식산업센터 건립사업	26,100	1,353	2,842	14,234	7,671	2022	2019	16
건설기계부품 재제조 산업 고도화를 위한 사업화 기반 조성	12,000	1,360	925	125	9,590	2023	2019	19
SOS랩 구축 및 SW서비스 개발 사업	9,329	-	1,475	1,956	5,898	2024	2020	25
전라도 천년정원 조성사업	12,400	-	34	666	11,734	2022	2021	5
산업용 드론 기업육성을 위한 기반구축 및 실증시범사업	12,700	975.5	524.5	500	500	2022	2019	60
지능형 저압직류(LVDC) 핵심기술 개발사업	35,700	2,427	9,822	12,480	10,971	2024	2019	45
EV/ESS 사용 후 배터리 리사이클링 산업화 추진	22,770	2,800	8,665	5,875	5,430	2024	2019	40
영산포역사 문화체험 전시관 조성사업	2,900	-	210	2,690	-	2021	2019	20
바람길숲 조성사업	20,000	432	568	19,000	-	2022	2019	30
군도16호선확포장공사	18,900	330	325	250	17,995	2024	2019	1
송현교 재가설공사	2,642	2,498	144	-	-	2020	2019	100
나주시 보건소 별동 증축	8,538	4,379	3,193	966	-	2021	2018	97

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

광주전남공동혁신도시

복합혁신센터 건립

담당자

체육진흥과 오시나

(☎339-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 빛가람 혁신도시의 이전기관 입주가 대부분 완료되고 입주민이 증가함에 따라       이들의 문화 향유 욕구를 충족시킬 수 있는 시설과 프로그램에 대한 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2023. 8.

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 199

○ 규 모 : 연면적 20,0000㎡(÷5%)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 62,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	62,600	13,600	13	8,000	40,987
국 비	19,000	-	13	8,000	10,987
시 도 비	10,000	-	-	-	10,000
시군구비	33,600	13,600	-	-	20,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 11. ~ 2019. 10.   : 타당성조사, 지방재정투자심사

○ 2021. 2. ~ 4.  : 건축 설계공모 당선작 선정

○ 2021. 5. ~ 6.  : 건설사업관리용역 PQ 제출공고 및 계약체결

□ 향후계획

○ 2021. 9.  : 기타공사분 발주

○ 2022. 1.  : 건축공사분 발주

○ 2023. 8.  : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

육상보조경기장 전천후 실내경기장 건립

담당자

체육진흥과 오시나

(☎339-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 적극적인 전지훈련 유치에도 불구 우천 시에도 이용가능한 전천후 시설       부재로 한계 노출

○ 육상보조경기장 전천후 실내경기장 건립을 통해 전국대회 유치 및 전지       훈련 유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2021. 8.

○ 위 치 : 나주시 영산강변로 99 나주종합스포츠파크 육상보조경기장

○ 규 모 : 육상보조경기장 2,332.13㎡(막구조)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,653백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,653	44	1,063	1,546	-
국 비	540	44	496	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,113	-	567	1,546	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 3.  : 실시설계 착수

○ 2020. 8.  : 전라남도 계약심사

○ 2020. 9.  : 계약체결 및 공사착공

○ 2020. 12. : 동절기 공사중지

□ 향후계획

○ 2021. 8.  : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

에너지-ICT 융복합

지식산업센터 건립

담당자

일자리경제과 손영호

(☎339-8301)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신산단에 공공부문 지식산업센터를 건립하여 강소벤처기업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2022

○ 위 치 : 나주시 왕곡면 덕산리 817-8. -9

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 14,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,100백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	26,100	1,353	2,842.2	14,234	7,670.8
국 비	16,000	1,000	401.8	9,000	5,598.2
시 도 비	4,000		1	2,400	1,599
시군구비	6,100	353	2,439.4	2,834	473.6
지 방 채
민간자본
특 교 세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16 %)

○ 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2020.  1. : 부지매입 완료

○ 2020. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2021.  8. : 공사 발주

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

건설기계부품 재제조 사업화 기반조성사업

담당자

일자리경제과 고강용

(☎339-8322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 신산업 육성을 위하여 지역 내 연구기반시설 구축 및 기술개발지원으로 새로운 지역 클러스터 구축(노후‧폐기 건설기계‧부품을 활용한 재제조로 자원 절약 및 신산업 육성)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

○ 위 치 : 남평읍 서산리 일원(남평농공단지 내)

○ 규 모 : 건설기계‧부품 재제조 센터 구축 등 A=2,045㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,000	1,360	925	125	9,590
국 비	5,800	660	500		4,640
시 도 비	2,900	330	250		2,320
시군구비	2,900	330	125	125	2,320
지 방 채
민간자본	400	40	50		310
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 부지확보 추진, 19%)

○ 재제조 건설기계‧부품 기술지원센터 및 인프라 구축 부지확보 추진

○ 재제조 부품 품질검사 및 성능 시험 장비 구축

□ 향후계획

○ 2021. 11. : 센터 부지 계약(남평농공단지 선분양)

○ 2022.  6. : 센터 건축공사 착공

○ 2023. 12. : 사업완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업

담당자

문화예술과김형선

(☎339-4633)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민체감형 지역문제 해결을 위한 SW서비스 개발 및 실증

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. 1. ~ 2024. 12. 31.(5년)

○ 사업내용 : 지역 문제 해결을 위한 특화 SOS랩 구축·운영 및 지역 수요                  맞춤형 SW서비스 R&D 추진, 통합플랫폼 구축

○ 시행부처/전담기관 : 과학기술정보통신부 / 정보통신산업진흥원

○ 주관/참여지자체 : 전라남도 / 나주시

○ 수행기관 : 전남정보문화산업진흥원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,329백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,329	-	1,475	1,956	5,898
국 비	5,529	-	875	1,156	3,498
시 도 비	1,520	-	240	320	960
시군구비	2,280	-	360	480	1,440
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 공모사업 선정 : 2020.4.2.

○ 제2차 전라남도 지방재정투자심사 : 2020.4.

○ SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업 지원 협약체결 : 2020.4.

○ 4대분야(지역사회문제 발굴, 지역혁신역량 강화, SOS랩 및 플랫폼 운영,       R&D 생태계 조성) 9개 세부사업 선정

□ 향후계획

○ 지역사회문제 조사, 역량 강화 마중물 프로젝트, SOS랩운영, 지역사회문제       해결 R&D 등 세부사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

(단위:백만원)

변경내용	국비		도비	시비	합계
	당초	변경			당초	변경
사업비	5,539	5,529	1,520	2,280	9,339	9,329

사업명

전라도 천년 역사문화정원 조성사업

담당자

문화예술과 김병부

(☎339-4603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라도 정도 천년을 기념하며 37개 시군의 과거와 미래, 그것을 잇는 현재를 나주읍성을 따라 역사문화공원 조성하고 역사문화 거점 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주 금성관 및 나주향교 일원

○ 규 모 : 전라도 천년한마당 조성 등 4가지 테마사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,400	-	34	666	11,700
국 비
시 도 비	6,400	-	34	666	5,700
시군구비	6,000	-	-	-	6,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 : 기본계획 수립중)

○ 기본계획 수립용역                          : 2020. 3. ~ 2021. 8.

○ 전남도 지방재정 투자심사                   : 2021. 2. 22.

○ 문화재청 협의                              : 2021. 5. 17.

□ 향후계획

○ 기본계획 수립 완료                         : 2021. 8.

○ 실시설계 용역 발주                         : 2021. 8.

○ 문화재 현상변경 등 행정절차 이행           : 실시설계 과업중

사업명

산업용 드론 기업 육성을 위한 기반구축 및 실증 시범 사업

담당자

에너지신산업과 이권익

(☎339-8362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 드론산업 선순환 구조 확립 및 강소기업 육성을 통한 “신개념 비즈

니스 창출 및 일장리 창출 선도”

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 전남실감미디어산업지원센터 내

○ 규 모 : 전남실감미디어산업지원센터 3,4층(전남드론산업지원센터 구축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,700	2,926	4,297,1	2,674	2,802.9
국 비	6,200	600	2,873,1	1,299	1,427.9
시 도 비	2,500	975,5	524,5	500	500
시군구비	2,500	975,5	524,5	500	500
지 방 채
민간자본	1,500	375	375	375	375
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 사업신청서 제출 및 수행기관 선정평가	: 2019. 4.~5.

○ 사업수행 기관별 협약체결	: 2019. 7.

○ 전남드론산업지원센터 구축 완료	: 2020. 5.

○ 1, 2차년도 기업지원 47건(현장실증 등) 수행	: 2020. 6.~12.

○ 1, 2차년도 장비 25종 구축	: 2020. 11.

□ 향후계획

○ 3차년도 기술사업화지원 사업 30건 진행	: 2021. 5.~12.

○ 3차년도 장비 8종 구축(이월장비3종 포함)	: 2021. 11.

사업명

지능형 LVDC(저압직류) 핵심기술 개발사업

담당자

에너지신산업과 이창원

(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재생에너지 3020정책으로 직류전원(태양광‧ESS‧EV) 증가와 디지털 DC부하 확산에

대응하여 에너지손실 저감을 위한 한전의 DC배전 상용화 준비에 따른

수용가용 LVDC 기술개발에 필요한 플랫폼(인프라) 지원을 통해 기업경쟁력

제고 및 관련 산업육성 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2024. 4.(5년)

○ 위 치 : 나주시 동수동 391-10번지(나주혁신산단 내)

○ 규 모 : 저압직류 핵심기술 실증인프라 구축, LVDC핵심기기 기술표준 개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	35,700	2,427	9,822	12,480	10,971
국 비	25,000	1,932	5,792	8,133	9,143
시 도 비	2,300		1,150	1,150
시군구비	2,300		1,150	1,150
지 방 채
민간자본	6,100	495	1,730	2,047	1,828
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  45%)

○ 부지매입(7,256.4㎡) 및 혁신산단 입주계약	: 2020.  4.

○ LVDC실증센터 건축설계 완료	: 2020.  9.

○ 건축허가 및 LVDC실증센터 착공	: 2021.  3.

·(건축규모) 건축면적 649.74㎡ / 연면적 1,037.9㎡ / 지상2층, 철근콘크리트구조

·(신재생에너지) 센터 내 LVDC 실증용 전원 설치 (태양광 250㎾ / ESS 1㎿h)

□ 향후계획

○ LVDC실증센터 준공	: 2021.  9.

○ 기기시험절차서, 750dc 전원공급용 컨버터 등 기술개발  : 2021. 12.

○ 수용가용 핵심직류기기 기술개발 및 실증 추진	: 2022.  1. ~

사업명

EV‧ESS 사용후 배터리 리사이클링

산업화 추진

담당자

에너지신산업과 이창원

(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지전환(고효율‧저소비‧친환경) 정책에 따라 증가하는 EV‧ESS로부터

배출되는 사용후 배터리의 잔존가치 활용방안 마련하여 자원의 효율적 사용과

선순환을 통한 에너지신산업화 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 11.(5년)

○ 위 치 : 나주시 동수동 391-1번지(나주혁신산단 내)

○ 규 모 : 연간 EV 1,000대, ESS 1MWh급 재사용 배터리 성능평가 및 안전시험

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	22,770	2,800	8,665	5,875	5,430
국 비	9,100	2,000	1,900	1,900	3,300
시 도 비	4,320	800	1,908	1,292	320
시군구비	6,480		4,062	1,938	480
지 방 채
민간자본	2,870		795	745	1,330
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 센터 건립공사 발주 및 적격심사	: 2021.  4.

○ EV 성능‧신뢰성 시험장비(16종 18대) 도입완료	: 2021. 6.

○ 산업단지 입주계약, 건축 인허가, 지적측량 완료	: 2021.  7.

○ 센터 착공, 전담기관 연차평가 결과 계속 추진	: 2021.  7.

□ 향후계획

○ 3차년도 업무협약 체결	: 2021.  7.

○ ESS 성능‧신뢰성 시험장비(6종) 도입심의 및 구입	: 2021. 11.

○ 센터 준공, 재사용 판단‧안전성 평가방법, 운송표준 개발 등 : 2022.  6.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 참여기관 수 : 14개사 → 18개사(민간기업 4개사 컨소시엄 추가 참여)

○ 사업비 : 당초 231억 → 변경 227.7억

- 변경내역 : 국비)98억 → 91억(△감 7억) / 민자)25억 → 28.7억(증 3.7억)

사업명

영산포역사 문화체험 전시관 조성사업

담당자

산림공원과 정명근

(☎339-7212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남 서남부권 물류 중심지였던 영산포를 테마로 하여 영산포역사 문화

체험전시관을 조성하여 지역의 역사성 제고 및 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2021년

○ 위 치 : 영산포 철도공원(삼영동 174-1 일원)

○ 규 모 : 영산포역사 문화체험전시관 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,900		210	2,690
국 비
시 도 비	1,450		105	1,345
시군구비	1,450		105	1,345
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 건축설계 및 전시물 제작용역 추진 : 2020. 9. ~ 2021. 12.

○ 건축인허가 및 전라남도 계약심사  : 2021. 7.

□ 향후계획

○ 영산포역사 문화체험전시관 조성   : 2021. 8. ~ 12.

사업명

바람길숲 조성사업

담당자

산림공원과 조정현

(☎339-7233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지, 악취 등의 대기오염을 개선하여 생활권 주변의 숲으로서의

생태적 기능을 회복하여 녹색도시 건설

○ 전국 10개 혁신도시 중 정주여건 최하위권으로 바람길숲 조성을 통해

산책·휴양을 할 수 있는 녹색도시에 걸맞은 환경개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위    치 : 나주시 빛가람동 일원

○ 규    모 : 60ha

○ 사업내용 : 바람연결숲, 공해차단숲, 순환가로연결숲 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	20,000	432	568	19,000	0
국 비	10,000	216	284	9,500
시 도 비
시군구비	6,000	216	284	5,500
지 방 채	4,000			4,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 12. ~ 2020. 11.

○ 공사 계약 및 착공          : 2021. 4. 20.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2021. 4. ~ 2022. 4.

사업명

군도16호선 확포장공사

담당자

건설과 박성용

(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겨울철 도로 결빙과 선형불가 지역의 위험도로를 개선하여 안전사고 예방과 통행 불편을 해소하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 봉황면 송현리 ~ 다도면 궁원리

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.75km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,900	330	325	250	17,995
국 비
시 도 비
시군구비	18,900	330	325	250	17,995
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 11. : 타당성 조사 및 노선계획 검토 용역 착수

○ 2019. 10. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022.  1. : 보상협의 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

송현교 재가설공사

담당자

안전재난과 윤동현

(☎339-7862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우로 송현교 교각침하 및 긴급 통행금지 실시(2017.06.)

○ 정밀안전진단용역 시행 결과 E등급으로 교량 재가설 진단(2017.08.)

□ 사업개요

○ 위    치 : 나주시 석현동 372-7번지(장성천 일원)

○ 사 업 량 : 교량 재가설 L= 99m, B= 7.0m(난간포함)

○ 사 업 비 : 27억원(특교15, 시비12) / 2019년도 25억원, 2020년도 2억원

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,642백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,642	2,498	144
국 비
시 도 비
시군구비	1,142	998	144
지 방 채
민간자본
기타(특교세)	1,500	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018.  3. : 실시설계용역 착수

○ 2019.  6. : 공사 착공

○ 2020. 11. : 공사 준공

□ 향후계획 : 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 사업비 당초 : 2,900백만원(특별교부세 1,500, 시비 1,400백만원)

변경 : 2,642백만원(특별교부세 1,500, 시비 1,142백만원)

사업명

나주시보건소 별동증축

담당자

보건위생과 강원준

(☎061-339-2112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 질병치료 위주의 보건사업에서 벗어나 보건의료 환경변화에 능동적으로

대응할 수 있는 시설을 갖춰 시민들에 생애주기별 맞춤형 건강관리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 전라남도 나주시 이창동 738 일원

○ 규 모 : 연면적 2,962㎡ (지하1층~지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,538백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,538	4,378	3,193	966	-
국 비	2,787	1,766	756	265	-
시 도 비	796	441	289	66	-
시군구비	4,253	2,171	1,448	634	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
특 교 세	700	-	700	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 농어촌의료서비스 개선사업 공모선정	: 2018. 12.

○ 별동증축 기본설계 착수	: 2018. 12.

○ 한국건강증진개발원 기본설계 심의 완료	: 2019. 6.

○ 전라남도 경관 및 공공디자인 심의 완료	: 2019. 8.

○ 공사 계약예비심사 및 본 심사 완료	: 2019. 11.

○ 공종별 입찰 및 계약	: 2019. 11.

○ 나주시보건소 별동증축 공사 준공검사 완료	: 2021. 4.

□ 향후계획

○ 보건의료장비, 의자 등 비품 및 인테리어 시공

○ 보건소 조경공사 입찰 및 착공

10-2. 지방채 발행사업

우리 나주시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
일자리종합 지원센터건립	7,108	2,100	700	200	4,108		2,100	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

나주시 일자리종합지원센터 건립

담당자

일자리경제과 조성민

(☎339-8313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 일자리 지원기관을 집적화하여 연령별, 성별, 분야별 일자리 및 직업훈련 정보를 한곳에서 확인 및 참여할 수 있도록 원스톱 일자리지원 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3. ~ 2021. 6.

○ 위 치 : 나주시 이창동 506-10 외 3필지(부지 2,909㎡)

○ 규 모 : 지상5층(건축면적 473.15㎡, 연면적 2,211.12㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,108백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,108	1,959	2,096	3,053	-
지 방 채	2,100	-	1,749	351	-
국 비	700	700	-	-	-
시 도 비	200	200	-	-	-
시군구비	4,108	1,059	347	2,702	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 나주시 일자리종합지원센터 준공 : 2021. 6. 30.

□ 향후계획

○ 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 심사	: 2021. 9.

○ 일자리종합지원센터 운영을 위한 비품 구입	: 2021. 8. ~ 9.

○ 유관기관 입주 및 준공식 개최	: 2021. 9.(예정)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 6,781백만원 변경 7,108백만원

- 공간변경에 따른 공사비 및 관급자재 증가

10-3. 민간투자사업

우리 나주시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL	해 당 없 음
BTO