109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 나주시에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
나주시 가족센터 및 주거지주차장 건립	10,226	229	3,208	6,789	-	2022년	2019년	70
광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립	62,600	13	8,854	7	53,726	2024	1단계 2019 2단계 2021	20
스쿼시 전용경기장 건립	3,100	-	89	1,504	1,507	2023	2020	-
마이크로바이옴 기반 스마트 웰에이징 기술개발	11,570	-	1,790	2,330	7,450	2024	2021	40
에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립	26,600	3,729	1,663	17,428	3,780	2023	2019	25
건설기계부품 재제조산업 고도화를 위한 사업화기반조성	12,000	2,235	175	2,170	7,420	2023	2019	27
SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업	9,207	1,956	1,798	1,844	3,932	2024	2020	50
2021년 제11회 의병의날 기념행사	250	-	249	-	-	-	2020	100
마한 천문대 조성사업	7,200	30	185	745	6,240	2024	2020	20
동강느러지 관광활성화사업	3,000	-	200	1,583	1,217	2024	2021	20
빛가람혁신도시 생활SOC 복합 센터 건립	17,886	2,086	480	12,190	3,130	2023	2020	20
한전공대 대학 부지 도시기반시설 설치	5,287	286	5,001	-	-	2021	2019	100
고효율 전력설비 연구기반 구축사업	20,360	18,143	1,956	261		2022	2018	95
산업용 드론 기업육성을 위한 기반구축 및 실증시범사업	12,644	7,223	2,674	2,747		2022	2019	80
지능형 저압직류(LVDC)핵심기술 개발사업	35,700	12,249	12,482	5,684	5,285	2024	2019	70
EV/ESS 사용 후 배터리 리사이클링 산업화 추진	23,470	10,471	5,869	4,000	3,130	2024	2019	75
나주시 가공배전선로 지중화 사업	10,522	7,548	2,865	109	-	2023	2019 2020	55
저압직류 핵심기기 인증 지원센터 기반구축	16,489	-	2,509	4,690	9,290	2025	2021	20
전남 나주 강소연구개발특구 운영	21,600		7,200	5,700	8,700	2025	2021	40
도시가스 공급지원 사업	22,437	1,012	1,012	2,300	19,125	2025	2021	14
구)나주정미소 문화재생사업	4,000	-	1,282	2,718	-	2022	2021	32
바람길숲 조성사업	20,000	1,000	6,937	12,063	-	2022	2019	80
군도16호선 확포장공사	20,000	610	416	-	18,974	2025	2019	5
반남 농어촌도로 201호선 확포장공사	4,000	-	1,110	1,500	1,390	2023	2020.	55
빛가람에너지 클러스터 투자선도지구	15,000	644	1,043	350	12,963	2025	2019	30
나주 공공하수 처리시설 악취방지시설 설치사업	1,692	100	-	1,592		2023.3.	2020	85%
나주배 박물관 리모델링	250	250	243	-	-	2022		100%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주시 가족센터 및 주거지주차장 건립

담당자

사회복지과 윤은화(☎8487)

회  계  과 김을희(☎8692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 가족서비스의 수요와 시 청사 주변의 부족한 주차 공간 문제 해결을       위해 가족센터 및 주거지주차장 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. (3년)

○ 위 치 : 나주시 송월동 1099-2, 1099-3

○ 규 모 : 부지면적 1,816㎡ / 총 연면적 5,945,14㎡(지상 4층)

- 가족센터 : 연면적 1,773.65㎡(지상1~2층), 5,160백만원

- 주거지주차장 : 연면적 4,171.49㎡(지상 2층~옥상층), 5,066백만원, 주차면수 165대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,226백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,226	229	3,208	6,789	0
지 방 채	2,500		314	2,186
국 비	3,900	229	2,205	1,466
시 도 비
시군구비	3,826		689	3,137
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 가족센터 및 주거지주차장 건립 사업 확정(균형위)	: 2019.10.
○ 재정투자심사 승인 및 공유재산관리계획 반영	: 2019.11.~12.
○ 공공건축 사업계획 사전검토	: 2020.2.
○ 사업수행능력평가 및 기본‧실시설계 용역 착수	: 2020.4.~6.
○ 선진지 견학, 컨설팅 등 기본설계 추진	: 2020.7.~9.
○ 기본설계, 공법(특허)심의, 경관심의 완료	: 2020.10.~12.
○ 기술심의 완료 및 용역 최종보고회	: 2021.3.~4.
○ 건축허가 및 계약심사	: 2021.4.~7.
○ 공사 발주 및 착공	: 2021.8.
○ 기계설비 공사 1차 준공	: 2022.5.
○ 기계설비 공사 2차 착공	: 2022.6.
○ 공사 준공	: 2022.10.

□ 향후계획

○ 가족센터 내부 인테리어 및 기자재 구입 : 2022. 11. ~

○ 가족센터 개소(예정)                     : 2023. 3.

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	사업기간	비고
당초	2020.1.~2022.6.
변경	2020.1.~2022.12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립

담당자

체육진흥과 장재영(☎339-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공기관 이전 완료 및 혁신도시 내 인구유입 증가에 따라 혁신도시의        낮은 정주여건 문제 대두로 기존 도시개발전략과 차별화 된 행정, 문화, 체육       등이 복합화 된 복합혁신센터 건립 필요성 대두

○ 혁신도시 시즌2를 이끌어 갈 혁신도시발전재단의 사무공간 마련 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6. ~ 2025. 5.

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 199번지

○ 규 모 : 지하1층/지상5층 연면적 21,091㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 62,600백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	62,600	8,867	19	10,335	21,800
국 비	19,000	8,000	7	7,000	-
시 도 비	5,000	863	12	3,335	-
시군구비	21,800	4	-	-	21,800
지 방 채	16,800	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021.  5.  : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2022.  9.  : 각종 인증(녹색인증,제로에너지인증 등) 및 건축허가 완료

○ 2022. 10.  : 조달청 계약(건축공사) 의뢰

□ 향후계획

○ 2022. 11.~12. : 기타공사(전기, 통신, 소방 등) 계약

○ 2022. 11. ~ 2023. 1. : 건축공사 계약 체결

○ 2023.  3. ~ 2025. 5. : 공사 착공 및 준공(공사기간 26개월)

□ 사업변경 내역

구분	사업기간	비고
당초	2018. 6. ~ 2024. 12.
변경	2018. 6. ~ 2025. 5.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

스쿼시 전용경기장 건립공사

담당자

체육진흥과 김지혜(☎4528)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2023년 전국체전(목포시) 스쿼시 경기 개최 및 각종 대회 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023

○ 위 치 : 나주종합스포츠파크 내(실내수영장 옆)

○ 규 모 : 지상1층, 연며ᅟᅧᆫ적 998.3㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,100	-	89	1,504	1,507
국 비	800	-	27	386	387
시 도 비	400	-	31	184	185
시군구비	1,900	-	31	934	935

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2021년 공모사업 신청 및 선정	: 2020. 3.

○ 전남남도 지방재정투자심사(재심사) 승인	: 2021. 2.

○ 시의회 공유재산관리계획 동의안 심의(원안가결)	: 2021. 2.

○ 공공건축기획심의(건축허가과)	: 2021. 3.

○ 설계용역 착수 및 대한스쿼시 연명 협의	: 2021. 5. ~ 8.

○ 나주시 기술자문위원회 자문 의뢰	: 2021. 11.

○ 전라남도 계약심사 완료	: 2022. 6.

○ 스쿼시 전용경기장 건립공사 계약체결	: 2022. 8.

□ 향후계획

○ 스쿼시 전용경기장 건립공사 착수	: 2022. 9.

○ 스쿼시 전용경기장 건립공사 준공	: 2023. 3.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

마이크로바이옴 기반 스마트

웰에이징 기술개발 사업

담당자

일자리경제과 이정원(☎339-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바이오소재산업의 핵심원천기술을 개발하여 식품기업의 생산성 향상과 매출액 증대를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 6. ~ 2024. 12.

○ 지원대상 : 동신대학교 산학협력단

○ 사업내용 : 마이크로바이옴 기반 노화측정 원천기술 확보 및 사업화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,570백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,570	-	1,790	2,330	7,450
국 비	4,750	-	750	1,000	3,000
시 도 비	1,425	-	225	300	900
시군구비	3,325	-	525	700	2,100
민간자본	2,070	-	290	330	1,450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 공모사업 신청 및 수행기관 선정 평가 : 2021. 4. ~ 5.

○ 사업수행 기관별 협약 체결           : 2021. 6.

○ 1차년도 연구개발 수행               : 2021. 6. ~ 12.

- 논문 6건, 특허출원 7건, 제품화 3건, 인증획득 1건, 수혜기업 5개사 등

□ 향후계획

○ 2~3차년도 사업추진 및 1단계(2021~2023) 사업비 정산  : 2024.

○ 2단계(2024~2025) 사업추진 및 사업비 정산	: 2026.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

에너지-ICT 융복합지식산업센터 건립

담당자

일자리경제과 이용재 (☎339-8302)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신산단에 공공부문 지식산업센터를 건립하여 강소벤처기업 육성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019 ~ 2023년

○ 위    치 : 나주시 왕곡면 덕산리 817-8,9

○ 규    모 : 지상 4층(부지 13,264㎡, 연면적 11,387㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	26,600	3,729	1,663	17,428	3,780
국 비	16,000	1,002	1,095	10,123	3,780
시 도 비	4,000	1	313	3,686	-
시군구비	6,100	2,726	255	3,119	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	500	-	-	500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2020.  1. : 부지매입 완료

○ 2020. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2021. 12. : 건설사업관리용역 PQ평가, 건축공사 계약

□ 향후계획

○ 2022. 2. : 건설사업관리용역 착수, 건축공사 계약

○ 2022. 5. : 전기, 통신, 소방공사 계약

○ 2023. 6. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 26,100백만원 → (변경) 26,600백만원 / 특교세 교부

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

건설기계부품 재제조 사업화 기반조성사업

담당자

일자리경제과 고강용(☎339-8322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 신산업 육성을 위하여 지역 내 연구기반시설 구축 및 기술개발지원

으로 새로운 지역 클러스터 구축(노후‧폐기 건설기계‧부품을 활용한 재제조로

자원 절약 및 신산업 육성)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

○ 위 치 : 남평읍 서산리 일원(남평농공단지 내)

○ 규 모 : 건설기계‧부품 재제조 센터 구축 등 A=2,045㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,000	2,235	175	2,170	7,420
국 비	5,800	1,160	-	1,000	3,640
시 도 비	2,900	580	-	500	1,820
시군구비	2,900	455	125	500	1,820
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	400	40	50	170	140
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

○ 건설기계‧부품 재제조 기술지원센터 및 인프라 구축 부지 확보

○ 재제조 부품 품질검사 및 성능 시험장비 구축, 기술지원센터 실시설계 용역 추진

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 기술지원 센터 부지 계약(남평농공단지 선분양)

○ 2022.  2. : 기술지원 센터 실시설계 용역 착수

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업

담당자

문화예술과 김진숙(☎339-4632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민체감형 지역문제 해결을 위한 SW서비스 개발 및 실증

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. 1. ~ 2024. 12. 31.(5년)

○ 내 용 : 지역 문제 해결을 위한 특화 SOS랩 구축·운영 및 지역수요 맞춤형 SW서비스 R&D 추진, 통합플랫폼 구축

○ 시행부처/전담기관 : 과학기술정보통신부 / 정보통신산업진흥원

○ 주관/참여지자체 : 전라남도 / 나주시

○ 수행기관 : 전남정보문화산업진흥원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,207백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,207	1,475	1,926	1,844	3,962
국 비	5,407	875	1126	1,044	2,362
시 도 비	1,520	240	320	320	640
시군구비	2,280	360	480	480	960

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 공모사업 선정 : 2020. 4.

○ 제2차 전라남도 지방재정투자심사 : 2020. 4.

○ SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업 지원 협약체결 : 2020. 4.

○ 4대분야(지역사회문제 발굴, 지역혁신역량 강화, SOS랩 및 플랫폼 운영, R&D 생태계 조성) 10개 세부사업 선정 및 추진 : 2020 ~ 2022

○ 지역 사회문제 해결 R&SBD 지원사업 협약 체결 : 2022. 6.

□ 향후계획

○ 지역사회문제조사, 역량 강화 마중물 프로젝트, SOS랩 및 플랫폼 운영, R&D 생태계 조성 등 10개 세부사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

(단위 : 백만원)

변경내용	국비		도비	시비	합계
	당초	변경			당초	변경
사업비	5,539	5,407	1,520	2,280	9,339	9,207

사업명

제11회 의병의 날 기념행사

담당자

문화예술과 강한빛(☎339-4604)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기념행사를 통해 의병의 역사적 의의와 가치를 되새기고, 애국·애족 정신을 계승 발전시켜 국민 통합과 국가 발전을 도모

□ 사업개요

○ 기     간 : 2021. 3. ~ 2021. 8.

○ 장     소 : 금성관 일원

○ 내     용 : 제11회 의병의 날 기념행사

○ 주최/주관 : 행정안전부 / 전라남도, 나주시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	249	0	249	-	-
국 비	100	0	100
시 도 비	50	0	50
시군구비	99	0	99
지 방 채	0	0	0
민간자본	0	0	0
기 타	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 추진완료)

○ 공모사업 선정                           : 2020.  7.

○ 제3차 전라남도 지방재정투자심사         : 2020.  9.

○ 추진계획 수립 및                        : 2021.  2.

○ 행사대행용역사 선정(협상에 의한 계약)    : 2021.  3.

○ 의병주간 부대행사                       : 2021.  5. 16. ~ 6. 1.

○ 의병의 날 기념식                        : 2021.  6. 1.

○ 국도비 보조사업 사업실적 및 정산서 제출 : 2021.  9.

○ 국도비 보조금 이자액 반납               : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

마한 천문대 조성사업

담당자

역사관광과 오종민(☎339-8712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반남면 자미산성, 반남 고분군과 국립나주박물관을 연계한 자연학습을 테마로 한 생태 관광자원화 사업 추진을 통하여, 침체된 지역경제 활성화는 물론 국립나주박물관과 연계를 통하여 테마 관광벨트화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 나주시 반남면 신촌리 산 5-3번지 외 2필지

○ 규 모 : 별자리공원 조성 A=29,568㎡

- 천문대 건립(지하1층, 지상3층, 연면적 1,300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,200	30	185	745	6,240
국 비
시 도 비	3,600	-	-	200	3,400
시군구비	3,600	30	185	545	2,840
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2017.  7. : 기본계획수립 및 타당성조사 완료

○ 2020.  5. : 지방재정투자심사 완료

○ 2021.  8. : 실시설계용역(토목) 착수

○ 2021. 11. : 지방이양(균특) 문화관광자원개발 신규사업 확정

○ 2021.  6. : 실시설계용역(건축) 착수

□ 향후계획

○ 2023.  2. : 사업 착수

○ 2024. 12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 투자심사시 천문대 건축비용을 152만원/㎡으로 책정하였으나,「건축서비스산업진흥법」제23조에 의거 사업계획 사전검토 의견으로 건축비용이 285만원/㎡으로 상승함으로써 총사업비도 당초 58억원에서 72억원으로 변경

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동강 느러지 전망대 관광활성화 사업

담당자

역사관광과 박연제(☎339-8713)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수려한 경관을 조망할 수 있는 느러지 전망대는 나주의 관광요충지로 잠재력이 풍부하여 관광활성화를 위한 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 나주시 동강면 옥정리 산 1번지 일원

○ 규 모 : 문화공원 조성 A=97,113㎡ , 쉄터, 카페, 산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	200	1,583	1,217
국 비
시 도 비	980	-	100	300	580
시군구비	2,020	-	100	1,283	637
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019.  4. : 기본계획 및 타당성조사 완료

○ 2021.  7. : 실시설계용역 착수

○ 2021.  9. : 주민 현장 설명회

○ 2021. 10. : 지방재정 투자심사 완료

○ 2022.  3. : 공유재산 관리계획 승인

□ 향후계획

○ 2023.  2. : 실시설계용역 완료

○ 2023.  3. : 사업 착수

○ 2024. 12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

빛가람혁신도시 생활SOC 복합센터 건립

담당자

혁신도시교육과 김현영(4682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신도시 정주여건 개선 및 어린이, 가족 서비스 수요 증가에 따른 문화시설 확충

□ 사업개요

○ 위    치 : 전남 나주시 빛가람동 383번지

○ 규    모 : 연면적 4,480㎡(±3%이내), 지상 2층

- 도서관동 : 어린이도서관, 다함께돌봄센터

- 복 합 동 : 상생푸드마켓, 육아지원시설

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,886백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,886	2,086	480	12,190	3,130
국 비			480	7,377	50
시 도 비
시군구비		2,086		4,813	3,080
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 용역 추진                        : ‘22. 4. ~ 10.

○ 행정절차 이행(기술심의, BF, 에너지효율등급, 녹색건축물 인증 등) : ‘22. 7. ~ 10.

□ 향후계획

○ 계약 심사 및 계약 체결	: ‘22.  11.

○ 공사 착공 및 준공	: ‘22. 12. ~ ‘23. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 : (당초) 6,300㎡  ⇒ (변경) 4,480㎡

※ 원자재값 상승 등으로 인한 건축 단가 상승

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

한전공대 대학부지 도시기반시설 설치

담당자

혁신도시교육과 박창주(4697)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2022년 3월 개교를 위한 한전공대 도시기반시설 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 1월 ~ 2021년 12월(3월)

○ 위 치 : 한국에너지공대 인근

○ 규 모

- 진입도로 개설 : L=645m, B=25m

- 상수도 배수관로(D=250mm) 신설 : L= 2.0km

- 오수관로(D=300mm) 및 우수관로(D=500mm) 신설 L=0.1km

- 전기□통신 지중화사업 : L=645m

- 관련 용역(환경, 재해영향평가, 전략환경영향평가, 실시설계 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,287백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,287	286	5,001	-	-
시군구비	5,287	286	5,001	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축사업

담당자

에너지신산업과 신성군

(☎339-8372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중소․중견기업의 자체보유 시험설비가 절대적으로 부족, 연구개발과 참고(예비)시험인프라 열악

○ 에너지밸리 중소․중견기업의 유입 촉진 및 해외시장 진출강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.(4년 6개월)

○ 위 치 : 나주시 동수동 395-3(나주 혁신산단 내)

○ 규 모 : 203.6억원(국비 100, 도비 34.3, 시비34.3, 민간 35)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,360	18,143	1,956	261
국 비	10,000	8,639	1,100	261
시 도 비	3,430	3,144	286
시군구비	3,430	3,144	286
지 방 채
민간자본	3,500	3,216	284
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 한국전기설비시험연구원 건축공사 완료 : 2020. 6.

○ 장비도입 및 구축 : 2020. 6. ~ 2022. 10.

○ 한국전기설비시험연구원 개원 : 2021. 10.

□ 향후계획

○ KORAS 인증 췩득 신청 : 2022. 8. ~ 계속

○ 장비도입 완료 : 2022. 10.

○ 사업완료 및 최종결과보고서 작성 : 2022. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산업용 드론 기업 육성을 위한 기반구축 및 실증 시범 사업

담당자

에너지신산업과 최신형

(☎339-8363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 드론산업 선순환 구조 확립 및 강소기업 육성을 통한 “신개념 비즈

니스 창출 및 일장리 창출 선도”

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 전남실감미디어산업지원센터 내

○ 규 모 : 전남실감미디어산업지원센터 3,4층(전남드론산업지원센터 구축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,644백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,644	7,223	2,674	2,747
국 비	6,144	3,473	1,299	1,372
시 도 비	2,500	1,500	500	500
시군구비	2,500	1,500	500	500
지 방 채
민간자본	1,500	750	375	375
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 사업신청서 제출 및 수행기관 선정평가            : ‘19. 4.~5.

○ 사업수행 기관별 협약체결                        : ‘19. 7.

○ 전남드론산업지원센터 구축 완료                  : ‘20. 5.

○ 연차사업(장비구축 및 기업지원 등) 추진           : ‘20 ~ ’21

□ 향후계획

○ 4차년도 장비구축 및 기업지원 추진               : ‘22. 6. ~

○ 3년 성과정리 및 성과관리기간 대응계획 수립      : ‘22. 6. ~

○ 사업완료 및 최종결과보고서 작성                 : ‘22. 12.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고
총사업비	12,700백만원	12,644억원	감 56백만원
변경내용	국 6,200, 도 2,500, 시 2,500, 민 1,500	국 6,144, 도 2,500, 시 2,500, 민 1,500	국비예산 축소

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

EV/ESS 사용 후 배터리 리사이클링 산업화 추진

담당자

에너지신산업과 이창원

(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전기차 사용후 배터리의 재사용‧재제조를 통해 자원의 효율적 사용과 선순환체계

구축 및 에너지신산업화 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 11.(5년)

○ 위 치 : 나주시 동수동 391-1(나주혁신산단 내)

○ 규 모 : 연간 배터리팩 1,000대, MWh급 재사용 배터리 시험평가

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	23470	10,471	5,869	4,000	3,130
국 비	9,800	3,900	1,900	1,900	2,100
시 도 비	4,320	2,708	1,292	160	160
시군구비	6,480	3,068	1,932	1240	240
지 방 채	0
민간자본	2,870	795	745	700	630
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 산업부 공모 선정 및 협약 체결                         : ‘19. 11.

○ 사용후 배터리 산업화센터 준공                         : ‘22. 6.

○ 배터리 성능검사 시험장비(21종) 구축 및 시운전          : ‘22. 7.

□ 향후계획

○ 4차년도 사업 추진 및 보조금 교부                      : ‘22. 9.

○ 배터리 안전검사 시험장비(5종) 구축                     : ‘23. 5.

○ 평가방법 및 자원순환체계 구축 및 고도화               : ‘23. 6.

○ 이차전지 자원순환산업 육성 및 인력 양성사업 신규 추진 : ‘23.~

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증감
총사업비	231억원	234.7억원	증 3.7억
변경내용	○ 민간부담금 : 25억원 - 참여기업 8개사	○ 민간부담금 28.7억원 - 참여기업 12개사(4개사 증가)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주시 가공배전선로 지중화 사업

담당자

에너지신산업과 이창원

(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나주읍성 4대문 복원 및 도시재생사업 연계 공중에 무질서한 배전‧통신선

지하매설로 도시미관 개선 및 시민이 안전한 도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 4개권역(영강동 0.35km, 금남동 0.97km, 성북동 1.81km, 이창동 1.14km)

○ 규 모 : 4구역 4.27km 구간 배전‧통신선로 지중화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,522백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,522	7,548	2,865	109	0
국 비	0
시 도 비	0
시군구비	6,209	4,800	1,300	109
지 방 채	0
민간자본	4,313	2,748	1,565
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 한전 사업 선정                           : ‘19. 1. / ‘19. 12.

○ 성북동 지중화 완료                       : ‘21. 12.

○ 영강동 지중화 공사 착공                  : ‘21. 10.

○ 이창동 지중화 공사 착공                  : ‘22. 4.

□ 향후계획

○ 영강동 지중화 완료                       : ‘22. 12.

○ 이창동 배전선로 지중화 공사 추진         : ‘22.  4. ~ ‘23.  6.

- 한전, 통신선로 매설(‘23. 3.) / 한전주 철거(‘23. 6.)

○ 금남동 배전선로 지중화 공사 추진         : ‘22. 11. ~ ‘23. 12.

- 한전, 통신선로 매설(‘23. 8.) / 한전주 철거(‘23. 12.)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지능형 저압직류(LVDC)핵심기술 개발사업

담당자

에너지신산업과 이창원

(☎339-8373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 직류전원‧직류부하 증가에 대응하여 직류배전 구성기기에 필요한 연구개발

인프라 구축 및 지원을 통해 기업경쟁력 제고와 관련 산업 육성 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2024. 4.(5년)

○ 위 치 : 나주시 동수동 391-10(나주혁신산단 내)

○ 규 모 : 수용가용 저압직류 기술실증센터 및 시험용 전원설비(250KW) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	35,700	12,249	12,482	5,684	5,285
국 비	25,000	7,724	8,133	4,619	4,524
시 도 비	2,300	1,150	1,150
시군구비	2,300	1,150	1,150
지 방 채	0
민간자본	6,100	2,225	2,049	1,065	761
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 산업부 공모 선정 및 협약 체결                           : ‘19. 5.

○ 핵심기술 실증센터 준공 및 직류전원설비(태양광) 설치      : ‘21. 12.

○ 저압직류 기술표준 15건 초안 및 산학연 의견 수렴         : ‘21. 10.

○ 개발제품 품질검사시험절차서 개발 및 고도화              : ‘22. 1.~

□ 향후계획

○ 기술표준 15건 중소기업중앙화 단체표준 등록 추진         : ‘22. 9. ~

- 직류수용가 전기안전 요구사항, 직류회로차단기 요구사항 등 15건

○ 직류수용가 안전성 확보를 위한 부하기기 동작기준(안) 개발 : ‘22. 12.

○ 실증데이터 기반 안전성 평가 항목 발굴 및 표준(5건) 제정  : ‘22. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

저압직류 핵심기기 인증 지원센터 기반구축

담당자

에너지신산업과 이창원

(☎339-8373)

□ 사업목적 및 -필요성

○ 직류수용가용 핵심기기 및 직류 배전에 연계되는 직류 분산전원 시스템의

성능 검증 및 신뢰성 확보를 위한 인증지원 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. ~ 2025. 12.(4년 9개월)

○ 위 치 : 나주시 동수동 391-10(나주혁신산단 내)

○ 규 모 : 인증지원센터 건립, 시험평가장비(47종) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,489백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,489	0	2,509	4,690	9,290
국 비	8,430		1,930	2,070	4,430
시 도 비	2,400		80	880	1,440
시군구비	3,600		120	1,320	2,160
지 방 채	0
민간자본	2,059		379	420	1,260
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 산업부 공모 선정 및 협약 체결                     : ‘21. 5.

○ 성능검증 시험장비(11종) 구축                       : ‘21. 12.

○ LVDC 산학연 전문가 협의체 구성 및 분기별 운영   : ‘22. 2.

○ 인증지원센터 입찰공고 및 적격심사                 : ‘22. 7.

□ 향후계획

○ 인증지원센터 건축 착공(연면적 660㎡, 지상 2층)     : ‘22. 9.

○ 성능검증 시험장비(9종) 구축                        : ‘22. 11.

○ 인증시험 평가항목 도출 및 인증체계 표준(안) 수립   : ‘22. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

강소연구개발특구 육성사업

담당자

에너지신산업과 김병국(☎339-8362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남 나주의 한국전력공사를 중심으로 지능형 태양광․에너지저장 등의         R&D역량 강화 및 산․학․연 협력을 통한 기술이전 사업화 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2025.

○ 위 치 : 혁신도시 산학연클러스터, 혁신산단 일부 등

○ 규 모 :  1.69㎢(51만평) (기술핵심기관 0.26㎢, 배후공간 1.43㎢)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,600		7,200	5,700	8,700
국 비	16,000		6,000	4,000	6,000
시 도 비	1,680		360	510	810
시군구비	3,920		840	1,190	1,890
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

○ 전담조직운영, 혁신네트워크 기술발굴, 기술이전사업화, 기술창업육성 등

○ 기술이전 사업화, 강소형 기술창업 육성, 강소특구 특화성장 지원 등

□ 향후계획

○ 양방향 기술발굴, 기술이전 사업화, 강소형 기술창업 육성, 특화성장 지원

○ 연구소기업 기술가치 평가, 액셀러레이팅 지원사업, 지역특화 기업 성장지원

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시가스 공급지원사업

담당자

에너지신산업과 조장훈

(☎339-8382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공급효율이 낮은 저밀도 주거지역 주민들의 도시가스 공급 민원 해소

○ 주민의 에너지 복지 증진 및 주거환경 개선을 위한 도시가스 보급 확대 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년(5년)

○ 위 치 : 나주시 8개지역(다시, 금천, 산포, 노안, 원도심 추가구간 등)

○ 규 모 : 배관연장 63㎞ / 수혜가구 1,577세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,437백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	22,437	1,012	1,012	2,300	19,125
국 비
시 도 비
시군구비	22,437	1,012	1,012	2,300	19,125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 나주시 도시가스 보급 2차 5개년 추진계획 수립(2021~2025) : 2020.  9.

○ 2022년도 도시가스 공급지원사업 계획 수립                : 2022.  4.

○ 2022년 도시가스 공급지원사업 보조금 지급 및 착공        : 2022.  6.

□ 향후계획

○ 2022년도 도시가스 공급지원사업 준공 및 보조금 정산     : 2022. 12.

○ 2023~2025년도 도시가스 공급지원사업 추진               : 2023.~2025.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

구)나주정미소 문화재생사업

담당자

도시재생과 이봉규(☎339-8174)

도시재생과 전성은(☎339-8184)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나주 읍성 중심지에 위치한 정미소를 문화재생공간으로 조성하여 공연, 전시, 체험 등의 나주읍성도시재생사업과 연계한 복합 문화예술 앵커시설로 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 과원길 5

○ 규 모 : 1,490㎡(정미소 3동(824㎡), 4동(236㎡), 5동(430㎡))리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000		1,282	2,718
국 비	2,000		557	1,443
시군구비	2,000		725	1,275

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ H/W : 3,4,5동 공사 발주

○ S/W : 도심캠핑 / 문화동호회 지원 / 예술가지원프로그램 사업추진 중

□ 향후계획

○ H/W : 3동 준공: 2022. 11. / 4,5동 준공 : 2022. 12.

○ S/W : 아카이브 구축(책자·영상) 제작, 홍보물(굿즈) 제작 등

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

바람길숲 조성사업

담당자

산림공원과 조정현(☎339-7233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지, 악취 등의 대기오염을 개선하여 생활권 주변의 숲으로서의

생태적 기능을 회복하여 녹색도시 건설

○ 전국 10개 혁신도시 중 정주여건 최하위권으로 바람길숲 조성을 통해

산책·휴양을 할 수 있는 녹색도시에 걸맞은 환경개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위    치 : 나주시 빛가람동 일원

○ 규    모 : 60ha

○ 사업내용 : 바람연결숲, 공해차단숲, 순환가로연결숲 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,000	1,000	6,937	12,063
국 비	10,000	500	6,937	2,563
시 도 비
시군구비	6,000	500	0	5,500
지 방 채	4,000	0	0	4,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기본 및 실시설계 용역 추진  : 2019. 12. ~ 2020. 11.

○ 공사 계약 및 착공           : 2021. 4. 20.

□ 향후계획

○ 공사 추진                   : 2021. 4. ~ 2022. 11.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군도 16호선 확포장사업

담당자

건설과 최재용(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겨울철 도로 결빙과 선형불가 지역의 위험도로를 개선하여 안전사고 예방과       통행 불편을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 봉황면 송현리 1009-4번지 ~ 다도면 궁원리 548-5번지

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.75km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,000	610	416		18,974
국 비
시 도 비
시군구비	20,000	610	416		18,974
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2022.  7. : 경관심의 완료

□ 향후계획

○ 전라남도 건설기술 심의

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

반남 농어촌도로 201호선 확포장공사

담당자

건설과 최재용(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반남면 농어촌도로를 확·포장하여 주민들의 정주여건 개선 및 안전한         통행로 확보를 통한 안전사고를 예방하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 반남면 대안리 1578번지 일원

○ 규 모 : 4,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000		1,110	1,500	1,390
국 비
시 도 비
시군구비	4,000		1,110	1,500	1,390
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2021.  5. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 공사 총괄 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

빛가람에너지클러스터투자선도지구

담당자

도시과 박재욱(☎339-8982)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신도시와 원도심간 지역 상생발전을 위한 지역 성장 거점 공간 마련

◦ 나주 KTX역 앞 부족한 주차장 확보 및 교통체계 개편을 통한 호남 서남부       교통허브 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 나주시 송월동 1507번지 일원 / 나주역 일원

○ 규 모 : 투자선도지구 A= 779,948㎡

- 공원 55,000㎡, 주차장 252면, 광장 및 교통체계 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,000,000,000	644,134,610	1,043,300,040	350,000,000	12,962,565,350
국 비	10,000,000,000	154,501,100	1,043,300,040	350,000,000	8,452,198,860
시 도 비
시군구비	5,000,000,000	489,633,510	-		4,510,366,490

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018.  7. 31. : 지역개발사업 투자선도지구 공모 사업 선정 / 국토부

○ 2018. 12. 17. : 투자선도지구 지정 용역 착수

○ 2019. 12. 17. : 투자선도지구 지정 신청 제안(市→道)

○ 2020. 8.   5. : 투자선도지구 지정 신청(道→국토부)

□ 향후계획

○ 2020. 8. ~  10. : 중앙행정기관 협의 및 국토정책위원회 심의

○ 2020. 10. ~ 12. : 투자선도지구 실시계획 승인

○ 2021. 2. ~ 2023. 12. : 기반시설 등 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주 공공하수처리시설 악취방지시설 설치사업

담당자

상하수도과 정홍주(☎339-7654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장에 적합한 악취방지시설을 설치함으로써 하수처리장의 쾌적한

환경조성과 지역주민의 생활환경을 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 나주시 가야길 55(나주 공공하수처리장 내)

○ 규 모

- 악취확산 개구부 밀폐형 덮개 설치

- 침사지 복개 1식

- 악취포집배관(L=270m) 및 탈취장치 신설(1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,692백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,692	100	0	1,592	0
국 비	847	50	0	797	0
시 도 비	159	10	0	149	0
시군구비	686	40	0	647	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2020.  1. : 실시설계 용역 착수

○ 2021.  7. : 재원협의 및 총사업비 변경(영산강유역환경청)

○ 2021.  9. : 건설공사 기술자문(나주시 건설과)

○ 2021. 12. : 도 계약심사(전라남도 회계과)

○ 2022.  1. : 계약체결 및 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주배 박물관 리모델링

담당자

배원예유통과 장재은(☎339-2591)

□ 사업목적 및 필요성

○ 박물관 개보수를 통해 안전하고 쾌적한 박물관 환경을 조성하여 관람객들에게 쉼과 여유가 있는 문화 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. 13. ~ 2021. 12. 22.

○ 위 치 : 나주시 금천면 영산로 5838

○ 규 모 : 부지 3,887㎡(1,176평), 건물 1,180㎡(357평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	250	250	243
국 비	100	100	97	0	0
시군구비	150	150	146	0	0

□ 추진상황

○ ’21.05.13.~7.15. 나주배 박물관 개보수 설계용역 (30%)

○ ’21.09.15.      나주배 박물관 개보수공사 시행 (50%)

○ ’21.12.22.      나주배 박물관 개보수공사 준공 (100%)

□ 향후계획

○ 나주배 농업의 역사와 문화에 대한 연구 조사를 통해 상설전시실 개편에 관한 기본 계획, 공간 구상 및 예산 확보

□ 사업변경 내역

○ 당초사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2021~2022(2년)	2021(1년)	1년 축소
사업비	ㅇ 총사업비 : 3,000백만원 - 국비 1,200, 지방비 1,800	ㅇ 총사업비 : 250백만원 - 국비 100, 지방비 150	금액축소
사업규모	부지 3,887㎡(1,176평) 건물 1,180㎡(357평)	부지 3,887㎡(1,176평) 건물 1,180㎡(357평)	변경없음
사업내용	노후화된 박물관 리모델링으로 차별화된 브랜드 구축 및 문화플랫폼 형성	노후화된 박물관 리모델링으로 차별화된 브랜드 구축 및 문화플랫폼 형성	변경없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 나주시에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
가족센터 및 주거지주차장 건립	10,226	2,500	3,900	-	3,826	-	2,500	100
광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립	62,600	3,600	19,000	5,000	21,800	-	3,600	20
자연재해위험 개선지구 정비사업(삼도)	22,934	4,000	9,440	-	9,494	-	4,000	99
자연재해위험 개선지구 정비사업(남평1)	11,214	2,000	4,957	-	4,257	-	2,000	100
봉황천 생태하천 조성사업	31,453	1,300	18,709	-	11,444	-	1,300	98

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(별첨 가능)

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

나주시 가족센터 및 주거지주차장 건립

담당자

사회복지과 윤은화(☎8487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 가족서비스의 수요와 시 청사 주변의 부족한 주차 공간 문제 해결을       위해 가족센터 및 주거지주차장 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. (3년)

○ 위 치 : 나주시 송월동 1099-2, 1099-3

○ 규 모 : 부지면적 1,816㎡ / 총 연면적 5,945,14㎡(지상 4층)

- 가족센터 : 연면적 1,773.65㎡(지상1~2층), 5,160백만원

- 주거지주차장 : 연면적 4,171.49㎡(지상 2층~옥상층), 5,066백만원, 주차면수 165대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,226백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,226	229	3,208	6,789	0
지 방 채	2,500		314	2,186
국 비	3,900	229	2,205	1,466
시 도 비
시군구비	3,826		689	3,137
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 가족센터 및 주거지주차장 건립 사업 확정(균형위)	: 2019.10.
○ 재정투자심사 승인 및 공유재산관리계획 반영	: 2019.11.~12.
○ 공공건축 사업계획 사전검토	: 2020.2.
○ 사업수행능력평가 및 기본‧실시설계 용역 착수	: 2020.4.~6.
○ 선진지 견학, 컨설팅 등 기본설계 추진	: 2020.7.~9.
○ 기본설계, 공법(특허)심의, 경관심의 완료	: 2020.10.~12.
○ 기술심의 완료 및 용역 최종보고회	: 2021.3.~4.
○ 건축허가 및 계약심사	: 2021.4.~7.
○ 공사 발주 및 착공	: 2021.8.
○ 기계설비 공사 1차 준공	: 2022.5.
○ 기계설비 공사 2차 착공	: 2022.6.
○ 공사 준공	: 2022.10.

□ 향후계획

○ 가족센터 내부 인테리어 및 기자재 구입 : 2022. 11. ~

○ 가족센터 개소(예정)                     : 2023. 3.

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	사업기간	비고
당초	2020.1.~2022.6.
변경	2020.1.~2022.12.

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립

담당자

체육진흥과 장재영(☎339-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공기관 이전 완료 및 혁신도시 내 인구유입 증가에 따라 혁신도시의        낮은 정주여건 문제 대두로 기존 도시개발전략과 차별화 된 행정, 문화, 체육       등이 복합화 된 복합혁신센터 건립 필요성 대두

○ 혁신도시 시즌2를 이끌어 갈 혁신도시발전재단의 사무공간 마련 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6. ~ 2025. 5.

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 199번지

○ 규 모 : 지하1층/지상5층 연면적 21,091㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 62,600백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	62,600	8,867	19	10,335	21,800
국 비	19,000	8,000	7	7,000	-
시 도 비	5,000	863	12	3,335	-
시군구비	21,800	4	-	-	21,800
지 방 채	16,800	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021.  5.  : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2022.  9.  : 각종 인증(녹색인증,제로에너지인증 등) 및 건축허가 완료

○ 2022. 10.  : 조달청 계약(건축공사) 의뢰

□ 향후계획

○ 2022. 11.~12. : 기타공사(전기, 통신, 소방 등) 계약

○ 2022. 11. ~ 2023. 1. : 건축공사 계약 체결

○ 2023.  3. ~ 2025. 5. : 공사 착공 및 준공(공사기간 26개월)

□ 사업변경 내역

구분	사업기간	비고
당초	2018. 6. ~ 2024. 12.
변경	2018. 6. ~ 2025. 5.

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

삼도 자연재해위험개선지구 정비사업

담당자

안전재난과 강승구(☎339-7285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼도(토계)동 일원에 항구적인 방재시설 설치로 주택 및 농경지 침수피해 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 나주시 삼도동, 토계동 일원

○ 규 모 : 배수펌프장 증설(Q=550㎥/min), 하천정비 L=1.43km, 교량 4개소,               수로박스 L=61m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,934백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액	향후 소요액
		기투자	2022년	2023년 이후
계	22,934	19,664	3,270	0
지 방 채	4,000	2,520	1,480
국 비	9,440	9,440
시 도 비	9,494
시군구비		7,704	1,790
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2010. 6.  1. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 680,000㎡)

○ 2016. 5. 24. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18. 12. 11. 완료)

○ 2019. 1. 14. : 1차분 공사 착공 (‘19. 12. 9. 준공)

○ 2020. 2. 17. : 2차분 공사 착공 (‘20. 12. 31. 준공)

○ 2021. 4. 19. : 3차분 공사 착공 (‘22. 11. 30. 총괄 및 3차분 준공예정)

□ 향후계획

○ 공사 준공(예정) : 2022. 11.

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

남평1 자연재해위험개선지구 정비사업

담당자

안전재난과 강승구(☎339-7285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남평읍 서산리 일원에 항구적인 방재시설 설치로 주택 및 농경지 침수피해 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 8.

○ 위 치 : 나주시 남평읍 서산리 일원

○ 규 모 : 배수펌프장 신설(Q=50㎥/min), 하천정비 L=430m, 교량 3개소,                배수로정비 L=680m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,214백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액	향후 소요액
		기투자	2022년	2023년 이후
계	11,214	8,941	2,273	0
지 방 채	2,000	510	1,490
국 비	4,957	4,957
시 도 비	4,257
시군구비		3,474	783
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  6. 19. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 164,700㎡)

○ 2017.  4. 25. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18. 12. 21. 완료)

○ 2019.  6. 26. : 1차분 공사 착공 (‘20. 5. 19. 준공)

○ 2020.  2. 17. : 2차분 공사 착공 (‘20. 12. 21. 준공)

○ 2021.  4. 19. : 3차분 공사 착공

○ 2022.  8. 31. : 총괄 및 3차분 준공

□ 향후계획

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

나주시 봉황천 생태하천 조성사업

담당자

안전재난과 윤동현(☎339-7862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방하천 봉황천의 치수 안정성 확보를 통해 하천 재해 예방

□ 사업개요

○ 봉황면 용곡리(미곡마을) ~ 봉황면 신동리(화산교)

○ 사 업 량 : L= 7.4km (계획하폭 : 15~45m, 계획홍수량 : 16~278㎥/s)

○ 사업내용 : 제방 축제 및 호안 정비, 하도 정비, 교량 재가설 등

○ 사업기간 : 2017. 4. ~ 2022. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,453백만원

○ 집 행 액 : 31,423백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	31,453	28,153	3,270	30	0
지 방 채	1,300		1,270	30	-
국 비	13,892	13,892		-	-
시 도 비	4,980	3,000	1,980	-	-
시군구비	11,281	11,261	20	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 봉황천 생태하천조성공사 착공                         : 2017.  4.

○ 봉황천 생태하천조성공사 준공                         : 2022. 10.

□ 향후계획

○ 봉황천 제방정비공사 발주(예정)                        : 2022. 11.

○ 봉황천 제방정비공사 준공                             : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

구 분	당초	현재	비고
계	31,453	31,453	변경없음
지 방 채	1,300	1,300
국 비	13,892	13,892
시 도 비	4,980	4,980
시군구비	11,281	11,281
기 타	-	-

10-3. 민간투자사업

우리 나주시에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	해 당 없 음
BTO