119

특수공시

나주시에서 ‘21년에 추진한 특수공시(주민관심사항) 사업은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	총사업비	비 고
	계	11건	213,837
1	월산 소하천 정비사업	하천정비 L=1.68km, 교량 6개소	12,574	안전 재난과
2	나주천 생태하천 복원사업	생태하천 L= 3.36km, 펌프장・유수지 증설, 교량13개소 차집관로 정비 3km	27,722	안전 재난과
3	남평읍 하수도 중점관리지역 도시침수대응사업	우수관로 5.5km, 펌프장증설 380톤/분	25,887	상하 수도과
4	봉황 농어촌도로 204호선 확포장 공사	도로 확·포장 L=1.6km, B=8.0m	4,500	건설과
5	반남 농어촌도로 201호선 확포장 공사	도로 확·포장 L=0.9km, B=8.0~9.0m	4,000	건설과
6	영산강변 저류지 테마공원 조성사업	테마공원 조성 1식 (A=310,632㎡ / 약 9만평)	9,500	관광과
7	동강느러지 전망대 관광활성화 사업	문화공원 조성(A=97,055㎡)	1,960	관광과
8	빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립	연면적 약 4,500㎡, 지하1층, 지상2층	15,784	미래 전략과
9	영산포권 도시재생사업	사업면적 110,000㎡	18,910	도시과
10	읍성권 도시재생사업	사업면적 194,016㎡	25,000	도시과
11	광주전남 공동혁신도시 복합혁신센터 건립	부지 8,832.4㎡, 지하1/지상5층, 연면적 21,000㎡	68,000	체육 진흥과

1		월산소하천 정비공사(소하천 정비사업)

* 담당자 : 안전재난과장(최준석, 339- 7867), 하천정비팀장(남기문, 339-7861)

	사업목적
❍ 최근 기후 변화로 나주시 관내에 국지성 호우가 빈번히 발생하여, 월산소하천 하상내 토사 적치 및 제방 법면 유실 등 피해가 발생하고 있으므로, 하천 제방 축제와 구조물 설치를 통해 지역주민의 안정된 생활과 지역의 발전을 도모하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금천면 월산리 912번지 일원(빛가람동 남측)

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=1.68km, 교량 6개소

- 흙깍기 31,746㎥, 흙쌓기 30,405㎥, 거적덮기 11,503㎡, 호안블럭 20,307㎡, 식생매트 1,942㎡

- 배수통관 27개소, 둑마루포장 16,545㎡, 폐기물 5,987ton

❍ 사 업 비 : 12,574백만원(시비 12,574)

- 공사비: 10,759백만원(도급액 3,072, 관급자재 2,896, 폐기물처리비 195, 감리비 654, 보상비 3,942)

❍ 공사기간 : 2020. 1.6. ~ 2023. 12. 16.

❍ 도급업체: 청해종합건설(주) / 공정율 70%

❍ 건설사업관리용역: 수성엔㈜지니어링 외1개사

❍ 연도별 예산 계획

(단위:천원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	비고 (잔여사업비)
합 계	12,574,000	320,000	884,000	3,480,000	3,000,000	1,901,500	750,000	2,238,500
국 비	6,287,000	160,000	442,000	1,740,000	1,500,000	950,750	375,000	1,119,250
시 비	6,287,000	160,000	442,000	1,740,000	1,500,000	950,750	375,000	1,119,250

※ 공사 준공까지 필요사업비 750백만원(본예산 요구)

□ 추진상황

❍ 실시설계용역 착수                               : 2018.  3.

❍ 사전설계심의 완료(행안부)                        : 2019.  8.

❍ 계약심사 완료(전남도)                            : 2019. 11.

❍ 공사 착공                                       : 2020.  1.

❍ 공사중지(보상협의 지연 및 우기철)                : 2020.  2.

❍ 공사재개                                        : 2020.  11.

❍ 공사 1차분 준공 및 2차분 시행                   : 2021.  4.

❍ 편입토지 보상 완료(공탁금 집행)                  : 2021.  11.

❍ 2개사업 일시 중지(추진 공사비 부족)              : 2022.  7.

❍ 2차분 준공 및 3차분 착공                         : 2022.  9.

□ 기대효과

❍ 월산소하천 제방 축제와 확폭을 통해 우수기에 집중호우로 인한 재해발생률을 낮춰 주민들의 안정된 생활환경을 조성하며, 둑마루에 콘크리트 포장함으로써 주민들의 편익 및 영농활동 증진에 기여함

□ 관련사진(위치도 등)

월산천 위치도(금천면 월산리, 빛가람동 남측방면)

영산천

빛가람 혁신도시

월산소하천

L=1.68㎞

계획평면도

중,상류부

하류부

2		나주천 생태하천 복원사업

* 담당자 : 안전재난과장(최준석), 하천정비팀장(남기문, 339-7861)

	사업목적
원도심을 관통하는 지방하천 나주천을 정비하여 홍수 예방 등 치수적 안정성을 도모하고 자연과 사람이 공존하는 명품 생태공원 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 경현동 ~ 삼도동(영산강 합류부) 일원

❍ 사 업 비 : 277억원(국비50%, 시비50%) / 생태하천 복원 등 3개 사업

❍ 사업내용 : 생태하천 L= 3.36km, 펌프장・유수지 증설, 교량 13개소

차집관로 정비 3km

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2025년

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘20년	‘21년	‘22년 이후
27,722	2,400	2,000	252	23,070

□ 추진상황

❍ 문화재현상변경 심의 완료                           : 2020.  3.

❍ 건설기술심의 완료(道),행안부                           : 2021. 12.

❍ 조달 원가심사 및 계약요청                           : 2022.  5.

❍ 원가심사 완료 및 입찰공고                          : 2022.  9.

□ 향후 추진계획

❍ 공사 착공                                            : 2022. 11.

❍ 나주천 하류부(동점문 인근) 구간 정비 완료             : 2023.  8.

❍ 공사 준공                                            : 2025. 12.

▢ 참고자료 – 위치도

3		남평읍 하수도 중점관리지역 도시침수대응 사업

* 담당자 : 상하수도과장(우홍민), 하수시설팀장(박성용, 339-7671)

	사업목적
❍ 남평읍 일원의 침수피해 예방 ❍ 집중호우 시 상습침수 지역 피해 예방

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.

◦ 위    치 : 남평읍 남평리, 동사리 일원

◦ 사 업 량 : 우수관로 5.5km, 펌프장증설 380톤/분

◦ 총사업비 : 25,887,000천원(국 18,121,000, 시 7,766,000)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘19년	‘20년	‘21년 이후
25,887	4,641	3,494	1,602	16,150

□ 추진상황

❍ 중점관리지역 지정 및 하수도정비대책 승인	: 2016. 12.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수(‘19. 12. 완료)	: 2017.  3.

❍ 공공하수도 설치인가(전라남도)	: 2019. 10.

❍ 공사 총괄 착공	: 2019. 12

□ 기대효과

❍ 우수를 신속히 배제하여 도시침수 방지효과 및 쾌적한 생활환경조성

❍ 침수예방사업지역 내 수변공간 활용으로 토지의 부가가치 증대

❍ 하수관로 정비사업 등으로 공공수역의 수질 개선

□ 관련사진(위치도 등)

위 치 도

4		봉황 농어촌공사 204호선 확포장 공사

* 담당자 : 건설과장(이재관), 토목팀장(나철웅, 339-8891)

	사업목적
❍ 봉황면 욱곡리 일원 도로 확포장을 통한 효율적인 도로교통 처리 대책 마련 및 주민 교통 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 봉황면 욱곡리 1042-23 ~ 욱곡리 171-8

❍ 사업규모 : 도로 확·포장 L=1.6km, B=8.0m

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2023. 9.

❍ 사 업 비 : 45억원[공사비 29억(특교8, 도비5, 시비16), 부지매입 13억(시비13), 폐기물 등 3억(시비3)]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘19년	‘20년	‘21년 이후
4,500	130	684	2,100	1,586

□ 추진상황

❍ 총괄 및 1차분 공사 착공	: 2020. 03.

❍ 2차분 공사 착공(‘20. 12. 준공)	: 2020. 08.

❍ 3차분 공사 착공(‘21. 12. 준공)	: 2020. 11.

❍ 총괄분 공사 중지	: 2022. 01.

□ 기대효과

❍ 지역개발을 위한 도로 기반시설확충으로 지역 농업생산성 향상 및

주민생활편익 증진

❍ 마을간 연결 도로 확충을 통한 도로 통행 환경 개선

□ 관련사진(위치도 등)

농어촌도로204호선 확포장

L=1.60km, B=8.0m

봉황면사무소

5		반남 농어촌도로 201호선 확포장 공사

* 담당자 : 건설과장(이재관), 토목팀장(나철웅, 339-8891)

	사업목적
❍ 반남면 대안리 일원 도로 확포장을 통한 효율적인 도로교통 처리 대책 마련 및 주민 교통 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 반남면 대안리 704-2 ~ 대안리 194-6

❍ 사업규모 : 도로 확·포장 L=0.9km, B=8.0~9.0m

❍ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 40억원[공사비 35억(특교7, 시비28), 부지매입 5억]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
4,000	-	913	973	2,114

□ 추진상황

❍ 실시설계용역 착수(‘21. 5. 준공)	: 2020. 04.

❍ 총괄 및 1차분 공사 착공(‘21. 12. 준공)	: 2021. 03.

❍ 2차분 공사 착공(‘22. 3. 준공)	: 2021. 10.

❍ 3차분 공사 착공(‘22. 8. 준공)	: 2022. 03.

❍ 4차분 공사 착공	: 2022. 10.

□ 기대효과

❍ 지역개발을 위한 도로 기반시설확충으로 지역 농업생산성 향상 및

주민생활편익 증진

❍ 마을간 연결 도로 확충을 통한 도로 통행 환경 개선

□ 관련사진(위치도 등)

- 사업 위치도

- 계획평면도

6		영산강변 저류지 테마공원 조성사업

* 담당자 : 관광과장(김화영), 영산강국가정원조성T/F팀장(옥성관, 339-8701)

	사업목적
❍ 영산강 강변 저류지의 억새단지를 관광자원화 하여 관광객에게 볼거리와 휴식 공간을 제공하고 관광객 유치로 지역경제 활성화를 위함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 영산동 766-1번지 일원(영산강 강변 저류지 내)

❍ 사업규모 : 테마공원 조성 1식 (A=310,632㎡ / 약 9만평)

❍ 사업기간 : 2020. 1. 10. ~ 2024. 5. 16.

❍ 사 업 비 : 95억원

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
9,500	3,930	1,000	804	3,766

□ 추진상황

❍ 기본 및 실시설계 용역 추진       : 2018. 3. ~ 2020. 12.

❍ 공사발주(총괄 및 1차분)           : 2019. 11.

❍ 공사 일시중지(하천점용허가 반려)  : 2020. 1.

❍ 하천점용허가 변경 허가            : 2021. 6.

❍ 공사재개(총괄 및 1차분)            : 2021. 6.

❍ 공사 1차분 준공                    : 2022. 5.

❍ 공사 2차분 준공                    : 2022. 10.

□ 기대효과

❍ 영산강 저류지를 활용한 테마공원을 조성하여 체험 문화공간 조성 및

놀이시설 체험을 통해 관광객 유입과 지역경제 활성화에 기여

□ 관련사진(위치도 등)

□ 조감도

7		동강느러지 전망대 관광활성화 사업

* 담당자 : 관광과장(김화영), 관광개발팀장(강정석, 339-8711)

	사업목적
❍ 수려한 경관을 조망할 수 있는 한반도 지형 동강 느러지 주변 관광 기반시설 확충 및 관광객의 유입으로 인한 지역경제 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 동강면 옥정리 산 1번지 일원

❍ 사업규모 : 문화공원 조성(A=97,055㎡)

❍ 사업내용 : 쉼터, 산책로, 주차장, 진입로 확포장

❍ 사업기간 : 2021.  1. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 비 : 19.6억원

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘22년	‘23년	‘24년
1,960	200	600	-	1,160

□ 추진상황

❍ 기본계획 및 타당성조사 완료	: 2019.  4.

❍ 지방이양(균특) 문화관광자원개발 신규사업 확정	: 2020. 11.

❍ 사업 추진 관련 사전의견 청취(지역발전 협의회 등)	: 2021.  2.

❍ 도시관리계획, 환경 및 재해영향평가 용역 착수	: 2021.  5.

❍ 실시설계용역 착수	: 2021.  7.

❍ 동강면 주민 현장 설명회	: 2021.  9.

❍ 투자심사 완료	: 2021. 10.

❍ 공유재산 관리계획 동의(안) 승인	: 2022.  9.

❍ 토지 보상 협의	: 2022. 10.

□ 향후계획

❍ 토지보상 완료	: 2023.   3.

❍ 도시관리계획 시설 결정 및 실시설계 용역 완료	: 2023.   7.

❍ 사업 착공	: 2023.   9.

❍ 사업 준공	: 2024.  12.

□ 관련사진(위치도 및 계획평면도)

8		빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립사업

* 담당자 : 미래전략과장(정태진), 혁신도시지원팀장(이지연, 339-4681)

	사업목적
❍ 빛가람 혁신도시 정주여건 개선을 위해, 어린이와 가족을 위한 맞춤형 복합시설 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 빛가람동 383번지

❍ 사업규모 : 연면적 약 4,500㎡, 지하1층, 지상2층

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2024

❍ 사 업 비 : 158억원[국비79, 시비79] * 행안부(45억), 문체부(33.5억), 보건복지부(0.5억)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
15,784	-	3,203	9,480	3,101

□ 추진상황

❍ 주민의견수렵(선호도조사, 설문조사)	: 2020. 1.

❍ 지역사회활성화 기반조성 사업계획서 제출           : 2020. 10.

❍ 전라남도 지방재정 투자심사(조건부: 2단계심사)	: 2020. 11.

❍ 공공건축 기획용역 시행(2021. 12. 완료)	: 2020. 12.

❍ 공공건축 사업계획 사전검토(건축공간연구원)	: 2021. 3.

❍ 국유지 매입 불가로 사업부지 변경 계획 수립        : 2021. 9.

❍ 사업대상지 변경에 따른 주민설명회 개최            : 2021. 9.

❍ 도시관리계획 변경 용역 착수(용역 중지 중)                : 2021. 10.

❍ 나주시 공공건축 심의위원회 심의 완료              : 2021. 11.

❍ 전라남도 기본 및 실시설계용역 계약심사 완료       : 2021. 11.

❍ 생활SOC복합센터 건립 추진협의체 구성 및 1차 회의 : 2022. 1.~2.

❍ 공유재산 관리계획 수립(회계과, 나주시의회)            : 2022. 2.

❍ 생활SOC복합센터 건립 건축 설계공모             : 2022. 2. ~4.

❍ 사업추진 설명 1차(빛가람동 주민자치회)	: 2022. 3.

❍ 당선작 선정, 기본 및 실시설계 용역 착수          : 2022. 4.

❍ 설계공모 결과 설명 2차(빛가람동 주민자치회)	: 2022. 4.

❍ 설계 진행사항 설명 3차(빛가람동 주민자치회)	: 2022. 6.

❍ 설계의 경제성 등 검토(VE)용역 시행              : 2022. 7.

❍ 설계의 경제성 등 검토(VE)용역 워크숍            : 2022. 8.

❍ 사업추진 점검 회의, 건립추진협의체 회의(2차)      : 2022. 8.

* 도서관 규모 확장(3층) 필요성 제기

❍ 생활SOC복합센터 건립 주민설명회(LH2단지 주민대상)	: 2022. 9.

❍ 설계용역 보완(3층 증축 대비 2층 설계 구조보강 등)	: 2022.10.

□ 향후계획

❍ 기술심의, 건축인허가, BF인증 등 행정절차 이행     : 2022.11.~2023.5.

❍ 원가 심사 및	공사 발주	: 2023. 5.

□ 위 치 도

9		영산포권 도시재생사업

* 담당자 : 도시과장(노세영), 도시재생팀장(정찬종, 339-8181)

	사업목적
❍ 영산포구 근대문화유산을 활용하여 지역상권 활성화와 일자리를 창출하고 노후불량주택 및 골목길 정비를 통한 주민 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 근대유산과 더불어 상생하는 영산포 도시재생

❍ 위    치 : 나주시 영산동 130-2번지 일원

❍ 사업면적 : 110,000㎡

❍ 전략목표 : 역사 문화 자원의 현대화, 주민일자리 창출사업 추진, 중심시가지 상권 활성화, 주거복지&커뮤니티 환경개선

❍ 주요내용 : 영산포 상생센터 등 14개 사업

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023

❍ 사 업 비 : 189.1억원[93억(국비), 15.5억(도비), 80.6억(시비),]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	‘19년	‘20년	‘21년 이후
18,910	2,292	1,124	15,494

□ 추진상황

❍ 도시재생 활성화계획 승인	: 2019. 12.

❍ 공사 준공	: 2020. 12.

- 영산동 주차장 조성

❍ 공사 준공	: 2021.  12.

- 셉테드안전교통 사업, 죽전골목 정비, 노인복지관 유니버설디자인, 옹벽타일벽화

❍ 공사 착공	: 2022.   4.

- 죽전골목 상생상가, 근대시간여행관 정원조성

□ 기대효과

❍ 근대유산을 활용한 지역상권 활성화 및 일자리 창출

❍ 주택 및 골목길 정비를 통한 정주여건 개선

❍ 주민주도의 상생협의체 육성과 역량강화로 지속가능한 도시재생 도모

□ 사업계획도

구상도

10		읍성권 도시재생사업

* 담당자 : 도시과장(노세영), 도시재생팀장(정찬종, 339-8181)

	사업목적
❍ 사업대상지 내 공·폐가를 혁신도시 이전기관의 첨단산업과 연계한 나주시 근대 역사문화거점 공간으로 조성하고 로컬푸드 산업의 육성을 통한 주민 일자리 및 소득 창출

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 현대화로 재조명한 역사문화 복원도시

❍ 위    치 : 나주시 죽림동 32번지 일원

❍ 사업면적 : 194,016㎡

❍ 전략목표 : 역사 문화 자원의 현대화, 주민일자리 창출사업 추진, 중심시가지 상권 활성화, 주거복지&커뮤니티 환경개선

❍ 주요내용 : 학생운동길 역사문화거리 조성 등 15개 사업

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023

❍ 사 업 비 : 250억원[150억(국비), 100억(시비),]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	‘19년	‘20년	‘21년 이후
25,000	5,992	3,400	15,608

□ 추진상황

❍ 도시재생 활성화계획 승인	: 2019. 12.

❍ 공사 착공	: 2020.  4.

- 남외동 주차장 조성, 죽림동 CCTV 설치, 지적재조사 사업

❍ 공사 착공	: 2021.  11.

- 문화예술소통창작소, 게스트하우스

❍ 공사 착공	: 2022.   5.

- 쌈지공원 시굴조사 용역, Co-working 스페이스 조성, 청춘스트리트몰

□ 기대효과

❍ 구도심과 혁신도시와의 연계를 통한 근대 역사문화거점 공간 조성

❍ 쾌적한 주거환경 조성 및 편의시설 확보로 정주여건 개선

❍ 지역특화상품 개발로 주민소득 증대 및 일자리 창출

□ 사업계획도

구상도

11		광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립

* 담당자 : 체육진흥과장(노부기), 체육시설관리팀장(김중원, 339-4521)

	사업목적
❍ 정주 인프라 및 기업지원 시설 확충과 발전재단 설립지원으로 혁신도시 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 빛가람동 199번지

❍ 사업규모 : 부지 8,832.4㎡, 지하1/지상5층, 연면적 21,000㎡

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년

❍ 사 업 비 : 680억원[국비 190, 광역 100(도비 50, 광주 50), 시비 390]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
68,000	13,185	6,100	16,200	32,515

□ 추진상황

❍ 타당성조사 완료	: 2019. 7.

❍ 지방재정 투자심사 통과	: 2019. 11.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2021. 5.

❍ 감독권한대행 등 건설사업관리용역 착수    : 2021. 6.

❍ 중앙투자심사 2단계 완료	: 2021. 10.

❍ 설계안전성 검토(국토안전관리원) 완료      : 2022.  1.

❍ 건축허가 완료	: 2022.  9.

❍ 조달계약 요청(건축공사)	: 2022. 10.

❍ 공사 착공 및 준공(*공사기간 26개월)	: 2023.  3. ~ 2023. 5.

□ 기대효과

❍ 문화·체육·교육 등 복합문화공간 조성을 통한 시민의 삶의 질 향상

❍ 혁신도시 발전재단의 사무공간 마련을 통한 혁신도시 시즌2의 발판 마련

□ 관련사진(위치도 등)

위 치 도

건축위치

한국전력공사

국립전파

연 구 원

우정사업정보센터

전파진흥원

한국KDN

빛가람

호수공원

중흥 1차

중흥 2차