		2021년 지방자치단체 재정공시 편람

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 나주시에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
동수·오량농공단지 복합문화센터 건립사업	4,000	-	7	170	3,823	2024년	2022	10
나주 혁신산단 폐기물시설 부지매입	5,900	-	-	5,900	-	2023년	2022	70
빛가람혁신도시 생활SOC 복합센터 건립	22,170	2,086	710	15,004	4,370	2025.1.	2020.11. 2022.10.	35
산업용 드론 기업육성을 위한 기반구축 및 실증시범사업	12,644	9,897	2,747	0	0	2022	2019	100
저압직류 핵심기기 인증 지원센터 기반구축	16,489	-	4,690	3,095	6,195	2025	2021	40
전남 나주 강소연구개발특구 운영	21,600	7,200	5,700	2,900	5,800	2025	2021	60
도시가스 공급 지원사업	22,437	1,028	2,127	-	19,282	2025	2021	40
남도의병역사박물관 건립 지원사업	5,400	-	640	3,300	1,460	2025	2022	11
반남 농어촌도로 201호선 확포장공사	3,500	913	1,453	721	413	2024	2020	78
봉황 농어촌도로 204호선 확포장 공사	3,200	2,330	423	447		2023	2017	84
노안면 도산리 마을간 연결도로 확·포장공사	2,100	-	100	1,000	1,000	2024	2022	10
나주 종합스포츠파크 외곽 도시계획도로 개설	4,200	-	12.6	4.9	4,182.5	2028	2022	1
금천면소재지~ 혁신도시간 도시계획도로 개설	7,900	-	-	-	7,900	2027	2022	0
공공하수처리시설 악취방지시설 설치사업	1,692	100	1,132	460	-	2023.3.	2020	100
영산강변 저류지 테마공원 조성 사업	9,500	4,294	1,000	1,440	3,766	2024	2022	50
나주시 가족센터 및 주거지주차장 건립	10,226	3,437	6,461	328	-	2022	2019	100
농산물 산지유통센터 (APC) 지원	6,900	-	-	-	-	사업포기	2021	-
고품질 쌀 유통활성화 사업	20,999	0	15,226	5,773	0	2023	2021	100
가축분뇨 공동자원화 시설 증축 개보수 지원사업	3,000	-	-	3,000	-	2023	2022	50
바람길숲 조성사업	20,000	7,937	10,186	1,877	-	2023	2019	90

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동수·오량농공단지 복합문화센터 건립사업

담당자

일자리경제과 강승구(☎339-8323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동수·오량 농공단지의 산업단지 복합문화센터를 건립함으로써 근로자들의 근로환경을 개선

○ 근로자와 지역주민들의 공동체 공간을 만들어주어 지역상생을 도모하고 청년 인구 유입을 유도함으로 지역발전 및 노후산단에 새로운 활력을 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)

○ 위 치 : 운곡동 174-27 외 1필지

○ 규 모 : 건축 연면적 1,100㎡(±5% 이내), 건축물(3층) 1동

- 근린생활시설(1동) : 세미나실, 프로그램실, 동아리방 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	0	7	170	3,823
국 비	2,800	-	6	163	2,631
시 도 비	360	-	1	2	357
시군구비	840	-	-	5	835
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 복합문화센터 건립사업 추진계획 수립	: 2021. 7.

○ 복합문화센터 건립사업 공모 선정	: 2021. 9.

○ 협약체결(전남도, 나주시, 산업단지공단)	: 2021. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역계약 및 착수	: 2023. 2.

○ 입주협의회 설명회 개최	: 2023. 3.

□ 향후계획

○ 실시설계 완료	: 2023. 6.

○ 행정절차(계약심사, 설계심의, BF인증 등) 이행	: 2023. 7.

○ 공사 준공	: 2024. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주 혁신산단 폐기물시설 부지매입

담당자

일자리경제과 김영상(☎339-8324)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신산단 내 발생 폐기물 처리(매립)를 위해 조성된 부지 중 1필지를 매입하여 산업용지로 전환 후 공급

○ 산단 미분양용지 분양에 따른 이자부담 경감(약 3.1억원)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2023년(2년간)

○ 위 치 : 동수동 404-3번지 일원

○ 규 모 : 폐기물처리부지 15,077㎡(4,560평) 매입 후 산업용지로 전환 및 분양

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,900	0	0	5,900	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,900	-	-	5,900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 폐기물 처리부지 매입	: 2023. 1.

○ 환경보전방안 검토 용역 착수	: 2023. 4.

○ 실시계획 변경 용역 착수	: 2023. 5.

□ 향후계획

○ 관리기본계획 변경(폐기물처리시설 부지→산업용지)	: 2023. 9.

○ 산업용지 매각 및 매각대금 세입조치	: 2023. 10.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

빛가람혁신도시 생활SOC 복합센터 건립

담당자

미래전략과 윤지은(☎339-7852)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신도시 정주여건 개선 및 어린이, 가족 서비스 수요 증가에 따른 문화시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간: 2021. 1. ~ 2025. 1.

○ 위 치: 전라남도 나주시 빛가람동 383번지

○ 규 모: 연면적 4,639.34㎡, 지하1~지상2층

(어린이도서관, 육아종합지원시설, 지역상생푸드마켓 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 22,170백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	22,170	2,086	710	15,004	4,370
국 비	7,907		710	7,147	50
시 도 비
시군구비	14,263	2,086		7,857	4,320
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 기본 및 실시설계 용역: ‘22. 4. ~ ’23. 7.

○ 전라남도 건설기술심의(총 공사비 100억 이상): ‘23. 3.

○ 나주시 계약심의(건축공사, 건설사업관리용역): ’23. 4.

○ 시공단계 건설사업관리계획 수립: ‘23. 4.

○ 건설사업관리용역 전라남도 계약심사: ‘23. 6.

□ 향후계획

○ 건축공사 및 건설사업관리 용역 착수: ‘23. 8.

○ 공사 착공 및 준공: ’23. 9. ~ ‘25. 1.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
사업규모	4,480㎡	4,639.34㎡
총 사업비	17,886	22,170
사업기간	2021. 1. ~ 2023. 12.	2021. 1. ~ 2025. 1.

※ 원자재값 상승, 설계 변경(구조, 기계·설비 등 보강)으로 사업비 증

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산업용 드론 기업육성을 위한 기반구축 및 실증시범사업

담당자

미래전략과 김선영

(☎339-4663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 드론 산업 생태계를 조성하여 강소기업 육성을 통한 신개념 비즈니스모델 발굴 및 상용 서비스 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 전남드론산업지원센터(나주시 빛가람로 777)

○ 주 체 : 산업통상자원부, 전라남도, 나주시

○ 수 행 : 주관-전남정보문화산업진흥원, 참여-한전, 한국정보통신기술협회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,644	9,897	2,747	-	-
국 비	6,144	4,772	1,372
시 도 비	2,500	2,000	500
시군구비	2,500	2,000	500
지 방 채	-	-	-
민간자본	1,500	1,125	375
기 타	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 6개 단위사업 완료

- 센터구축, 장비구축, 표준활용, 인력양성, 정보구축, 보급확산

□ 향후계획

○ 국비 정산 : ’23. 8.~9.

○ 지방비 정산 : ’23. 10.~11.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

저압직류 핵심기기 인증 지원센터 기반구축

담당자

에너지신산업과 이승훈

(☎339-8372)

□ 사업목적 및 -필요성

○ 직류수용가용 핵심기기 및 직류 배전에 연계되는 직류 분산전원 시스템의

성능 검증 및 신뢰성 확보를 위한 인증지원 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. ~ 2025. 12.(4년 9개월)

○ 위 치 : 나주시 동수동 391-10(나주혁신산단 내)

○ 규 모 : 인증지원센터 건립, 시험평가장비(47종) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,489백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,489	2,509	4,690	3,095	6,195
국 비	8,430	1,930	2,070	1,175	3,255
시 도 비	2,400	80	880	600	840
시군구비	3,600	120	1,320	900	1,260
지 방 채	0
민간자본	2,059	379	420	420	840
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 산업부 공모 선정 및 협약 체결                         : 2021. 5.

○ 성능검증 시험장비(11종) 구축                           : 2021. 12.

○ LVDC 산학연 전문가 협의체 구성 및 분기별 운영       : 2022. 2.

○ 인증지원센터 입찰공고 및 적격심사                     : 2022. 7.

□ 향후계획

○ 인증지원센터 건축 준공(연면적 1,369㎡, 지상 2층)        : 2023. 2.

○ 3차년도 구축장비(1종) 구축                            : 2023. 9.

○ KOLAS 공인인증시험 기관 신청                        : 2023. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

강소연구개발특구 육성사업

담당자

에너지신산업과 김윤곽

(☎339-8363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남 나주의 한국전력공사를 중심으로 지능형 태양광․에너지저장 등의         R&D역량 강화 및 산․학․연 협력을 통한 기술이전 사업화 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2025.

○ 위 치 : 혁신도시 산학연클러스터, 혁신산단 일부 등

○ 규 모 : 1.69㎢(51만평) (기술핵심기관 0.26㎢, 배후공간 1.43㎢)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,600	7,200	5,700	2,900	5,800
국 비	16,000	6,000	4,000	2,000	4,000
시 도 비	1,680	360	510	270	540
시군구비	3,920	840	1,190	630	1,260
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 강소특구 육성사업 지방비 출연 협약                   : 2021. 5.

○ 에너지신산업 융복합 얼라이언스 업무협약              : 2021. 6.

○ 2021년 강소연구개발특구 지방비 출연                  : 2021. 6.

○ 에너지분야 강소특구 업무 협약                        : 2022. 11.

○ 2022년 강소연구개발특구 지방비 출연                  : 2022. 6.

○ BIXPO 연계 강소특구 미래발전 포럼 개최              : 2022. 11.

□ 향후계획

○ 강소연구개발특구 지방비 출연                         : ~ 2025.

○ 강소특구 연차평가 실적 보고                          : 매년

○ 에너지신산업 융복합 얼라이언스 회의                  : 반기마다

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시가스 공급지원사업

담당자

에너지신산업과 장강진

(☎339-8384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공급효율이 낮은 저밀도 주거지역 주민들의 도시가스 공급 민원 해소

○ 주민의 에너지 복지 증진 및 주거환경 개선을 위한 도시가스 보급 확대 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~2025년(5년)

○ 위 치 : 나주시 8개 지역(다시·금천·산포·노안면, 원도심 추가구간 등)

○ 규 모 : 배관연장 63km / 수혜가구 1,577세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,437백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	22,437	1,028	2,127	-	19,282
국 비
시 도 비
시군구비	22,437	1,028	2,127	-	19,282
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 나주시 도시가스 보급 2차 5개년 추진계획 수립(2021~2025)      : 2020. 9.

○ 2021년도 도시가스 공급지원사업 계획 수립                : 2021. 1.

○ 2021년도 도시가스 공급(166세대)                         : 2021. 11.

○ 2022년도 도시가스 공급지원사업 계획 수립                : 2022. 4.

○ 2022년도 도시가스 공급(255세대)                          : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 2022년도 도시가스 공급지원사업 보조금 정산              : 2023. 9.

□ 사업변경 내역

○ 2025년까지 추진계획을 수립하여 연차적으로 추진하였으나 사업비가 과다하고 경제성이 낮아 예산확보가 어려움.

○ 향후 다량의 가스 공급처 및 중대형 아파트 건설계획에 따라 도시가스 공급지원사업 추진할 계획임.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남도의병역사박물관 건립 지원 사업

담당자

문화예술과 이소담(☎339-4642)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남은 전국에서 의병활동(임진왜란, 한말)이 가장 활발했던 지역으로,

의병정신을 계승하는 ‘의향(義鄕)’으로서의 전남의 정체성 확립 공간 필요

○ 전국 897개 박물관 중 의병박물관은 소규모의 ‘의령의병박물관’, ‘제천의병

전시관’ 두 곳 밖에 없고, 의병활동과 유적이 많은 전남에는 전무한 실정.

* 1909년 국내 교전 의병수의 45.5%가 전남 의병(17,579명/전국 38,593명)

○ 200만 도민의 염원을 담아 호남의병의 구국 충혼을 기리고 의병정신을

계승하기 위해 건립하는 ‘남도의병역사박물관(역사공원) 건립’ 사업대상지

공모에 나주시가 1순위로 선정됨에 따라 선조 의병의 의로운 희생정신을

기릴 수 있는 공간으로서의 입지 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 9월 ~ 2025년 6월

○ 위 치 : 나주시 공산면 신곡리 산23-3번지 일원

○ 규 모 : 토지매입 및 분묘이장비 1,788백만원/ 도시계획변경 1,035백만원 /

지장물 철거비 531백만원 / 엘리베이터 설치비 2,066백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	5,400	-	640	3300	1460
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

○ 남도의병역사박물관 조성 관련 분묘조사 용역 실시        : `21. 12.  7.

○ 사업부지 도시관리계획 변경 용역 착수                   : `22.  5. 27.

○ 남도의병역사박물관 건립 지원 지장물 철거공사 설계용역 착수  : `22. 12. 22.

□ 향후계획

○ 사업부지 협의 매수 및 분묘 이장 관련 관계자와 지속 면담 추진     : `23. 7. ~

○ 지장물 철거 공사 계약 의뢰                                : `23. 8. ~

○ 문화시설(엘리베이터) 설치 추진                             : `24. 1. ~

□ 사업변경 내역

○ 당초: 총 사업비 5,400백만원

(토지매입 및 분묘이장비 1,788/ 도시계획변경 1,035 / 지장물 철거비 531백만원 / 엘리베이터 설치비 2,066)

○ 현재: 총 사업비 8,757백만원

(토지매입 및 분묘이장비 3,031/ 도시계획변경 660 / 지장물 철거비 3,000백만원 / 엘리베이터 설치비 2,066)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

반남 농어촌도로 201호선 확포장공사

담당자

건설과 박연제(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌 도로개설로 지역간 이동 편리성 확보 및 지역균형 발전 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024

○ 위 치 : 나주시 반남면 대안리 1531-1번지 일원

○ 규 모 : 도로확포장  L=0.8km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500	913	1,453	721	413
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	-	-	500	-
시군구비	2,300	913	753	221	413
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	700	-	700	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 2021.  5. : 총괄 및 1차분 착공

○ 2021. 12. : 1차분 준공

○ 2022.  3. : 2차분 준공

○ 2022.  9. : 3차분 준공

○ 2023.  4. : 4차분 준공

□ 향후계획

○ 2023.  9. : 5차분 착공

○ 2024. 12. : 총괄분 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

봉황 농어촌도로 204호선 확포장 공사

담당자

건설과 박연제(☎339-8892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌 도로개설로 지역간 이동 편리성 확보 및 지역균형 발전 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2023

○ 위 치 : 나주시 봉황면 욱곡리 171-16번지 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=1.6km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,200	2,330	423	447
국 비
시 도 비	498	447	51
시군구비	1,902	1,083	372	447
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	800	800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

○ 2020.  3. : 총괄 및 1차분 착공

○ 2020.  7. : 1차분 준공

○ 2020. 12. : 2차분 준공

○ 2021.  9. : 3차분 준공

○ 2022. 12. : 4차분 준공

○ 2023.  5. : 5차분 준공

□ 향후계획

○ 2023.  9. : 5차분 착공

○ 2024. 12. : 총괄분 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

노안면 도산리 마을간 연결도로 확·포장공사

담당자

도시과 임주혁(☎339-8984)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 마을 진입로 확보로 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 전라남도 나주시 노안면 도산리, 유곡리 일원

○ 규 모 : 연결도로 확포장 L=800m, B=5.0→8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,100	-	100	1,000	1,000
국 비	1,050	-	50	500	500
시 도 비	1,050	-	50	500	500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022년  5월: 도시관리계획결정(도로) 용역 발주

○ 2022년  8월: 개발제한구역 관리계획 미반영시설 사전협의 2차(전남도청)

□ 향후계획

○ 2023년 12월: 도시계획시설 결정 (국토부)

○ 2024년  3월: 공사착공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주 종합스포츠파크 외곽 도시계획도로 개설

담당자

도시과 최철주(☎339-8983)

□ 사업목적 및 필요성

○ 종합스포츠파크와 외곽도로의 직접 연결 도로망 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.4. ~ 2028. 12.

○ 위 치 : 전라남도 나주시 송월동 234-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=663m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,200	-	12.6	4.9	4,182.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 도시관리계획 및 실시설계용역 착수(2022.4.)

○ 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가 용역 착수(2022. 12.)

□ 향후계획

○ 도시관리계획 및 실시설계용역 준공

○ 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가 용역 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

금천면소재지∼혁신도시간 도시계획도로

개설

담당자

도시과 최철주(☎339-8983)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금천면소재지와 혁신도시간 상생발전을 위한 직접 연결 도로망 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 금천면 오강리 84번지~ 석전리 131-3번지

○ 규 모 : 도로개설 L=1900m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,900				7,900
국 비
시 도 비
시군구비	7,900	-	-	-	7,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 계약심사(나주시 감사실)의뢰 및 완료 2022.6.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 발주

○ 토지보상

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주 공공하수처리시설 악취방지시설 설치사업

담당자

상하수도과 이창원(☎339-7653)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장에 적합한 악취방지시설을 설치함으로써 하수처리장의 쾌적한

환경조성과 지역주민의 생활환경을 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 나주시 가야길 55(나주 공공하수처리장 내)

○ 규 모

- 악취확산 개구부 밀폐형 덮개 설치

- 침사지 복개 1식

- 악취포집배관(L=270m) 및 탈취기(400㎥/분) 1대 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,692백만원(국 846, 도 169.2, 시 676.8)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,692	100	1,132	460	-
국 비	846	50	566	230	-
시 도 비	169.2	10	113	46.2	-
시군구비	676.8	40	453	183.8	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.  1. : 실시설계 용역 착수

○ 2021.  7. : 재원협의 및 총사업비 변경(영산강유역환경청)

○ 2021.  9. : 건설공사 기술자문(나주시 건설과)

○ 2021. 12. : 도 계약심사(전라남도 회계과)

○ 2022.  1. : 계약체결 및 착공

○ 2023.  3. : 시험가동 및 준공

□ 향후계획

○ 사업비 정산 및 반납

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

영산강변 저류지 테마공원 조성사업

담당자

영산포발전기획단 박솔(☎339-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강 강변 저류지의 억새단지를 관광자원화 하여 지역주민은 물론 관광객들에게 볼거리와 휴식 공간을 제공과 관광객 유치로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 1월 ~ 2024년 6월

○ 위 치 : 영산동 766-1번지 일원(영산강변 저류지)

○ 규 모 : 테마공원 조성(310,632㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,500	4,294	1,440	2,000	1,766
국 비	2,860	2,860	-	-	-
시 도 비	2,283	-	400	1,000	883
시군구비	4,357	1,434	1,040	1,000	883

□ 추진상황(공사 공정률 : 50%)

○ 기본 및 실시설계 용역 발주  : 2018.  3.

○ 기본 및 실시설계 용역 준공  : 2019. 12.

○ 공사 착공                   : 2020.  1.

○ 공사 추진 중                : 2023.  8.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2024. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2018년 1월 ~ 2023년 12월 → 변경 2018년 1월 ~ 2024년 6월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나주시 가족센터 및 주거지주차장 건립

담당자

사회복지과 안민지(☎8487)

회  계  과 김을희(☎8692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 종합가족복지서비스의 수요 충족과 시 청사 주변의 부족한 주차 공간 문제

해결을 위해 가족센터 및 주거지주차장 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.(3년)

○ 위 치 : 나주시 송월동 1099-2, 1099-3번지

○ 규 모 : 부지면적 1,816㎡ / 총 연면적 5,945㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,226	3,437	6,461	328	0
국 비	3,900	2,434	1,138	328
시 도 비	0	0	0
시군구비	3,826	689	3,137
지 방 채	2,500	314	2,186
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 가족센터 및 주거지주차장 건립 사업 확정(균형위)	: 2019. 10.
○ 재정투자심사 승인 및 공유재산관리계획 반영	: 2019. 11.~12.
○ 공공건축 사업계획 사전검토	: 2020. 2.
○ 사업수행능력평가 및 기본‧실시설계 용역 착수	: 2020. 4.~6.
○ 선진지 견학, 컨설팅 등 기본설계 추진	: 2020. 7.~9.
○ 기본설계, 공법(특허)심의, 경관심의 완료	: 2020. 10.~12.
○ 기술심의 완료 및 용역 최종보고회	: 2021. 3.~4.
○ 건축허가 및 계약심사	: 2021. 4.~7.
○ 공사 발주 및 착공	: 2021. 8.
○ 기계설비 공사 1차 준공	: 2022. 5.
○ 기계설비 공사 2차 착공	: 2022. 6.
○ 공사 준공	: 2022. 10.
○ 기자재 구입 및 내부 인테리어(전기) 공사 완료	: 2023. 2.~6.
○ 개관식	: 2023. 6.

□ 향후계획

○ 가족센터의 효율적 운영 및 주거지주차장 이용에 불편함이 없도록 정기

관리･감독 실시

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고품질 쌀 유통활성화 사업

담당자

배원예유통과 김미순(☎339-7332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 농협RPC를 통합하여 규모의 경제를 실현하고, 벼 가공시설

현대화를 통한 고품질쌀 생산체계를 구축하여 나주쌀 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2023년

○ 위 치 : 나주시 동강면 월양리 150-3, 나주시 다도면 송학리 131-1

○ 규 모 : 가공현대화시설(1식), 벼 견조·저장시설(2식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,999백

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,999		15,226	5,773
국 비	7,147		5,176	1,971
시 도 비	1,072		776	296
시군구비	4,288		3,105	1,183
지 방 채
민간자본	8,492		6,169	2,323
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○고품질쌀 유통 활성화사업 확정                   : ’22. 1.

○나주시 통합RPC 시설공사 착공                   : ’22. 5.

○나주시 통합RPC 준공                            : ’23. 5.

□ 향후계획

○ 고품질쌀 유통 활성화 사업 보조금 정산          : ’23. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비: 당초 17,868백만원(국 7,147, 도 1,072, 시 4,288, 자담 5,361)

⇒  변경 20,999백만원(국 7,147, 도 1,072, 시 4,288, 자담 8,492)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가축분뇨 공동자원화 시설

지원사업(증축·개보수)

담당자

축산과 김진호(☎339-7632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후화된 가축분뇨 공동자원화 시설 개보수 및 교체를 통한 분뇨처리 효율 증대 및 악취 저감 효과

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1. ~ 2023. 12. (2022년 사업 사고이월 추진중)

○ 위 치 : 나주시 왕곡면 나주서부로 844

○ 규 모 : 50㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년	2024년 이후
계	3,000			1,200
국 비	1,200	-	-	1,200	0
시 도 비
시군구비	900	-	-		900
지 방 채
민간자본
기 타	900	-	-		900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 보조금 교부결정 : 2022. 11.

○ 가축분뇨처리시설 설치 공사 계약 체결 : 2023. 5.

○ 예산조기집행을 위한 선급금 지급 : 2023. 6. (1,200백만원)

○ 액비저장탱크 설치완료 및 악취포집기 제작완료

□ 향후계획

○ 액비 정화시설 설치 및 악취포집기 설치 완료 : 2023. 11월 한

○ 보조금 지급 및 정산 : 2023. 12월 한

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

바람길숲 조성사업

담당자

빛가람시설사업소 공원녹지팀 김주영(☎339-2613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지, 악취 등의 대기오염을 개선하여 생활권 주변의 숲으로서의

생태적 기능을 회복하여 녹색도시 건설

○ 전국 10개 혁신도시 중 정주여건 최하위권으로 바람길숲 조성을 통해 산책·휴양을 할 수 있는 녹색도시에 걸맞은 환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 일원

○ 규 모 : 바람연결숲, 공해차단숲, 순환가로연결숲 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,000	7,937	10,186	1,877
국 비	10,000	7,437	2,410	153	-
시 도 비
시군구비	6,000	500	3,776	1,724	-
지 방 채	4,000		4.000		-
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 12. ~ 2020. 11.

○ 공사 계약 및 준공(총괄분)   : 2021. 4. ~ 2022. 12.

○ 공사 계약 및 착공(추가분)   : 2023. 1. ~ 2023. 12.

□ 향후계획

○ 공사 준공(추가분) : 2023. 11월 중

10-2. 지방채 발행사업

우리 나주시에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립	68,000	16,800	19,000	5,000	27,200	-	16,800 (‘21년 차입 3,600)	55
자연재해위험 개선지구 정비사업(삼도)	22,934	4,000	9,440	-	9,494	-	4,000	100
자연재해위험 개선지구 정비사업(남평1)	11,214	2,000	4,957	-	4,257	-	2,000	100
나주시 가족센터 및 주거지주차장 건립	10,226	2,500	3,900	-	3,826	-	2,500	100
바람길숲 조성사업	20,000	4,000	10,000	-	6,000	-	4,000	90

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립

담당자

체육진흥과 정희정(☎339-4525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공기관 이전 완료 및 혁신도시 내 인구유입 증가에 따라 혁신도시의        낮은 정주여건 문제 대두로 기존 도시개발전략과 차별화 된 행정, 문화, 체육       등이 복합화 된 복합혁신센터 건립 필요성 대두

○ 혁신도시 시즌2를 이끌어 갈 혁신도시발전재단의 사무공간 마련 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2025.

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 199번지

○ 규 모 : 지하1층 지상5층 연면적 21,091㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 68,000백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	68,000	9,860	3,113	10,335	44,692
국 비	19,000	9,000	3,000	7,000	-
시 도 비	5,000	360	13	3,335	1,292
시군구비	27,200	500	100	-	26,600
지 방 채	16,800		-	-	16,800
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2022. 12.   : 공사 계약 완료

○ 2023.  3.   : 공사 착공

○ 2023.  8.   : 기초(파일)공사 진행 중(8월 말 완료 예정)

□ 향후계획

○ 2025.  5.   : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

삼도 자연재해위험개선지구 정비사업

담당자

안전재난과 장인원(☎7285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼도(토계)동 일원에 항구적인 방재시설 설치로 주택 및 농경지 침수피해 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 나주시 삼도동, 토계동 일원

○ 규 모 : 배수펌프장 증설(Q=550㎥/min), 하천정비 L=1.43km, 교량 4개소,               수로박스 L=61m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,934백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액	향후 소요액
		기투자	2022년	2023년 이후
계	22,934	19,664	3,270	0
지 방 채	4,000	2,520	1,480
국 비	9,440	9,440
시 도 비
시군구비	9,494	7,704	1,790
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2010.  6.  1. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 680,000㎡)

○ 2016.  5. 24. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18. 12. 11. 완료)

○ 2019.  1. 14. : 1차분 공사 착공 (‘19. 12. 9. 준공)

○ 2020.  2. 17. : 2차분 공사 착공 (‘20. 12. 31. 준공)

○ 2021.  4. 19. : 3차분 공사 착공 (‘22. 11. 30. 총괄 및 3차분 준공예정)

○ 2022. 11. 21. : 총괄 및 3차분 준공

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

남평1 자연재해위험개선지구 정비사업

담당자

안전재난과 장인원(☎7285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남평읍 서산리 일원에 항구적인 방재시설 설치로 주택 및 농경지 침수피해 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 8.

○ 위 치 : 나주시 남평읍 서산리 일원

○ 규 모 : 배수펌프장 신설(Q=50㎥/min), 하천정비 L=430m, 교량 3개소,                배수로정비 L=680m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,214백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액	향후 소요액
		기투자	2022년	2023년 이후
계	11,214	8,941	2,273	0
지 방 채	2,000	510	1,490
국 비	4,957	4,957
시 도 비
시군구비	4,257	3,474	783
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  6. 19. : 재해위험지구 지정 / “가”등급(면적 164,700㎡)

○ 2017.  4. 25. : 기본 및 실시설계용역 착수 (‘18. 12. 21. 완료)

○ 2019.  6. 26. : 1차분 공사 착공 (‘20. 5. 19. 준공)

○ 2020.  2. 17. : 2차분 공사 착공 (‘20. 12. 21. 준공)

○ 2021.  4. 19. : 3차분 공사 착공

○ 2022.  8. 31. : 총괄 및 3차분 준공

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

나주시 가족센터 및 주거지주차장 건립

담당자

사회복지과 안민지(☎8487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 종합가족복지서비스의 수요 충족과 시 청사 주변의 부족한 주차 공간 문제

해결을 위해 가족센터 및 주거지주차장 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.(3년)

○ 위 치 : 나주시 송월동 1099-2, 1099-3번지

○ 규 모 : 부지면적 1,816㎡ / 총 연면적 5,945㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,226	3,437	6,461	328	0
국 비	3,900	2,434	1,138	328
시 도 비	0	0	0
시군구비	3,826	689	3,137
지 방 채	2,500	314	2,186
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 가족센터 및 주거지주차장 건립 사업 확정(균형위)	: 2019. 10.
○ 재정투자심사 승인 및 공유재산관리계획 반영	: 2019. 11.~12.
○ 공공건축 사업계획 사전검토	: 2020. 2.
○ 사업수행능력평가 및 기본‧실시설계 용역 착수	: 2020. 4.~6.
○ 선진지 견학, 컨설팅 등 기본설계 추진	: 2020. 7.~9.
○ 기본설계, 공법(특허)심의, 경관심의 완료	: 2020. 10.~12.
○ 기술심의 완료 및 용역 최종보고회	: 2021. 3.~4.
○ 건축허가 및 계약심사	: 2021. 4.~7.
○ 공사 발주 및 착공	: 2021. 8.
○ 기계설비 공사 1차 준공	: 2022. 5.
○ 기계설비 공사 2차 착공	: 2022. 6.
○ 공사 준공	: 2022. 10.
○ 기자재 구입 및 내부 인테리어(전기) 공사 완료	: 2023. 2.~6.
○ 개관식	: 2023. 6.

□ 향후계획

○ 가족센터의 효율적 운영 및 주거지주차장 이용에 불편함이 없도록 정기

관리･감독 실시

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

바람길숲 조성사업

담당자

빛가람시설사업소 공원녹지팀 김주영(☎339-2613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지, 악취 등의 대기오염을 개선하여 생활권 주변의 숲으로서의

생태적 기능을 회복하여 녹색도시 건설

○ 전국 10개 혁신도시 중 정주여건 최하위권으로 바람길숲 조성을 통해 산책·휴양을 할 수 있는 녹색도시에 걸맞은 환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 나주시 빛가람동 일원

○ 규 모 : 바람연결숲, 공해차단숲, 순환가로연결숲 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,000	7,937	10,186	1,877
지 방 채	10,000	7,437	2,410	153	-
국 비
시 도 비	6,000	500	3,776	1,724	-
시군구비	4,000		4.000		-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 12. ~ 2020. 11.

○ 공사 계약 및 준공(총괄분)   : 2021. 4. ~ 2022. 12.

○ 공사 계약 및 착공(추가분)   : 2023. 1. ~ 2023. 12.

□ 향후계획

○ 공사 준공(추가분) : 2023. 11월 중

10-3. 민간투자사업

우리 나주시에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

		2022년 지방자치단체 재정공시 편람

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	해 당 없 음
BTO