		2021년 지방자치단체 재정공시 편람

		2022년 지방자치단체 재정공시 편람

119

특수공시

나주시에서 ‘22년에 추진한 특수공시(주민관심사항) 사업은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	총사업비	비 고
	계	10건	232,177
1	평산 재해위험지구 개선사업	펌프장(Q=1,560㎥/분) 유수지(V=32,000㎥) 증설	28,210	안전 재난과
2	우수저류시설(삼영1) 설치사업	우수저류시설 1개소 (A=3,500㎡, V=14,700㎥)	15,000	안전 재난과
3	월산 소하천 정비사업	하천정비 L=1.68km, 교량 6개소	12,574	안전 재난과
4	나주천 생태하천 복원사업	생태하천 L= 3.36km, 펌프장・유수지 증설, 교량13개소 차집관로 정비 3km	27,722	안전 재난과
5	남평읍 하수도 중점관리지역 도시침수대응사업	우수관로 5.5km, 펌프장증설 380톤/분	25,887	상하 수도과
6	봉황 농어촌도로 204호선 확포장 공사	도로 확·포장 L=1.6km, B=8.0m	4,000	건설과
7	반남 농어촌도로 201호선 확포장 공사	도로 확·포장 L=0.9km, B=8.0~9.0m	4,000	건설과
8	빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립	연면적 약 4,639㎡, 지하1층, 지상2층	20,084	미래 전략과
9	에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립	부지 13,264.3㎡, 연면적 11,387㎡, 지상4층	26,700	일자리 경제과
10	광주전남 공동혁신도시 복합혁신센터 건립	부지 8,832.4㎡, 지하1층/지상5층, 연면적 21,000㎡	68,000	체육 진흥과

1		평산 자연재해위험개선지구 정비사업

* 담당자 : 안전재난과장(최준석, 339-7270), 자연재난팀장(노대광, 339-7281)

	사업목적
❍ 집중호우 시 지석천 홍수위 상승으로 내수 자연배수가 곤란하고 기존 펌프장의 용량이 부족하여 상습적인 농경지 및 주택 침수가 발생하고 있는 실정으로 자연재해로부터 소중한 시민의 생명과 재산을 보호하고자 배수펌프장 증설사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 남평읍 평산리 1338번지 일원

❍ 사업내용 : 펌프장 증설 및 유입수로 정비

❍ 사 업 량 : 펌프장(Q=1,560㎥/분) 및 유수지(V=32,000㎥) 증설

배수로정비(1.0×1.0~2.5×1.5) L=1.21km

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.

❍ 사 업 비 : 28,210백만원[국비 14,105(50%), 도비 920(5%), 시비 13,185(45%)]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‵23년	‵24년	‵25년 이후
28,210	7,590	6,881	8,410	5,329

□ 추진상황

❍ 재해(침수)위험지구 지정 / “가”등급(면적 981,500㎡)    : 2015.  5.

❍ 실시설계 용역 착수(완료: 20223. 6. 20.)               : 2020.  4.

❍ 1차분 공사 착공(준공: 2022. 6. 13.)                  : 2022. 10.

❍ 2차분 공사 착공                                 : 2022.  4.

❍ 현재 공정율: 31%(펌프장 벽체)

□ 기대효과

❍ 배수펌프장 신설 및 유수지 신설 등으로 농경지 및 주택 침수피해 예방(수혜면적: 76.19ha, 수혜인구 77명)

□ 관련사진(위치도 등)

2		우수저류시설(삼영1) 설치사업

* 담당자 : 안전재난과장(최준석, 339-7270), 자연재난팀장(노대광, 339-7281)

	사업목적
❍ 집중호우 시 우수를 일시적으로 지하에 저류시켜 우수 유출량을 조절상습적인 주택 및 침수를 예방하는 등 자연재해로부터 소중한 시민의 생명과 재산을 보호하고자 우수저류시설 설치사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 삼영동 675-2번지 일원

❍ 사업내용 : 우수저류시설 설치

❍ 사 업 량 : 우수저류시설 1개소(A=3,500㎡, V=14,700㎥)

❍ 사업기간 : 2022. 4. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 15,000백만원[국비 7,500(50%), 시비 7,500(50%)]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‵23년	‵24년	‵25년 이후
15,000	8,026	6,974	-	-

□ 추진상황

❍ 재해(침수)위험지구 지정 / “가”등급(면적 46,000㎡)  : 2015.  6.

❍ 실시설계 용역 착수(완료: 2022. 4. 7.)         : 2020.  4.

❍ 1차분 공사 착공(준공: 2023. 6. 20.)           : 2022.  4.

❍ 2차분 공사 착공(준공: 2023. 6. 20.)           : 2022.  5.

❍ 3차분 공사 착공                           : 2023. 3.

❍ 현재 공정율: 52%(저류조 기초)

□ 기대효과

❍ 우수저류시설 및 관로 확장 등으로 주택 및 도로 침수피해 예방

(수혜면적: 14.74ha, 수혜인구 216명)

□ 관련사진(위치도 등)

3		월산소하천 정비공사(소하천 정비사업)

* 담당자 : 안전재난과장(최준석, 339- 7867), 하천정비팀장(옥성관, 339-7861)

	사업목적
❍ 최근 기후 변화로 나주시 관내에 국지성 호우가 빈번히 발생하여, 월산소하천 하상내 토사 적치 및 제방 법면 유실 등 피해가 발생하고 있으므로, 하천 제방 축제와 구조물 설치를 통해 지역주민의 안정된 생활과 지역의 발전을 도모하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금천면 월산리 912번지 일원(빛가람동 남측)

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=1.68km, 교량 6개소

- 흙깍기 31,746㎥, 흙쌓기 30,405㎥, 거적덮기 11,503㎡, 호안블럭 20,307㎡, 식생매트 1,942㎡

- 배수통관 27개소, 둑마루포장 16,545㎡, 폐기물 5,987ton

❍ 사 업 비 : 12,574백만원(시비 12,574)

- 공사비: 10,759백만원(도급액 3,072, 관급자재 2,896, 폐기물처리비 195, 감리비 654, 보상비 3,942)

❍ 공사기간 : 2020. 1. 6. ~ 2023. 12. 16.

❍ 도급업체: 청해종합건설(주) / 공정율 92%

❍ 건설사업관리용역: 수성엔㈜지니어링 외1개사

❍ 연도별 예산 계획

(단위 : 천원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	비고 (잔여사업비)
합 계	12,574,000	320,000	884,000	3,480,000	3,000,000	1,901,500	750,000	2,238,500
국 비	6,287,000	160,000	442,000	1,740,000	1,500,000	950,750	375,000	1,119,250
시 비	6,287,000	160,000	442,000	1,740,000	1,500,000	950,750	375,000	1,119,250

※ 공사 준공까지 필요사업비 750백만원(본예산 요구)

□ 추진상황

❍ 실시설계용역 착수                               : 2018.  3.

❍ 사전설계심의 완료(행안부)                        : 2019.  8.

❍ 계약심사 완료(전남도)                            : 2019. 11.

❍ 공사 착공                                       : 2020.  1.

❍ 1차분 준공                                      : 2021.  4.

❍ 2차분 준공                                       : 2022.  9.

❍ 3차분 준공                                       : 2023.  6.

□ 기대효과

❍ 월산소하천 제방 축제와 확폭을 통해 우수기에 집중호우로 인한 재해발생률을 낮춰 주민들의 안정된 생활환경을 조성하며, 둑마루에 콘크리트 포장함으로써 주민들의 편익 및 영농활동 증진에 기여함

□ 관련사진(위치도 등)

월산천 위치도(금천면 월산리, 빛가람동 남측방면)

영산천

빛가람 혁신도시

월산소하천

L=1.68㎞

계획평면도

중,상류부

하류부

4		나주천 생태하천 복원사업

* 담당자 : 안전재난과장(최준석), 하천정비팀장(옥성관, 339-7861)

	사업목적
원도심을 관통하는 지방하천 나주천을 정비하여 홍수 예방 등 치수적 안정성을 도모하고 자연과 사람이 공존하는 명품 생태공원 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 경현동 ~ 삼도동(영산강 합류부) 일원

❍ 사 업 비 : 277억원(도비50%, 시비50%) / 생태하천 복원 등 3개 사업

❍ 사업내용 : 생태하천 L= 3.06km, 펌프장・유수지 증설, 교량 13개소

차집관로 정비 3km

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2025년

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘23년	‘24년	‘24년 이후
27,722	10,800	6,000	6,000	4,922

□ 추진상황

❍ 문화재현상변경 심의 완료                           : 2020.  3.

❍ 건설기술심의 완료(道),행안부                           : 2021. 12.

❍ 조달 원가심사 및 계약요청                           : 2022.  5.

❍ 원가심사 완료 및 입찰공고                          : 2022.  9.

❍ 공사 착공                                          : 2022. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 나주천 하류부(동점문 인근) 구간 정비 완료             : 2023. 12.

❍ 공사 준공                                            : 2025. 11.

▢ 참고자료 – 위치도

5		남평읍 하수도 중점관리지역 도시침수대응 사업

* 담당자 : 상하수도과장(박덕진), 하수시설팀장(박성용, 339-7671)

	사업목적
❍ 남평읍 일원의 침수피해 예방 ❍ 집중호우 시 상습침수 지역 피해 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 남평읍 남평리, 동사리 일원

❍ 사업내용 : 남평읍 하수도 중점관리지역 도시침수대응 사업

❍ 사 업 량 : 우수관로 5.5km, 펌프장증설 380톤/분

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 1.

❍ 사 업 비 : 25,887,000천원(국 18,121,000, 시 7,766,000)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
25,887	9,348	2,850	2,731	10,958

□ 추진상황

❍ 중점관리지역 지정 및 하수도정비대책 승인	: 2016. 12.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수(‘19. 12. 완료)	: 2017.  3.

❍ 공공하수도 설치인가(전라남도)	: 2019. 10.

❍ 공사 총괄 착공	: 2019. 12.

❍ 공사 차수분 준공(1~4차)	: 2022. 12.

❍ 공사 차수분 착공(5차)	: 2023.  3.

□ 기대효과

❍ 우수를 신속히 배제하여 도시침수 방지효과 및 쾌적한 생활환경조성

❍ 침수예방사업지역 내 수변공간 활용으로 토지의 부가가치 증대

❍ 하수관로 정비사업 등으로 공공수역의 수질 개선

□ 관련사진(위치도 등)

계획평면도

6		봉황 농어촌공사 204호선 확포장 공사

* 담당자 : 건설과장(이재관, 339-8880), 토목팀장(임창호, 339-8891)

	사업목적
❍ 봉황면 욱곡리 일원 도로 확포장을 통한 효율적인 도로교통 처리 대책 마련 및 주민 교통 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 봉황면 욱곡리 1042-23 ~ 욱곡리 171-8

❍ 사업내용 : 농어촌도로 확·포장

❍ 사 업 량 : L=1.6km, B=8.0m

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 40억원(특교8, 도비5, 시비27)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
4,000	2,600	-	700	700

□ 추진상황

❍ 총괄 및 1차분 공사 착공	: 2020.  3.

❍ 1차분 공사 준공	: 2020.  7.

❍ 2차분 공사 착공(‘20. 12. 준공)	: 2020.  8.

❍ 3차분 공사 착공(‘21. 12. 준공)	: 2020. 11.

❍ 4차분 공사 착공	: 2022.  4.

□ 기대효과

❍ 기반시설 확충으로 지역 농업생산성 향상 및 주민생활편익 증진

❍ 마을간 연결 도로 확충을 통한 도로 통행 환경 개선

□ 관련사진(위치도 등)

7		반남 농어촌도로 201호선 확포장 공사

* 담당자 : 건설과장(이재관, 339-8880), 토목팀장(임창호, 339-8891)

	사업목적
❍ 반남면 대안리 일원 도로 확포장을 통한 효율적인 도로교통 처리 대책 마련 및 주민 교통 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 반남면 대안리 704-2 ~ 대안리 194-6

❍ 사업내용 : 농어촌도로 확·포장

❍ 사 업 량 : L=0.9km, B=8.0~9.0m

❍ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 40억원(특교7, 시비33)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
4,000	-	1,100	807	500

□ 추진상황

❍ 실시설계용역 착수(‘21. 5. 준공)	: 2020.  4.

❍ 총괄 및 1차분 공사 착공(‘21. 12. 준공)	: 2021.  3.

❍ 2차분 공사 착공(‘22. 3. 준공)	: 2021. 10.

❍ 3차분 공사 착공(‘22. 8. 준공)	: 2022.  3.

❍ 4차분 공사 착공(‘23. 4. 준공)	: 2022. 10.

□ 기대효과

❍ 기반시설 확충으로 지역 농업생산성 향상 및 주민생활편익 증진

❍ 마을간 연결 도로 확충을 통한 도로 통행 환경 개선

□ 사업 위치도

□ 계획평면도

8		빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립사업

* 담당자 : 미래전략과장(정태진), 2차공공기관이전팀장(김승훈, 339-7851)

	사업목적
❍ 빛가람 혁신도시 정주여건 개선을 위해, 어린이와 가족을 위한 맞춤형 복합시설 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 빛가람동 383번지

❍ 사업규모 : 연면적 약 4,639.34㎡, 지하1층 ~ 지상2층

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2025. 1.

❍ 사 업 비 : 201억원[국비79, 시비122] * 행안부(45억), 문체부(33.5억), 보건복지부(0.5억)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년 이후
20,084	-	3,203	9,480	3,101	4,300

□ 추진상황

❍ 주민의견수렵(선호도조사, 설문조사)	: 2020. 1.

❍ 지역사회활성화 기반조성 사업계획서 제출            : 2020. 10.

❍ 전라남도 지방재정 투자심사(조건부: 2단계심사)	: 2020. 11.

❍ 공공건축 기획용역 시행(2021. 12. 완료)	: 2020. 12.

❍ 공공건축 사업계획 사전검토(건축공간연구원)	: 2021. 3.

❍ 국유지 매입 불가로 사업부지 변경 계획 수립          : 2021. 9.

❍ 사업대상지 변경에 따른 주민설명회 개최              : 2021. 9.

❍ 도시관리계획 변경 용역 착수(용역 중지 중)                   : 2021. 10.

❍ 나주시 공공건축 심의위원회 심의 완료              : 2021. 11.

❍ 전라남도 기본 및 실시설계용역 계약심사 완료        : 2021. 11.

❍ 생활SOC복합센터 건립 추진협의체 구성 및 1차 회의   : 2022. 1.~2.

❍ 공유재산 관리계획 수립(회계과, 나주시의회)               : 2022. 2.

❍ 생활SOC복합센터 건립 건축 설계공모               : 2022. 2. ~4.

❍ 사업추진 설명 1차(빛가람동 주민자치회)	: 2022. 3.

❍ 당선작 선정, 기본 및 실시설계 용역 착수             : 2022. 4.

❍ 설계공모 결과 설명 2차(빛가람동 주민자치회)	: 2022. 4.

❍ 설계 진행사항 설명 3차(빛가람동 주민자치회)	: 2022. 6.

❍ 설계의 경제성 등 검토(VE)용역 시행                 : 2022. 7.

❍ 설계의 경제성 등 검토(VE)용역 워크숍               : 2022. 8.

❍ 사업추진 점검 회의, 건립추진협의체 회의(2차)          : 2022. 8.

* 도서관 규모 확장(3층) 필요성 제기

❍ 생활SOC복합센터 건립 주민설명회(LH2단지 주민대상)	: 2022. 9.

❍ 설계용역 보완(3층 증축 대비 2층 설계 구조보강 등)               : 2022.10.

❍ VE 제안내용 검토회의(최종)                                 : 2022. 11.

❍ 나주시 공공건축물 경관심의(조건부 의결)                : 2022. 11.

❍ BF 예비인증 완료                                     : 2022. 12.

❍ 신재생에너지 설치계획서 제출, 녹색건축물 예비인증신청   : 2023. 1.

❍ 국유지 매입 지방재정투자심사(적정)	: 2023. 4.

❍ 공사 시행계획 수립 및 전기·통신·소방공사 발주        : 2023. 5.

❍ 전기·통신·소방 공사 시공자 선정, 공사계약 체         : 2023. 6.

❍ 건설사업관리용역 계약심사 완료(전남도)	: 2023. 6.

❍ 기본 및 실시설계 용역 완료                            : 2023. 7.

□ 향후계획

❍ 건설사업관리 용역 및 공사 착수	: 2023. 9.

❍ 빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 공사 준공             : 2025. 1.

□ 위 치 도

9		에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립

* 담당자 : 일자리경제과장(문혜인, 339-8290), 투자유치팀장(권현웅, 339-8301)

	사업목적
❍ 혁신산단 내 공공부문 지산센터를 건립하여 ICT기업에 저렴한 업무공간을 제공하고 기업의 혁신 및 성장역량을 제고할 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 혁신산단 내(왕곡면 덕산리 817-8, 9)

❍ 사업내용 : 기업 입주공간(33개), 회의실, 체력단련실, 휴게실, 지원시설 마련

❍ 사업규모 : 부지 13,264.3㎡, 연면적 11,387㎡, 지상4층

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 10.

❍ 사 업 비 : 26,700백만원(국비 16,000, 도비 4,000, 시비 6,200, 특교 500)

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
19,798	2,842	1,663	8,882	6,411

□ 추진상황

❍ 제6차 지식산업센터 건립사업 선정               : 2018. 12.

❍ 지식산업센터 건립 부지 매입                    : 2020. 1.

❍ 조달청 공사원가 사전심사                       : 2021. 6.

❍ 건설사업관리용역 PQ평가, 건축공사 계약          : 2021. 12.

❍ 건설사업관리용역 착수, 건축공사 1차분 착공	: 2022. 2.

❍ 전기, 통신, 소방공사 계약 및 착공	: 2022. 5.

❍ 건축공사 1차분 준공 및 2차분 계약	: 2023. 1.

□ 기대효과

❍ 에너지-ICT 기업에 저렴한 업무공간을 공급하여 기업 성장역량 제고

□ 관련사진

10		광주전남 공동혁신도시 복합혁신센터 건립

* 담당자 : 체육진흥과장(노부기, 339-4500), 체육시설관리팀장(김훈모, 339-4521)

	사업목적
❍ 정주 인프라 및 기업지원 시설 확충과 발전재단 설립지원으로 혁신도시 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 나주시 빛가람동 199번지

❍ 사업규모 : 부지 8,832.4㎡, 지하1/지상5층, 연면적 21,000㎡

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년

❍ 사 업 비 : 680억원[국비 190, 광역 100(도비 50, 광주 50), 시비 390]

【연도별 사업비 투자 현황 (단위 : 백만원)】
합 계	기투자	‘21년	‘22년	‘23년 이후
68,000	13,185	6,100	16,200	32,515

□ 추진상황

❍ 타당성조사 완료	: 2019. 7.

❍ 지방재정 투자심사 통과	: 2019. 11.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2021. 5.

❍ 감독권한대행 등 건설사업관리용역 착수    : 2021. 6.

❍ 중앙투자심사 2단계 완료	: 2021. 10.

❍ 설계안전성 검토(국토안전관리원) 완료      : 2022.  1.

❍ 건축허가 완료	: 2022.  9.

❍ 조달계약 요청(건축공사)	: 2022. 10.

❍ 공사 착공 및 준공(*공사기간 26개월)	: 2023.  3. ~ 2023. 5.

□ 기대효과

❍ 문화·체육·교육 등 복합문화공간 조성을 통한 시민의 삶의 질 향상

❍ 혁신도시 발전재단의 사무공간 마련을 통한 혁신도시 시즌2의 발판 마련

□ 관련사진(위치도 등)

위  치  도

조  감  도